Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-8098/2017

25 января 2018 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 18.01.2018

Решение изготовлено в полном объеме 25.01.2018

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Пименовой В.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Квантум" (ИНН 1435236645, ОГРН 1111435000093) к государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ИНН 1435133520, ОГРН 1031402044145) о взыскании 11 917 214,73 руб. основного долга, 555 453,91 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами,

по встречному исковому заявлению государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Квантум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 838 737,03 руб. задолженности за давальческие материалы,

при участии в заседании:

от ООО «Квантум»: ФИО2 – по доверенности от 01.10.2017,

от ГУП «ЖКХ РС (Я)»: ФИО3 – по доверенности от 26.12.2017 №576,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Квантум" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд с иском к государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 23 482 668,64 руб. основного долга, 558 652,78 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором указывает на частичную оплату по акту взаимозачета №ЯДСО000019 от 25.05.2017 на сумму 686 599,23 руб.

11.12.2017 от ответчика поступило встречное исковое заявление, в котором ГУП «ЖКХ РС (Я)» просит взыскать с ООО «Квантум» долг за давальческие материалы в размере 838 737,03 руб.

10.01.2018 через систему подачи документов «Мой арбитр» от ООО «Квантум» поступило заявление об уточнении исковых требований, в соответствии с которым ООО «Квантум» (с учетом данных в судебном заседании пояснений представителя истца) просит взыскать с ГУП «ЖКХ РС (Я)» всего 12 200 717,600 руб., из них: основного долга – 11 917 214,73 руб., 283 502,87 руб. процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

11.01.2018 от ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступило ходатайство о приобщении документов к материалам дела.

Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству представителя ООО «Квантум» объявлен перерыв до 18.01.2018 16 час. 10 мин. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети «Интернет». После перерыва судебное заседание продолжено при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле.

После перерыва от ООО «Квантум» поступило заявление об увеличении исковых требований. В своем заявлении истец по первоначальному иску, ссылаясь на статью 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит взыскать 11 917 214,73 руб. основного долга, 555 453,91 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Представитель ГУП «ЖКХ РС (Я)» пояснил, что с заявлением об увеличении исковых требований ознакомлен.

Уточнение судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика по первоначальному иску сообщил об отсутствии возражений по первоначальному иску.

Представитель ООО «Квантум» признает долг по встречному иску.

Судом установлены обстоятельства дела.

22.04.2013 между ГУП «ЖКХ РС (Я)» (Заказчик) и ООО «Квантум» (Подрядчик) заключен договор №13644 на подрядные работы, по условиям которого Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству «Под ключ» объекта: «Строительство котельной «Школа-сад» в с.Батамай Кобяйского улуса», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с.Батамай.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость работ по договору составляет 35 300 200 руб., включает в себя резервную сумму на случай возникновения непредвиденных расходов, в размере 3% от стоимости договора, в том числе НДС.

Срок начала работ по договору исчисляется с момента двухстороннего подписания договора; окончание строительства объекта – 15.09.2013, с приемкой объекта по акту приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) (пункты 3.2-3.3 Договора).

Дополнительными соглашениями от 13.09.2013 №1, от 12.01.2015 №2, от 03.12.2015 №3, от 15.07.2016 №4, от 01.09.2016 №5, от 30.12.2016 №6 стороны внесли изменения в договор в части стоимости и окончания строительства объекта.

Согласно товарным накладным №90 от 31.12.2014, №ДСО0000048 от 27.06.2016, №ДСО00000056 от 30.06.2016, №ДСО0000074 от 31.08.2016, №ДСО0000073 от 30.08.2016, №ДСО0000082 от 30.09.2016, №ДСО0000088 от 01.10.2016, №ДСф000001 от 27.10.2016, №ДСО0000048 от 27.06.2016 для выполнения работ по Договору Подрядчику переданы материалы Заказчика на сумму 7 337 148,55 руб.

Согласно актам о приемке выполненных работ от 16.03.2015 №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, №15 и справке о стоимости работ и затрат от 16.03.2016 №2 работы выполнены Подрядчиком на сумму 20 224 424,76 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 18.07.2016 №4 и справке о стоимости работ и затрат от 18.07.2016 №4 работы выполнены Подрядчиком на сумму 2 242 380,57 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 23.11.2016 №7 и справке о стоимости работ и затрат от 23.11.2016 №7 работы выполнены Подрядчиком на сумму 2 484 538,64 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 29.12.2016 №8 и справке о стоимости работ и затрат от 29.12.2016 №8 работы выполнены Подрядчиком на сумму 1 192 415,06 руб.

Согласно актам о приемке выполненных работ от 31.12.2013 №1 и справке о стоимости работ и затрат от 31.12.2013 №3 работы выполнены Подрядчиком на сумму 12 451 978,78 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 12.10.2015 №1 и справке о стоимости работ и затрат от 12.10.2015 №3 работы выполнены Подрядчиком на сумму 1 192 415,06 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 15.09.2016 №5 и справке о стоимости работ и затрат от 15.09.2016 №5 работы выполнены Подрядчиком на сумму 2 412 413,28 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 15.10.2016 №6 и справке о стоимости работ и затрат от 15.10.2016 №6 работы выполнены Подрядчиком на сумму 5 235 879,74 руб.

Ответчиком произведена оплата задолженности платежными поручениями всего на сумму 57 870 007,25 руб.

Кроме того, Соглашениями о перераспределении средств №19611 от 30.03.2015, №19464 от 31.03.2015 стороны подтвердили согласие на перенаправление части платежей в размере 12 451 978,78 руб.

С учетом изложенного, задолженность Заказчика по договору на подрядные работы от 22.04.2013 №13644 составляет 4 274 149,94 руб.

30.12.2016 стороны подписали акт приемки законченного строительством объекта.

15.12.2015 между ГУП «ЖКХ РС (Я)» (Заказчик) и ООО «Квантум» (Подрядчик) заключен договор №22073 на подрядные работы, по условиям которого Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству «Под ключ» объекта: «Строительство производственной базы в п.Тикси Булунского улуса (гараж на 13 автомашин)», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Булунский улус, п.Тикси.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость работ по договору составляет 23 000 0000 руб., в том числе НДС 18% 3 508 474,57 руб.

Срок начала работ по договору исчисляется с момента двухстороннего подписания договора; окончание строительства объекта – 30.07.2016 (пункты 3.2-3.3 Договора).

Дополнительным соглашением № 1 к договору от 05.12.2016, стороны изменили срок окончания строительства объекта на 01.12.2017.

Согласно товарной накладной на отпуска материалов на сторону формы М-15 №113 от 16.12.2015 Подрядчику переданы материалы на сумму 862 713,07 руб.

Согласно актам о приемке выполненных работ №1 от 01.04.2016, №1 от 22.12.2016 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 01.04.2016  всего на сумму 8 570 040,62 руб.

Кроме того, согласно товарным накладным №1 от 12.05.2016 и №6 от 12.05.2016 Подрядчиком использован свой материал и который принят Заказчиком на сумму 505 121,55 руб.

Платежным поручением от 18.07.2016 №4507 Заказчиком произведена частичная оплата на сумму 500 000 руб.

16.06.2016 сторонами подписано Соглашение №24012 о взаимном погашении задолженности на сумму 3 443 818,06 руб.

02.12.2016 сторонами подписано Соглашение №25629 о взаимном погашении задолженности на сумму 98 500 руб.

30.12.2016 сторонами подписано Соглашение №26435 о взаимном погашении задолженности на сумму 449 962,64 руб.

С учетом изложенного, оплата по договору №22073 от 15.12.2015 на сумму 4 492 280,70 руб., задолженность по договору составляет 4 077 759,92 руб.

17.10.2014 между ГУП «ЖКХ РС (Я)» (Заказчик) и ООО «Квантум» (Подрядчик) заключен договор №18355 на подрядные работы, по условиям которого Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству «Под ключ» объекта: «Строительство тепловых сетей в с.Батамай Кобяйского улуса», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с.Батамай.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость работ по договору составляет 7 770 926,43 руб., в том числе НДС.

Срок начала работ по договору исчисляется с момента двухстороннего подписания договора; окончание строительства объекта – 30 дней с момента заключения договора (пункты 3.2-3.3 Договора).

Согласно акту о приемке выполненных работ №1 от 10.12.2015 и справке о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.12.2015 работы выполнены Подрядчиком на сумму 10 685 062,29 руб.

Платежными поручениями от 12.11.2014 №940, от 13.05.2016 №2894 Заказчиком произведена частичная оплата на сумму 10 570 902,28 руб.

С учетом изложенного, задолженность по договору №18355 от 17.10.2014 составляет 114 160,01 руб.

31.12.2015 между ГУП «ЖКХ РС (Я)» (Заказчик) и ООО «Квантум» (Подрядчик) заключен договор №22373 на подрядные работы, по условиям которого Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству «Под ключ» объекта: «Производственная база в п.Тикси Булунского улуса (котельная)», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Булунский улус, п.Тикси.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость работ по договору составляет 58 200 000 руб., в том числе НДС.

Дополнительным соглашением №1 от 20.05.2016 стоимость работ по договору увеличена до 59 440 280,80 руб.

Срок начала работ по договору исчисляется с момента двухстороннего подписания договора; окончание строительства объекта – 01.09.2016 (пункты 3.2-3.3 Договора).

Согласно товарной накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15 №113 от 16.12.2015 на сумму 862 713,07 руб.

Согласно актам о приемке выполненных работ №1, №2 от 29.03.2016, №1, №3, №4 от 20.05.2016, №3 от 22.12.2016 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 01.04.2016, №1 от 20.05.2016, №3 от 22.12.2016 работы выполнены Подрядчиком на сумму 5 900 434,26 руб.

Платежным поручением от 06.09.2016 №6110 Заказчиком произведена частичная оплата на сумму 500 000 руб., произведен взаимозачёт от 01.04.2017 на сумму 171 456,36 руб.

С учетом изложенного, задолженность по договору №22373 от 31.12.2015 составляет 5 228 977,90 руб.

31.05.2017 ООО «Квантум» направило в адрес ГУП «ЖКХ РС (Я)» претензию об оплате 16 213 962,70 руб. Претензия вручена ГУП «ЖКХ РС (Я)» 01.06.2017 вход.№3824.

Согласно пунктам 1 и 2  статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Кодекса, применяются, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров.

В данном случае договор, заключенный между сторонами относится к договору строительного подряда, регулируемого § 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Из материалов дела следует, что в рамках договоров на подрядные работы от 22.04.2013 №13644, от 15.12.2015 №22073, от 17.10.2014 №18355, от 31.12.2015 №22373 Подрядчиком выполнены работы согласно актам о приемке выполненных работ, а также справкам о стоимости выполненных работ и затрат. Работы приняты Заказчиком без замечаний и возражений.

Ответчиком произведена частичная оплата задолженности согласно платежным поручениям.

Соглашениями от 16.06.2016 №24012, от 02.12.2016 №25629, от 30.12.2016 №26435 стороны зачли сумму 3 992 280,70 руб.

Актом взаимозачета от 25.05.2017 №ЯДСО000019 сторонами зачтена сумма 686 599,23 руб., и актом от 01.04.2017 на сумму 171 456,36 руб. 

Кроме того, стороны перенаправили платежи в счет расчетов по иным договорам на сумму 12 451 978,78 руб.

С учетом изложенного, задолженность по основному долгу составляет 11 917 214,73 руб., в том числе: по договору № 13644 от 22.04.2013 – 2 496 316,90 руб., по договору № 22073 от 15.12.2015 – 4 077 759,92 руб., по договору № 18355 от 17.10.2014 – 114 160,01 руб., по договору № 22 373 от 31.12.2015 – 5 228 977,90 руб.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В материалы дела ответчик доказательств оплаты задолженности в размере 11 917 214,73 руб. не представил. Данная сумма ответчиком не оспаривается.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении первоначального иска и взыскании с ответчика  11 917 214,73 руб.

ООО «Квантум» также просит суд взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2017 по 18.01.2018 в размере 555 453,91 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Принимая во внимание указанные выше нормы права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности является обоснованным.

Расчет судом проверен и признан верным.

При таких обстоятельствах, первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

По встречному исковому суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 745 ГК РФ обязанность по обеспечению строительства материалами несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной его части осуществляет заказчик.

Пунктами 1.3. Договоров работы выполняются из материалов Заказчика и Подрядчика. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком доля исполнения договора в соответствии с пунктами 4.1.27 Договора №13644, пункта 4.2.1 договоров №22373, №22073.

Согласно пункту 1 статьи 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 

по договору №22073 от 15.12.2015 товарной накладной на отпуска материалов на сторону формы М-15 №113 от 16.12.2015 Подрядчику переданы материалы на сумму 862 713,07 руб.; 

по договору №22373 от 31.12.2015 Подрядчику товарной накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15 №113 от 16.12.2015 на сумму 862 713,07 руб.;

по договору №13644 от 22.04.2013 товарными накладными №90 от 31.12.2014, №ДСО0000048 от 27.06.2016, №ДСО00000056 от 30.06.2016, №ДСО0000074 от 31.08.2016, №ДСО0000073 от 30.08.2016, №ДСО0000082 от 30.09.2016, №ДСО0000088 от 01.10.2016, №ДСф000001 от 27.10.2016, №ДСО0000048 от 27.06.2016 Подрядчику переданы материалы Заказчика на сумму 7 337 148,55 руб.

Накладные по форме М-15 содержит все реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а именно: наименование документа, дата составления документа, наименование экономического субъекта, составившего документ, содержание факта хозяйственной жизни, величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения, наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события, подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

В представленных истцом накладных на отпуск материалов на сторону указаны наименование документа, дата его составления, наименование поставщика и получателя, наименование товара и объем поставки, стоимость товара и размер налога на добавленную стоимость, накладные подписаны должностными лицами организаций, передавшей и получившей материалы, на них также присутствует оттиск печати организаций генподрядчика и субподрядчика.

Следовательно, такие накладные являются доказательством совершения Заказчиком поставки давальческого материала подрядчику и достаточным основанием для принятия ответчиком к учету материалов.

Между тем, материалы Заказчика использованы для строительства не в полном объеме, стоимость неизрасходованных материалов составила 838 737,03 руб., в том числе по договору №22073 от 15.12.2015 на сумму 42 227,76 руб., по договору №22373 от 31.12.2015 на сумму 103 019,57 руб., по договору №13644 от 22.04.2013 на сумму 693 489,70 руб.

Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Доказательств возврата давальческого материала на сумму 838 737,03 руб. материалы дела не содержат и не оспариваются ООО «Квантум».

С учетом изложенного суд считает обоснованным требование по встречному иску о возврате неиспользованного давальческого материала в размере 838 737,03 руб.

Истцу по первоначальному иску при предъявлении иска предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

При цене иска в размере 12 472 668,64 руб. размер государственной пошлины составляет 85 363 руб. 

При принятии встречного иска по ходатайству ГУП «ЖКХ РС (Я)» произведен зачет государственной пошлины на сумму 19 755 руб. При этом представлена справка на возврат государственной пошлины по делу №А58-6078/2017 от 12.10.2017 на сумму 21 915 руб. Разницу в размере 2 140 руб. суд учитывает при взыскании государственной пошлины по настоящему делу.

Таким образом, с ГУП «ЖКХ РС (Я)» в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 83 223 руб.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по делу подлежит взысканию с истца по первоначальному иску в пользу государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» в размере 19 775 руб.

В соответствии со статьей 170 АПК РФ в связи со встречным взысканием со сторон денежных средств в резолютивной части решения указана денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Квантум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 11 917 214,73 руб. основной долг, в том числе: по договору № 13644 от 22.04.2013 – 2 496 316,90 руб., по договору № 22073 от 15.12.2015 – 4 077 759,92 руб., по договору № 18355 от 17.10.2014 – 114 160,01 руб., по договору № 22 373 от 31.12.2015 – 5 228 977,90 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2017 по 18.01.2018 в размере 555 453,91 руб., всего 12 472 668,64 руб.

Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квантум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 838 737,03 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 775 руб., всего 858 512,03 руб.

В результате зачета первоначального и встречного иска взыскать с государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Квантум» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 11 614 156,61 руб.

Взыскать с государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 83 223 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

Судья

                                     В.С.Терских