АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-26536/2022

12 сентября 2023 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения оглашена 05 сентября  2023 года.

Полный текст решения изготовлен 12 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Бурганова Б.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СтандартНефтьСервис» (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Бурсервис» (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности, третье лицо ФИО2,

при участии в судебном заседании: 

от истца –  представителя ФИО3, по доверенности от 06.06.2023, 

от ответчика –  представителя ФИО4, по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось ООО «СтандартНефтьСервис» к ООО «Бурсервис» о взыскании задолженности по договорам подряда в сумме 35 061 119 руб. 38 коп. и расходов по пошлине.

Суд счел возможным привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований – к/у ОАО «Волгабурмаш» ФИО2

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истцом представлено заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит  взыскать в ответчика задолженности по договорам подряда в сумме 24 113 826 руб. 06 коп., расходов по пошлине.

Частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Соответствующие уточнения заявленных требований приняты арбитражным судом, поскольку они не противоречат закону и нарушают права других лиц.

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом.

Представитель ответчика в судебном заседании признал заявленные требования.

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседание, об объявленных перерывах в судебном заседании была так же размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на иск, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 16.02.2018 между ООО «СтандартНефтеСервис» (Исполнитель) и ООО «БУРСЕРВИС» (Заказчик) был заключен договор на субподряд № 2/18 на супервайзерские услуги при строительстве, реконструкции и ремонте скважин, в соответствии с п. 1.1. которого Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора осуществлять контроль за строительством, реконструкцией, и ремонтом скважин (услуги супервайзинга) на объектах заказчика в период с 16.02.2018 по 31.12.2018.

Согласно пункту 3.3. Договора оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течении 3 календарных дней после получения денежных средств от генерального заказчика, то есть не позднее 33 суток от даты выставления счетов-фактур отчётного периода.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения к договору № 2/18 от 01.02.2018  согласованный Сторонами, в порядке статьи 4 АПК РФ, срок ответа/исполнения требований либо претензии, составляет 5 (пять) дней со дня получения претензии. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащегося в претензии.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к договору № 2/18 от 01.02.2018, если иное не предусмотрено договором, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответ на претензию споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

Свои обязательства ООО «СтандартНефтеСервис» выполнило надлежащем образом и в полном объёме, что подтверждается актами сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) и счётами-фактурами.

Тем не менее, обязательства ООО «БУРСЕРВИС» в части оплаты выполненных работ до настоящего времени исполнены не в полном объёме, так по состоянию на текущую дату у ООО «БУРСЕРВИС» перед ООО «СтандартНефтеСервис» имеется задолженность по договору №2/18 от 16.02.2018  в размере 112 585, 25 рублей.

27.03.2018 между ООО «СтандартНефтеСервис» (Исполнитель) и ООО «БУРСЕРВИС» (Заказчик) был заключен договор №3/18 на оказание возмездных услуг по супервайзингу при текущем и капитальном ремонте скважин на условиях субподряда, в соответствии с пунктом 2.1. Договора которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по контролю и координации текущего и капитального ремонта скважин Заказчика (супервайзерские услуги), осуществляемого Подрядчиком по ТКРС, а Заказчик обязан оплатить оказанные ему слуги в сроки и в порядке, указанные в настоящем Договоре.

Согласно пункту 5.3. Договора оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течении 60 суток, но не ранее, чем через 30 календарных дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ (оказанных услуг) на основании счетов-фактур, выставляемых Подрядчиком, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, либо иным, не запрещённым законом способом. Обязательства по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения к договору № 3/18 от 27.03.2018  согласованный Сторонами, в порядке ст. 4 АПК РФ, срок ответа/исполнения требований либо претензии, составляет 5 (пять) дней со дня получения претензии. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащегося в претензии.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к договору № 3/18 от 27.03.2018  если иное не предусмотрено договором, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответ на претензию споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

Свои обязательства ООО «СтандартНефтеСервис» выполнило надлежащем образом и в полном объёме, что подтверждается актами сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) и счётами-фактурами.

Тем не менее, обязательства ООО «БУРСЕРВИС» в части оплаты выполненных работ до настоящего времени исполнены не в полном объёме, так по состоянию на текущую дату у ООО «БУРСЕРВИС» перед ООО «СтандартНефтеСервис» имеется задолженность по договору №3/18 от 27.03.2018  в размере 938 692 рублей.

01.08.2018 между ООО «СтандартНефтеСервис» (Исполнитель) и ООО «БУРСЕРВИС» (Заказчик) был заключен договор № 3/18 ТКРС на оказание услуг по супервайзингу, в соответствии с п. 1.1. которого Исполнитель обязуется в течении всего срока действия договора оказывать Заказчику собственными ресурсами услуги по контролю и координации текущего и капитального ремонта скважин Заказчика (супервайзерские услуги), осуществляемого подрядчиком по ТКРС. Заказчик обязуется оказанные услуги принять и оплачивать в сроки и в порядке, указанные в настоящем договоре.

Согласно пункту 3.2. Договора оплата по договору производится не ранее и не позднее 45-60 календарных дней на основании полного пакета оригиналов документов и при наличии оригинала счетов-фактур (с обязательным предоставлением копии доверенностей, подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счетах-фактурах).

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к договору № 3/18 ТКРС от 01.08.2018  согласованный Сторонами, в порядке ст. 4 АПК РФ, срок ответа/исполнения требований либо претензии, составляет 5 (пять) дней со дня получения претензии. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащегося в претензии.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения к договору № 3/18 ТКРС от 01.08.2018 если иное не предусмотрено договором, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответ на претензию споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

Свои обязательства ООО «СтандартНефтеСервис» выполнило надлежащем образом и в полном объёме, что подтверждается актами сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) и счётами-фактурами.

Тем не менее, обязательства ООО «БУРСЕРВИС» в части оплаты выполненных работ до настоящего времени исполнены не в полном объёме, так по состоянию на текущую дату у ООО «БУРСЕРВИС» перед ООО «СтандартНефтеСервис» имеется задолженность по договору №3/18 ТКРС от 01.08.2018  в размере 14 819 961,03 рублей.

28.08.2018 между ООО «СтандартНефтеСервис» (Исполнитель) и ООО «БУРСЕРВИС» (Заказчик) был заключен договор субподряда №4/18 ЗБС на оказание услуг супервайзинга при строительстве эксплуатационных и разведочных скважин / зарезке боковых стволов, в соответствии с п. 2.1. которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с техническим заданием (Приложение №3 к договору), по настоящему договору оказывать услуги супервайзинга при строительстве эксплуатационных и разведочных скважин/зарезке боковых стволов в соответствии с утверждённым рабочим проектом на строительство скважин, а Заказчик обязан оплатить ему услуги в сроки и в порядке, указанном в настоящем договоре.

Согласно пункту 5.1. Договора расчёт за фактически оказанные услуги производятся Заказчиком в течении 30 дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора) путём безналичного перечисления денежных средств по реквизитам получателя денежных средств на основании подписанного сторонами оригинала акта сдачи-приёмки оказанных услуг и оригинала счёта-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к договору №4/18 ЗБС от 28.08.2018 г. согласованный Сторонами, в порядке ст. 4 АПК РФ, срок ответа/исполнения требований либо претензии, составляет 5 (пять) дней со дня получения претензии. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащегося в претензии.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения к договору №4/18 ЗБС от 28.08.2018  Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде Саратовской области.

Свои обязательства ООО «СтандартНефтеСервис» выполнило надлежащем образом и в полном объёме, что подтверждается актами сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) и счётами-фактурами.

Тем не менее, обязательства ООО «БУРСЕРВИС» в части оплаты выполненных работ до настоящего времени исполнены не в полном объёме, так по состоянию на текущую дату у ООО «БУРСЕРВИС» перед ООО «СтандартНефтеСервис» имеется задолженность по договору №4/18 ЗБС от 28.08.2018  в размере 11 892 408, 50 рублей.

01.08.2019 между ООО «СтандартНефтеСервис» (Исполнитель) и ООО «БУРСЕРВИС» (Заказчик) был заключен договор №01-ХНТ на оказание супервайзерских услуг при строительстве и реконструкции, бурении (в т.ч. геологоразведочном), испытании поисково-разведочных скважин, зарезке боковых стволов и углублении скважин, в соответствии с п. 1.1. которого Исполнитель обязуется оказать супервайзерские услуги при строительстве и реконструкции, бурении ( в т.ч. геологоразведочном), испытании поисков- разведочных скважин, зарезке боковых стволов и углублении скважин в объёме и сроке, определённые в Наряде-заказе (ах), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Согласно пункту 5.5. Договора оплата за оказанные услуги производится заказчиком ежемесячно, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя (указанный в Договоре) в течении 30 календарных дней начиная с 1-го числа месяца следующего за отчётным, на основании, оригиналов документов оформленных надлежащем образом и подписанных сторонами.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения к договору №01-ХНТ от 01.08.2019  согласованный Сторонами, в порядке ст. 4 АПК РФ, срок ответа/исполнения требований либо претензии, составляет 5 (пять) дней со дня получения претензии. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащегося в претензии.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к договору №01-ХНТ от 01.08.2019  Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде Саратовской области.

Свои обязательства ООО «СтандартНефтеСервис» выполнило надлежащем образом и в полном объёме, что подтверждается актами сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) и счётами-фактурами.

Судебным приказом, выданным Арбитражным судом Саратовской области 15.04.2022  по делу №А57-8609/2022 с ООО «БУРСЕРВИС» в пользу ООО «СтандартНефтеСервис» в рамках указанного договора была взыскана задолженность в размере 472 526,4 рублей

Тем не менее, обязательства ООО «БУРСЕРВИС» в части оплаты выполненных работ до настоящего времени исполнены не в полном объёме, так по состоянию на текущую дату у ООО «БУРСЕРВИС» перед ООО «СтандартНефтеСервис» имеется задолженность по договору №01-ХНТ от 01.08.2019  в размере 7 297 472,6 рублей.

18.03.2022 ООО «СтандартНефтеСервис» в адрес ООО «БУРСЕРВИС» была направлена досудебная претензия с требованием о погашении образовавшейся задолженности, тем не менее признавая наличие долговых обязательств ООО «БУРСЕРВИС фактически денежные средства не выплатило.

В соответствии с положениями статей 702, 708, 709 и 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить работы надлежащего качества в согласованные сроки и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 ГК РФ).

Из встречного характера таких обязательств и положений пунктов 1 и 2 статьи 328 ГК РФ следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом (в том числе с соблюдением установленных сроков).

Основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику (статьи 702, 720, 746 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно статье 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Оформленный в таком порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ (пункт 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Таким образом, подписанный сторонами договора акт приемки выполненных работ без замечаний имеет юридическую силу, является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и порождает обязанность заказчика по оплате выполненных работ.

В подтверждение выполненных работ истец представил акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанные сторонами.

Подписанные ответчиком акты о выполненных работах свидетельствуют о выполнении истцом предусмотренных условиями договора обязательств и принятии последним этих работ без замечаний и возражений.

Как установлено судом при исследовании фактических обстоятельств дела, факты выполнения работ по вышеуказанному договору и их стоимость подтверждены представленными в материалы дела актами о выполненных работах, подписанными сторонами без возражений относительно объема, качества и стоимости выполненных работ; ответчиком не оспорены.

ООО «Бурсервис» в судебном заседании исковые требования признает.

Из принципа диспозитивности следует, что процессуальные отношения в арбитражном судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются, как правило, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношении?. Данный принцип подразумевает свободу распоряжения лицами, участвующими в деле, принадлежащими им процессуальными правами и средствами защиты.

Воспрепятствование свободному распоряжению участниками спора своими процессуальными правами должно происходить только в исключительных случаях.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно части 3 статьи 49 АПК РФ, ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Частью 3 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

В соответствии с частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

При таких обстоятельствах, с учетом представленных в материалы дела документов и позиций участников судебного разбирательства, требования ООО «СтандартНефтьСервис» к ООО «Бурсервис» о взыскании задолженности в размере 24 113 826 руб. 06 коп. подлежат удовлетворению. 

Доводы третьего лица не нашли документального подтверждения и надлежащего обоснования; опровергнуты позицией истца.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу частей 1, 2 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бурсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтандартНефтьСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договорам подряда в сумме 24 113 826 руб. 06 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 143 569 руб. В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СтандартНефтьСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 56 431 руб., уплаченную по платежному поручению № 2220 от 30.09.2022. Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                                 Б.Р. Бурганов