АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-5177/2020

11 марта 2021 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А., 

руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительная  компания-Бизнескапитал" выполнить обязательства по устранению выявленных дефектов  в период гарантийного срока по контракту следующим образом:  

по объекту автомобильная дорога по ул. Баженова в г. Калуге: произвести  проливку швов-стыков битумным вяжущим съездов с основным полотном;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Плеханова в  г. Калуге: произвести проливку шва-стыка битумным вяжущим в р-не 

<

...>  и в местах отбора кернов (

<

...>); укрепить бортовой камень на парковке в  р-не д. 116 (со стороны сквера ФИО1) путем бетонирования; восстановить плиточное  покрытие на тротуаре покрытия на тротуаре на пересечении с ул. Рылеева путем разбора  разрушенного участка, подсыпки основания, восстановления плиточного покрытия;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Кутузова до ул. Товарная  (исключая участок от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта) в г. Калуге: восстановить  плиточное покрытие на тротуаре вблизи бортового камня от ул. Кутузова до ул. Кирова;  восстановить дорожное полотно и бортовой камень в р-не 

<

...> путем  демонтажа разрушенного участка, укрепление бортового камня путем бетонирования,  асфальтирование разобранного участка;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Марата в г. Калуге: укрепить бортовой  камень в р-не 

<

...> путем бетонирования; восстановить бортовой камень в  р-не д. 4 (церковь); приведение крыши люка в р-не д. 7 (РосСтат) в нормативное  состояние путем разборки асфальтобетонного покрытия вокруг люка, поднятия уровня  люка в уровне верхнего дорожного покрытия с помощью КО 6, укладки  асфальтобетонного покрытия вокруг поднятого люка;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Никитина в г. Калуге: устранить  скопление ливневых вод в р-не д. 76; произвести проливку шва-стыка битумным вяжущим  в р-не 

<

...>, 

<

...>, д. 66/30, д. 39А, на въезде на автостоянку, пересечения с  ул. Восточный проезд, ул. М. Горького, ул. Ст. Разина, пер. Тульский; восстановить  асфальтобетонное покрытие в районе провала колодца в р-не 

<

...> (со стороны  завода), на пересечении с ул. М. Горького путем разборки асфальтобетонного покрытия  вокруг люков, поднятия уровня люков в уровень верхнего дорожного покрытия с  помощью КО 6, укладки асфальтобетонного покрытия вокруг поднятых люков;  восстановить асфальтобетонное покрытие между дорожным полотном и дождеприемной  решеткой в районе д. 25; произвести проливку шва-стыка битумным вяжущим в р-не  съезда на 1-й пер. Пестеля, на пересечении с ул. Ф. Энгельса;  

по объекту автомобильная дорога по пер. Колхозная в г. Калуге: укрепить бортовой  камень путем отсыпки почвой вдоль д. 5А по пер. Труда (вдоль забора автомойки), вдоль  д. 1;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Плеханова от ул. Пушкина до ул. Труда в  г. Калуге: восстановить плиточное покрытие на тротуаре на пересечении с  ул. Георгиевской по четной стороне, на пешеходном переходе в р-не д. 39/67, в р-не 

<

...> в р-не д. 31; произвести проливку шва-стыка битумным вяжущим на  съезде с ул. Достоевского и ул. Дзержинского (д. 1/46); шва- стыка при въезде на парковку  в р-не д. 38, шва-стыка с ул. Суворова, на съезде с ул. Пролетарской, пересечение с  ул. Георгиевской;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Пушкина в г. Калуге: восстановить  плиточное покрытие на тротуаре в р-не д. 19, в р-не д. 1/20; выровнять уровень плитки  при съезде к д. 19; уплотнить плитку в р-не д. 4Б путем разбора, уплотнения основания,  последующей укладки демонтированной плитки; восстановить асфальтобетонное  покрытие, примыкающее к бортовому камню в районе 

<

...> от  перекрестка с ул. Плеханова до остановочной площадки общественного транспорта  "ул. Баумана" путем разбора и укладки нового асфальтобетонного покрытия; произвести  разборку асфальтобетонного покрытия вокруг крьпшки колодца в р-не д. 65/17 по  ул. Академика Королева, выравнивание оголовка люка с последующим  асфальтированием;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Рылеева от ул. Суворова до ул. Труда в  г. Калуге: восстановить асфальтобетонного покрытия в местах отбора кернов; произвести  проливку швов-стыков съездов с основным полотном; выполнить устройство валика в  р-не д. 41 асфальтобетонной смесью; восстановить покрытие тротуара, примыкающего к  бортовым камням на пересечении с ул. Труда разбора, уплотнения основания,  последующей укладки демонтированной плитки; изменить уклон тротуарной плитки на  подходе к пешеходному переходу в р-не 

<

...> путем разбора ранее  уложенной плитки, выравнивания основания, повторной укладки тротуарной плитки;  произвести проливку швов-стыков битумным вяжущим на пересечении с  ул. Пролетарская и со стороны д. 5А (Д/С "Родничок");  

по объекту автомобильная дорога по ул. Пухова в г. Калуге: произвести проливку  шва-стыка битумным вяжущим в р-не д. 49, на шве-стыке с ул. Поле Свободы;  восстановить плиточное покрытие на тротуаре в районе д. 34 к. 1 разбора, уплотнения  основания, последующей укладки демонтированной плитки; восстановить  асфальтобетонного покрытие вблизи бортового камня на пересечении с ул. Чичерина, с  пер. Труда путем разбора и укладки нового асфальтобетонного покрытия; восстановить  бортовой камень в районе д. 48/24; восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре  в районе д. 30;  

по объекту автомобильная дорога по ул. Тульская в г. Калуге: произвести  мероприятия по ликвидации скопления дождевых вод в районе д. 74/45, на пересечении с  ул. Степана Разина, в районе д. 32, с ул. М. Горького (ведомость недоделок и дефектов);  произвести проливку швов-стыков битумным вяжущим съездов с основным полотном;  восстановить асфальтобетонное покрытие на месте демонтажа железнодорожного  переезда путем разбора асфальтобетонного покрытия, выравнивания основания, укладки  асфальтобетонного покрытия в месте разбора; восстановить асфальтобетонное покрытие в  месте просадки колодезного люка в р-не д. 70 путем разбора асфальтобетонного  покрытия, выравнивание оголовка люка с последующим асфальтированием; произвести  выравнивание бортового камня на пешеходном переходе в р-не д. 88/36, в р-не д. 74/75, в  р-не д. 189 стр. 5, в р-не д. 56 на пешеходном переходе, в р-не 2-го Тульского пер., в р-не  перекрестка с ул. Восточный проезд путем разбора асфальтобетонного покрытия вокруг  бортового камня, демонтажа завышенного бортового камня, монтажа бортового камня,  бетонирования, асфальтирования разрытого участка; восстановить асфальтобетонное  

покрытие на съездах на пересечении с ул. М. Горького, д. 11, пешеходный переход  ул. Тульской-2й Тульский проезд путем проливки швов-стыков битумным вяжущим;  восстановить плиточное покрытие на пешеходном переходе в р-не д. 9/2 по  ул. Луначарского; восстановить асфальтобетонное покрытие вокруг ливневой  канализации в р-не д. 16А путем разбора и укладки нового асфальтобетонного покрытия.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания-Бизнескапитал" в пользу муниципального казенного учреждения "Служба  единого заказа городского хозяйства" 6 000 руб. расходов на уплату государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.А. Пашкова