Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 06АП-368/2019

15 мая 2020 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2020 года.Полный текст  постановления изготовлен 15 мая 2020 года.

           Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе:

председательствующего Иноземцева И.В.

судей  Волковой М.О., Усенко Ж.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 В.

при участии  в заседании: в отсутствие представителей сторон 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 

на решение от  20.12.2018

по делу № А73-16457/2018

Арбитражного суда Хабаровского края

по иску публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к акционерному обществу «Технодизайн» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 14 031 742,72 руб. 

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ПАО «НК «Роснефть», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к акционерному обществу «Технодизайн» (далее – АО «Технодизайн», ответчик) с иском о взыскании 14 031 742, 72  руб., в том числе: неосновательное обогащение в рамках договора № ДТ12-43 от 06.03.2014 в сумме 10 831 634, 18  руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 200 108, 54  руб. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 20.12.2018 в удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с судебным актом, истец обратился в Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска. 

В обоснование ссылается на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, не соответствие выводов суда фактическим обстоятельства дела, неполное выяснение обстоятельств дела. 

При рассмотрении дела в апелляционном суде определением от 25.04.2019 по ходатайству ПАО «НК «Роснефть» по делу назначалась строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручалось экспертам автономной некоммерческой организации «Хабаровская лаборатория судебной и независимой экспертизы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее - АНО «ХЛСиНЭ») ФИО2 и ФИО3, производство по делу приостанавливалось. 

По окончании проведения экспертизы, предоставления заключения экспертов от 11.06.2018 № 208/3, исследования в заседании заключения экспертов, опроса экспертов, предоставления сторонами возражений по проведенному исследованию и выводов эксперта в части отсутствия выполнения работ, которые фактически были выполнены на объекте, апелляционный суд по ходатайству сторон определением от 17.10.2019 назначил проведение повторной судебной строительно-технической экспертизы, которая поручена обществу с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза и оценка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) эксперту ФИО4, производство по делу приостановлено.

14.01.2020 в Шестой арбитражный апелляционный суд поступило заключение эксперта от 10.01.2020 № 17-10-2019 в связи с чем, определением  от 21.01.2020 производство по делу возобновлено, дело назначено к слушанию на 11.02.2020 в 10 часов 40 минут.

11.02.2020 в судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, направили ходатайства об отложении рассмотрения дела для урегулирования спора мирным путём. 

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2020 судебное заседание отложено на 10.03.2020 в 15 часов 30 минут.

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 судебное заседание отложено на 16.04.2020 в  09 часов 00 минут.

16.04.2020 на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821, направленного на предотвращение угрозы распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  установления с 30.03.2020 по 30.04.2020 нерабочих дней, судебное заседание откладывалось на 14.05.2020 в 10 часов 20 минут.

До начала судебного заседания от сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения от 16.03.2020 в отсутствие представителей сторон.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проводилось в отсутствие сторон. 

Изучив материалы дела,  рассмотрев представленное мировое соглашение и ходатайства к нему, апелляционный суд приходит к следующему.

Изучив материалы дела,  рассмотрев представленное мировое соглашение и ходатайства к нему, апелляционный суд приходит к следующему.

Согласно части 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

В соответствии с частью 2 статьи 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

Мировое соглашение в соответствии со статьей 139 АПК РФ может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса по любому делу, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

В силу части 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Учитывая, что мировое соглашение, оформленное в письменном виде и подписанное АО «Технодизайн» в лице генерального директора ФИО5 и со стороны ПАО «НК «Роснефть» представителем по доверенности от 24.10.2018 № ИС-652/Д ФИО6, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции находит заявление об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению.

На основании пункта 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения истцу подлежат возврату из федерального бюджета 50 процентов уплаченной им государственной пошлины по иску и государственная пошлина по апелляционной жалобе.

Поскольку ПАО «НК «Роснефть» при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 93 159 руб. (платежные  поручения № 37763 от 22.05.2018., № 77803 от 19.09.2018), при подаче апелляционной  жалобы – 3 000 руб. (платежное   поручение № 4801 от 28.01.2019), то  из федерального бюджета подлежит возвращению государственная пошлина  по иску в размере  46 579,50 руб., государственная пошлина  по апелляционной жалобе  1 500 руб.

С учетом изложенного, а также условий заключенного мирового соглашения о размере возмещении судебных расходов по госпошлине от половины уплаченной, а также полной стоимости судебной экспертизы,   с АО «Технодизайн» в пользу  ПАО «НК «Роснефть» подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной  пошлины по иску  в размере 46 579,50 руб.,  по апелляционной жалобе  1 500 руб.,   расходы по оплате судебных экспертиз в размере 600 000 руб., оплаченных платежными поручениями № 30338 от 09.04.2019, № 80077  от 06.09.2019.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 109 АПК РФ  денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются по исполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда. 

 Судебный акт о перечислении  денежных средств эксперту (экспертному учреждению, организации) выносится по окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта (абзац второй пункта 26 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»).

Денежные средства для оплаты первоначальной экспертизы,  порученной    экспертам АНО «ХЛСиНЭ» внесены ПАО «НК «Роснефть» на депозитный счет Шестого арбитражного апелляционного в размере 300 000 руб. (платежное поручение № 30338 от 09.04.2019) были выплачены экспертному учреждению определением суда от 08.11.2019.

Внесенные ПАО «НК «Роснефть» на депозитный счет Шестого арбитражного апелляционного денежные средства в размере 300 000 руб. (платежное поручение № 80077 № 06.09.2019) на оплату повторной экспертизы, порученной ООО «Строительная экспертиза и оценка», подлежат выплате экспертному учреждению.

Кроме того, в рамках настоящего дела АО «Технодизайн» внесло на депозитный счет Шестого арбитражного апелляционного суда платежным поручением № 712 от 30.09.2019 денежные средства в размере 100 000  руб., которые не использованы в связи с чем, подлежат возврату плательщику.

Руководствуясь статьями 150, 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 16.03.2020 между акционерным обществом «Технодизайн» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на следующих условиях:

1. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании 10 831 634  (десять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек неосновательного обогащения по договору №ДТ 12-42 от 25.02.2014, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 200 108  (три миллиона двести тысяч сто восемь) рублей 54 копейки.

2. Стороны признают невыполненными работы, принятые актами выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.04.2014 и № 2 от 30.06.2014, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № 1 от 30.04.2014  и № 2 от 30.06.2014 по договору № ДТ 12-42 от 25.02.2014  на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Информационные сети КиА», расположенному на территорий ООО «РН-Комсомольский НПЗ» по адресу: 

<

...> заключенному между Истцом и Ответчиком, в согласованном сторонами объеме на сумму 10 742 728 (десять миллионов семьсот сорок две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей (Приложение № 1 к настоящему мировому соглашению).

3. Ответчик обязуется выполнить работы по договору № ДТ 12-42 от 25.02.2014, указанные в Приложении № 1 к настоящему мировому соглашению, в соответствии с графиком по Приложению  №  2 к настоящему мировому соглашению.

4. Сдача - приемка работ, указанных в п. 3 настоящего мирового соглашения, оформляется подписанием актов по формам КС-2, КС-3 и выставлением счетов-фактур.

5. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в Приложении 2 к настоящему мировому соглашению, Ответчик оплачивает Истцу неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ, изложенных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.

6. Ответчик обязуется выплатить Истцу сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

7. Ответчик обязуется оплатить Истцу половину расходов по оплате государственной пошлины, понесенных Истцом:

при подаче искового заявления по настоящему делу, в размере 46 795 (сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек.

при подаче, апелляционной жалобы по настоящему делу, в размере 1 500 (тысяча пятьсот) рублей  00 копеек.

Вторая половина расходов по оплате государственной пошлины понесенных Истцом:

при подаче искового заявления по настоящему делу, в размере 46 795 (сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек.

при подаче, апелляционной жалобы по настоящему деду, в размере 1 500 (тысяча пятьсот) рублей 00 копеек  на основании пункта  3 части  1 статьи  333.40 Налогового кодекса  Российской Федерации  возвращается Истцу из федерального бюджета.

8. Ответчик обязуется оплатить Истцу судебные расходы по оплате судебных экспертиз, назначенных в суде апелляционной инстанции по делу №06АП-368/2019 в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей  00 копеек.

9. Судебные расходы по оплате услуг представителей, командировочные расходы, иные судебные расходы относятся на Стороны, которые их понесли.

10. Оплата, предусмотренная пунктами 6, 7 и 8 настоящего Мирового соглашения, в сумме 998 295  (девятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто пять) рублей 50 копеек производится Ответчиком в соответствии с графиком платежей:

     п/п

Срок оплаты

Сумма платежа

1

до 10 мая 2020 г.

43 404 руб.

2

до 10 июня 2020 г.

43 404 руб.

3

до 10 июля 2020 г.

43 404 руб.

4

до 10 августа 2020 г.

43 404 руб.

5

до 10 сентября 2020 г.

43 404 руб.

6

до 10 октября 2020 г.

43 404 руб.

7

до 10 ноября 2020 г.

43 404 руб.

8

до 10 декабря 2020 г.

43 404 руб.

9

до 10 января 2021 г.

43 404 руб.

10

до 10 февраля 2021 г.

43 404 руб.

11

до 10 марта 2021 г.

43 404 руб.

12

до 10 апреля 2021 г.

43 404 руб.

13

до 10 мая 2021 г.

43 404 руб.

14

до 10 июня 2021 г.

43 404 руб.

15

до 10 июля 2021 г.

43 404 руб.

16

до 10 августа 2021 г.

43 404 руб.

17

до 10 сентября 2021 г.

43 404 руб.

18

до 10 октября 2021 г.

43 404 руб.

19

до 10 ноября 2021 г.

43 404 руб.

20

до 10 декабря 2021 г.

43 404 руб.

21

до 10 января 2022 г.

43 404 руб.

22

до 10 февраля 2022 г.

43 404 руб.

23

до 10 марта 2022 г.

43 07,50 руб.

11. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи  142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное Ответчиком добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.

12. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

13. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

14. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

Приложение №1 к мировому соглашению по делу А73-16457/2018

Перечень

работ по объекту: "Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Информационные сети КиА"

№ п.

 

Сдано по актам

По экспертизе

Разница

 

Наименование работ

количество

цена за единицу, руб.

 стоимость, руб. 

количество

цена за единицу, руб.

 стоимость, руб. 

Количество

Цена за единицу, руб.

 Стоимость, руб. 

1

2

4

5

                                            6   

4

5

                                 6   

4

5

                                             6   

 

АПРЕЛЬ 2014 г.

 

 

Смета №50478 

 

                    1 551 909   

 

              173 718   

 

                             1 377 314   

1

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов: до 0,1 т

12

1308,71

                                433 477   

1,5

1308,71

                    54 185   

10,5

1308,71

                                394 892   

 

ОЗП

 

                                163 927   

 

                    20 492   

 

                                145 639   

 

ЭМ

 

                                  24 820   

 

                      3 105   

 

                                   21 715   

 

НР

 

                                133 041   

 

                    16 628   

 

                                126 473   

 

СП

 

                                111 689   

 

                    13 960   

 

                                101 065   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                539 071   

 

                    60 342   

 

                                491 087   

 

Канаты пеньковые пропитанные

0,0012

87 510,00   

                                         105   

0,0002

               87 510,00   

                               18   

0,001

   87 510,00   

                                           88   

 

Кислород технический: газообразный

23,4

                      45,34   

                                      1 061   

2,925

                      45,34   

                            133   

20,475

                    45,34   

                                        928   

 

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

0,0004

               22 140,00   

                                             9   

0

               22 140,00   

                                -     

0,0004

         22 140,00   

                                             9   

 

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0

0,0233

               30 625,09   

                                         714   

0,0029

               30 625,09   

                               89   

0,0204

          30 625,09   

                                        625   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э46

0,168

               43 340,00   

                                      7 281   

0,021

               43 340,00   

                            910   

0,147

          43 340,00   

                                     6 371   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

0,06

               42 710,00   

                                      2 563   

0,0075

               42 710,00   

                            320   

0,0525

          42 710,00   

                                     2 242   

 

Гвозди строительные

0,0001

               61 204,41   

                                             6   

0

               61 204,41   

                                -     

0,0001

          61 204,41   

                                             6   

 

Пропан-бутан, смесь техническая

7,08

                      39,14   

                                         277   

0,885

                      39,14   

                               35   

6,195

                    39,14   

                                        242   

 

Растворитель марки: Р-4

0,0072

               77 440,00   

                                         558   

0,0009

               77 440,00   

                               70   

0,0063

          77 440,00   

                                        488   

 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

0,0124

                 5 154,67   

                                           64   

0,0015

                 5 154,67   

                                 8   

0,0109

            5 154,67   

                                           56   

 

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

0,0037

               60 350,00   

                                         223   

0,0005

               60 350,00   

                               30   

0,0032

            60 350,00   

                                        193   

 

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

0,2244

                    390,56   

                                           88   

0,0281

                    390,56   

                               11   

0,1963

                  390,56   

                                           77   

 

Итого:

 

                                    12 948   

 

                      1 623   

 

                                   11 325   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                  16 102   

 

                      1 807   

 

                                   14 084   

2

Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны

12

               66 791,15   

                                  801 494   

1,5

               66 791,15   

                 100 187   

10,5

         66 791,15   

                                701 307   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                996 736   

 

                  111 569   

 

                                872 144   

 

 

 

 

 

 

Смета №50026

 

                                866 936   

 

                                -     

 

                       866 936   

3

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

9,36

1330,57

                                190 000   

0

1330,57

                                -     

9,36

1330,57

                                190 000   

 

ОЗП

 

                                  65 238   

 

                                -     

 

                                   65 238   

 

ЭМ

 

                                  29 947   

 

                                -     

 

                                   29 947   

 

НР

 

                                  58 827   

 

                                -     

 

                                   58 827   

 

СП

 

                                  35 988   

 

                                -     

 

                                   35 988   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                236 284   

 

                                -     

 

                                236 284   

 

Патроны для пристрелки

117

                      15,24   

                                      1 783   

0,00

                      15,24   

                                -     

117

                    15,24   

                                     1 783   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

64,02

                      43,42   

                                      2 780   

0,00

                      43,42   

                                -     

64,02

                    43,42   

                                     2 780   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

7,488

                      42,71   

                                         320   

0,00

                      42,71   

                                -     

7,488

                    42,71   

                                        320   

 

Дюбели для пристрелки стальные

117

                      10,00   

                                      1 170   

0,00

                      10,00   

                                -     

117

                    10,00   

                                     1 170   

 

Дюбели распорные полипропиленовые

3,744

                      76,08   

                                         285   

0,00

                      76,08   

                                -     

3,744

                    76,08   

                                        285   

 

Скоба У1078

103

                      13,68   

                                      1 409   

0,00

                      13,68   

                                -     

103

                    13,68   

                                     1 409   

 

Итого:

 

                                      7 747   

0,00

 

                                -     

 

                                     7 747   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                    9 634   

0,00

 

                                -     

 

                                     9 634   

4

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*100              ОЦИНКОВАННАЯ

450

                 1 055,55   

                                474 998   

0

                 1 055,55   

                                -     

450

            1 055,55   

                                474 998   

5

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ   СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ

36

                    677,08   

                                  24 375   

0

                    677,08   

                                -     

36

                    677,08   

                                   24 375   

 

Итого:

 

                                  499 372   

 

                                -     

 

                                499 372   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                621 018   

 

                                -     

 

                                621 018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета № 50042

 

                                693 403   

 

174 636 

 

                                517 886   

6

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

7,52

1330,57

                                152 625   

2,48

1330,57

                    50 341   

5,04

1330,57

                                   97 206   

 

ОЗП

 

                                  52 403   

 

                    17 287   

 

                                   30 038   

 

ЭМ

 

                                  24 055   

 

                      7 935   

 

                                   16 120   

 

НР

 

                                  47 257   

 

                    15 585   

 

                                   31 672   

 

СП

 

                                  28 910   

 

                      9 534   

 

                                   19 376   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                189 805   

 

                    62 289   

 

                                120 885   

 

Патроны для пристрелки

94

                      15,24   

                                      1 433   

 

                      15,24   

                                -     

94

                    15,24   

                                     1 433   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

51,44

                      43,42   

                                      2 234   

 

                      43,42   

                                -     

51,44

                    43,42   

                                     2 234   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

6,016

                      42,71   

                                         257   

 

                      42,71   

                                -     

6,016

                    42,71   

                                        257   

 

Дюбели для пристрелки стальные

94

                      10,54   

                                         991   

31

                      10,00   

                            310   

63

                    10,54   

                                        681   

 

Дюбели распорные полипропиленовые

3,008

                      76,08   

                                         229   

0,992

                      76,08   

                               75   

2,016

                    76,08   

                                        153   

 

Скоба У1078

82,72

                      13,68   

                                      1 132   

27,28

                      11,68   

                            319   

55,44

                    13,68   

                                        813   

 

Итого:

 

                                      6 274   

 

                            852   

 

                                     5 570   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                    7 803   

 

                      1 054   

 

                                     6 927   

7

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*100              ОЦИНКОВАННАЯ

370

    1 055,55   

                                390 554   

124

                    677,08   

                    83 958   

246

            1 055,55   

                                306 596   

8

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ   СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ

12

                  677,08   

                                    8 125   

4

                 1 055,55   

                      4 222   

8

                  677,08   

                                     7 069   

 

Итого:

 

                                  398 678   

 

                    88 180   

 

                                313 665   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                495 796   

 

                  109 109   

 

                                390 073   

 

 

 

 

 

 

Смета № 50023

 

                 5 821 289   

 

               2 470 736   

 

                             3 338 073   

                                       МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 

9

Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

63,6

827,35

                                633 654   

0

827,35

                                -     

63,6

827,35

                                803 384   

 

ОЗП

 

                                149 600   

 

                                -     

 

                                279 598   

 

ЭМ

 

                                216 449   

 

                                -     

 

                                216 449   

 

НР

 

                                166 032   

 

                                -     

 

                                186 064   

 

СП

 

                                101 573   

 

                                -     

 

                                121 273   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                788 011   

 

                                -     

 

                                999 087   

10

Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

0,1

1412,1

                                    1 375   

0

1412,1

                                -     

0,1

1412,1

                                     1 475   

 

ОЗП

 

                                        345   

 

                                -     

 

                                        445   

 

ЭМ

 

                                        422   

 

                                -     

 

                                        422   

 

НР

 

                                        377   

 

                                -     

 

                                        377   

 

СП

 

                                        231   

 

                                -     

 

                                        231   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                    1 710   

 

                                -     

 

                                     1 834   

11

КАБЕЛЬ ГЕРДА-КВнг  2*2*1,5с

1,44

             370 769,92   

                                533 909   

0

             370 769,92   

                                -     

1,44

370769,92

                                533 909   

12

КАБЕЛЬ ГЕРДА-КВнг  5*2*1,5с

0,48

             660 118,64   

                                316 857   

0

             660 118,64   

                                -     

0,48

660118,64

                                316 857   

13

КАБЕЛЬ КВВГЭнг 4*1,5с

0,9

               38 216,10   

                                  34 394   

0

               38 216,10   

                                -     

0,9

38216,1

                                   34 394   

14

КАБЕЛЬ КВВГЭнг 5*1,5с

0,48

               47 432,20   

                                  22 767   

0

               47 432,20   

                                -     

0,48

47432,2

                                   22 767   

15

КАБЕЛЬ КВВГЭнг 7*1,5с

0,55

               63 898,31   

                                  35 144   

0

               63 898,31   

                                -     

0,55

63898,31

                                   35 144   

16

КАБЕЛЬ КВВГЭнг 10*1,5с

0,5

               89 088,98   

                                  44 544   

0

               89 088,98   

                                -     

0,5

89088,98

                                   44 544   

17

КАБЕЛЬ КВВГЭнг 14*1,5с

0,55

             121 775,42   

                                  66 976   

0

             121 775,42   

                                -     

0,55

168347,46

                                   92 591   

18

КАБЕЛЬ КВВГЭнг 19*1,5с

0,5

             168 347,46   

                                  84 174   

0

             168 347,46   

                                -     

0,5

168347,46

                                   84 174   

19

КАБЕЛЬ КВВГЭнг- FRLS 10*1.5

0,48

             227 330,51   

                                109 119   

0

             227 330,51   

                                -     

0,48

227330,51

                                109 119   

20

КАБЕЛЬ КВВГнг 7*1,5

0,48

               63 898,31   

                                  30 671   

0

               63 898,31   

                                -     

0,48

63898,3

                                   30 671   

21

КАБЕЛЬ ВВГнг- LS 3*1.5

0,01

               22 425,85   

                                        224   

0

               22 425,85   

                                -     

0,01

22425,85

                                        224   

 

Итого:

 

                               1 278 780   

 

                                -     

 

                             1 304 395   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                            1 590 289   

 

                                -     

 

                             1 622 143   

22

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

36,92

1330,57

                                749 422   

24,78

1034,84

                    503 003   

12,14

1330,57

                                251 572   

 

ОЗП

 

                                257 315   

 

                    172 706   

 

                                   89 073   

 

ЭМ

 

                                118 116   

 

                       79 281   

 

                                   38 835   

 

НР

 

                                232 038   

 

                    155 740   

 

                                   76 987   

 

СП

 

                                141 953   

 

                       95 276   

 

                                   46 677   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                931 980   

 

                    622 390   

 

                                312 854   

 

Патроны для пристрелки

461,5

                      15,24   

                                      7 033   

309,8

                      15,24   

                         4 721   

151,7

                    15,24   

                                     2 312   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

252,5

                      43,42   

                                    10 964   

169,5

                      43,34   

                         7 346   

83

                    43,42   

                                     3 617   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

29,54

                      42,71   

                                      1 262   

19,82

                      42,71   

                            847   

9,72

                    42,71   

                                        415   

 

Дюбели для пристрелки стальные

461,5

10,54

                                    4 864   

277,5

                      10,54   

                         2 925   

184

                    10,54   

                                     1 939   

 

Скоба У1078

406,1

13,68

                                      5 555   

272,6

                      13,68   

                         3 729   

133,5

                    13,68   

                                     1 826   

 

Итого:

 

                                    53 449   

 

                       44 524   

 

                                   10 110   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                  66 469   

 

                       55 091   

 

                                   12 573   

23

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*100              ОЦИНКОВАННАЯ

1790

               1 055,55   

                     1 889 435   

1239

                 1 139,11   

              1 411 357   

551

            1 055,55   

                                274 353   

24

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*150  ОЦИНКОВАННАЯ

8

                 1 139,11   

                                    9 113   

0

                 1 139,11   

                                -     

8

            1 139,11   

                                     9 113   

25

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ   СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ

85

                    677,08   

                                  57 552   

56

                    677,08   

                       37 916   

85

                  677,08   

                                   19 635   

26

СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ  СТ100*100  ОЦИНКОВАННАЯ

10

                    915,47   

                                    9 155   

0

                    915,47   

                                -     

10

                  915,47   

                                     9 155   

27

СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ                  СПК 150*100*100    ОЦИНКОВАННАЯ

1

                 1 013,77   

                                    1 014   

0

                 1 013,77   

                                -     

1

            1 013,77   

                                     1 014   

 

Итого:

 

                     1 966 268   

 

               1 449 274   

 

                                313 270   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                     2 445 246   

 

               1 793 256   

 

                                389 581   

 

 

 

 

 

 

Смета № 50024

 

                                479 899   

 

                                -     

 

                                479 899   

22

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

5,15

1330,57

                                104 535   

0

1330,57

                                -     

5,15

1330,57

                                   99 059   

 

ОЗП

 

                                  35 893   

 

                                -     

 

                                   33 317   

 

ЭМ

 

                                  16 479   

 

                                -     

 

                                   16 979   

 

НР

 

                                  32 364   

 

                                -     

 

                                   29 364   

 

СП

 

                                  19 799   

 

                                -     

 

                                   19 399   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                130 000   

 

                                -     

 

                                123 189   

 

Патроны для пристрелки

64,38

                      15,24   

                                         981   

0

                      15,24   

                                -     

64,38

                    15,24   

                                        981   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

35,23

                      43,42   

                                      1 530   

0

                      43,34   

                                -     

35,23

                    43,42   

                                     1 530   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

4,12

                      42,71   

                                         176   

0

                      42,71   

                                -     

4,12

                    42,71   

                                        176   

 

Дюбели для пристрелки стальные

64,38

                      10,54   

                                         679   

0

                      10,54   

                                -     

64,38

                    10,54   

                                        679   

 

Дюбели распорные полипропиленовые

2,06

                      76,08   

                                         157   

0

                      76,08   

                                -     

2,06

                    76,08   

                                        157   

 

Скоба У1078

56,65

                      13,68   

                                         775   

0

                      13,68   

                                -     

56,65

                    13,68   

                                        775   

 

Итого:

 

                                      4 297   

 

                                -     

 

                                     4 297   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                    5 344   

 

                                -     

 

                                     5 344   

23

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*100              ОЦИНКОВАННАЯ

240

                 1 055,55   

                                253 332   

0

                 1 055,55   

                                -     

240

               1 055,55   

                                274 353   

25

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ   СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ

30

                    677,08   

                                  20 312   

0

                    915,47   

                                -     

30

                  677,08   

                                     6 990   

26

СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ  СТ100*100  ОЦИНКОВАННАЯ

5

                    915,47   

                                    4 577   

0

                    677,08   

                                -     

5

                  915,47   

                                     1 197   

 

Итого:

 

                                  278 222   

 

                                -     

 

                                282 540   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                345 996   

 

                                -     

 

                                351 366   

 

Смета № 50030

 

                                493 667   

 

                 615 766   

 

                                            -     

                                       Раздел 1. 

 

 

                                396 967   

 

                 497 650   

 

                                            -     

                                        МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                        

32

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

5,35

1330,57

                                108 625   

6,38

1330,57

                 129 505   

 

 

ОЗП

 

                                  37 298   

 

                     44 462   

 

 

ЭМ

 

                                  17 120   

 

                     20 413   

 

 

ЗПМ

 

                                    2 269   

 

                       2 713   

 

 

НР

 

                                  33 632   

 

                      40 099   

 

 

СП

 

                                  20 575   

 

                      24 531   

 

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                135 086   

 

                    160 243   

 

 

Патроны для пристрелки

66,88

                      15,24   

                                      1 019   

79,75

                      15,24   

                        1 215   

 

 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

36,59

                      43,42   

                                      1 589   

43,64

                      43,34   

                        1 891   

 

 

Болты с гайками и шайбами строительные

4,28

                      42,71   

                                         183   

5,104

                      42,71   

                            218   

 

 

Дюбели для пристрелки стальные

66,88

                      10,54   

                                         705   

79,75

                      10,54   

                            841   

 

 

Дюбели распорные полипропиленовые

2,14

                      76,08   

                                         163   

2,552

                      76,08   

                            194   

 

 

Скоба У1078

58,85

                      13,68   

                                         805   

70,18

                      13,68   

                            960   

 

 

Итого:

 

                                      4 464   

 

                        5 320   

 

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                    5 551   

 

                         6 582   

 

 

33

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*100              ОЦИНКОВАННАЯ

264

                 1 055,55   

                                278 665   

319

                 1 055,55   

                    336 720   

 

 

34

СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ  СТ100*100  ОЦИНКОВАННАЯ

2

                    915,47   

                                    1 831   

0

                    915,47   

                                -     

 

 

35

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ   СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ

5

                    677,08   

                                    3 385   

38

                    677,08   

                      25 729   

 

 

Итого:

 

                                  283 882   

 

                    362 449   

 

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                353 034   

 

                    448 476   

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета № 50034

 

                                756 267   

 

                    337 461   

 

                                417 101   

                                       МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 

36

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

8,12

1330,57

                                164 820   

3,58

1330,57

                      72 676   

4,54

1330,57

                                   92 139   

 

ОЗП

 

                                  56 595   

 

                      24 956   

 

                                   29 893   

 

ЭМ

 

                                  25 977   

 

                      11 452   

 

                                   16 479   

 

НР

 

                                  51 030   

 

                      22 502   

 

                                   25 878   

 

СП

 

                                  31 218   

 

                      13 766   

 

                                   19 889   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                204 970   

 

                       89 927   

 

                                114 584   

 

Патроны для пристрелки

101,5

                      15,24   

                                      1 547   

44,75

                      15,24   

                            682   

56,75

                    15,24   

                                        865   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

55,54

                      43,42   

                                      2 412   

24,49

                      43,34   

                         1 061   

31,05

                    43,42   

                                     1 350   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

6,496

                      42,71   

                                         277   

2,864

                      42,71   

                            122   

3,632

                    42,71   

                                        155   

 

Дюбели для пристрелки стальные

101,5

                      10,54   

                                      1 070   

44,75

                      10,54   

                            472   

56,75

                    10,54   

                                        598   

 

Дюбели распорные полипропиленовые

3,248

                      76,08   

                                         247   

1,432

                      76,08   

                            109   

1,816

                    76,08   

                                        138   

 

Скоба У1078

89,32

                      13,68   

                                      1 222   

39,38

                      13,68   

                            539   

49,94

                    13,68   

                                        683   

 

Итого:

 

                                      6 775   

 

                         2 985   

 

                                     3 790   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                    8 425   

 

                         3 694   

 

                                     4 713   

37

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*100              ОЦИНКОВАННАЯ

405

                 1 055,55   

                                427 498   

179

                 1 055,55   

                    188 943   

226

                 1 055,55   

                                238 554   

38

СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ  СТ100*100  ОЦИНКОВАННАЯ

1

                    915,47   

                                        915   

0

                    915,47   

                                -     

1

                    915,47   

                                        915   

 

Итого:

 

                                  436 538   

 

                    197 068   

 

                                239 470   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                542 878   

 

                    243 842   

 

                                297 804   

 

 

 

 

 

 

Смета № 50040

 

                                523 588   

 

                                -     

 

                                523 588   

                                       МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 

40

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2(0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)

5,65

1330,57

                                114 691   

0,00

1330,57

                                -     

5,65

1330,57

                                114 691   

 

ОЗП

 

                                  39 382   

 

                                -     

 

                                   39 382   

 

ЭМ

 

                                  18 079   

 

                                -     

 

                                   18 079   

 

НР

 

                                  35 508   

 

                                -     

 

                                   35 508   

 

СП

 

                                  21 722   

 

                                -     

 

                                   21 722   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                142 630   

 

                                -     

 

                                142 629   

 

Патроны для пристрелки

70,63

                      15,24   

                                      1 076   

0,00

                      15,24   

                                -     

70,63

                    15,24   

                                     1 076   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

38,65

                      43,42   

                                      1 678   

0,00

                      43,34   

                                -     

38,65

                    43,42   

                                     1 678   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

4,52

                      42,71   

                                         193   

0,00

                      42,71   

                                -     

4,52

                    42,71   

                                        193   

 

Дюбели для пристрелки стальные

70,63

                      10,54   

                                         744   

0,00

                      10,54   

                                -     

70,63

                    10,54   

                                        744   

 

Дюбели распорные полипропиленовые

2,26

                      76,08   

                                         172   

0,00

                      76,08   

                                -     

2,26

                    76,08   

                                        172   

 

Скоба У1078

62,15

                      13,68   

                                         850   

0,00

                      13,68   

                                -     

62,15

                    13,68   

                                        850   

 

Итого:

 

                                      4 714   

0,00

 

                                -     

 

                                     4 714   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                    5 863   

0,00

 

                                -     

 

                                     5 863   

41

СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ  СП100*100              ОЦИНКОВАННАЯ

275

1055,55

                                  290 276   

0,00

153,27

                                -     

275

1055,55

                                  290 276   

42

СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ  СТ100*100  ОЦИНКОВАННАЯ

5

915,47

                                      4 577   

0,00

119,69

                                -     

5

915,47

                                      4 577   

43

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ   СУ100*100 ОЦИНКОВАННАЯ

10

677,08

                                      6 771   

0,00

82,23

                                -     

10

677,08

                                      6 771   

 

Итого:

 

                                  301 624   

0,00

 

                                -     

 

                                301 624   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                375 099   

0,00

 

                                -     

 

                                375 099   

 

ИЮНЬ 2014 г.

 

 

Смета №50478 

 

                            4 684 067   

 

                 1 330 754   

 

                             3 221 382   

1

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов: до 0,1 т

32,475

1308,71

                            1 173 147   

10,3

1308,71

                    372 105   

22,175

1308,71

                                818 740   

 

ОЗП

 

                                443 646   

 

                    140 722   

 

                                313 646   

 

ЭМ

 

                                  67 183   

 

                       21 304   

 

                                   57 183   

 

НР

 

                                360 052   

 

                    114 204   

 

                                250 052   

 

СП

 

                                302 266   

 

                       95 875   

 

                                197 859   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                    1 458 923   

 

                    414 381   

 

                             1 018 183   

2

Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны(С 245 МАТ=1,07 к расх.)

0,252

78 813,56   

                                  19 861   

0

               78 813,56   

                                -     

0,252

          78 813,56   

                                   19 861   

3

Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны(Вст3сп МАТ=1,09 к расх.)

0,13

78 813,56   

                                  10 246   

0

               78 813,56   

                                -     

0,13

         78 813,56   

                                   10 246   

4

Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны

32,093

               78 813,56   

                            2 529 364   

10,3

               78 813,56   

                    811 780   

21,793

         78 813,56   

                             1 717 584   

 

Итого:

 

                               2 559 470   

0,00

 

                    811 780   

 

                             1 747 691   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                            3 182 952   

0,00

 

                 1 004 454   

 

                             2 173 424   

 

Канаты пеньковые пропитанные

0,0032

               87 510,00   

                                         280   

0,001

               87 505,04   

                               88   

0,0022

         87 510,00   

                                        193   

 

Кислород технический: газообразный

63,33

                      45,34   

                                      2 871   

20,09

                      45,34   

                            911   

43,24

                    45,34   

                                     1 961   

 

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

0,001

               22 140,00   

                                           22   

0,0003

               22 140,00   

                                -     

0,0007

         22 140,00   

                                           22   

 

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0

0,063

               30 625,09   

                                      1 929   

0,02

               30 625,09   

                            613   

0,043

         30 625,09   

                                     1 317   

 

Электроды диаметром: 4 мм Э46

0,4547

               43 340,00   

                                    19 707   

0,1442

               43 340,00   

                        6 250   

0,3105

          43 340,00   

                                   13 457   

 

Болты с гайками и шайбами строительные

0,1624

               42 710,00   

                                      6 936   

0,0515

               42 710,00   

                        2 200   

0,1109

          42 710,00   

                                     4 737   

 

Гвозди строительные

0,0003

               61 204,41   

                                           18   

0,0001

               61 204,41   

                                -     

0,0002

          61 204,41   

                                           18   

 

Пропан-бутан, смесь техническая

19,16

                      39,14   

                                         750   

6,077

                      39,14   

                            238   

13,083

                    39,14   

                                        512   

 

Растворитель марки: Р-4

0,0195

               77 440,00   

                                      1 510   

0,0062

               77 440,00   

                            480   

0,0133

          77 440,00   

                                     1 030   

 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

0,0334

                 5 154,67   

                                         172   

0,0106

                 5 154,67   

                               55   

0,0228

            5 154,67   

                                        118   

 

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

0,0101

               60 350,00   

                                         610   

0,0032

               60 350,00   

                            193   

0,0069

         60 350,00   

                                        416   

 

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

0,6073

                    390,56   

                                         237   

0,1926

                    390,56   

                               75   

0,4147

                  390,56   

                                        162   

 

Итого:

 

                                    35 043   

0,00

 

                       11 101   

 

                                   23 942   

 

Зимнее удорожание 4,86% от СМР; НДС 18%; Страхование 0,5051%

 

                                  43 579   

0,00

 

                       13 736   

 

                                   29 774   

ИТОГО

        15 871 025,96   

 

       5 103 071   

 

 10 742 179,35   

 Страхование выполненных работ 0,5051% 

25 775,61   

 Разница (остаток к выполнению) 

   10 767 954,96   

 

Приложение №2 к мировому соглашению по делу № А73-16457/2018

График

выполнения работ по объекту: "Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Информационные сети КиА"

Объект

Смета

Марка РД

Сумма, руб.

2 кв. 2020

3 кв. 2020

4 кв. 2020

1 кв. 2021

2 кв. 2021

3 кв. 2021

4 кв. 2021

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

КиА

Смета №50026

АК

                       866 936   

 

 

 

 

                 433 468   

                 433 468   

 

Смета № 50024

АК

                       479 899   

 

 

          479 899   

 

 

 

Смета №50042

АК

                       517 886   

 

 

 

 

 

                 517 886   

Смета №50034

АК

                       417 101   

 

 

 

 

 

                 417 101   

 

Смета №50478

КМ

4 598 696   

 

 

 

 

  1 149 674   

             1 149 674   

   1 149 674   

  1 149 674   

Смета №50023

АК

 3 338 073,35   

     333 807,34   

    166 903,67   

     166 903,67   

     166 903,67   

      333 807,34   

     667 614,67   

     834 518,34   

166 903,67   

 500 711,00   

 

Смета №50040

АК

                       523 588   

 

 

 

 

 

                 523 588   

 

Страхование 

      25 775,61   

 

 

 

 

 

  25 775,61   

Итого:

10 767 954,96   

    333 807,34   

     166 903,67   

    166 903,67   

    166 903,67   

      813 706,34   

    667 614,67   

     834 518,34   

    1 750 045,67   

     2 083 853,00   

     2 090 363,00   

   1 693 335,61   

 

Решение от  20.12.2018  по делу № А73-16457/2018 Арбитражного суда Хабаровского края  отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину  по иску  46 579,50 руб.,  уплаченную  платежными  поручениями № 37763 от 22.05.2018., № 77803 от 19.09.2018, государственную пошлину  по апелляционной жалобе  1 500 руб.,  уплаченную платежным  поручением № 4801 от 28.01.2019.

Взыскать с акционерного общества «Технодизайн» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску  46 579,50 руб., по оплате  государственной  пошлины   по апелляционной жалобе  1 500 руб.,  по оплате судебных экспертиз 600 000 руб.

 Возвратить акционерному обществу «Технодизайн» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  с депозитного счета Шестого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 100 000  руб., перечисленные платежным поручением № 712 от 30.09.2019.

Перечислить с депозитного счета Шестого арбитражного апелляционного суда денежные средства 300 000 руб. за проведение повторной строительно-технической экспертизы в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза и оценка»  (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.В. Иноземцев

Судьи

М.О. Волкова

Ж.А. Усенко