ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10АП-7850/2024

Дело № А41-62882/23

03 июня 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 03 июня 2024 года  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Боровиковой С.В. судей: Коновалова С.А., Погонцева М.И., 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,  в судебном заседании участвуют представители:  

от ООО «ЗеленИнвест Строй» – ФИО2 по доверенности от 10.01.2023;  

от ГУ ЗАГС Московской области– Кокурин В.В. по доверенности от 09.01.2024  рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной  ответственностью «ЗеленИнвест Строй» на решение Арбитражного суда Московской  области от 26.03.2024 по делу № А41-62882/23 по исковому заявлению ООО  «ЗеленИнвест Строй» к ГУ ЗАГС Московской области о взыскании денежных средств,  по встречному исковому заявлению от ГУ ЗАГС Московской области к ООО  «ЗеленИнвест Строй» о взыскании денежных средств,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЗеленИнвест Строй» (далее – ООО  «ЗеленИнвест Строй» ) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском,  уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ к Главному управлению ЗАГС Московской  

области (далее – ГУ ЗАГС Московской области) о взыскании 446084 руб. 71 коп. пени за  период с 14.02.2012 по 25.06.2023.  

 Определением суда от 22.11.2023 к производству принят встречный иск  ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ к ООО  «ЗЕЛЕНИНВЕСТ СТРОЙ» о взыскании 245222 руб. 70 коп. неустойки, 5 000 рублей  штрафа по государственному контракту от 22 июля 2021 года № 0148200001921000016.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 26.03.2024 по делу № А4162882/23 Иск ООО «ЗеленИнвест Строй» удовлетворен в части. С Главного  управления ЗАГС Московской области в пользу ООО «ЗеленИнвест Строй» взыскано  300000 руб. 00 коп. неустойки и 11922 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

Возвращена ООО «ЗеленИнвест Строй» из федерального бюджета  государственная пошлина по иску в сумме 11078 руб. 00 коп., уплаченная по чек-ордеру  от 14.03.2023 г.  

Встречный иск Главного управления ЗАГС Московской области удовлетворен в  части.  

С ООО «ЗеленИнвест Строй» в пользу Главного управления ЗАГС Московской  области взыскано 50000 руб. 00 коп. неустойки.  

С ООО «ЗеленИнвест Строй» в доход федерального бюджета государственную  пошлину по иску в сумме 3034 руб. 00 коп.  

Произведен зачет удовлетворенных требований, в результате произведенного  зачета взыскано с Главного управления ЗАГС Московской области в пользу ООО  «ЗеленИнвест Строй» 261922 руб. 00 коп..  

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «ЗеленИнвест Строй»  обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой,  полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для  дела, а так же неправильно применены нормы материального права.  

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения  проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258,  266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца  поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе в полном объеме, просил  решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.  

Представитель ответчика возражал против доводов апелляционной жалобы,  просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную  жалобу – без удовлетворения.  

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела  письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит апелляционную  жалобу не подлежащей удовлетворению.  

Как следует из материалов дела, 22 июля 2021 года между Главным управлением  ЗАГС Московской области (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью  «ЗеленИнвест Строй» (Исполнитель) заключен Государственный контракт №  0148200001921000016 (далее – Контракт) на оказание услуг по выполнению  проектноизыскательских работ, подготовке сводного сметного расчета на проведение  капитального ремонта помещений Главного управления ЗАГС Московской области в  соответствии с разработанной проектной документацией и получению положительного  заключения проверки проектно-сметной документации в органе государственной  экспертизы (ГАУ МО «Мособлгосэспертизы»).  

Согласно п. 1.1 контракта исполнитель обязуется в обусловленные контрактом  сроки оказать заказчику услуги по выполнению проектно-изыскательских работ,  подготовке сводного сметного расчета на проведение капитального ремонта помещений  Главного управления ЗАГС Московской области в соответствии с разработанной  проектной документацией и получению положительного заключения проверки  проектно-сметной документации в органе государственной экспертизы (ГАУ МО  «Мособлгосэспертиза»), перечисленные в приложении 1 к контракту «Сведения об  объекте закупки», а заказчик обязуется принять и оплатить услуги, в порядке и в  соответствии с условиями, предусмотренными контрактом (п. 1.1 Контракта).  

Согласно п. 1.4 контракта, перечень и объем услуг, подлежащих оказанию,  требования к качеству оказываемых исполнителем услуг, а также требования к порядку  и способу их оказания исполнителем, определяются контрактом, в том числе  приложением 5 к контракту. Цена контракта 4 795 750 рублей (п. 2.1 контракта).  

Срок оказания услуг 140 (сто сорок) календарных с даты заключения контракта  (22.07.2021 по 09.12.2021 включительно) (п. 3.1 контракта).  

Порядок и сроки осуществления приемки заказчиком оказанных исполнителем  услуг и оформление её результатов согласован сторонами в разделе 4 договора.  

Заказчик осуществляет приемку услуг после получения от исполнителя  документов, указанных в разделе «Оформление при исполнении обязательств»  приложения 3 к контракту.  

 Порядок и сроки осуществления приемки услуг, а также порядок и сроки  оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления  приемки и оформления результатов» приложения 3 к контракту (п. 4.3 контракта).  

Для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных  контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу  (п. 4.4 контракта).  

Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки  проведения экспертизы» приложения 3 к контракту (п. 4.5 контракта).  

Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки  осуществления приемки и оформления результатов» приложения 3 к контракту,  осуществляет приемку оказанных услуг и подписывает или утверждает подписанный  всеми членами приемочной комиссии (в случае создания заказчиком приемочной  комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет исполнителю  мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень  выявленных недостатков и сроки их устранения (далее - Мотивированный отказ).  

В случае, если контрактом предусмотрено предоставление исполнителем  обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за  исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанной услуги осуществляется  после предоставления исполнителем такого обеспечения в порядке и в сроки, которые  установлены в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к  контракту (п. 4.6 контракта).  

В случае получения Мотивированного отказа исполнитель обязан в сроки,  установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и  

направить заказчику документы, указанные в разделе «Оформление при исполнении  обязательств» приложения 3 к контракту (п. 4.7 контракта).  

Со дня получения от исполнителя указанных в настоящем пункте документов  заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом контракта, при этом  срок исполнения обязательств заказчика, установленный настоящим разделом  контракта, исчисляется со дня получения таких документов.  

В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не  устранены исполнителем в установленные в Мотивированном отказе сроки, заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в  соответствии с условиями контракта (п. 4.8 контракта).  

Согласно п. 13.1. контракта, он вступает в силу с момента его заключения и  действует по 18.01.2022.  

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных  обязательств сторон. 04 февраля 2022 года подрядчик направил заказчику проектную  документацию, положительное заключение государственной экспертизы и акты  выполненных работ (письмо № 3/2 от 04 февраля 2022 года) по электронной почте и  почтой России, подписал акты выполненных работ в системе ПИК ЕАСУЗ.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.06.2023 по делу № А4119686/2023 вступившим в законную силу, с Главного управления записи актов  гражданского состояния Московской области в пользу ООО «ЗелИнвест Строй»  взысканы 4795750,29 руб. задолженности по государственному контракту №  0148200001921000016 от 20.07.2021.  

Судом установлено, что исполнителем надлежащим образом выполнены работы в  рамках государственного контракта № 0148200001921000016 от 20.07.2021.  

В связи с просрочкой оплаты выполненных работ исполнитель контракта  рассчитал сумму пени за период с 14.02.2012 по 25.06.2023, размер которой с учетом  применения периода действия моратория составила 446084 руб. 71 коп.  

Претензионный порядок урегулирования спора не привел к погашению суммы  неустойки ответчиком, в связи с чем истец по первоначальному иску обратился в  арбитражный суд с заявленными требованиями.  

В обоснование доводов встречного иска указано, что цена Контракта составляет 4  795 750 рублей.  

Срок оказания услуг 140 (сто сорок) календарных с даты заключения Контракта  (22.07.2021 по 09.12.2021 включительно) (п. 3.1 Контракта).  

Однако в установленный Контрактом срок (09.12.2021), услуги Исполнителем не  оказаны, проектно-сметная документация с положительным заключением ГАУ МО  «Мособлгосэспертиза» Заказчиком не получена.  

Письмом от 22.12.2021 № 33ИСХ-14923/01-08 в адрес Ответчика направлена  претензия о неисполнении обязательств по Контракту с требованием оплатить штраф в  размере 5 000 рублей, обосновав свое требование тем, что согласно п. 7.1 Контракта за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и  условиями Контракта.  

В свою очередь фактом неисполнения обязательств по настоящему Контракту  считается: – неоказание услуг (части услуг) установленных Контрактом; – неоказание  услуг (части услуг) в сроки, указанные в Контракте; – оказание услуг ненадлежащего  качества (несоответствующего условиям Контракта); – отказ устранить недостатки  (ненадлежащее качество) оказанных услуг; – не устранение недостатков в сроки,  установленные в претензии Заказчика.  

Однако претензия Главного управления ЗАГС Московской области оставлена  Ответчиком без удовлетворения. Штраф за неисполнение обязательств,  предусмотренный условиями Контракта (п. 7.3.4. Контракта) Обществом с  ограниченной ответственностью «ЗеленИнвест Строй» не оплачен.  

 Кроме этого, условиями Контракта предусмотрена ответственность Исполнителя  за просрочку исполнения обязательств.  

 Согласно п. 7.3.2 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей  на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,  

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом  (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически  исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

25.03.2022 Исполнитель надлежащим образом уведомлен о принятом Заказчиком  решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 10.03.2022. 06.04.2022  решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу.  

Истцом по встречному иску произведен расчет пени за просрочку исполнения  обязательства Исполнителем, размер которой за период с 10.12.2021 (дата исполнения  обязательств по Контракту) по 06.04.2022 (дата расторжения Контракта), составил 245  222 руб. 70 коп.  

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения в  арбитражный суд со встречными исковыми требованиями.  

Удовлетворяя первоначальные и встречные требования в части суд первой  инстанции признал требования обоснованными.  

Оспаривая решение суда первой инстанции по мотивам, изложенным в  апелляционной жалобе ответчик указывает, указывает, что суд первой инстанции  необоснованно взыскал неустойку в указанном размере.  

Апелляционный суд не может согласиться с доводами апелляционной жалобы в  силу следующего.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно положениям статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных законом.  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а  заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам  договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение  

проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд)  положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не  установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах  договоров (статья 702 ГК РФ). Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре  подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По  согласованию между сторонами в 5 68_15436846 договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Согласно  пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей  выполнению работы или способы ее определения. Если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов,  заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи  результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).  

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных  подрядчиком работ является сдача их результата заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.  

Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда  содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми  актами (статья 422 ГК РФ). Основанием для начисления неустойки (штрафа, пеней)  является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, в  частности просрочка его исполнения (статьи 329, 330 ГК РФ).  

В силу статьи 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты  нарушенного гражданского права. Согласно Гражданскому кодексу Российской  Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,  удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком,  обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или  договором (статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии  со статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Представленный истцом по первоначальному иску расчет подлежащей взысканию  неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является  правильным. Учитывая просрочку в исполнении обязательств, суд, изучив и оценив в  совокупности все представленные в материалы дела доказательства, находит требования  истца обоснованными и основанными на нормах действующего законодательства.  

 При этом суд снизил размер неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, до  300 000 руб. 00 коп. Суд полагает, что указанная сумма соответствует величине,  достаточной для компенсации потерь кредитора.  

В отношении встречного иска о взыскании 245 222 руб. 70 коп. неустойки (п. 7.3.2  контракта), 5 000 рублей штрафа (п. 7.3.4 контракта) по государственному контракту от  22 июля 2021 года № 0148200001921000016 судом установлено следующее.  

 Согласно п. 7.3.2 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей  на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом  (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически  исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. В соответствии с п.  7.3.4 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки  исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  контрактом, штраф устанавливается в размере 5000.  

Как указывает истец по встречному иску, им взыскивается неустойка и штраф за  нарушение сроков выполнения работ.  

Данный штраф фактически начислен истцом за нарушение срока выполнения  работ, а значит истцом заявлено о применении двойной меры ответственности за одно и  

то же правонарушение, так как одновременно заявлены два требования за просрочку  выполнения работ.  

Поскольку действующим законодательством не допускается двойная  ответственность за одно и то же правонарушение, а истцом фактически одновременно за  одно и то же неисполнение ответчиком обязательств по своевременному выполнению  работ по договору заявлены требования о взыскании 245 222 руб. 70 коп. неустойки,  начисленной на основании п. 7.3.2 контракта, и 5000 руб. 00 коп. штрафа, начисленного  на основании п. 7.3.4 контракта, требование истца о взыскании 5000 руб. 00 коп. штрафа  в удовлетворении требований обоснованно отказано.  

Кроме того, истцом по встречному иску неверно определен период начисления  неустойки, поскольку в рамках дела № А41-19686/23 судом было установлено, что 04  февраля 2022 года подрядчик направил заказчику проектную документацию,  положительное заключение государственной экспертизы и акты выполненных работ  (письмо № 3/2 от 04 февраля 2022 года) по электронной почте и почтой России,  подписал акты выполненных работ в системе ПИК ЕАСУЗ. Решение суда по данному  делу вступило в законную силу, оставлено без изменения судами вышестоящих  инстанций (ст. 69 АПК РФ).  

Таким образом, в данном случае неустойку за нарушение сроков выполнения  работ необходимо рассчитывать с 10.12.2021 г. по 04.02.2022 г., в связи с чем судом  произведен перерасчет заявленной истцом по встречному иску неустойки и правильной  суммой неустойки следует считать 75852 руб. 79 коп.  

Кроме того, в ходе рассмотрения дела представитель ответчика по встречному  иску также заявил ходатайство об уменьшении подлежащей взысканию неустойки  согласно положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В данном случае при рассмотрении спора суд обоснованно применил нормы  статьи 333 ГК РФ.  

Таким образом, поскольку арбитражный суд пришел к обоснованному выводу об  удовлетворении первоначального иска и встречного иска в части, в силу ст. 410 ГК РФ и  произвел зачет удовлетворенных требований, в результате которого с ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в пользу ООО "ЗЕЛЕНИНВЕСТ  СТРОЙ" подлежит взысканию 261922 руб. 00 коп.  

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе отклоняются по следующим  основаниям.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство  нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе  уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.  

Согласно пункту 2 информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики  применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации» основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям  нарушения обязательств.  

Согласно пункту 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из  своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности,  данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных  средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам,  выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения  обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.  

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму  неустойки.  

 Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем  интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи  333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.  

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности  неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер  убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки.  

 Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы,  подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.  

Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки  кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение  заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства,  свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения  обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и  осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних  показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на  определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и  т.д.).  

При этом суд обращает внимание, что в Определении Конституционного Суда  Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О указано на то, что гражданское  законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения  исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение  или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях  устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.  

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации именно  законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и  свобод гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц.  

Это касается и свободы договора при определении на основе федерального закона  таких его условий, как размеры неустойки - они должны быть соразмерны указанным в  этой конституционной норме целям.  

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним  из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против  злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по  существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской  Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не  должно нарушать права и свободы других лиц.  

Именно поэтому в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить  баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой  действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате  конкретного правонарушения.  

Принимая во внимание компенсационную природу неустойки как меры  ответственности за нарушение гражданско-правового обязательства, заявление  ответчика о несоразмерности неустойки, суд приходит к выводу о возможности  применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и  уменьшения размера подлежащей взысканию с ответчика неустойки в связи с ее явной  несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, учитывая также размер  взыскиваемой неустойки в денежном выражении, отсутствие доказательств,  представленных истцом, о размерах его убытков в связи с несвоевременным  исполнением ответчиком своих обязательств.  

 При таких условиях, учитывая положения статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, суд обоснованно снизил неустойку.  

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов,  которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении  дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу,  влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда  первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными  и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда  Московской области.  

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не  означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.  

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда  первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела,  при правильном применении норм действующего законодательства.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к  отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены  обжалуемого судебного акта не имеется.  

 Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 26.03.2024 по делу № А4162882/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть  обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу.  

Председательствующий С.В. Боровикова  

Судьи С.А. Коновалов   М.И. Погонцев