Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РЕШЕНИЯ

Дело № А32-42894/2021

г. Краснодар

27 мая 2024 года

На основании изложенного, суд, руководствуясь статьями 49, 65, 71, 110, 167-171 ,  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

решил:

По первоначальному исковому заявлению Ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить. 

Ходатайство ответчика о снижении штрафа согласно ст. 333 ГК РФ оставить без  удовлетворения.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Донец Юрия Владимировича г. Сочи  (ОГРНИП: 310236713800055, ИНН: 231709259183, Дата присвоения ОГРНИП: 18.05.2010)  в пользу ООО «СЗ «Сочи-Парк пять плюс» г. Сочи (ОГРН: 1192375037062, Дата  присвоения ОГРН: 21.05.2019, ИНН: 2367009386) неотработанный аванс в сумме 295 423  руб., штраф за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 29.12.2020   № 69 в сумме 1 000 000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 16 232 руб.  

В остальной части иска - отказать. 

Выдать ООО «СЗ «Сочи-Парк пять плюс» г. Сочи (ОГРН: 1192375037062, Дата  присвоения ОГРН: 21.05.2019, ИНН: 2367009386) в справку на возврат излишне  уплаченной госпошлины из федерального бюджета в сумме 5 495 руб., оплаченной  платежным поручением № 1214 от 14.08.2021.  

По встречному исковому заявлению. Ходатайство об уточнении исковых требований - удовлетворить. 

Взыскать с ООО «СЗ «Сочи-Парк пять плюс» г. Сочи (ОГРН: 1192375037062, Дата  присвоения ОГРН: 21.05.2019, ИНН: 2367009386) в пользу индивидуального  предпринимателя Донец Юрия Владимировича г. Сочи (ОГРНИП: 310236713800055,  ИНН: 231709259183, Дата присвоения ОГРНИП: 18.05.2010) стоимость выполненных  работ и/или прямых затраты, расходы, убытки подрядчика по договору подряда № 69 от  29.12.2020 на общую сумму в размере 1 283 848 рублей, в числе которых:  

- выполненные работы, по устройству витражных конструкций – оконные изделия и  двери, в размере 781 248 рублей;  

- выполненные проектные работы, по разработке проектной документации –  Эскизный проект, в размере 302 600 рублей;  

- выполненные проектные работы, по разработке рабочей документации, по  устройству кровли, металлоконструкций, основания и чернового пола, в размере 120 000  рублей;  

- выполненные проектные работы, по разработке рабочей документации –  кладочный план, в размере 80 000 рублей.  

Взыскать с ООО «СЗ «Сочи-Парк пять плюс» г. Сочи (ОГРН: 1192375037062, Дата  присвоения ОГРН: 21.05.2019, ИНН: 2367009386) в пользу индивидуального  предпринимателя Донец Юрия Владимировича г. Сочи (ОГРНИП: 310236713800055,  ИНН: 231709259183, Дата присвоения ОГРНИП: 18.05.2010) расходы по оплате  госпошлины в сумме 18 671,24 руб., и расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 14  858 руб.  

В остальной части встречного иска – отказать. 

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований, взыскать с ООО  «СЗ «Сочи-Парк пять плюс» г. Сочи (ОГРН: 1192375037062, Дата присвоения ОГРН:  21.05.2019, ИНН: 2367009386) в пользу индивидуального предпринимателя Донец Юрия  Владимировича г. Сочи (ОГРНИП: 310236713800055, ИНН: 231709259183, Дата  присвоения ОГРНИП: 18.05.2010) денежные средства в размере 5722,24 руб.  

Взыскать с ООО «СЗ «Сочи-Парк пять плюс» г. Сочи (ОГРН: 1192375037062, Дата  присвоения ОГРН: 21.05.2019, ИНН: 2367009386) в доход Федерального бюджета РФ  госпошлину в сумме 3 826 руб. за рассмотрение встречного иска.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья В.С. Чуриков