48/2023-90384(1) 

 

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09 e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Тула Дело № А62-10160/2021  Резолютивная часть постановления объявлена 05.12.2023  

Постановление изготовлено в полном объеме 05.12.2023 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего  Капустиной Л.А., судей Дайнеко М.М. и Мосиной Е.В., при ведении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии от истца –  общества с ограниченной ответственностью «Трансснаб» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) – ФИО2 (доверенность от 30.11.2023) и ФИО3 (протокол от  11.03.2014), от ответчика – Управления Министерства внутренних дел Российской  Федерации по Смоленской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) – ФИО4 (доверенность от 13.02.2023) и ФИО5 (доверенность от 23.01.2023), в отсутствие  третьих лиц – Департамента государственного строительного и технического надзора  Смоленской области и общества с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие Мануфактура», рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу Управления Министерства внутренних дел Российской  Федерации по Смоленской области на решение Арбитражного суда Смоленской области  от 18.09.2023 по делу № А62-10160/2021 (судья Печорина В. А.),  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Трансснаб» (далее – общество) обратилось  в Арбитражный суд Смоленской области с исковым заявлением (с учетом уточнения) к  Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской  области (далее – управление) о расторжении государственного контракта от 19.06.2020 №  75; признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от  государственного контракта; взыскании задолженности по оплате фактически  выполненных работ в размере 60 425 032 рублей 01 копейки, убытков в размере 5 089 487  рублей 66 копеек, и расходов, связанных с исполнением контракта, в размере 14 869 849  

рублей 76 копеек, а также неустойки за просрочку оплаты в сумме 90 258 рублей 22  копеек (т.3, л. д. 112).  

В свою очередь управление, в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, обратилось со встречным исковым заявлением к  обществу о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных  денежных средств по государственному контракту от 19.06.2020 № 75 в размере  

9 137 247 рублей 29 копеек. 

Определением первой инстанции от 22.03.2022 встречное исковое заявление  принято к производству для его совместного рассмотрения с первоначальными  требованиями.  

До рассмотрения спора по существу управление, в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неоднократно уточняло  исковые требования, в окончательном виде сформулировав их как требования взыскания  с общества неосновательного обогащения в виде излишне оплаченных актов КС-2 от  10.12.2020 № 1, 2, 3, 4, от 20.12.2020 № 5, 6 (т. 1, л. д. 82–149) в размере 5 738 096 рублей  28 копеек (с учетом НДС), неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с  01.01.2020 по 21.03.2022 в сумме 122 200 рублей 36 копеек и штрафа в сумме 157 424  рублей 58 копеек. Судом уточнение принято.  

Определениями суда от 30.01.2023, от 24.05.2023, принятыми на основании статьи  51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в  качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора, привлечены Департамент государственного строительного и  технического надзора Смоленской области (далее – департамент) и общество с  ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Мануфактура».  

Решение суда от 18.09.2023 первоначальные исковые требования удовлетворены  частично: с управления в пользу общества взыскана задолженность по оплате  выполненных работ в размере 59 311 257 рублей 46 копеек; в удовлетворении остальной  части первоначального иска отказано. Встречные исковые требования удовлетворены  частично: с общества в пользу управления взыскана неустойка за нарушение сроков  выполнения работ за период с 01.01.2020 по 21.03.2022 в сумме 122 200 рублей 36 копеек  и штраф в сумме 157 424 рублей 58 копеек. В удовлетворении остальной части  встречного иска отказано. В результате зачета с управления в пользу общества взыскана  задолженность за выполненные работы в размере 59 031 632 рублей 52 копеек.  

В апелляционной жалобе управление просит решение отменить и принять новый  судебный акт. Оспаривая судебный акт, заявитель считает экспертные заключения,  

положенные в основу решения суда, ненадлежащими доказательствами, полагая, что  эксперты не обладают необходимой квалификацией для осуществления исследования, к  заключениям не приложены документы, подтверждающие квалификацию экспертов,  неверно выбрана методика исследования, не даны ответы на поставленные судом  вопросы, не проведен анализ и не дана оценка соответствия результата работ проектной и  рабочей документации, отсутствует информация о проведении замеров и т.п. Ссылается  на то, что замена подрядчиком силикатного полнотелого утолщенного кирпича марки  М150 для кладки внутренних стен на двухпустотный силикатный кирпич марки М200, с  заказчиком не согласована, использование указанного кирпича затрагивает несущие  конструкции здания и требуют прохождения дополнительной экспертизы проектной  документации. Утверждает, что размер установленных оконных блоков не соответствует  проектной документации, влечет увеличение стоимости контракта, требует оформления  дополнительного соглашения и подтверждения государственной экспертизы. Указывает,  что система дымоудаления выполнена подрядчиком с нарушением требований проекта:  согласно требованиям проектной документации подрядчик обязан был установить трубы  заводского изготовления диаметром 250 мм из нержавеющей кислотостойкой стали марки  «DIN 1.4404» толщиной 0,6 мм, системы ООО КХ «Балтвент», в то время как им  фактически установлены трубы с толщиной металла 0,5 мм. Полагает, что имеются  основания для назначения повторной судебной экспертизы. Сообщает, что заключение  органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта  капитального строительства требованиям проектной документации заказчиком не будет  получено по причине многочисленных отклонений от проектно-сметной документации в  ходе строительства. Утверждает, что из-за указанных обстоятельств ввод жилых домов  в эксплуатацию невозможен.  

В отзыве истец просит решение оставить без изменения, апелляционную жалобу –  без удовлетворения. Указывает, что вопреки позиции заявителя, судом проверена  квалификация экспертов перед назначением экспертизы; возражений перед назначением  экспертизы от управления не поступало. Ссылается на наличие в материалах дела  подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, части  3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации о допустимости  применения двухпустотного силикатного кирпича марки СУРПу-200/Р35/1,6 для кладки  стен выше 6 этажа, подписанное проектной организацией – АНО «Архитектурная  мастерская Абаляна»; внесенные изменения (относительно замены кирпича) не требуют  прохождения государственной экспертизы, так как не затрагивают несущие конструкции,  не нарушают требования технических регламентов, санитарно-эпидемиологических  

требований, соответствуют заданию застройщика на проектирование; отсутствие  необходимости прохождения повторной государственной экспертизы проектной  документации подтверждено письмом Центра государственной экспертизы объектов  Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечает, что  письмом от 08.04.2021 № 20/2084 заказчиком согласована замена кирпича, так как он  улучшает показатели стен. Сообщает, что экспертами даны дополнительные пояснения,  представлены обмерные листы по замерам фактически выполненных работ, приложены  документы на средства измерений, в судебных заседаниях экспертами даны ответы на  вопросы (в том числе в письменном виде); представители управления участвовали при  экспертном осмотре и обмерах. Отмечает, что, вопреки позиции заявителя, монтаж  дымоходов должен был производиться не материалами ЗАО ХК «Балтвент», а по  технологическим картам ЗАО ХК «Балтвент», что подтверждается ответом управления от  21.06.2021 № 20/3438, которым согласован монтаж системы дымоудаления производства  ООО фирмы «Крафт», а также ответом АНО «Архитектурная мастерская Абаляна» о  возможности применения дымоходов производства ООО «Крафт» с установлением трубы  толщиной металла 0,5 мм. Считает, что основания для назначения повторной экспертизы  отсутствуют, в определении суда от 22.06.2023 указаны мотивы отказа в данном  ходатайстве, дополнительно поясняя, что с января 2023 года на объекте выполняются  строительные работы новым подрядчиком, что не позволит получить объективные  данные в случае назначения повторной экспертизы. Указывает, что сделанное  представителем Департамента государственного строительного и технического надзора  Смоленской области устное заявление о том, что по завершении работ не будет выдано  заключение об их соответствии требованиям проектной документации, является  субъективным мнением, без учета того, что срок окончания строительства не наступил  (установлен 24.12.2024), проверочные мероприятия в отношении общества не  проводились, на объекте работает новый подрядчик, который использует результат работ  общества.  

В судебном заседании представители сторон поддержали позиции, изложенные в  апелляционной жалобе и отзыве на нее.  

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения  дела, в том числе путем размещения информации о движении дела в сети Интернет, в суд  представителей не направили. С учетом мнений представителей сторон, судебное  заседание проводилось в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Изучив материалы дела и доводы жалобы, выслушав представителей истца и  ответчика, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что жалоба не подлежит  удовлетворению.  

Как видно из материалов дела, в порядке Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) между управлением  (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен государственный контракт от 19.06.2020 №  75 (ИКЗ 201673001356467300100100790034120414), по условиям которого подрядчик  обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с графиком выполнения  работ (приложение № 3) выполнить строительно-монтажные работы по строительству  двух десятиэтажных жилых домов по адресу: 

<

...> по  техническому заданию (приложение № 1) и проектно-сметной документации (приложение   № 2), определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам  требования, сметным расчетом, и сдать заказчику результаты выполненных работ, а  заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  осуществить приемку выполненной работы по графику выполнения работ по контракту  (приложение № 3) и оплатить выполненные работы за счет средств федерального бюджета  в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с  условиями контракта.  

Согласно пункту 1.2 контракта строительно-монтажные работы, выполняемые по  контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской  Федерации, строительным нормам и правилам (СНиП), своду правил (СП), санитарным  нормам и правилам (СанПиН) и технологическим регламентам, а материалы и  оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие  сертификаты и иные документы согласно законодательству Российской Федерации о  техническом регулировании.  

Цена контракта, согласно пункту 2.1, является твердой, определена на весь срок  исполнения и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других  обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением  обязательств по контракту, составляет 367 390 505 рублей, в том числе НДС 20 %:  

а) 2020 год – 57 215 219 рублей 61 копейка, в том числе НДС 20 % в сумме 

9 535 869 рублей 93 копеек, аванс 10 % – 5 721 521 рубль 96 копеек; 

б) 2021 год – 51 019 917 рублей 86 копеек, в том числе НДС 20 % в сумме 

8 503 319 рублей 64 копеек, аванс 10 % – 5 101 991 рубль 79 копеек;  

в) 2022 год – 31 689 400 рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 5 281 566 рублей 67  копеек аванс 10 % – 3 168 940 рублей;  

 г) 2023 год – 130 357 600 рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 21 726 266  рублей 67 копеек, аванс 10 % – 13 035 760 рублей;  

д) 2024 год – 97 108 367 рублей 53 копеек, в том числе НДС 20 % в сумме 16 184 727 рублей 92 копеек, аванс 10 % – 9 710 836 рублей 75 копеек. Расчеты по контракту осуществляются: 

в 2020 году – в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта  подрядчику предоставляется казначейское обеспечение обязательств в размере 57 215 219  рублей 61 копейки, но не более годового объема финансирования в 2020 году,  действующее до момента окончания срока действия контракта;  

в 2021 году – в течение 10 календарных дней с даты начала выполнения работ в  2021 году подрядчику предоставляется казначейское обеспечение обязательств в размере  51 019 917 рублей 86 копеек, но не более годового объема финансирования в 2021 году,  действующее до момента окончания срока действия контракта;  

в 2022 году – в течение 10 календарных дней с даты начала выполнения работ в  2022 году подрядчику предоставляется казначейское обеспечение обязательств в размере  31 689 400 рублей, но не более годового объема финансирования в 2022 году,  действующее до момента окончания срока действия контракта;  

в 2023 году – в течение 10 календарных дней с даты начала выполнения работ в  2023 году подрядчику предоставляется казначейское обеспечение обязательств в размере  130 357 600 рублей, но не более годового объема финансирования в 2023 году,  действующее до момента окончания срока действия контракта;  

в 2024 году – в течение 10 календарных дней с даты начала выполнения работ в  2024 году подрядчику предоставляется казначейское обеспечение обязательств в размере  97 108 367 рублей 53 копеек, но не более годового объема финансирования в 2024 году,  действующее до момента окончания срока действия контракта.  

В соответствии с пунктом 3.11 контракта оплата за работы осуществляется в  соответствии с графиком оплаты (приложение № 4 к контракту) в течение 25 календарных  дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ.  

В соответствии с пунктом 5.4 контакта подрядчик обязан выполнять работы и  сдавать их заказчику по частям - по завершении каждого квартала в рамках графика  выполнения работ по контракту (приложение № 3 к контракту). Отчетный квартал – период с 1-го числа предшествующего квартала по 1-ое число не включительно текущего  квартала, в том числе их отдельных этапов.  

Пунктом 6.3.17 контракта на заказчика возложена обязанность совместно с  подрядчиком получить технические условия на подключение временных инженерных  сетей для обеспечения строительной площадки на период строительства объекта.  

Сроки выполнения работ по контракту установлены в приложении № 3 к контракту  (пункт 7.1 контракта), в рамках которого подрядчик обязан выполнять работы и сдавать  их заказчику по частям – по завершении каждого отчетного квартала, в том числе  отдельных этапов, в сроки, установленные контрактом. Подрядчик в течение 5  календарных дней с даты завершения каждого отчетного квартала представляет заказчику  подписанные со своей стороны следующие документы:  

а) акт о приемке выполненных работ в 4-х экземплярах; 

б) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х  экземплярах;  

в) исполнительную документацию на выполненный в соответствии с актом о  приемке выполненных работ и формой КС-3 объем работ;  

г) счет на фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном  месяце;  

д) счет-фактуру на фактически выполненный объем работ в соответствующем  отчетном месяце (предоставляется, если подрядчик является плательщиком НДС);  

е) акт о приемке законченного строительством объекта с приложением полного  перечня исполнительной документации по реестру в 3-х экземплярах (предоставляется  после завершения работ в последнем отчетном месяце исполнения контракта);  

ж) акты освидетельствования скрытых работ с приложениями; 

з) исполнительные геодезические схемы; и) сертификаты и паспорта на материалы,  изделия и оборудование;  

к) руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования на  русском языке и т.п.  

Акт о приемке выполненных работ и форма КС-3 должны быть подписаны  представителями строительного контроля (технического надзора).  

Приемка результатов по каждому отчетному кварталу, в том числе отдельных  этапов, в рамках графика выполнения работ (приложение № 3) (за исключением  последнего отчетного квартала каждого этапа исполнения контракта), включая  проведение экспертизы результатов выполнения работ, осуществляется в течение 15  календарных дней с даты предоставления подрядчиком документов, указанных в пункте  7.1 контракта, если иное не установлено разделом контракта (пункт 7.3 контракта).  

Согласно пункту 22.1 контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по  решению суда либо в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения  контракта в соответствии е гражданским законодательством.  

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 раздела 2 (приложение № 1  «Техническое задание») подрядчик должен осуществить в установленном порядке за свой  счет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на  строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках  подключения.  

По акту от 20.06.2020 заказчиком передана проектная и сметная документацию в  полном объеме в одном экземпляре; второй комплект документации передан 01.09.2020.  

По акту приема-передачи от 24.06.2020 заказчиком переданы копии разрешения  на строительство № 67-Rl67302000-123-2019 от 09.09.2019; положительное заключение  государственной экспертизы проверки проектной документации без сметы и результатов  инженерных изысканий № 77-1-2-0120-15 от 28.12.2015; положительное заключение  государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости №  77-1-1-4-0041-16 от 30.05.2016. Проектная и сметная документация получила  положительное заключение государственно экспертизы (заключения от 28.12.2015 и от  26.05.2016 ФКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и  безопасности, находящихся в ведении МВД РФ» (т. 2, л. 

<

...>)).  

С целью исполнения контракта заказчиком заключены государственные контракты  на техническое присоединение к сетям № 004/2020 от 19.06.2020 на осуществление  технологического присоединения к электрическим сетям (ИКЗ:  201673001356467300100100520013512414); № 205/64/2825 от 19.06.2020 о подключении  (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети  газораспределения (ИКЗ 20I67300I356467300100100520013522414); № 28/03/2020 от  19.06.2020 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным  системам водоснабжения и водоотведения (ИКЗ:  0050201673001356467300100100510013600414).  

Письмом от 31.08.2020 № 12/804 (т. 2, л. д. 126) подрядчик уведомлен о  необходимости выполнить условия контракта в части устройства временного  подключения к инженерным сетям  

В процессе производства строительно-монтажных работ выяснилось, что из-за  отсутствия свободных мощностей для подключения к сетям водопровода (в ранее  согласованном месте врезки в существующую магистраль), необходимо внесение  изменений в проектную документацию (том 14 07035-6700-Д-НВК «Наружные сети  

водоснабжения и канализации»), в связи с чем в адрес проектировщика (АНО  «Архитектурная мастерская Абаляна М.А.») заказчиком направлена соответствующая  просьба от 02.09.2020 № 12/279.  

Сопроводительным письмом от 10.02.2021 № 20/774 откорректированная рабочая  документация (том 14 07035-6700-ДНВК «Наружные сели водоснабжения и  канализации») направлена заказчиком на согласование в СМУП «Горводоканал», а с  письмом от 09.03.2021 (т. 2, л. д. 123) подрядчику направлен согласованный с СМУП  «Горводоканал» проект рабочей документации «Наружные сети водоснабжения и  канализации».  

В письме от 08.07.2021 № 20210708-04 общество сообщило заказчику о  недостатках проектной документации, препятствующих дальнейшему выполнению  строительно-монтажных работ (отсутствие раздела проекта по устройству  вентилируемого фасада, отсутствие узлов примыкания перегородок к плитам перекрытия,  отсутствие узлов примыкания перегородок к кирпичным стенам, отсутствие узлов по  монтажу остекления лоджий, отсутствие раздела проектной документации по устройству  сигнализации загазованности квартир и отсутствие раздела проектной документации по  устройству наружного освещения) и просило устранить их.  

В ответе от 20.07.2021 № 3/217715686553 заказчик сослался на отсутствие раздела  проекта по устройству вентилируемого фасада, в связи с наличием всей необходимой  информации в сметной документации.  

В письме от 08.07.2021 № 20210708-03 общество сообщило заказчику о  невозможности выполнения строительно-монтажных работ в отсутствие авторского  надзора за строительством.  

Не оспаривая факт отсутствия авторского надзора, заказчик в письмах от  21.06.2021 № 20/3436, от 20.07.2021 № 3/217715686560 сообщил, что на этапе проверки  проектно-сметной документации была удалена статья расходов на заключение договора  на авторский надзор, а также указал на обязанность подрядчика продолжать выполнение  работ до заключения договора на авторский надзор (письмо от 20.07.2021 №  3/217715686560 – т. 2, л. д. 8, письмо от 17.09.2021 № 3/217719532153 – т. 2,  

л. д. 109–110, письмо от 17.09.2021 № 3/217719532177 – т. 2, л. д. 112)).  

Договор на авторский надзор заключен 02.12.2021 (т. 3, л. д. 37).  

Письмом от 08.07.2021 № 20210708-06 (т. 2, л. д. 4) общество уведомило  заказчика о наличии недостатков в сметной документации (не в полном объеме отражены  работы по устройству примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и  парапетам (по смете позиция 364–123 м/п, по проектной документации (07035-6700-Д-АС  

лист 7) – 195 м/п, в одном доме); не в полном объеме отражены работы по устройству  вент. шахт № 1 в количестве 2 шт. в одном доме (по смете позиции 463-480 объем  материалов указан на устройство одной вент. шахты, по проекту (07035-6700-Д-АС лист  7) вент. шахты две в одном доме); отсутствует утеплитель пеноплекс толщиной 120 мм;  имеется арифметическая ошибка, согласно которой на устройство одной вент. шахты  учтены 2 плиты ПТ 12.5-8,6, а проектом (07035-6700-ДАС лист 3) предусмотрено 4  плиты; не в полном объеме отражены работы по монтажу металлического ограждения  лоджий и балконов (согласно смете позиции 492-493 – 11,270 Тн на один дом, по проекту  (07035-6700-Д-АС) – 12,115 Тн); отсутствуют работы по сверлению отверстий в плитах  перекрытия для пропуска труб инженерных сетей; отсутствует сверление отверстий и/или  установка закладных труб в внутренних стенах и перегородках для монтажа  электроснабжения и слаботочных систем; отсутствуют работы по монтажу системы  водоснабжения и водоотведения на основании нового утвержденного проекта;  отсутствует раздел по устройству сигнализации загазованности квартир; отсутствует  раздел по устройству наружного освещения) и просило внести в нее изменения.  

В письме от 09.08.2021 № 3/217715686539 (т. 2, л. д. 156) заказчик согласовал  часть пунктов, указанных в письме от 08.07.2021 № 20210708-06, указав, что по пунктам  1-5 заказчик не возражает против выполнения работ в объемах и количестве,  обозначенном в проектной документации; данные объемы работ и строительные  материалы будут учтены при оплате следующего этапа работ и составлении  дополнительного соглашения на увеличение объемов; по пунктам 6-10 (сверление  отверстий, монтаж системы водоотведения и водоснабжения, устройство сигнализации  загазованности квартир, устройство наружного освещения) сообщено о подготовке  изменений в проектную и сметную документацию, а также о том, что отсутствие  изменений в проектную документацию в части разделов проектной документации по  устройству сигнализации загазованности квартир, по устройству уличного освещения (с  необходимостью внесения которых согласен заказчик) не может являться препятствием  для выполнения работ в 2021 году при окончании срока строительства в 2024 году  (указанные разделы потребуются на заключительной стадии строительства); вопросы об  отсутствии в проектной документации некоторых конструктивных решений в части  примыканий узлов внутренних перегородок из газосиликатных блоков к плитам  перекрытий и к стенам из кирпича и в части устройства закладных деталей лифтовых  шахт обсуждались на совещаниях (протоколы от 09.03.2021, 16.03.2021) и по ним  проведены консультации с автором проекта, указавшим, что узлы примыканий должен  предоставить подрядчик и согласовать их с заказчиком.  

В письме от 22.03.2021 № 20210322 (т. 2, л. д. 159) подрядчик известил заказчика  о том, что выявленные недостатки не препятствуют ему выполнять работы в  соответствии с проектной документацией.  

В связи с удорожанием материалов, необходимых для выполнения работ,  общество в письме от 08.07.2021 № 20210708-05 предложило увеличить цену контракта  на основании пункта 2.7 контракта и с учетом разъяснений, содержащихся в письме  Министерства Финансов Российской Федерации, Минстроя России и Федеральной  антимонопольной службы № 24-06-06/45785 от 10.06.2021, № 24044-АЛ/09 от 10.06.2021  и № ПИ/47490/21 от 10.06.2021.  

В ответе от 17.09.2021 № 3/217719532184 (т. 2, л. д. 106), составленном на  основании письма департамента от 31.08.2021 № 22/27/2-18528 (т. 2, л. д. 84–105),  заказчик указал на порядок увеличения сметной стоимости строительства, отметив, в  частности, что для принятия соответствующего решения необходимо подготовить  обосновывающие документы (расчеты) по приложению к приказу Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021   № 500/пр».  

Обосновывающие документы (расчеты) в соответствии с приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021   № 500/пр заказчику представлены не были.  

В связи с выявленными несоответствиями проектно-сметной документации,  отсутствием авторского надзора, удорожанием строительных материалов, истечением  срока действия разрешения на строительство, отсутствием подключения внутренних  систем водоснабжения, подрядчик уведомил заказчика о приостановлении работ от  12.08.2021 (т. 2, л. д. 12, 14–16) с 15.08.2021.  

Фактически работы прекращены подрядчиком с 22.08.2021, что подтверждается  отметкой в общем журнале производства работ.  

В акте проверки департамента от 17.09.2021 № 02-444 выявлены нарушения в  работе подрядчика (в нарушение графика строительно-монтажных работ (приложение к  контракту № 3) и претензионных требований заказчика (от 07.06.2021 № 20/3149) не  выполнены работы по помещениям техподполья (на отметке ниже 0.000), которые  должны были быть исполнены до конца четвертого квартала 2020 года; в результате  нарушения графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение к контракту   № 3) и не выполнения работ по помещениям техподполья (на отметке ниже 0.000),  которые должны были быть исполнены до конца четвертого квартала 2020 года, ввод  силового электрического кабеля в дома № 1 и № 2 произведены в нарушение проекта; в  

процессе проведения строительных работ по устройству наружных, внутренних степ и  перегородок из белого силикатного утолщенного кирпича (проект 07035-6700-Д-ЛС лист  2 «Технические указания к кладочным планам») подрядчик, дважды применил  несогласованный с заказчиком строительный материал белый силикатный двухпустотный  утолщенный кирпич, который отсутствует в проектно-сметной документации,  получившей положительное заключение государственной экспертизы; замена кирпича  произведена без прохождения повторной экспертизы проектной документации;  устройство межкомнатных перегородок из газосиликатных блоков проведено с  нарушением СТО ПЛАТ 3.1-2013, СП 70.13330.2012, при обследовании кладки  перегородок обнаружены вертикальные швы первого ряда блоков с отсутствием клея,  которые обмазываются клеем впоследствии поверхностно; при устройстве  внутриквартирных межкомнатных перегородок из газосиликатных блоков, без  согласования с заказчиком, использованы железобетонные перемычки толщиной 100 мм в  нарушение проектной документации (альбом 2, том 3. 9 лист 12, 07035-6700-Д-ЛС  «Спецификация перемычек»); монтаж системы дымоудаления произведен изделиями  компании «Craft» вместо, указанной в проектно-сметной документации системы ЗАО ХК  «Балтвент»; в результате обследования многопустотных плит перекрытия в здании № 2 на  нижней плоскости двух плит обнаружено нарушение целостности изделия (с частичным  разрушением), образовавшееся в результате попадания в полости плиты дождевой и талой  воды с последующим замерзанием; в результате обследования установленного на четырех  балконах дома № 2 фасадного остекления выявлены отклонения от проектно-сметной  документации, которые не были согласованы и утверждены заказчиком; заполнения  оконных и дверных (балконных) проемов оконными и дверными блоками ПВХ на доме №  1 и № 2 выполнены с нарушением требований проектной документации: размеры  отличаются от указанных в проекте), по результатам которой выдано предписание от  17.09.2021 № 02-444п, признанное законным решением Арбитражного суда Смоленской  области от 13.05.2022 по делу № А62-9103/2021.  

25.02.2022 управлением принято решение об одностороннем отказе от исполнения  государственного контракта, мотивированное необоснованным приостановлением  подрядчиком работ и наличием существенных нарушений:  

не выполнено кирпичное ограждение лоджий в жилых домах № 1 и № 2, в то время  как согласно проекту 07035-6700-Д-АС кладку кирпичного ограждения лоджии следует  выполнять одновременно с основной кладкой стен;  

засыпка пазух выполнена не в полном объеме, как это предусмотрено проектом  07035-6700-Д-ПОС-ПЗ (лист 10) и пунктом 11.31 СП 45.13330.2017. Свод правил.  

Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП  3.02.01-8, в результате чего входы в подвалы оказались залиты водой;  

отсутствуют защитные ограждения лестничных маршей и шахт лифтов в жилых  домах № 1 и № 2 выше 8-го этажа, предусмотренные проектом 07035-6700-Д-П0С-П3  (лист 21), а также пунктом 6.2.16 СНиП 12- 03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования».  

Поскольку решение об одностороннем отказе от исполнения государственного  контракта получено подрядчиком 11.03.2022, в соответствии с пунктом 13 статьи 95  Закона № 44-ФЗ, оно вступило в законную силу 22.03.2022.  

Для приемки работ, выполненных до расторжения контракта, общество направило  управлению акты формы КС-2 от 27.08.2021 № 7 на сумму 5 101 991 рубля 72 копеек и  от 27.08.2021 № 8 на сумму 60 425 032 рублей 01 копейки (т. 3, л. д. 134). При этом  стоимость работ по акту от 27.08.2021 № 7 в размере 5 101 991 рубля 72 копеек зачтена  подрядчиком в счет ранее уплаченного аванса.  

Ссылаясь на необоснованное уклонение заказчика от оплаты выполненных работ,  а также возникновение у общества убытков (расходы на приобретение банковской  гарантии, по содержанию и охране объекта, обеспечению строительной площадки  электроэнергией, по устройству временной дороги, временных сооружений  (строительного городка), временного освещения, ограждения строительной площадки,  установку камер видеонаблюдения и обеспечение доступа подключения к сети  «Интернет», приобретению изделий ПВХ для выполнения работ по устройству лоджий) и  наличие оснований для привлечения заказчика к ответственности в виде неустойки за  просрочку перечисления авансовых платежей, общество обратилось в арбитражный суд с  настоящим иском.  

В свою очередь управление, ссылаясь на невыполнение подрядчиком работ,  результат которых принят по актам формы КС-2 от 10.12.2020 № 1-4, от 20.12.2020 № 5, 6  (т. 1, л. д. 76–129), необоснованное получение в связи с этим денежных средств,  обратилось со встречным исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения  в размере 5 738 096 рублей 28 копеек (с учетом НДС), из которых 4 708 871 рубль 20  копеек (в связи с неверным применением расценок при устройстве перегородок из  газосиликатных блоков); 495 484 рублей 32 копеек (невыполненные работы по устройству  основания под сваебойную установку); 617 576 рублей 80 копеек (необоснованный учет  средств на временные здания и сооружения в размере 1,1 %); 473 109 рублей 52 копейки  (по пункту 26 сметы контракта в актах не отминусована стоимость горячекатанной  арматуры); 1 029 225 рублей 08 копеек (завышение стоимости кирпича при кладке стен  

(разница между стоимостью марки кирпича в смете «Кирпич силикатный полнотелый,  утолщенный, размером 250 х 120 х 88 мм, марка:100» и фактически примененной маркой  кирпича при кладке стен, учтенной в актах КС-2 «Кирпич силикатный полнотелый  утолщенный, размером 250 х 120 х 88 мм, марка:150» - расчет т. 10, л. д. 21).  

В соответствии с абзацем 4 преамбулы Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв.  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017), поскольку в силу  части 1 статьи 2 Закона № 44-ФЗ законодательство о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, при  разрешении споров, вытекающих из государственных (муниципальных) контрактов, суды  руководствуются нормами Закона о контрактной системе, толкуемыми во взаимосвязи с  положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а при отсутствии  специальных норм – непосредственно нормами Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

Сторонами не оспаривается факт прекращения между ними договорных  отношений. Решение суда в части отказа в иске о признании недействительным  одностороннего отказа от исполнения контракта никем не оспаривается.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской  Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские  работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или  муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального  контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Применительно к пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской  Федерации сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в  

нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт  сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в  случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованным.  

Акт приемки работ является основанием для возникновения обязательства  заказчика по оплате выполненных работ (пункт 8 информационного письма Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики  разрешения споров по договору строительного подряда») и при их неподписании  заказчик должен представить доказательства обоснованного отказа от принятия работ  (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.09.2019 № 305-ЭС19-9109,  постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  27.03.2012 № 12888/11).  

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в Обзоре судебной  практики Верховного Суда Российской Федерации № 2(2016), утвержденном  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 06.07.2016, согласно пункту 1  статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной  подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при  отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к  работам соответствующего рода; если иное не предусмотрено законом, иными правовыми  актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи  заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно  предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для  установленного договором использования, а если такое использование договором не  предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.  

По смыслу изложенного работы, выполненные с отступлением от требований  обязательных норм и правил, не могут признаваться выполненными с надлежащим  качеством и подлежащими оплате (Обзор судебной практики Верховного Суда  Российской Федерации № 2(2016), утвержденный Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 06.07.2016),  

В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата  выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного  подряда.  

В силу пункта 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2  статьи 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта является твердой и определяется на весь срок  исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской  

Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и  максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о  закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается,  за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, в частности  статьей 95 названного закона.  

Согласно подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение  существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их  изменения по соглашению сторон, в случае если возможность изменения условий  контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, если по  предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара,  объем работы или услуги не более чем на десять процентов, или уменьшаются  предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой  работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по  соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного  законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально  дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя  из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем  на десять процентов цены контракта.  

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» (далее –  постановление Пленума № 35) разъяснено, что, разрешая споры, связанные с  расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453  ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в  будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары  по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные  средства по договору кредита и т.п.).  

Согласно пункту 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации  стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству  до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или  соглашением сторон.  

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив  от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое  обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к  отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного  

обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не  вытекает из существа обязательства.  

В пункте 10 постановления Пленума № 35 разъяснено, что если к моменту  расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные  работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии,  доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности  осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона,  регулирующим соответствующие обязательства.  

В целях определения объема, стоимости и качества работ, выполненных до  момента прекращения контракта, определениями суда от 06.06.2022 и от 01.03.2023 по  делу назначены судебные экспертизы (первоначальная и дополнительная), производство  которых поручено ООО «СмолГеоТехПроекТ» (эксперты ФИО7 и ФИО8).  

Согласно экспертным заключениям от 13.04.2023 № 23 и от 22.11.2022 № 45: 

 акты о приемке выполненных работ от 27.08.2021 № 7 (жилой дом № 1 оконные  проемы) на сумму 5 101 991 рублей 72 рубля, от 27.08.2021 № 8 (жилой дом № 1, 2  общестроительные работы) на сумму 60 425 032 рублей 07 копеек, от 27.08.2021 № 7  (жилой дом № 1, оконные проемы) на сумму 5 101 991 рубля 72 копеек содержат в своем  составе 4 пронумерованные позиции;  

стоимость выполненных работ соответствует примененным расценкам в акте № 7  по форме КС-2 от 27.08.2021;  

примененные оконные блоки имеют сертификаты и паспорта качества, копии  паспортов на материалы представлены в исполнительной документации, заводские  маркировки и полученные в процессе обследования данные свидетельствуют о  соответствии материалов и изделий исполнительной документации;  

при натурном исследовании установлено, что монтажные швы окон не заполнены  монтажной пеной, уплотнительные ленты не имеют должного закрепления; работы по  монтажу оконных блоков окончательно не завершены в полном объеме; общие виды  оконных заполнений отражены в приложении № 1 «Фотоматериалы» на фото № 12, № 14,   № 33;  

акт о приемке выполненных работ № 8 по форме КС-2 от 27.08.2021 (жилой дом №  1, 2 общестроительные работы) на сумму 60 425 032 рублей 07 копеек содержит в своем  составе 271 пронумерованную позицию;  

примененные материалы и изделия имеют сертификаты и паспорта качества, копии  паспортов на материалы представлены в исполнительной документации, заводские  

маркировки и полученные в процессе обследования данные свидетельствуют о  соответствии материалов и изделий исполнительной документации;  

стоимость выполненных работ соответствует примененным расценкам в акте № 8  по форме КС-2 от 27.08.2021;  

указанные в акте от 27.08.2021 № 8 в позициях 14, 172 перегородки имеют  множественные мелкие повреждения на площади 432 кв. метров;  

по результатам натурного исследования установлено, что монтажные швы окон не  заполнены монтажной пеной, данный факт свидетельствует о неполном завершении работ  по монтажу оконных блоков, данный факт отражен в акте от 27.08.2021 № 8 в позиции  232, 233;  

выявленные мелкие недостатки являются устранимыми и будут устранены  последующими видами отделочных работ; необходимость проведения отдельных  мероприятий по устранению недостатков не требуется; при устройстве отделочных  покрытий мелкие повреждения перегородок будут устранены штукатурными покрытиями;  

вышеуказанные мелкие повреждения перегородок отражены в приложении № 1  «Фотоматериалы» на фото № 19, фото № 55, фото № 74; в приложении № 2 «Материалы  обследования» дефекты описаны в разделе «Перегородки»;  

расчет стоимости выполнен по данным, полученным в результате выполнения  обмерных работ во внутреннем объеме зданий (приложены обмерные листы).  

Согласно заключению дополнительной экспертизы, стоимость работ по  завершению работ по устройству монтажных швов смонтированных окон составляет  744 136 рублей 70 копеек, расчет стоимости приведен в приложении 1 к экспертному  заключению. Стоимость работ устранения недостатков (недоделок) в перегородках на  площади 432 кв. метров составляет 369 637 рублей 85 копеек, расчет стоимости приведен  в приложении 2 к экспертному заключению. Применена расценка на выполнение работ по  установке перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа 4 м на сумму 4  781 136 рублей 82 копеек. Расценка № 172 в акте № 8 «Установка перегородок из  легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м» соответствует выполненным  работам. Фактически выполнены работы по устройству перегородок из газосиликатных  материалов толщиной 100 мм.  

В связи с возникшими у сторон вопросами экспертами даны ответы, которые  устранили возможность иного толкования выводов заключений (аудиопротоколы  судебных заседаний от 15.06.2023, 22.06.2023, 04.09.2023), дополнительные пояснения (т.  9, л. д. 9–22), обмерные листы по замерам объемов выполненных работ – т. 9, л. д. 100)).  

Оценив экспертные заключения по правилам статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом данных экспертами устных и  письменных пояснений, суд правомерно принял их в качестве надлежащих доказательств,  ввиду соответствия требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации и Федеральному закону от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ).  

Довод заявителя о необоснованной замене силикатного полнотелого утолщенного  кирпича марки М150 для кладки внутренних стен на двухпустотный силикатный кирпич  марки М200, был предметом исследования суда первой инстанции и правомерно  отклонен им в связи с наличием в материалах дела подтверждения проектировщика  (АНО «Архитектурная мастерская Абаляна») соответствия изменений, внесенных в  проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы  проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса  Российской Федерации от 19.05.2021 № 1 о допустимости применения двухпустотного  силикатного кирпича марки СУРПу-200/Р35/1,6 для кладки стен выше 6-го этажа,  подписанное проектной организацией (т. 9, л. д. 137–139).  

Согласно им внесенные изменения (относительно замены кирпича)  дополнительного прохождения государственной экспертизы (пункт 15 статьи 48, пункт  3.8 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации) не требуют, так как:  

- не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального  строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на  аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;  

- не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды,  требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к  безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности,  требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и  объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта; -  соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а  также результатам инженерных изысканий;  

- соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных  ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта  капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в  установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального  

строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации.  

В связи с этим экспертами сделаны выводы о том, что для кладки стен возможно  использование двухпустотного кирпича; замена кирпича согласована проектной  организацией и заказчиком; замена кирпича не требует прохождения повторной  государственной экспертизы проектной документации.  

То обстоятельство, что замена кирпича не требует прохождения повторной  государственной экспертизы проектной документации, подтверждено и письмом Центра  государственной экспертизы объектов Федеральной службы войск национальной гвардии  Российской Федерации от 19.03.2021 (т. 9, л. д. 114).  

Довод заявителя о том, что заказчиком не согласована замена кирпича, не  соответствует материалам дела.  

Так, в письме от 02.04.2021 № 20210402 подрядчик просил заказчика согласовать  замену кирпича, указав, что согласно паспорту кирпич СУрПУ-М200 улучшает  показатели стен, увеличивая их несущую способность, а также снижает общий вес здания  (вес одного кирпича меньше на 1 кг).  

В ответе от 08.04.2021 № 20/2084 управление сообщило об отсутствии  возражений против применения кирпича марки СУрПУ-М200 при устройстве внутренних  стен на объекте; данный ответ согласован проектировщиком.  

Из экспертного заключения следует, что при выезде на объект экспертами было  осуществлено механическое вскрытие наружных стен в более чем 30 местах по каждому  дому, ни в одном из мест не было обнаружено наличие двухпустотного кирпича, а  исполнительной документацией подтверждается, что лишь на 7 и 8 этаже во внутренних  несущих стенах частично применен двухпустотный кирпич.  

Довод заявителя о том, что размер установленных оконных блоков не  соответствуют проектной документации, опровергается пояснениями экспертов,  данными в судебных заседаниях 22.06.2023 и 04.09.2023, согласно которым, если  следовать проекту и установить окна по спецификации, то в последующем невозможно  будет выполнить работы по примыканию вентилируемого фасада к окнам; наружная часть  кирпичной кладки, примыкающая к окну и не закрытая утеплителем, приведет к  промерзанию откосов, потерям тепла и образованию плесени в квартирах.  

Примененная конфигурация окон согласована с заказчиком (т. 10, л. д. 116–127). 

Согласно подтверждению проектной организации (АНО «Архитектурная  мастерская Абаляна») изменения, внесенные в проектную документацию, соответствуют  требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

добавлены эскизы оконных блоков с указанием схем открывания (лист проектной  документации АС-11) (т. 9, л. д. 137–139).  

При этом в соответствии с актом проверки департамента от 08.07.2021 (т. 11, л. д.  53) нарушения, связанные с несогласованием изменений в проектную документацию по  марке кирпича и конфигурации окон, признаны устраненными в связи с их фактическим  согласованием.  

Ссылка заявителя на акт осмотра от 22.03.2023 (т. 10., л. д. 174), проведенный  управлением с участием ООО «Научно-производственное предприятие Мануфактура»,  согласно которому установленные подрядчиком окна требуют демонтажа, обоснованно  не принята судом первой инстанции, исходя из следующего.  

Пунктом 8.15 контракта установлена обязанность заказчика по составлению  рекламационного акта совместно с подрядчиком.  

Согласно пункту 8.16 контракта для участия в составлении рекламационного акта,  фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  подрядчик обязан в течение 2 дней с даты получения извещения от заказчика направить  своего представителя.  

Указанный порядок заказчиком не соблюден, об осмотре 22.03.2023 подрядчик не  извещался.  Кроме того, при описании недостатков выполненных работ по монтажу окон,  заказчиком не указано, ни каким образом проведены замеры установленных окон, ни на  основании каких параметров установлены зафиксированные недостатки в установке окон.  

Довод заявителя о том, что система дымоудаления выполнена подрядчиком с  нарушением требований проекта, мотивированный тем, что в соответствии с проектной  документацией подрядчик обязан был установить трубы заводского изготовления  диаметром 250 мм из нержавеющей кислотостойкой стали марки DIN 1.4404, толщиной  0,6 мм, системы ООО КХ «Балтвент», в то время как фактически подрядчиком  установлены трубы с толщиной металла 0,5 мм, также правомерно признан судом  необоснованным в силу следующего.  

В соответствии с проектной документацией монтаж дымоходов должен был  производиться не материалами ЗАО ХК «Балтвент», а по технологическим картам ЗАО  ХК «Балтвент», что подтверждается ответом управления от 21.06.2021 № 20/3438,  которым согласован монтаж системы дымоудаления производства ООО фирмы «Крафт»,  а также ответом АНО «Архитектурная мастерская Абаляна» о возможности применения  дымоходов производства ООО «Крафт» с установлением трубы толщиной металла 0,5  мм.  

Согласно подпункту «а» пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в описании  объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные  характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в  отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,  полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения  товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие  требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.  Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак, в том  числе, в случае сопровождение такого указания словами «или эквивалент».  

Таким образом, применение подрядчиком при выполнении работ дымоходов  производства фирмы «Крафт» не противоречит порядку проведения закупочной  процедуры, так как дымоходы ЗАО КХ «Балтвент» и ООО «Крафт» имеют аналогичные  характеристики, что заказчиком не опровергнуто.  

Более того, в соответствии с подтверждением соответствия изменений, внесенных  в проектную документацию, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного  Кодекса Российской Федерации от 19.05.2021 № 1, проектной организацией согласована  установка дымоходов производства ООО «Крафт», с установлением трубы с толщиной  металла 0,5 мм (т. 11, л. 

<

...>).  

Вопреки доводам апелляционной жалобы, представленные экспертные заключения,  соответствуют требованиям статей 82, 83 и 86 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, в заключении отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения, эксперты  надлежащим образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо  ложного заключения, их образование и квалификация проверены судом при назначении  экспертизы (определения от 06.06.2022, от 01.03.2023); документы о квалификации  представлены в материалы дела (в качестве приложения к ходатайству общества о  назначении экспертизы от 06.06.2022 (трудовые книжки и договоры, дипломы о высшем  образовании, удостоверения о повышении квалификации, уведомления о включении  сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и  архитектурно-строительного проектирования). При проведении экспертизы эксперты  руководствовались соответствующими нормативными документами, справочной и  методической литературой. Ответы экспертов на поставленные вопросы являются  определенными, понятными и не противоречивыми. Отводов экспертам ответчиком не  

заявлено, определения суда о приостановлении производства по делу в связи с  назначением экспертиз не обжаловано.  

Доводы заявителя относительно экспертного заключения сводится к несогласию с  выводами, сделанными квалифицированными специалистами, и касаются вопроса  специальных познаний. Допустимыми доказательствами выводы экспертизы ответчиком  не опровергнуты.  

В соответствии со статьей 7 Закона № 73-ФЗ, который распространяет свое  действие и на лиц, осуществляющих производство судебных экспертиз вне  государственных судебно-экспертных учреждений (статья 41), эксперт независим от  органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц,  заинтересованных в исходе дела, и дает заключение, основываясь на результатах  проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями, что  соответственно предполагает независимость в выборе методов, средств и методик  экспертного исследования, необходимых, с его точки зрения, для выяснения  поставленных вопросов и решения экспертных задач.  

Принцип независимости эксперта как субъекта процессуальных правоотношений  (часть 2 статьи 7 Закона № 73-ФЗ) предполагает его самостоятельность в выборе методов  проведения экспертного исследования.  

Оценка методики исследования, способов и приемов, примененных экспертами, не  является предметом судебного рассмотрения, поскольку определяется лицами,  проводящими исследование и обладающими специальными познаниями для этого.  

С учетом изложенного, основания для вывода о сомнительности или  противоречивости составленных исследований отсутствуют.  

В связи с этим судом первой инстанции правомерно отказано в ходатайстве  ответчика о назначении повторной экспертизы.  

С учетом выводов экспертиз, суд пришел к правильному выводу о том, что  стоимость фактически выполненных истцом работ по акту от 27.08.2021 № 8 (60 425 032  рублей 01 копеек) подлежит уменьшению на стоимость устранения некачественно  выполненных работ в перегородках на площади 432 кв. метров (369 637 рублей 85  копеек), а также на стоимость работ по завершению работ по устройству монтажных швов  смонтированных окон (744 136 рублей 70 копеек), в связи с чем задолженность составит  59 311 257 рублей 46 копеек (60 425 032 рублей 01 копеек – 744 136 рублей 70 копеек –  369 63 рублей 85 копеек).  

Истцом определенная судом стоимость выполненных работ не оспаривается. 

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований о взыскании с  общества необоснованно полученных средств в сумме 5 738 096 рублей 28 копеек (с  учетом НДС) (4 708 871 рубля 20 копеек в связи с неверным применением расценка при  устройстве перегородок из газосиликатных блоков + 495 484 рублей 32 копеек не  подтвержденные работы по устройству основания под сваебойную установку + 617 576  рублей 80 копеек необоснованный учет средств на временные здания и сооружения в  размере 1,1 %) + 473 109 рублей 52 копеек по пункту 26 сметы контракта в связи с тем,  что в актах не отминусована стоимость горячекатанной арматуры + 1 029 225 рублей 08  копеек в связи с завышением стоимости кирпича при кладке стен (разница между  стоимостью марки кирпича в смете «Кирпич силикатный полнотелый, утолщенный,  размером 250 х 120 х 88 мм, марка:100» и фактически примененной маркой кирпича при  кладке стен, учтенной в актах КС-2 «Кирпич силикатный полнотелый утолщенный,  размером 250 х 120 х 88 мм, марка:150» (т. 10, л. д. 21, т. 3, л. д. 23–24, окончательный  вариант встречного заявления после уточнения (протокол судебного заседания от  04.09.2023)), суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.  

В обоснование требования о неверно примененной расценке при устройстве  перегородок из газосиликатных блоков (4 708 871 рубль 20 копеек) управление ссылается  на то, что согласно проектной документации (пункт 12, лист 2 «Технические указания к  планам», том 3(9), альбом 2 (07035-6700-Д-Д-АС) Архитектурно-строительные решения  выше 0.000»), внутриквартирные перегородки изготавливаются из газосиликатных  бетонных блоков толщиной 100 мм, однако в локальном сметном расчете (ЛСР)  применена расценка на устройство перегородок из легкобетонных плит в 1 слой (8-04-00105 ТЕР2001 67 от п. 209 ЛСР) и в 2 слоя (8-04-001-07 ТЕР-2001 67 от 13.03.2015 – пункт  210 ЛСР); фактически перегородки установлены в соответствии с проектной  документацией – из газосиликатных блоков, что в связи с допущенной в ЛСР ошибкой  влечет переплату по контракту (в указанной части работы по актам формы КС-2 закрыты  подрядчиком и оплачены заказчиком в соответствии со сметным расчетом).  

В силу пункта 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2  статьи 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта является твердой и определяется на весь срок  исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской  Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и  максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о  закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается,  за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, в частности  статьей 95 названного закона.  

Согласно подпункту 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение  существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их  изменения по соглашению сторон, с учетом положений бюджетного законодательства  Российской Федерации пропорционально дополнительному количеству товара,  дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены  единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.  

Как указано в абзаце 15 пункта 12 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, с учетом положений  статьи 8, части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, увеличение объема работ по  государственному (муниципальному) контракту, в том числе, когда такое увеличение  превышает 10% от цены или объема, предусмотренных контрактом, допустимо  исключительно в случае, если их невыполнение грозит годности и прочности результата  выполняемой работы. К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком также  могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся  информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не  могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены,  поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или  продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь  предусмотренного контрактом результата.  

В данном случае заключением судебной экспертизы подтверждено выполнение  подрядчиком работ по установке внутриквартирных перегородок в полном соответствии с  проектной документацией, объем выполненных работ (предъявленный в актах КС-2) в  соответствии с заключением судебной экспертизы соответствует фактически  выполненному объему работ.  

Отклоняя ссылку управления на допущенную в ЛСР ошибку в определении  сметного норматива по указанным видам работ (по сравнению с проектной  документацией), суд указал, что сметные нормативы разработаны на основе принципа  усреднения, а для оценки проектного решения (при отсутствии прямых сметных  нормативов) могут применяться наиболее близкие по составу (т.н. «применительные»  нормы (расценки)), в связи с чем требования утвержденной проектной документации  (проектных технических и технологических решений, в том числе детализированных в  рабочей документации имеют приоритет над входящей в ее состав сметной (пункт 3  

письма Межрегиональная общественная организация по содействию развитию  строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков» в письме от 02.09.2019).  

Проектная и сметная документация по объектам прошли государственную  экспертизу, а цена контракта, исходя из пункта 2.1, является фиксированной (твердой).  

В данном случае работы по контракту выполнены подрядчиком в предусмотренном  им объеме, приняты заказчиком без претензий по объему, качеству, срокам и цене, а  допустимых доказательств, опровергающих объем работ, подтвержденный экспертизами,  управлением в материалы дела не представлено.  

Допущенные заказчиком при формировании цены контракта ошибки в применении  сметных расценок не свидетельствуют о невыполнении подрядчиком полного объема  работ, а потому не являются основанием для уменьшения согласованной контрактом  суммы при выполнении полного объема работ.  

Иной правовой подход влечет изменение условий договора в одностороннем  порядке, при том, что при известности подрядчику возможности такого изменения, он  вероятно, не стал бы заключать контракт (определение Верховного суда Российской  Федерации от 22.06.2017 по делу № 305-ЭС17-1863).  

Отказывая во взыскании встречного требования на сумму 495 484 рублей 32  копеек, обоснованное управлением как не подтвержденные работы по устройству  основания под сваебойную установку (исполнительная документация по устройству  основания (акты освидетельствования скрытых работ)) отсутствует), суд правомерно  руководствовался приложением В СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация  строительства СниП 12-01-2004, согласно которому по результатам выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в  соответствии с технологиями строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса,  контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других  работ, оформляются акты освидетельствования скрытых работ; в актах указывают:  наименование объекта капитального строительства, его адрес, наименование застройщика  (технического заказчика), наименование лица, осуществляющего строительство,  наименование лица, осуществившего подготовку проектной документации, наименование  лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие  освидетельствованию.  

По смыслу изложенного к скрытым относятся строительные работы по  возведению объектов капитального строительства, на которые накладываются  последующими работы.  

Примерный состав исполнительной документации на строительно-монтажные  работы по устройству свайных фундаментов из свай заводского изготовления установлен  Приложением Б.3 названного Свода правил, согласно которому к нему отнесены:  исполнительная схема планового и высотного положения голов свай после погружения;  сводная ведомость погруженных железобетонных свай; акты освидетельствования  скрытых работ на осмотр свай до погружения; акты освидетельствования скрытых работ  на погружение свай; акты освидетельствования скрытых работ на устройство сварного  соединения отдельных секций составных секций; акты освидетельствования скрытых  работ на антикоррозионную обработку сварного соединения отдельных секций составных  секций; акты освидетельствования ответственной конструкции «Свайный фундамент».  

Как следует из материалов дела, соответствующая исполнительная документация  по организации свайного поля подрядчиком представлена: исполнительная схема  планового и высотного положения голов свай после погружения; акты  освидетельствования скрытых работ на осмотр свай до погружения от 02.07.2020, от  30.07.2020, от 10.08.2020 № 1, 3, 5; акты освидетельствования скрытых работ на  погружение свай от 02.07.2020, от 30.07.2020, от 10.08.2020 № 2, 4, 6.  

Пунктом 13.1 контракта предусмотрено. что перечень работ, подлежащих  освидетельствованию, предоставляется заказчиком.  

Такой перечень был указан в письме управления от 29.09.2020 № 12/296. При  этом оформление и предоставление исполнительной документации осуществлено  подрядчиком в соответствии с этим перечнем. Такой вид работ как «Устройство  основания под сваебойную установку» в указанном перечне отсутствует, что заказчиком  не опровергнуто; разделом проектной документации к контракту, определяющим  перечень видов строительно-монтажных работ, ответственных конструкций и  инженерных коммуникаций, подлежащих освидетельствованию (пункт 7, 07035-67-Д- ПОС), составление исполнительной документации по указанному виду работ также не  предусмотрено.  

Согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 10.04.2013 № 2846- ИМ/12/ГС, пунктом 1.7  сборника «Сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН  81-05-012001) при соответствующих обоснованиях, предусмотренных проектом  организации строительства (ПОС), не запрещено указанные затраты дополнительно  включать в объектные (локальные) сметы.  

Разделом 8 ПОС предусмотрено использование для перемещений сваебойного  агрегата использование выровненного основания с уложенными дорожными плитами по  серии 3.503-17 - ПЛ 20.156 в количестве 30 шт.  

Факт устройства свайного поля управлением не оспаривается, а сама забивка свай  не возможна без использования сваебойной установки.  

В доказательство приобретения дорожных железобетонных плит для устройства  основания под сваебойную установку подрядчиком представлены универсально-передаточные документы от 29.09.2020, от 26.08.2020, от 25.08.2020, от 14.07.2020,  которые списаны на строительный объект по расходным накладным от 30.07.2020 № 235,  от 31.08.2020 № 274.  

Отклоняя встречное требование о взыскании с подрядчика 617 576 рублей 80  копеек (необоснованный учет средств на временные здания и сооружения в размере 1,1  %), суд первой инстанции правомерно сослался на пункт 1.1 ГСН-2001 Сборника  сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01- 2001, утвержденного постановлением Госстроя Российской Федерации от 07.05.2001 №  45, согласно которому к временным зданиям и сооружениям относятся специально  возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные,  складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые  для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников  строительства.  

Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений,  может определяться по нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на  строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-05-01- 2001), в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и  монтажных работ по итогам глав 1-7 (1-5) сводного сметного расчета и дополнительными  затратами, не учтенными сметными нормами.  

Требование о расшифровке выполненных работ и понесенных затратах при  строительстве временных зданий и сооружений, при расчетах за временные здания и  сооружения по процентной норме возможно только в случаях, когда это предусмотрено в  договоре подряда. Если в договоре подряда указанное требование отсутствует, требования  о предоставлении расшифровок неправомерны (письмо Росстроя от 21.07.2005 № АП- 3185/06).  

Согласно пункту 3.6 контракта при приемке выполненных работ не выделяются и  не обосновывается стоимость в цене конструктивных решений (элементов и (или)  комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее  

удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих,  перебазирование строительномонтажных организаций), и затрат на строительство  временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.  

Разделом 9 ПОС предусмотрено обоснование потребности во временных зданиях и  сооружениях. Доказательств того, что временные здания и сооружения размещались не в  соответствии с ПОС управлением не представлено.  

Согласно условиям контракта (пояснительная записка к сводному сметному  расчету) затраты на временные здания и сооружения приняты в размере 1,1 % (без  расшифровки их видов и стоимости), отдельная смета на временные и здания и  сооружения отсутствует.  

Данное обстоятельство подтверждено заключением судебной экспертизы, согласно  которому в актах КС-2 от 10.12.2020 № 1, 2, 3, 4, от 20.12.2020 № 5, 6 подрядчиком  учтены средства на возведение временных зданий и сооружений в размере 1,1 % от  выполненного объема работ в полном соответствии с требованиями ГСН- 2001. Сборник  сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05- 01- 2001 (заключение дополнительной судебной экспертизы, лист 17).  

Отклоняя встречное требование о взыскании 473 109 рублей 52 копеек (с НДС),  мотивированное тем, что по пункту 26 сметы контракта не отминусована горячекатаная  арматурная сталь класса A-I, А-Н, А- III, суд указал, что оно не соответствует  действительности, так как в акте выполненных работ КС-2 № 8 от 27.08.2021 (по  указанному акту удовлетворены первоначальные исковые требования общества)  отминусована горячекатаная арматурная сталь класса A-I, А-П, А- III на сумму 402 304  рублей 01 копейка (без НДС) (т. 3, л. д. 140).  

Встречное требование о взыскании 1 029 225 рублей 08 копеек, представляющего  собой разницу вследствие завышения стоимости кирпича при кладке стен (разница  между стоимостью марки кирпича в смете и фактически примененной маркой кирпича  при кладке стен, учтенной в актах КС-2 – расчет т. 10, л. д. 21), также обоснованно  признано судом неправомерным, поскольку управлением не учтено заключенное  сторонами дополнительное соглашение к контракту от 14.12.2020 № 5 (т. 9, л. д. 162–163),  которым согласована замена «Кирпича керамического одинарного размером 250 х 120 х  88 мм, марка:100» на «Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250 х 120  х 88 мм, марка:150». При этом, как следует из актов КС-2, подрядчиком применена  расценка, указанная в дополнительном соглашении, что соответствует смете к контракту  (приложение № 6 – т. 9, л. д. 164–167), в которой применена расценка «кладка стен из  керамического кирпича», а в составе самой расценки приведен порядок расчета:  

отминусован керамический кирпич большей стоимостью (исключен из расчетов) и  добавлен силикатный кирпич с меньшей стоимостью (включен в расчет).  

Данное обстоятельство подтверждено заключением судебной дополнительной  экспертизы (лист 17).  

Решение суда в части отказа в удовлетворении первоначального иска и в части  удовлетворения встречного иска обществом не оспаривается, а права управления  судебный акт в названных частях не нарушает, ввиду чего не является предметом  апелляционного пересмотра применительно к части 5 статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, изложенных в  пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020   № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при  рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции».  

Доводы апелляционной жалобы повторяют позицию, которая была известна суду  первой инстанции и получила надлежащую оценку в судебном акте; указанные доводы  направлены на переоценку выводов суда. Рассмотрев спор повторно, апелляционная  инстанция оснований для такой переоценки не нашла.  

Таким образом, оснований для отмены или изменения решения суда первой  инстанции по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.  

Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену судебного акта (часть 4  статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не  установлено.  

В соответствии с частью 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции  указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в  связи с подачей апелляционной жалобы.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Поскольку заявитель в силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской  Федерации освобожден от уплаты госпошлины, последняя взысканию не подлежит.  

Согласно абзацу 7 пункта 27 постановления Пленума № 12 по результатам  рассмотрения апелляционной жалобы, поданной на часть решения суда первой инстанции,  арбитражный суд апелляционной инстанции выносит судебный акт, в резолютивной части  которого указывает выводы относительно обжалованной части судебного акта. Выводы,  

касающиеся необжалованной части судебного акта, в резолютивной части судебного акта  не указываются.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 269, статьей  271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый  арбитражный апелляционный суд   

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Смоленской области от 18.09.2023 по делу  

 № А62-10160/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в  течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В  соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.  

Председательствующий Л.А. Капустина  

Судьи М.М. Дайнеко   Е.В. Мосина