АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-13718/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

 

05 декабря 2023 г.                                                                                                  г. Кемерово

Дата объявления резолютивной части решения: 28 ноября 2023 года    

Дата изготовления судебного акта в полном объёме: 05 декабря 2023 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Шикина Г.М.

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), село Красное, Кемеровская область – Кузбасс,

к Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс,

об изменении условий концессионного соглашения № 4 от 12.05.2016,

третьи лица: Региональная энергетическая комиссия Кузбасса (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово, 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово,

при участии: 

от истца (посредством веб-конференции): ФИО2, представитель, доверенность от 02.05.2023, паспорт, диплом;

от ответчика: ФИО3, председатель КУМИ, паспорт;

от третьего лица УФАС: ФИО4, представитель, доверенность от 03.05.2023, удостоверение, диплом, ФИО5, представитель, доверенность от 29.09.2023, паспорт,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа об обязании ответчика привести текст концессионного соглашения от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района в соответствие с утвержденной постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 125 инвестиционной программой ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на 2016-2025 годы, а именно пункты 4.2., 4.14. и приложение № 2 концессионного соглашения от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 

 Правовое обоснование иска: статьи 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Определением суда от 01.08.2023 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 12.09.2023.

Определением суда от 12.09.2023 дело было признано подготовленным к рассмотрению по существу, судебное разбирательство назначено в судебном заседании 28.09.2023, затем судебное заседание неоднократно откладывалось, в том числе, по ходатайствам сторон.

26.09.2023 истец уточнил требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и просил обязать Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа привести текст концессионного соглашения от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района в соответствие с утвержденной постановлением от 02.09.2016 № 125 РЭК Кемеровской области инвестиционной программой ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на 2016-2025 годы, а именно пункт 4.14. и приложение № 2 концессионного соглашения от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

В силу части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Уточнение принято судом к рассмотрению.

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объёме, представители ответчиков против удовлетворения уточнённых исковых требований не возражали.

Рассмотрев и оценив представленные по делу доказательства, заслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения исковых требований, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 12 ГК РФ гражданские права защищаются способами, предусмотренными законом. Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения.

Между Муниципальным образованием Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и ООО «Коммунальщик» заключено концессионное соглашение от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района  (далее – Соглашение).

19.07.2023 истцом в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа было направлено письмо             № 70 с просьбой привести текст Соглашения в соответствие с утвержденной постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 125 инвестиционной программой ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2025 годы, а именно пункты 4.2., 4.14. и приложение № 2 Соглашения.

24.07.2023 от Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа был получен отказ со ссылкой на письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области № 11/1851.

03.03.2021 Кемеровским УФАС России было принято решение отказать в согласовании изменений условий концессионного соглашения, связанных с уменьшением размера расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленного в концессионном соглашения б/н от 12.05.2016, заключенного между муниципальным образованием Ленинск-Кузнецкий муниципальный район (округ) в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района (округа) и                     ООО «Коммунальщик» в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ленинск-Кузнецкого муниципального района (округа).

Частью 1 статьи 43 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях) установлено, что для изменения условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Основания, по которым могут быть изменены условия концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также порядок согласования антимонопольным органом таких изменений утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения» (далее — Правила № 368).

Перечень оснований для отказа в согласовании изменений условий концессионного соглашения установлен пунктом 14 Правил № 368.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Правил № 368 антимонопольный орган отказывает в согласовании изменений условий концессионного соглашения, в случае если размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленный в концессионном соглашении, подлежит уменьшению.

Согласно информации, предоставленной КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, внесение изменений в концессионное соглашение от 12.05.2016 обусловлено следующими обстоятельствами.

В соответствии с письмом Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015  № См-2-12/3343-03 для участия в конкурсном отборе на получение права владения и пользования муниципальными котельными Ленинск-Кузнецкого муниципального района в адрес ООО «Коммунальщик» были направлены долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 2016 – 2025 годы. В разделе «расходы на реализацию» инвестиционной программы ООО «Коммунальщик» на 2016 – 2025 годы, являющейся приложением № 2 к концессионному соглашению б/н от 12.05.2016, предусмотрено финансирование за счет источников собственных средств, которое составляет 22681,1 тыс. руб.

Установлено, что после заключения концессионного соглашения от 12.05.2016 постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 125 была утверждена инвестиционная программа ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2025 годы. В соответствии с утвержденной Региональной энергетической комиссией Кемеровской области инвестиционной программой ООО «Коммунальщик» объемы и источники привлекаемых концессионером средств установлены в размере 10 667,0 тыс. руб.

Исходя из изложенного, внесение изменений в концессионное соглашение б/н от 12.05.2016 связанно с изменением объемов привлекаемых концессионером средств, а именно: изменением расходов концессионера на реализацию инвестиционной программы с 22 681,1 тыс. руб. до 10 667 тыс. руб.

Таким образом, изменение существенных условий данного концессионного соглашения обусловлено уменьшением размера расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленного в концессионном соглашении б/н от 12.05.2016.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях в случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Согласно части 1 статьи 1 Закона о концессионных соглашениях целями настоящего Федерального закона являются привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

Согласно части 1 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях по концессионному соглашению одна сторона (концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Частью 9 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях предусмотрена возможность предоставления концедентом во владение и пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее – иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество).

В этом случае концессионным соглашением устанавливаются состав и описание такого имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок возврата такого имущества концеденту при прекращении концессионного соглашения.

Концессионным соглашением могут устанавливаться обязательства концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также по осуществлению за свой счет страхования риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения.

В соответствии с частью 11 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях в случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях, в том числе объекты водоснабжения и водоотведения, подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение концессионных соглашений осуществляются с учетом особенностей, установленных главой 4 Закона о концессионных соглашениях.

В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона о концессионных соглашениях для изменения условий концессионного соглашения, объектом которого являются, в том числе объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации за исключением случаев, когда такое согласие не требуется.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368 утверждены Правила предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, устанавливающие порядок получения согласия антимонопольного органа для изменения условий концессионного соглашения, также основания для согласования либо отказа в согласовании внесения изменений в концессионное соглашение.

Согласно пункту 12 Правил № 368 по результатам рассмотрения заявления с приложенными к нему документами антимонопольный орган принимает одно из следующих решений:

а) о согласовании изменений условий концессионного соглашения;

б) об отказе в согласовании изменений условий концессионного соглашения с указанием причин такого отказа.

Пунктом 14 Правил № 368 установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым антимонопольным органом может быть отказано в согласовании изменений условий концессионного соглашения.

Согласно подпункту "г" пункта 2 Правил № 368, одним из оснований согласования изменений условий концессионного соглашения является внесение в установленном порядке изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в связи с которыми стороны оказываются не способными выполнить принятые обязательства (в случае если предметом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем).

Как следует из пояснений Региональной энергетической комиссии Кузбасса, представленных в материалы дела, в 2015 году РЭК Кузбасса письмом от 01.12.2015                  № См-2-12/3343-03 для подготовки конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района направила долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

В приложении 3 к письму была направлена Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по имуществу, участвующему в конкурсе на отпуск тепловой энергии в 2016 – 2025 годах.

Среди параметров, указанных в строке 25 Сводной информации, указаны расходы на инвестиционную программу с разбивкой по годам в общей сумме 10 667,0 тыс. руб.

Таким образом, инвестиционная программа ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2025 годы, утвержденная постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 125, полностью соответствует согласованным долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

При таких обстоятельствах суд, исходя из того, что истцом нормативно обоснованы и документально подтверждены заявленные требования, находит их подлежащими удовлетворению.

 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс, привести текст концессионного соглашения от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района в соответствие с утвержденной постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.09.2016 № 125 инвестиционной программой ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2025 годы, а именно:

- пункт 4.14. соглашения изложить в следующей редакции:

«4.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Соглашения.

Предельный размер расходов на реконструкцию и (или) модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 10667 тыс. рублей с НДС.»;

- приложение № 2 к концессионному соглашению от 12.05.2016 № 4 в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района изложить в редакции в следующей редакции:

 

«Приложение № 2 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 12.05.2016 № 4

 «Инвестиционная программа ООО «Коммунальщик» в сфере теплоснабжения на  2016-2025 годы

 

№п/п

Наименованиемероприятий

Обоснование необходимости(цель реализации)

Описание и место расположенияобъекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименова-ние показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед.изм.

Значение показателя

Всего

Профинансированок 2016

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

в т.ч. за счет платыза подключение

до реализации мероприя-тия

после реализации мероприятия

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

Всего по группе 1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

Всего по группе 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Замена насоса Wilo IL 50/210-11/2

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...> Октября, 3

мощность

кВт/ч

5,5

5,5

2020

2020

140

0

0

0

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2

Реконструкция с заменой котлов КВр-0,6 3 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...> Октября, 3

Производительность

м3/ч

0,6

0,6

2022

2025

2060

0

0

0

0

0

0

0

200

1000

824

36

0

0

3.2.3

Установка узлов учета тепловой энергии

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...> Октября, 3

Учет тепловой энергии

шт.

0

1

2016

2016

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.4

Замена насоса 1К8/18 1 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная д/сада, 

<

...>

мощность

кВт/ч

1,2

1,2

2016

2017

64

0

20

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.5

Реконструкция с заменой котлов КВр-0,6 3 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная д/сада, 

<

...>

мощность

м3/ч

0,6

0,6

2021

2022

2060

0

0

0

0

0

0

1260

800

0

0

0

0

0

3.2.6

Установка узлов учета тепловой энергии

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная д/сада, 

<

...>

Учет тепловой энергии

шт.

0

1

2017

2017

200

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.7

Реконструкция с заменой котлов КВр-0,8 3 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Центральная котельная, 

<

...>

мощность

Гкал/ч

0,8

0,8

2017

2019

1865

0

0

9

1388

468

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.8

Замена насосной группы (К65-50-160) 1 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Центральная котельная, 

<

...>

мощность

кВт/ч

3,6

3,6

2020

2021

66

0

0

0

0

0

16

50

0

0

0

0

0

0

3.2.9

Замена насосной группы (К100-80-160) 1шт

Увеличение эффективности работы котельной

Центральная котельная, 

<

...>

мощность

кВт/ч

11,9

11,9

2021

2021

90

0

0

0

0

0

0

90

0

0

0

0

0

0

3.2.10

Установка электрогенератора 1 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Центральная котельная, 

<

...>

мощность

кВт/ч

0

50

2017

2017

1000

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.11

Установка электрогенератора 1 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...>

мощность

кВт/ч

0

3

2016

2016

80

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.12

Установка ХВО "Комплексон-6" 1 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...>

Производительность

м3/ч

0

10

2025

2025

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

3.2.13

Замена насоса Wilo PH-400e 2 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...>

мощность

кВт/ч

0,8

0,8

2025

2025

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

3.2.14

Реконструкция с заменой котлов КВр-0,25 3 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...>

Производительность

Гкал/ч

0,25

0,25

2019

2020

1000

0

0

0

0

756

244

0

0

0

0

0

0

0

3.2.15

Установка узлов учета тепловой энергии

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная школы, 

<

...>

Учет тепловой энергии

шт

0

1

2025

2025

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

3.2.16

Замена насоса Grundfos TP32-38/2 2шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная коррекционной школы, 

<

...>

мощность

кВт/ч

3

3

2024

2025

352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

176

0

0

3.2.17

Реконструкция с заменой котлов КВр-0,4К 2 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная коррекционной школы, 

<

...>

Производительность

Гкал/ч

0,4

0,4

2020

2020

1000

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

3.2.18

Установка электрогенератора (до 5 кВт) 1 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная коррекционной школы, 

<

...>

мощность

кВт/ч

0

2

2025

2025

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

3.2.19

Установка ХВО "Комплексон-6" 1 шт

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная коррекционной школы, 

<

...>

Производительность

м3/ч

0

10

2025

2025

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

3.2.20

Установка узлов учета тепловой энергии

Увеличение эффективности работы котельной

Котельная коррекционной школы, 

<

...>

Учет тепловой энергии

шт

0

1

2025

2025

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

Всего по группе 3.

10667

0

300

1253

1388

1224

1400

1400

1000

1000

1000

702

0

0

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Всего по группе 5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по программе

10667

0

300

1253

1388

1224

1400

1400

1000

1000

1000

702

0

0

».

 

Взыскать с Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), село Красное, Кемеровская область – Кузбасс, 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                                                       Г.М. Шикин