АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-8515/2022

г. Барнаул

04 сентября 2023 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  средств аудиозаписи и системы веб-конференции, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск,  

к государственному унитарному предприятию дорожного хозяйства Алтайского  края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г.Бийск,  

об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному  контракту № Ф.2019.00001 от 04.06.2019, выявленные в пределах гарантийного срока  эксплуатации дворовых территорий в г. Бийске,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора,  

общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г. Бийск,  

общества с ограниченной ответственностью «БийскДорСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск,  

общества с ограниченной ответственностью «Вираж» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г. Бийск,  

общества с ограниченной ответственностью «Подряд» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г. Бийск,  

при участии в судебном заседании:  

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 13.05.2022,  от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом,  

от третьих лиц – представитель ФИО3 по доверенности от 09.01.2023 (от  

ООО «Дорожник»), не явились, извещены надлежащим образом (от иных лиц).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

обязать государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского  края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» безвозмездно устранить  недостатки выполненных работ по муниципальному контракту № Ф.2017.282958 от  18.07.2021, выявленные в пределах гарантийного срока эксплуатации дворовых  территорий в г. Бийске не позднее 30 дней с момента вступления решения суда в  законную силу, путем выполнения работ, соответствующих строительным нормам и  правилам, выполнив следующие виды работ:  

1. ул. Декабристов, 12/2: 

- Демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) - 1750,0 м2.;  

- Устройство нового асфальтобетонного покрытия, с уклонами, обеспечивающими  отвод воды с проезжей части, в соответствии с требованиями муниципального контракта и  нормативной документации - 1750,0 м2.  

2. ул. Иртышская, 63: 

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  цементно песчаным раствором - 28 шт.;  

- Заполнение швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором - 178  шт.;  

- Демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) - 906,0 м2.;  

- Устройство нового асфальтобетонного покрытия, с уклонами, обеспечивающими  отвод воды с проезжей части, в соответствии с требованиями муниципального контракта и  нормативной документации - 906,0 м2.  

3. пер. Красноярский, 30/5: 

- Заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой - 42  шт.;  

- Ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой - 82,3 м.;  

- Выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия с устройством уклонов  обеспечивающих отвод воды с проезжей части (фрезеровка, нанесение выравнивающего  слоя асфальтобетона, в случае повреждения бортового камня осуществить его замену с  заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно  требований муниципального контракта и нормативной документации - 112,6 м2.;  

- Восстановить асфальтобетонное покрытие в месте вырубок для проведения  лабораторных исследований.  

4. ул. В. Короленко, 24: 

- Демонтаж бортового камня с сохранением его целостности (в случае повреждения  бортового камня осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями  цементно-песчаным раствором) - 6 шт.;  

- Монтаж бортового камня с соблюдением требований муниципального контракта  и нормативной документации - 6 шт.;  

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  цементно-песчаным раствором - 25 шт.;  

- Заполнение швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором - 287  шт.;  

- Демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) - 1111,5м2.;  

- Устройство нового асфальтобетонного покрытия, с уклонами, обеспечивающими  отвод воды с проезжей части, в соответствии с требованиями муниципального контракта и  нормативной документации - 1111,5 м2.  

5. ул. Васильева, 40: 

- Заполнение швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором -71  шт.;  

- Демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) - 311,66 м2.;  

- Устройство нового асфальтобетонного покрытия, с уклонами, обеспечивающими  

отвод воды с проезжей части, в соответствии с требованиями муниципального контракта и  

нормативной документации - 311,66 м2. 6. ул. В. Короленко, 43: 

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  

цементно-песчаным раствором - 16 шт.; 

- Заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой - 218  

шт.; 

- Ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой - 41,4 м.;  - Ремонт сопряжения асфальтобетонного покрытия с расшивкой шва - 18,3 м.;  

- Выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия с устройством уклонов  

обеспечивающих отвод воды с проезжей части (фрезеровка, нанесение выравнивающего  

слоя асфальтобетона, в случае повреждения бортового камня осуществить его замену с  

заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно  

требований муниципального контракта и нормативной документации - 47,15 м2.;  

- Восстановить асфальтобетонное покрытие в месте вырубок для проведения  

лабораторных исследований. 7. ул. В. Короленко, 47: 

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  

цементно-песчаным раствором - 4 шт.; 

- Заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой - 140  

шт.; 

- Ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой - 61.2 м.;  - Ремонт сопряжения асфальтобетонного покрытия с расшивкой шва - 41.6 м.;  

- Выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия с устройством уклонов  

обеспечивающих отвод воды с проезжей части (фрезеровка, нанесение выравнивающего  

слоя асфальтобетона, в случае повреждения бортового камня осуществить его замену с  

заполнением швов между бортовыми камнями цементно¬песчаным раствором) согласно  

требований муниципального контракта и нормативной документации - 24,94 м2.;  

- Восстановить асфальтобетонное покрытие в месте вырубок для проведения  

лабораторных исследований. 8. ул. В. Короленко, 49: 

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  

цементно-песчаным раствором - 4 шт.; 

- Заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 79 шт.:  

- Ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой - 10,1 м.;  - Ремонт сопряжения асфальтобетонного покрытия с расшивкой шва - 19,8 м.;  

- Выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия с устройством уклонов  обеспечивающих отвод воды с проезжей части (фрезеровка, нанесение выравнивающего  слоя асфальтобетона, в случае повреждения бортового камня осуществить его замену с  заполнением швов между бортовыми камнями цементно¬песчаным раствором) согласно  требований муниципального контракта и нормативной документации - 61,16 м2.;  

- Восстановить асфальтобетонное покрытие в месте вырубок для проведения  лабораторных исследований.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» в пользу  муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства,  благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» 542 000 руб. в  возмещение расходов по оплате за проведение экспертизы.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» в доход  федерального бюджета Российской Федерации 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.Н. Прохоров 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 8:30:00

 Кому выдана Прохоров Василий Николаевич