Именем Российской Федерации

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041 Россия, 

<

...>

тел. 

<

***>, E-mail: info@tula.arbitr.ru, http://www.tula.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А68-12428/2018

город Тула

10 января 2019 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Е.Н. Глазковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

МУ «Городская Служба Единого Заказчика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО «Строительная компания «ДОРСТРОЙ-М» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании устранить недостатки 

в заседании участвовали:  от истца: ФИО2 – по дов. от 03.10.2018,

         от ответчика: не явился, извещен в порядке ст. 123 АПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

МУ «Городская Служба Единого Заказчика» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к ООО «Строительная компания «ДорСтрой-М» об обязании в срок до 01 мая 2019 года устранить недостатки, возникшие в гарантийный период, а именно: 

- устранить выкрашивание резиновой крошки на резиновом покрытии баскетбольной площадки;

- устранить трещины на асфальтовом покрытии с торца школы S=15м2/20м2;

- произвести ремонт ограждения (1 секция) путем сварки.

Изучив материалы дела, выслушав мнение истца, суд установил, что по результатам аукциона, проведенного с соблюдением требований  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МУ «Городская служба единого заказчика» (заказчик - истец) и ООО «СК «ДОРСТРОЙ-М» (подрядчик - ответчик) заключили контракт от 09.08.2016 № Ф.2016.204048,  на выполнение работ по благоустройству школьной территории в соответствии с п. 1.1 которого заказчик, согласно распоряжению Правительства Тульской области №251-р от 14.04.2016 «Об утверждении распределения субсидий муниципальному образованию город Тула на реализацию проекта «Народный бюджет» из бюджета Тульской области и приказу Управления по благоустройству администрации города Тулы от 12.02.2016 № 1/4-п «Об утверждении муниципальных адресных перечней на 2016 год муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, в установленные п. 1.3 настоящего контракта сроки, выполнить работы по благоустройству школьной территории; благоустройству территории школы - устройство резинового покрытия; благоустройству школьной территории - ограждение; благоустройству школьной территории - Малые архитектурные формы МАФ; благоустройству школьной территории - озеленение, по адресу: 

<

...>, в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2), а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом (л.д. 37-46).

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта (п. 1.3 контракта).

Цена контракта составляет 9 999 965 руб. 25 коп., в том числе НДС 18% - 1 525 418 руб. 43 коп. (п. 2.1 контракта).

Работы по контракту выполнены, сданы ответчиком, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат (л.д. 47-69).

Согласно п. 8.1. контракта подрядчик гарантирует заказчику эксплуатацию объекта без каких-либо недостатков на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается:

- асфальтирование, устройство резинового покрытия – 3 года;

- на спортивное оборудование и малые архитектурные формы (МАФ) – 5 лет, с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и акта комиссионной приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантия на выполненные работы по озеленению составляет 1 год.

Гарантии качества распространяются на все материалы и все работы, выполненные подрядчиком по контракту на 100%.

Согласно п. 8.2 контракта, если  в  период  срока  гарантийной  эксплуатации  объекта, обнаружатся недостатки, вызванные результатом некачественного выполнения Работ (использование некачественных материалов). Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 дня со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения обнаруженных недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков заказчик составляет акт в одностороннем порядке (п. 8.3. контракта).

Истец 11.05.2018 направил уведомление  № 414 от 10.05.2018 о вызове представителя подрядчика для осмотра объекта работ (л.д. 70-72).

Комиссионным обследованием 01.06.2018 в составе инженеров МУ «ГСЕЗ», директора МБОУ ЦО №8, представителя ООО «СК «ДОРСТРОЙ-М» установлено, что на баскетбольной площадке на резиновом покрытии имеет место выкрашивание резиновой крошки, частично резиновое покрытие отсутствует; в местах сварки необходим ремонт ограждения (1 секция); на асфальтовом покрытии имеются трещины (л.д. 73).

МУ «ГСЕЗ» направило ООО «СК «ДОРСТРОЙ-М» претензию №550 от 05.06.2018 с требованием в срок до 01.07.2018 устранить вышеуказанные недостатки (л.д. 74-76). 

Письмом от 09.07.2018 № 09 ООО «СК «ДОРСТРОЙ-М» уведомило МУ «ГСЕЗ» об устранении недостатков по резиновому покрытию и ремонту ограждения 1 секции в местах сварки, а так же указало, что недостатки по асфальтовому покрытию будут устранены до конца августа 2018 года (л.д. 77).

Истец 19.09.2018 направил уведомление  № б/н от 18.09.2018 о вызове представителя подрядчика для осмотра объекта работ (л.д. 78-79).

Комиссионным обследованием 08.10.2018 в составе инженеров МУ «ГСЕЗ», представителя ГУ администрации г. Тулы по Советскому территориальному округу, директора МБОУ ЦО №8 (представитель ООО «СК «ДОРСТРОЙ-М» на осмотр не явился), установлено, что подрядчиком не полностью устранены недостатки (л.д. 80). А именно, комиссией выявлены трещины на асфальтовом покрытии, выкрашивание (нарушение целостности) резинового покрытия баскетбольного поля, нарушение сварочных соединений (отошла сварка).

Недостатки не устранены, что послужило основанием для обращения в суд с иском.

Ответчик отзыв на иск с изложением доводов в подтверждение своей позиции по существу заявленного требования не представил, извещен надлежащим образом по месту регистрации и точки поставки в порядке ст.123 АПК РФ. Определение возвращено с отметкой «истек срок хранения» (л.д. 93-94).

Согласно пункту 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Если лицу, направляющему сообщение, известен адрес фактического места жительства гражданина, сообщение может быть направлено по такому адресу.

Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме (статья 10 ГК РФ).

При таких обстоятельствах ответчик считается извещенным надлежащим образом, аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях АС Центрального округа от 28.09.2012 по делу №А68-41/12, АС Северо-Западного округа от 26.11.2015 по делу №А56-6609/15, АС Дальневосточного округа от 25.02.2016 по делу № А59-1014/15.

Дело рассмотрено в соответствии со ст.156 АПК РФ по имеющимся в нем доказательствам, представленным истцом.

При вынесении решения суд исходит из того, что в соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст.310 ГК РФ).

На основании ст. 307 ГК РФ обязательство у ответчика перед истцом возникло в силу договора подряда, дающего кредитору право требовать от должника исполнения обязательства.

В силу п.1 ст. 702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Судом установлен и материалами дела подтвержден факт выполнения ответчиком работ, которые были приняты истцом без замечаний, возражений и оплачены.

В соответствии со статьями 720, 753 ГК РФ принятие заказчиком результата выполненных работ является обязанностью заказчика. При этом сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Истец, ссылается на наличие недостатков, возникших после приемки выполненных работ, в гарантийный период.

Согласно ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Подрядчик в силу п. 1 ст. 754 ГК РФ несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

В силу ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, бремя доказывания причин возникновения недостатков в гарантийный период лежит на Подрядчике.

Взяв на себя гарантийные обязательства на выполненные работы:

- асфальтирование, устройство резинового покрытия – 3 года;

- на спортивное оборудование и малые архитектурные формы (МАФ) – 5 лет, с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и акта комиссионной приемки объекта в эксплуатацию, ответчик как подрядчик в силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие вышеуказанных причин.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства подтверждающие, что выявленные истцом дефекты произошли по причинам, указанным в ст. 755 ГК РФ. Истец выполнил все необходимые требования, которые предусмотрены контрактами, извещал подрядчика о необходимости устранить недостатки выполненных работ. Недостатки подтверждаются актами комиссионного обследования от 01.06.2018 и от 08.10.2018 (л.д. 73, 80).

Согласно ч. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что представленные истцом доказательства позволяют установить наличие совокупности всех необходимых условий для возложения  на  ответчика обязанности – устранить недостатки, возникшие в гарантийный период.

Поэтому суд удовлетворяет исковые требования.

Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, суд взыскивает с ответчика в пользу истца госпошлину в сумме 6 000 руб., уплаченную им при подаче иска платежными поручениями от 16.01.2018 № 10 в сумме 2 000 руб. от 06.11.2018 № 1148 в сумме 4 000 руб. (л.д. 8, 84).

Руководствуясь ст.ст. 110, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «Строительная компания «ДОРСТРОЙ-М» не позднее 01 мая 2019 года устранить недостатки, возникшие в гарантийный период, а именно:

- устранить выкрашивание резиновой крошки на резиновом покрытии баскетбольной площадки;

- устранить трещины на асфальтовом покрытии с торца школы S= 15м2/20м2;

- произвести ремонт ограждения (1 секция) путем сварки.

Взыскать с ООО «Строительная компания «ДОРСТРОЙ-М» в пользу МУ «Городская Служба Единого Заказчика» 6 000 руб.  в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Тульской области.

  Судья   Е.Н.Глазкова