/

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-12201/2018

11 июля 2018 года

г. Санкт-Петербург

 

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

С.В. Изотова,

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия «ЭКРА» на решение от 23.03.2018 по делу № А56-12201/2018 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Виноградова Л.В.), рассмотренному в порядке упрощенного производства,

по иску:

публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А; ОГРН 1027700004012, ИНН 7702080289)

к обществу с ограниченной ответственностью научно-производственному предприятию «ЭКРА» (428020, Чувашская Республика, Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 3, пом. 541; ОГРН 1022101135726, ИНН 2126001172)

о взыскании неустойки,

установил:

публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – истец, Общество) в соответствии с пунктом 13.2 договора обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью научно-производственному предприятию «ЭКРА» (далее -  ответчик, Предприятие) о взыскании 161 458 руб. 75 коп. неустойки. 

Решением от 23.03.2018, принятым путем подписания судьей резолютивной части, исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскано 161 458 руб. неустойки по договору от 12.09.2014 № 201422783/20131013-172, 5 844 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просит решение отменить, уменьшить размер взыскиваемой неустойки до 39 889 руб. 83 коп.

В отзыве на апелляционную жалобу Общество полагает решение законным и обоснованным, против удовлетворения апелляционной жалобы возражает, указывает, что ответчик в апелляционной жалобы ссылается на поставку товара по спецификациям № 1, 2, в то время как истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки оборудования по спецификациям № 3, 4, доводы Предприятия учтены Обществом при расчете неустойки; довод ответчика о том, что судом первой инстанции вынесено решение без учета его заявления об уменьшении неустойки, не подтверждается материалами дела; условие о размере неустойки согласовано сторонами договора без каких-либо возражений; ответчиком не представлены доказательства несоразмерности неустойки либо доказательства того, что взыскание неустойки в заявленном размере может привести к получению истцом необоснованной выгоды.

В силу части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) апелляционная жалоба на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между Обществом (генподрядчик) и Предприятием (субподрядчик) 12.09.2014 заключен договор № 201422783/20131013-172, в соответствии с которым генподрядчик привлекает субподрядчика к выполнению комплекса работ, необходимых для строительства объекта – второй очереди строительства Благовещенской ТЭЦ электрической мощностью не менее 120 МВт, тепловой мощностью 188 Гкал/час и увеличивающая электрическую мощность до 400 МВт, тепловую мощность до 1 005 Гкал/час действующей Благовещенской ТЭЦ, включающей в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, являющееся совокупностью опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В силу пункта 14.1 договора в сроки и в порядке, предусмотренные договором, субподрядчик обязался выполнить или обеспечить выполнение всего объема работ в соответствии с технической документацией, договором и приложениями к нему, и передать генподрядчику оборудование, документацию и оказать сопутствующие услуги и выполнить сопутствующие работы, а генподрядчик обязался принять результат работ и уплатить договорную цену в порядке, предусмотренном договором.

Пунктом 14.2 договора объем работ (поставка, работы и услуги по договору), без ограничения приведенным перечнем, включает в себя: изготовление и поставку на объект  оборудования защит РЗА, именуемого в дальнейшем оборудование (указанное в приложениях № 1, 2 к договору), включая запасные и быстроизнашиваемые части и материалы на время  пуска и ввода  объекта в эксплуатацию и на период гарантийного срока по номенклатуре и в количестве в соответствии с приложением № 6 к договору; оказание услуг по шеф-наладке оборудования, а также оказание услуг по инструктажу и обучению персонала заказчика; обеспечение выполнения работ, предусмотренных приложением № 3, в сроки, установленные договором, программой выполнения работ и комплексным сетевым графиком и в соответствии с положениями договора.

Согласно пункту 14.3 договора общее количество оборудования, его наименование и стоимость указаны в спецификациях, приведенных в приложениях № 1, 2.

В силу пункта 14.6 договора оборудование изготавливается и поставляется поставщиком для оснащения второй очереди Благовещенской ТЭЦ, расположенной по адресу: 675000, Россия, Амурская обл., Благовещенск.

Из пункта 14.7 договора следует, что порядок, сроки и условия оказания услуг описаны в приложении № 3 к договору.

В соответствии с пунктом 14.9 договора поставка оборудования осуществляется путем доставки оборудования в место поставки на условиях, изложенных в статьях 26, 27, 28 и 29 договора; риск случайной гибели и повреждения оборудования переходит к генподрядчику с даты фактической передачи оборудования, указанной в товарно-транспортной накладной, а моментом исполнения обязанности по поставке считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки оборудования.

Согласно пункту 14.10 договора место поставки оборудования: строительная площадка Благовещенской ТЭЦ (Россия, Амурская обл., Благовещенск); уточненный адрес места поставки будет сообщен генподрядчиком субподрядчику письменным уведомлением.

В силу пункта 14.12 договора сроки доставки оборудования согласованы сторонами в приложениях № 1, 2 к договору; ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется после завершения его монтажа, пуско-наладки, после пуска поставленного по договору оборудования в эксплуатацию под нагрузкой, после чего составляется акт о приемке оборудования в эксплуатацию.

Из пункта 14.13 договора следует, что субподрядчик обязуется одновременно с поставкой оборудования передать генподрядчику всю относящуюся к нему документацию, включая сертификаты качества, сертификаты соответствия, гарантийную документацию, паспорт на оборудование, поставляемое согласно приложениям № 1, 2, технические описания и иные документы согласно приложению № 8, необходимые для надлежащей эксплуатации оборудования; без предоставления вышеуказанных документов поставка считается не комплектной; в случае наличия в перечисленных документов недостоверной (искаженной) информации генподрядчик и заказчик не несут ответственность за ненадлежащую эксплуатацию оборудования.

В соответствии с пунктом 25.1 договора субподрядчик самостоятельно от своего имени обеспечивает приобретение материалов, необходимых для производства оборудования; субподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все закупаемые материалы являлись новыми и не были использованы ранее, а также соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения; субподрядчик гарантирует, что помимо прочих требований, предъявляемых Договором к материалам, используемые материалы будут соответствовать Оптимальным Практическим Нормам в области энергетического комплекса, будут соответствовать Технической Документации и требованиям Договора, будут пригодными для использования в составе Оборудования с учетом климатических условий места расположения Строительной Площадки и эксплуатационных режимов, описанных в Договоре, не будут иметь дефектов и недостатков.

Согласно положениям договора, изложенным в разделе 28 договора «Контроль качества оборудования в процессе его производства» субподрядчик обязался доставить оборудование в место поставки, указанное в пункте 14.10 договора; поставка оборудования осуществляется комплектами оборудования и в срок, указанный в спецификациях (приложения № 1, 2 к Договору (пункт 28.1 договора); доставка (транспортировка) до места поставки и страхование оборудования осуществляется за счет субподрядчика (пункт 28.2 договора); субподрядчик имеет право досрочного исполнения обязанности по поставке оборудования, при условии предварительного письменного согласования сроков и порядка досрочной поставки с генподрядчиком; в этом случае генподрядчик обязан обеспечить осуществление необходимых действий по приемке оборудования в соответствии с условиями, указанными в настоящей статье договора; генподрядчик не обязан при этом осуществлять досрочное финансирование (оплату) поставляемого оборудования, если стороны путем заключения дополнительного соглашения к договору не договорятся об ином (пункт 28.3 договора); риск случайной гибели и повреждения оборудования переходит к генподрядчику с даты фактической передачи оборудования на складе генподрядчика в месте поставки, указанной в товарно-транспортной накладной, а моментом исполнения обязанности по поставке считается дата приемки оборудования в месте поставки, подтвержденная подписанным сторонами актом сдачи-приемки оборудования (пункт 28.4 договора); субподрядчик должен доставить оборудование согласно пункту 28.1 договора, используя тот вид транспорта, который субподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах; при этом субподрядчик составляет схемы транспортировки и предварительно согласовывает их с генподрядчиком (пункт 28.5 договора); поставка оборудования производится в технологической последовательности монтажа позициями (либо партиями/комплектно готовыми партиями), указанными в приложениях № 1, 2 к договору, но не ограничиваясь ими (пункт 28.6 договора); партией/комплектно готовой партией оборудования считается каждая комплектно поставленная позиция (позиции 1, 2 и т.д.) спецификаций (Приложения № 1, 2) к договору (пункт 28.7 договора); поставщик обязан приложить к поставляемому оборудованию следующую товаросопроводительную документацию: сертификат качества, сертификат соответствия, упаковочную опись (либо спецификации, либо иные аналогичные документы); транспортную накладную/товарно-транспортную накладную (ТТН)/железнодорожную накладную, товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12), счет-фактуру, техническую документацию, в том числе руководство по монтажу и эксплуатации, в объеме, достаточном для выполнения монтажных и эксплуатационных работ и содержащие условия поставщика/завода изготовителя по хранению, консервации, транспортировке, монтаж (по 2 экземпляра) (пункт 28.8 договора); при наличии письменного согласия генподрядчика, субподрядчик имеет право досрочной поставки партий оборудования, при этом гарантийный срок на оборудование будет исчисляться не раньше срока поставки, предусмотренного договором (пункт 28.9 договора); в случае если досрочная поставка оборудования приведет к необходимости переконсервации и/или ревизии оборудования, субподрядчик выполнит эти работы собственными силами и за свой счет (пункт 28.10 договора); после отправки каждой позиции/партии оборудования субподрядчик в течение 3 рабочих дней направляет генподрядчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени и пункта прибытия на место поставки, субподрядчик должен предоставить генподрядчику транспортные документы, состав которых подлежит согласованию между сторонами (пункт 28.11 договора); датой отгрузки оборудования считается дата отпуска оборудования, указанная в товарно-транспортной накладной при транспортировке автомобильным транспортом и/или дата штемпеля станции отправления на железнодорожной квитанции о приемке груза при транспортировке железнодорожным транспортом (пункт 28.14 договора); не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до прибытия партии оборудования на место поставки субподрядчик обязуется сообщить генподрядчику ожидаемую дату прибытия и представить генподрядчику спецификацию отгрузочных мест (в электронной виде и на бумажном носителе) (пункт 28.17 договора); поставка оборудования производится субподрядчиком в сроки, указанные в приложениях № 1, 2 к договору, в случае получения письменного уведомления генподрядчиком о приостановке отгрузки готовой партии оборудования в сроки, указанные в приложениях № 1, 2 к договору, субподрядчик оставит оборудование на складе хранения оборудования, при этом, если срок нахождения оборудования на складе хранения превысит 1 (один) месяц, субподрядчик согласует с генподрядчиком на условиях отдельного дополнения величину расходов, связанных с указанным нахождением неотгруженного оборудования, его ревизией в случае необходимости, а также порядок перехода права собственности (пункт 28.18 договора); представитель субподрядчика вместе с представителем генподрядчика проведут на объекте проверку соответствия комплектно поставленной партии оборудования по приложениям № 1, 2 к договору отгрузочным документам и состояния упаковки без ее вскрытия с составлением акта сдачи-приемки оборудования в течение 5 рабочих дней после прибытия соответствующей партии оборудования на объект (пункт 28.22 договора); датой прибытия соответствующей комплектной позиции/партии оборудования является дата штемпеля представителя генподрядчика на товарно-транспортной накладной при транспортировке автомобильным транспортом или дата штемпеля железнодорожной станции назначения на накладной железнодорожного сообщения, с которой доставлено последнее грузовое место соответствующей комплектной позиции/партии оборудования, генподрядчик за свой счет производит разгрузку оборудования и несет ответственность за проведение разгрузочных работ и своевременную разгрузку оборудования и его сохранность на объекте (пункт 28.23 договора); датой поставки соответствующей позиции/партии оборудования, указанной в приложениях № 1, 2 к договору, является дата подписания уполномоченным представителем генподрядчика и представителем субподрядчика акта сдачи-приемки оборудования, указанного в пункте 28.22 договора, риск случайной гибели и повреждения оборудования переходит к генподрядчику с даты фактической передачи оборудования, указанной в товарно-транспортной накладной (пункт 28.24 договора); субподрядчик обязан известить генподрядчика о готовности оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты передачи оборудования перевозчику (пункт 28.25 договора).

Из положений раздела 46 договора «Ответственность субподрядчика при выполнении работ» следует, что в случае нарушения субподрядчиком сроков исполнения любой обязанности, в том числе срока начала, окончания работ/услуг, промежуточного срока, срока поставки и другого срока, установленного договором, субподрядчик оплатит генподрядчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора в день за каждый день просрочки, неустойка, подлежащая уплате субподрядчиком согласно настоящему пункту, не может превышать 10 процентов от цены договора в отношении каждого нарушения, неустойка не является зачетной (пункт 46.1 договора); генподрядчик вправе (без ущерба для любых иных способов взыскания неустойки) взыскать сумму неустойки, подлежащую уплате субподрядчиком согласно настоящей статье, из любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате субподрядчику, включая отложенный платеж, уплата или удержание суммы такой неустойки не освобождает субподрядчика от его обязательств по завершению работ или от каких-либо иных обязательств или обязанностей по договору (пункт 46.2 договора).

04.03.2015 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору, в соответствии с которым стороны пришли к соглашению об уменьшении объема поставки путем исключения оборудования по пункту 3.1 спецификации № 001 (приложение № 1 к договору), а также по пункту 3 спецификации № 002 (приложение № 2 к договору, а также согласовали обязанность субподрядчика по поставке дополнительного оборудования в объеме, указанном в приложении № 3 к дополнительному соглашению, а именно: шкаф цепей тока «43ASM01», шкаф цепей напряжения «43ASM02», шкаф контроля изоляции вала «43ASR06», панель синхронизации «43ASS01», шкаф 38Р распределения оперативного тока, шкаф 37Р РПР и преобразователей (спецификация № 003), общей стоимостью 6 137 534 руб., в том числе НДС 18 %.

Согласно пункту 5 дополнительного соглашения № 1 стороны подтверждают, что на момент подписания дополнительного соглашения генподрядчик произвел в пользу субподрядчика первый авансовый платеж за оборудование, указанное в спецификациях от 12.09.2104 № 001, 002, на сумму 2 517 176 руб. (в том числе НДС - 18 % в сумме 383 976 руб.).

В соответствии с пунктом 6 дополнительного соглашения № 1 стороны подтвердили, что на момент подписания дополнительного соглашения генподрядчик произвел в пользу субподрядчика второй авансовый платеж за оборудование, указанное в спецификациях от 12.09.2014 № 001, 002, на сумму 1 258 588 руб. (в том числе НДС – 18 % в сумме 191 988 руб.).

Из пункта 8 дополнительного соглашения № 1 следует, что оплата оборудования, указанного в приложении № 3 к дополнительному соглашению (спецификация № 003 к Договору), осуществляется в следующем порядке:  30% от стоимости оборудования – предоплата, которая перечисляется в следующем порядке: первый авансовый платеж в размере 20 % от стоимости оборудования в течение 5 рабочих дней с даты получения генподрядчиком банковской гарантии субподрядчика на возврат авансовых платежей и счета субподрядчика на данный платеж в 2-х оригинальных экземплярах, в течение 5 дней со дня получения авансового платежа субподрядчик направит генподрядчику надлежаще оформленную счет-фактуру; второй авансовый платеж в размере 10 % от стоимости оборудования в течение 10 рабочих дней после получения генподрядчиком счета субподрядчика на данный платеж в 2-х оригинальных экземплярах, но не ранее даты фактической оплаты первого авансового платежа, в течение 5 дней со дня получения авансового платежа субподрядчик направит генподрядчику надлежаще оформленный счет-фактуру; 65% от стоимости оборудования в течение 70 календарных дней с даты получения генподрядчиком документов, указанных в пункте 40.3 договора; 5% от стоимости оборудования в течение 5 банковских дней после получения оригиналов счета на оплату и банковской гарантии выполнения договора (на гарантийный период) (36 месяцев с даты отгрузки оборудования со склада поставщика).

Приложением № 1 к названному дополнительному соглашению срок изготовления оборудования установлен в течение 90 календарных дней со дня поступления денежных средств по первому платежу на расчетный счет субподрядчика; срок доставки оборудования до места поставки – 21 день; генподрядчик обязан предоставить полностью оформленные карты заказа, технические требования, задание заводу до проведения оплаты, срок готовности к отгрузке  исчисляется со дня их получения; изменения в картах заказа, технических требований, задании заводу, внесенные после проведения оплаты могут повлечь увеличение стоимости и сроков поставки.

30.03.2015 сторонами подписано дополнительное соглашение № 2, которым стороны возложили на субподрядчика обязанность по поставке дополнительного оборудования: шкаф преобразователей «43ASM03», договор дополнен спецификацией № 004.

Кроме того, дополнительным соглашением № 2 стороны внесли изменения в следующие положения договора:

- в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения № 2 пункт 40.2 договора изложен в следующей редакции:

Согласно пункту 40.2.1 договора общий объем авансирования по спецификациям № 001, 002 составляет 3 775 764 руб. 60 коп. и уплачивается Генподрядчиком в следующем порядке: 

- для осуществления первого авансового платежа субподрядчик в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора предоставляет генподрядчику банковскую гарантию возврата авансовых платежей (первого и второго вместе) одновременно со счетом на уплату первого авансового платежа, банковская гарантия предоставляется на сумму, равную всем авансовым платежам, срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по договору на 30 календарных дней, сумма банковской гарантии будет уменьшаться автоматически пропорционально стоимости выполненных субподрядчиком обязательств по договору (пункт 40.2.1.1 договора);

- генподрядчик осуществит первый авансовый платеж на общую сумму 2 517 176 руб. (в том числе НДС – 18 % в сумме 383 976 руб.), в течение 5 рабочих дней с даты получения генподрядчиком банковской гарантии на возврат авансового платежа субподрядчика и счета субподрядчика на данный платеж в 2-х оригинальных экземплярах, после получения данного авансового платежа, все позиции спецификации оборудования (приложение № 1, 2 к договору), считаются пропорционально авансированными, субподрядчик в течение 5 дней после получения представляет генподрядчику надлежаще оформленные счета-фактуры на полученную сумму авансового платежа (пункт 40.2.1.2 договора);

- генподрядчик осуществляет второй авансовый платеж на общую сумму 1 258 588 руб. (в том числе НДС – 18 % в сумме 191 988 руб.), в течение 10 рабочих дней после получения генподрядчиком счета субподрядчика на данный платеж в 2-х оригинальных экземплярах, но не ранее даты фактической оплаты первого авансового платежа, субподрядчик в течение 5 дней после получения представит генподрядчику надлежаще оформленные счета-фактуры на полученную сумму авансового платежа (пункт 40.2.1.3 договора);

Согласно пункту 40.2.2 договора общий объем авансирования по спецификации № 003 составляет 1 841 260 руб. 20 коп., что составляет 30 % от стоимости спецификации № 003 и уплачивается генподрядчиком в следующем порядке:

- первый авансовый платеж в размере 1 227 506 руб. 80 коп. (в том числе НДС – 18 % в сумме 187 246 руб. 80 коп.),что составляет 20 % от стоимости оборудования по спецификации № 003 в течение 5 рабочих дней с даты получения генподрядчиком банковской гарантии субподрядчика и счета субподрядчика на данный платеж в 2-х оригинальных экземплярах, в течение 5 дней со дня получения авансового платежа субподрядчик направит генподрядчику надлежаще оформленный счет-фактуру (пункт 40.2.2.1 договора);

- второй авансовый платеж в размере 613 753 руб. 40 коп. (в том числе НДС – 18 % в сумме 97 623 руб. 40 коп.), что составляет 10 % от стоимости оборудования по спецификации № 003, в течение 10 рабочих дней после получения генподрядчиком счета субподрядчика на данный платеж в 2-х оригинальных экземплярах, но не ранее даты фактической оплаты первого авансового платежа, в течение 5 дней со дня получения авансового платежа субподрядчик направит генподрядчику надлежаще оформленный счет-фактуру (пункт 40.2.2.2 договора);

- в целях обеспечения возврата авансовых платежей за оборудование по спецификации № 003 к договору субподрядчик обязан в течение 10 банковских дней с даты подписания дополнительного соглашения от 04.03.2015 № 1 представить генподрядчику банковскую гарантию в той же валюте или валютах на сумму, равную всем авансовым платежам за соответствующее оборудование; гарантия возврата авансовых платежей будет действовать вплоть до даты поставки указанного оборудования, увеличенной на 30 дней («Дата прекращения Гарантии Авансового Платежа») включительно (пункт 40.2.2.3 договора).

Согласно пункту 40.2.3 договора авансирование по спецификации № 004 не производится;

- в соответствии с пунктом 12 дополнительного соглашения № 2 пункт 28.1 договора изложен в следующей редакции: «Субподрядчик обязуется доставить оборудование в место поставки, указанное в пункте 14.10 договора, поставка оборудования, осуществляется комплектами оборудования и в срок, указанный в спецификациях (приложения № 1, 2, 10, 11 к Договору).»;

- в соответствии с пунктом 14 дополнительного соглашения № 2 пункт 28.7 договора изложен в следующей редакции: «Партией/комплектно готовой партией оборудования считается каждая комплектно поставленная позиция (поз. 1, 2 и т.д.) спецификаций (Приложения №1, 2, 10, 11) к договору.»;

- в соответствии с пунктом 15 дополнительного соглашения № 2 пункт 28.18 договора изложен в следующей редакции: «Поставка оборудования производится субподрядчиком в сроки, указанные в приложениях № 1, 2, 10, 11 к договору, в случае получения письменного уведомления генподрядчиком о приостановке отгрузки готовой партии оборудования в сроки, указанные в приложениях № 1, 2, 10, 11 к договору, Субподрядчик оставит Оборудование на складе хранения Оборудования, при этом, если срок нахождения оборудования на складе хранения превысит 1 месяц, субподрядчик согласует с генподрядчиком на условиях отдельного дополнения величину расходов, связанных с указанным нахождением неотгруженного оборудования, его ревизией в случае необходимости, а также порядок перехода права собственности.»;

- в соответствии с пунктом 17 дополнительного соглашения № 2 пункт 28.24 договора изложен в следующей редакции: «Датой поставки соответствующей позиции/партии оборудования, указанной в приложениях № 1, 2, 10, 11 к договору, является дата подписания уполномоченным представителем генподрядчика и представителем субподрядчика акта сдачи-приемки оборудования указанного в пункте 28.22 настоящей статьи настоящего договора, риск случайной гибели и повреждения оборудования переходит к генподрядчику с даты фактической передачи оборудования, указанной в товарно-транспортной накладной.».

Согласно приложению № 1 к названному дополнительному соглашению (спецификация № 004) срок поставки установлен в течение 90 календарных дней с момента подписания указанной спецификации обеими сторонами и предоставления полностью оформленных технических требований, задания заводу; срок доставки оборудования до места поставки – 21 календарный день; генподрядчик обязан предоставить полностью оформленные технические требования, задание заводу, срок готовности к отгрузке  исчисляется со дня их получения; изменения в картах заказа, технических требований, задании заводу, внесенные после проведения оплаты могут повлечь увеличение стоимости и сроков поставки.

Дополнительным соглашением от 19.06.2015 № 3 цена договора определена в размере 16 891 936 руб., включая НДС 18 %.

Платежными поручениями от 22.04.2015 № 212653, 212654 истец перечислил 1 841 260 руб. 20 коп. авансового платежа.

Оборудование, указанное в спецификациях № 003, 004, передано по актам от 04.09.2015.

В связи с просрочкой поставки оборудования Общество направило Предприятию претензию об оплате 912 164 руб. 55 коп. неустойки.

В ответ на указанную претензию Предприятие указало, что в период просрочки не может включаться время, в течение которого генподрядчик должен принять оборудование, истец допустил просрочку предоставления технических требований, в связи с чем сроки изготовления оборудования по спецификациям № 003, 004 необходимо исчислять с 02.06.2017.

В связи с отказом Предприятия удовлетворить требования, указанные в претензии, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Согласно статье 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

При расчете неустойки истцом учтены возражения ответчика, содержащиеся в ответе на претензию, о том, что технические требования по спецификациям № 003, 004 переданы только 27.04.2017, в связи с чем срок поставки оборудования указан 17.08.2017, который ответчиком нарушен.

Предприятие обратилось с ходатайством об уменьшении неустойки, ссылаясь на явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку неустойка рассчитывается от цены договора, тогда как цена оборудования по спецификации № 003 составляет 6 137 534 руб., по спецификации № 004 – 415 360 руб.

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Как разъяснено в пунктах 71 и 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). При этом заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 73 указанного постановления Пленума бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Таким образом, исходя из смысла приведенных выше правовых норм и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, а также принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) размер неустойки может быть снижен судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, поданного суду первой инстанции или апелляционной инстанции, если последней дело рассматривалось по правилам производства в суде первой инстанции.

Ответчик обратился с ходатайством об уменьшении размера неустойки в суд первой инстанции.

Суд первой инстанции не нашел оснований для уменьшения неустойки.

Согласно статье 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

В постановлении от 17.12.2013 № 12945/13 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что в силу принципа равенства участников гражданских правоотношений меры ответственности, предусмотренные для сторон одного договора при неисполнении ими обязательств, должны быть сбалансированными.

Оценив условия договора, предусматривающие ответственность генподрядчика и субподрядчика, следует отметить, что в отличие от субподрядчика генподрядчик уплачивает за просрочку платежа пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки, но в совокупности не более 10 процентов от просроченной суммы (пункт 48.1 договора), то есть неустойка рассчитывается от суммы неисполненного обязательства, тогда как субподрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от цены договора в отношении каждого нарушения (пункт 46.1 договора), то есть неустойка за нарушение обязанности субподрядчика рассчитана от общей цены договора без учета частично исполненного обязательства.

На основании изложенного, руководствуясь принципом равенства участников гражданских правоотношений, в целях сохранения баланса интересов сторон, суд апелляционной инстанции считает, что неустойка подлежит уменьшению до 39 883 руб. 83 коп., исходя расчета, представленного ответчиком.

В силу статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно пункту 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.03.2018 по делу № А56-12201/2018 изменить, изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

«взыскать с общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» в пользу публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 39 883 руб. 83 коп. неустойки по договору от 12.09.2014 № 201422783/20131013-172.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» в пользу публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 5 844 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.»

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Судья                                                                                     С.В. Изотова