АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ул. Большая Покровская, д. 1, Нижний Новгород, 603000 http://fasvvo.arbitr.ru 

______________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда кассационной инстанции  

Нижний Новгород Дело № А43-14227/2020 12 сентября 2025 года  

Резолютивная часть постановления объявлена 11.09.2025. Постановление в полном объеме изготовлено 12.09.2025. 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего Чиха А.Н., судей Бодровой Н.В., Павлова В.Ю., 

при участии представителей от общества с ограниченной ответственностью «Профсервис»:  

ФИО1, директора на основании протокола от 01.03.2024, ФИО2, по доверенности от 18.03.2025 

(после перерыва не явились), от публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье»:  

ФИО3, по доверенности от 18.10.2024 

(после перерыва не явилась),  

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Профсервис» 

на определение Арбитражного суда Нижегородской области от 12.09.2024 и на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2024 по делу № А43-14227/2020  

по заявлению публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» о прекращении исполнительного производства 

по делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Профсервис»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к публичному акционерному обществу  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения, 

о взыскании судебной неустойки 

и по встречному иску публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» к обществу с ограниченной ответственностью «Профсервис»  

о расторжении договора 

и у с т а н о в и л : 

общество с ограниченной ответственностью «Профсервис» (далее – ООО «Профсервис») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (в настоящее время – публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 в течении 14 дней с момента вступления решения суда в законную силу; о взыскании судебной неустойки в размере 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.  

ПАО «Россети Центр и Приволжье» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области со встречным иском о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412.  

Суд первой инстанции решением от 15.09.2020, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2021, первоначальный иск удовлетворил, в удовлетворении встречного иска отказал.  

ПАО «Россети Центр и Приволжье» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о прекращении исполнительного производства в связи с исполнением решения суда.  

Определением суда первой инстанции от 12.09.2024, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2024, заявление ПАО «Россети Центр и Приволжье» удовлетворено, исполнительное производство прекращено.  

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, ООО «Профсервис» обратилось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и принять новый судебный акт.  

Определениями от 22.04.2025 и 20.08.2025 на основании части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Трубниковой Е.Ю. на судью Бодрову Н.В., судьи Бабаева С.В. на судью Павлова В.Ю. После изменения состава суда рассмотрение жалобы начато с начала.  

Рассмотрение кассационной жалобы откладывалось. 

В заседании 09.09.2025 объявлялся перерыв в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 09 часов 15 минут 11.09.2025.  

До рассмотрения кассационной жалобы по существу стороны представили для утверждения судом подписанное мировое соглашение и просили его утвердить.  

После перерыва стороны не обеспечили явку представителей. От сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.  

По правилам части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.  

Названные обстоятельства не установлены, поэтому суд округа счел возможным  

утвердить мировое соглашение на основании статьи 141 данного кодекса.  

В части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.  

При прекращении производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины при утверждении мирового соглашения распределяются согласно подпункту 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации и пункту 3 части 9 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также условиям мирового соглашения.  

Руководствуясь статьями 141, 150, 286 – 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа  

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Нижегородской области от 12.09.2024 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2024 по делу № А43-14227/2020 отменить.  

Утвердить мировое соглашение, заключенное между публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» и обществом с ограниченной ответственностью «Профсервис» на следующих условиях:  

«1. Стороны мирового соглашения установили, что свои обязательства, предусмотренные техническим условиями к договору об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412, ПАО «Россети Центр и Приволжье» выполнило.  

2. ООО «Профсервис» самостоятельно производит технологическое подключение по 1 этапу Технических условий и производит подключение (фактическое присоединение, то есть обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности)) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 по третьей категории надежности в соответствии с положениями главы IX. «Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий» Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, но не позднее до «19» сентября 2025 года.  

В целях исполнения 1 этапа Технических условий ООО «Профсервис» направляет в адрес ПАО «Россети Центр и Приволжье» уведомление о выполнении технических условий с документами, предусмотренными пунктом 84 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).  

ПАО «Россети Центр и Приволжье» рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от ООО «Профсервис».  

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий ПАО «Россети Центр и Приволжье» составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий. Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.  

При невыполнении требований 1 этапа технических условий ПАО «Россети Центр и Приволжье» в письменной форме уведомляет об этом заявителя согласно требованиям пункта 89 Правил.  

Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии в соответствии с пунктом 91(1) Правил.  

ПАО «Россети Центр и Приволжье» не позднее 5 рабочих дней со дня получения от ООО «Профсервис» подписанного акта о выполнении технических условий осуществляет фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составляет акт об осуществлении технологического присоединения по 1 этапу технических условий в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя.  

3. ООО «Профсервис» самостоятельно производит подключение к своим электроустановкам по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 по 2 этапу в соответствии с техническими условиями по второй категории надежности в срок до «31» декабря 2025 года в соответствии со следующими техническими решениями:  

– смонтировать дополнительное ВРУ-0,4кВ на вводе объекта в соответствии с требованиями ПУЭ;  

– ВРУ-0,4кВ должно иметь повторное заземление и вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания.  

В целях исполнения 2 этапа Технических условий ООО «Профсервис» направляет в адрес ПАО «Россети Центр и Приволжье» уведомление о выполнении технических условий с документами, предусмотренными пунктом 84 Правил,  

ПАО «Россети Центр и Приволжье» рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от ООО «Профсервис».  

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий ПАО «Россети Центр и Приволжье» составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий. Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.  

При невыполнении требований 2 этапа технических условий ПАО «Россети Центр и Приволжье» в письменной форме уведомляет об этом заявителя согласно требованиям пункта 89 Правил.  

Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии в соответствии с пунктом 91(1) Правил.  

ПАО «Россети Центр и Приволжье» не позднее 5 рабочих дней со дня получения от ООО «Профсервис» подписанного акта о выполнении технических условий осуществляет фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составляет акт об осуществлении технологического присоединения по 2 этапу технических условий в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя.  

4. Приложение № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 читать в редакции Приложения № 1 к настоящему соглашению.  

5. Пункт 4 договора об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 читать в следующей редакции: «4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего соглашения.»  

6. Пункт 5 договора об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 читать в следующей редакции: «5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 31.12.2025.»  

7. Пункт 1 договора об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 читать в следующей редакции:  

«1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 145 кВт; категория надежности:  

1 этап – 145 кВт по 3 категории, 2 этап – всего 145 кВт по 2 категории. 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ;  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.»  

8. Пункт 10 договора об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2019 № 521038412 читать в следующей редакции:  

«10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 68/1 от 25.12.2017 (согласно приложению № 3 к нему) и составляет 77993.76 (семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 20 %, в том числе по этапам:  

на 1 этапе – 46209.18 (сорок шесть тысяч двести девять) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20 %;  

на 2 этапе – 31784.58 (тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС 20 %.  

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке: П = (С 1.1 + С 1.2) х N (руб.)(без НДС), П = 82.90 x 145 + 365.34 x 145 = 64994.80 (руб.)(без НДС), где: П - плата за технологическое присоединение; 

С 1.1 - ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт);  

С 1.2 - ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб. /кВт);  

N – объем максимальной мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение (кВт).»  

9. Судебные расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы прямо или косвенно связанные с производством по делу А43-14227/2020, истцом и ответчиком друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне настоящего мирового соглашения, которая их понесла, за исключением госпошлины.  

10. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины распределяются следующим образом:  

– 30% уплаченной истцом государственной пошлины подлежит возврату из федерального бюджета;  

– 70 % уплаченной истцом государственной пошлины остается за истцом, и не подлежат возмещению ответчиком.  

11. Ответчик оплачивает истцу астрент (судебную неустойку) за несвоевременное исполнение решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу А43-14227/2020 от 15.09.2020 в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки исполнения с периодом начисления: с 30.11.2022 – до 12.09.2024. В остальной части обязательства ответчика по оплате астрента (судебной неустойки) являются прекращенными.  

12. Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объёме определяют взаимные обязательства сторон по делу № А43-14227/2020.  

13. В случае нарушения ответчиком положений пункта 3 настоящего мирового соглашения, при условии соблюдения истцом указанного пункта мирового соглашения в части сроков осуществления технологического присоединения по 2 этапу в соответствии с техническими условиями по второй категории надежности (до «31» декабря 2025 года) последний обязуется оплатить неустойку в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения.  

14. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.  

15. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы судебного дела.  

16. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Волго-Вятского округа и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

Приложение: 1. «Технические условия». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

для присоединения к электрической сети филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» (вновь вводимая мощность) 

 № ННЭ/21/Р21-04 – 44 09 сентября 2025 года  

Заявитель – ООО «Профсервис»  

(заявка № Н/ЦЦ-НН-497140-ПТП от 05.12.2018, письмо от 17.12.2018 № ННЭ/35-10-2814) 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя – энергопринимающее  

устройство. 

2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого  

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  

- административное здание по адресу: 

<

...>  

дом 1. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств  

заявителя – 145 кВт. 4. Категория надежности электроснабжения; 1 этап – 145 кВт по 3 категории, 2 этап – всего 145 кВт по 2 категории. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  

технологическое присоединение - 0,4 кВ. 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2025 год. 

7. Точки присоединения к электрической сети: ЛЭП-0,4кВ от ТП-3011, ЛЭП-0,4кВ  

от ТП-3015 (РП-13, РП-39 ПС «Старосормовская») с максимальной мощностью  

энергопринимающих устройств – 145 кВт. 

8. Основной источник питания – ТП-3011 (РП-13, ПС «Старосормовская»). 9. Резервный источник питания – ТП-3015 (РП-39, ПС «Старосормовская»). 10. Обязательства сетевой организации:  

10.1. Обязательства сетевой организации по 1 этапу отсутствуют. 10.2. Обязательства сетевой организации по 2 этапу: 

10.2.1. В ТП-3015 выполнить замену силового трансформатора 6/0,4кВ-180кВА на  

трансформатор 6/0,4кВ-250кВА. Тип определить проектом. 

10.2.2. Запроектировать и построить ЛЭП-0,4кВ от ТП-3015 до границы участка  

заявителя ориентировочной протяженностью 0.62 км, в том числе: 

- многожильный кабель в бумажной изоляции сечением 240 мм2, ориентировочной  

протяженностью 0.352 км, 

- методом ГНБ многожильный кабель в бумажной изоляции, сечением 240 мм2  

протяженностью 0,268 км. 

10.3. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до границ  

участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства  

заявителя. 11. Обязательства заявителя: 

11.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить  

разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в  

соответствии с действующими нормами и правилами. 

11.2. По первому этапу: смонтировать ВРУ-0,4кВ на вводе кабеля от ТП-3011 в  

объект в соответствии с требованиями ПУЭ; по второму этапу: смонтировать ВРУ-0,4кВ  

на вводе кабеля от ТП-3015 в объект в соответствии с требованиями ПУЭ. ВРУ-0,4кВ должно иметь повторное заземление и вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания.  

11.3. Электроснабжение объекта запроектировать и выполнить: 

1 этап – от ЛЭП-0,4кВ от ТП-3011 (построенной по договору об осуществлении технологического присоединения от 07.08.2017 № 521002706),  

этап – от ЛЭП-0,4кВ, строящейся в соответствии с пунктом 10.2 настоящих технических условий.  

11.4. Для расчетного учета электрической энергии установить на границе балансовой принадлежности счетчики электрической энергии классом точности 1,0 и выше и соответствующие нагрузке трансформаторы тока.  

11.5. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.  

11.6. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Нижегородского РЭС филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» для осмотра.  

11.6. Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.  

12. Срок действия технических условий – два года со дня заключения дополнительно соглашения № 3.»  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Профсервис» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 24 000 рублей, уплаченную по платежному поручению от 14.01.2025 № 1.  

Производство по делу прекратить. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий месяца со дня его принятия, применительно к части 11 статьи 141, статье 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»).  

 Председательствующий А.Н. Чих 

Судьи Н.В. Бодрова В.Ю. Павлов