Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело   № А40-272469/19-55-1953

г. Москва

23  декабря 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2019г.

Мотивированный текст решения изготовлен 23 декабря 2019г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Дубовик О.В.

При ведении протокола судебного заседания секретарем  Бичуриной И.Р.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА БАРНАУЛА (ОГРН 1082221000905, ИНН 2221130900) 

к БАНКУ ЗЕНИТ (ОГРН 1027739056927, ИНН 7729405872) 

третьи лица: ООО «Строительная компания «БраНс», Комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула

о взыскании сумм по банковской гарантии 31 148 616 руб. 80 коп. по требованию об уплате неотработанного аванса, 483 888 руб. 06 коп. пени по требованию о нарушении графика выполнения работ, 34 839 руб. 94 коп. неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по гарантии по требованию, 529 526 руб. 49 коп. неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по гарантии по требованию о взыскании неотработанного аванса 

при участии:

от Истца: Харченко Д.В. по дов., от 24.09.2019г., после перерыва представитель не явился, извещен

от Ответчика: Барышев Н.М. по дов.  от 02.09.2019г., после перерыва Барышев Н.М.

От третьего лица : не явился, извещен. 

Установил:

УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА БАРНАУЛА обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к БАНКУ ЗЕНИТ  о взыскании сумм по банковской гарантии 31 148 616 руб. 80 коп. по требованию об уплате неотработанного аванса, 483 888 руб. 06 коп. пени по требованию о нарушении графика выполнения работ, 34 839 руб. 94 коп. неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по гарантии по требованию, 529 526 руб. 49 коп. неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по гарантии по требованию о взыскании неотработанного аванса.

Определением от 15 октября 2019г. к участию в деле с процессуальным статусом третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ООО «Строительная компания «БраНс». 

Определением от 18 ноября 2019г.  к участию в деле с процессуальным статусом третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

В судебное заседание не явились представители третьих лиц, извещены надлежащим образом о дате, месте и времени судебного разбирательства в порядке ст.123,156 АПК.

В судебном заседании объявлялся перерыв в порядке ст.163 АПК РФ для погашения Ответчиком задолженности.

 После перерыва Истец в судебное заседание не явился, извещен о дате, месте и времени судебного разбирательства в порядке ст.123,156 АПК.

Ответчик представил в материалы дела платежное поручение на сумму 32.196.871руб.29коп., подтверждающее погашение задолженности и неустойки в полном объеме.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Истца, третьих лиц в порядке ст.156 АПК РФ.

Заслушав представителя Ответчика, исследовав материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, В рамках национального проекта «Демография» и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее -«ЕИС») 12.09.2018 комитетом муниципального заказа города Барнаула размещена закупка в форме электронного аукциона (извещение №0317300301918000945) на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство детского сада-ясли в квартале 2006а г. Барнаула». Заказчиком работ является Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.

По результатам проведенной процедуры аукциона между Управлением и обществом с ограниченной ответственностью Строительная Компания «БраНс» (далее - ООО СК «БраНс») был заключен муниципальный контракт от 25.10.2018 №26-18 (далее - контракт) на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство детского сада-ясли в квартале 2006а г.Барнаула», реестровый номер 3222113090018000035.

В соответствии с п. 3.2 Контракта, цена работ составляет 128 365 218,65 руб. Оплата по Контракту осуществлялась за счет средств бюджета города Барнаула. Подрядчику перечислен аванс в сумме 38 509 565,60 руб. (приложение №2 -платежное поручение №749611 от 28.11.2018) и оплачены работы на сумму 505 486,27 руб. 

Согласно пункта 5.1 Контракта работы в полном объеме должны быть выполнены и сданы Заказчику в срок до 01.12.2019 включительно. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки, установленные Графиком выполнения работ, приведенным в Приложении № 2 к Контракту.

На основании раздела 2 Контракта «Определения и понятия» под этапом работ понимается цикл определенного вида работ, ограниченный начальным и конечными сроками, определенными в Графике выполнения работ. Все этапы в совокупности составляют результат работы Подрядчика в полном объеме, являющийся предметом Контракта.

График выполнения работ предусматривает, что по состоянию на 01.06.2019 Подрядчиком должно быть освоено 30 852 650,00 руб. от общей стоимости работ по Контракту, что составляет 24,04%. Фактически по актам приемки выполненных работ, подписанных между Заказчиком и Подрядчиком, было выполнено 5 646 503,47 руб., что составляло 4,4%.

Перечисленных Заказчиком в качестве аванса денежных средств было достаточно для исполнения Истцом 30% работ по Контракту. Однако в нарушение условий Контракта Подрядчиком обязательства по контракту были выполнены ненадлежащим образом.

ООО СК «БраНс» в качестве обеспечения исполнения обязательств подрядчика по контракту предоставило Управлению банковскую гарантию от 22.10.2018 №ЭБГ-ДО00-2018073781/18 (приложение №4, далее - гарантия), выданную ПАО «Банк Зенит», согласно которой гарант в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по контракту принял на себя обязательство выплатить бенефициару по его требованию денежную сумму, в общем размере в итоге не превышающую 38 703 081руб.

Гарантия обеспечивает выполнение обязательств принципала, в том числе:

-основных обязательств принципала по контракту;

-предусмотренных контрактом обязательств принципала по уплате неустоек (пеней, штрафов);

обязательств    принципала   по    оплате    авансовой   задолженности    в предусмотренных контрактом и законодательством случаях.

Гарантия вступает в силу с 22.10.2018 и действует по 31.01.2020 включительно.

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения этапов работ по контракту (графика выполнения работ). Управлением письмом от 29.05.2019 №163/исх-928 направлено требование к ООО СК «Бранс» о взыскании пени за невыполнение работ в сумме 483 888руб,06коп.

Ответа подрядчика на указанное требование в адрес Управления не поступало.

Управление в связи с ненадлежащим исполнением ООО СК «Бранс» обязательств по контракту направило в ПАО «Банк Зенит» требование от 13.06.2019 №163/исх-1038 о выплате денежной суммы в размере 483 888руб. 06коп.

Управлением также письмом от 19.06.2019 №163/исх-1092 направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта (приложение №6).

Банк письмом от 01.07.2019 №ГО-1915775 отказал Управлению в удовлетворении требования о выплате суммы по банковской гарантии, указав на отсутствие оттиска печати бенефициара в требовании и приложенным к требованию документам. Управление, устранив указанные замечания, 16.07.2019 направило требование повторно

Управлением письмом от 10.09.2019 №163/исх-1727 направило в адрес ПАО «Банк Зенит» требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в связи с невыполнением обязательств по возврату аванса на сумму 31 148 616руб.80коп.

Письмом от 24.09.2019 №ГО-19/8696 ПАО «Банк Зенит» признал требование Управления подлежащим удовлетворению, но уплату истребуемой суммы не произвел, предложив рассмотреть возможность предоставления гаранту рассрочки по оплате суммы требования на срок 12 месяцев.

Отказ Банка выполнить принятые на себя обязательства по гарантии послужил основанием для обращения Управления в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд исходит из следующего.

Ответчик представил в материалы дела платежное поручение на сумму 32.196.871руб.29коп., подтверждающее погашение задолженности и неустойки в полном объеме.

В соответствии со ст.408 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой надлежащее исполнение прекращает обязательство, Ответчиком обязательства исполнены в полном объеме, в связи с чем у суда отсутствуют основания для удовлетворения иска.

С учетом изложенного, разрешая настоящий спор по существу, суд приходит к выводу, что требования истца о возмещении задолженности и неустойки по банковской гарантии  удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь ст.309,310,408 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 71, 110, 112, 123,156,176,180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение  может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

 

Судья                                                                                                      Дубовик О.В.