АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-4596/2022

г. Кострома

13 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 декабря 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 13 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Хомяка Николая Георгиевича, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройком» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице Костромского отделения № 8640 о взыскании 49 893 руб. 16 коп. незаконно удержанной неустойки, а также 2 000 руб. расходов на оплату государственной пошлины

при участии в заседании:

от истца: не явился,

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 14.10.2021),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Костромского отделения № 8640 о взыскании 49 893 руб. 16 коп. незаконно удержанной неустойки по договору № 500004041094 от 15.03.2022, а также 2 000 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения иска возражал, пояснил, что удержания неустойки в соответствии с письмом от 13.04.2022 № 8640-19-исх/10, начисленной не несвоевременное предоставление подрядчиком поименованных в пункте 7.10 договора документов, им не производилось.

На основании частей 1 и 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие истца по имеющимся доказательствам.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

15.03.2022 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 50004041094, по условиям которого подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений и прилегающих территорий объектов Среднерусского банка ПАО Сбербанк, расположенных на территории Костромского ГОСБ, включенных в адресный перечень объектов, указанных в приложении № 2 к договору и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить его.

Согласно пункту 3.1. договора общая (максимальная) стоимость работ, выполняемых подрядчиком в течение срока действия договора, определяется в соответствии со сметами, составляемыми в порядке, указанном в п. 4.7 и п. 4.8 Договора, и составляет не более 19 415 306  рублей 16 копеек.

Оплата фактически выполненных подрядчиком работ по текущему ремонту и использованных подрядчиком материалов, комплектующих, оборудования и запасных частей, по каждому конкретному объекту, производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, открытый в ПАО Сбербанк, указанный в разделе 12 договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания заказчиком без претензий и замечаний к качеству выполненных работ актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного подрядчиком счета и представленной подписанной сторонами сметы на объект (пункт 3.5. договора).

В соответствии с пунктом 2.1.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями, в объеме и сроки, предусмотренные договором, техническими заданиями и графиком производства работ. В содержании технического задания, сроки выполнения работ по соответствующему объекту, указываются в Приложении №1 к Техническому заданию.

К обязанностям подрядчика условиями пункта 2.1.4 договора также отнесено предоставление заказчику в течение 5 календарных дней с момента получения технического задания по конкретному объекту проекта сметы, составленного по форме Приложения № 4 к настоящему договору.

Заказчик, в свою очередь обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения от подрядчика сметной документации, рассмотреть и согласовать её при отсутствии замечаний. При наличии замечаний в этот же срок направить подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего проекта сметы с указанием недостатков и сроков их устранения по каждому конкретному объекту (пункт 2.3.3. договора).

В соответствии с пунктом 4.7. договора подрядчик в течение 3 календарных дней с момента получения от Заказчика Технического задания по форме Приложение № 3 к настоящему договору по каждому конкретному объекту обязан подготовить и предоставить заказчику смету по форме приложения № 4 к настоящему договору, с указанием видов работ, объемов и расценок по каждому виду работ, составленный подрядчиком в 2 экземплярах на бумажном носителе, подписанных со своей стороны, и в электронном файле (в формате Excel) на основании расценок, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, а в случае отсутствия работ и расценок в перечне работ согласно Приложению № 1 к настоящему договору - предоставляется смета в электронном файле (в формате Excel) и в программном файле «Гранд-Смета», смета составляется на основании Федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2020, утвержденной Минстроем России (с изменениями и дополнениями), с переводом в текущий уровень цен по индексам пересчета к СМР на 3 квартал 2021г. и действующими на момент заключения настоящего Договора методическими документами в сфере сметного нормирования и ценообразования, а также требованиями заказчика (при наличии).

Согласно пункту 5.3. договора в случае нарушения подрядчиком сроков предоставления актов выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сроков предварительного осмотра объектов, сроков составления дефектных ведомостей (Приложение № 5 к Договору), актов использования материалов подрядчиком (Приложение №8 к Договору), сметы, а также сроков выполнения работ по каждому конкретному объекту, установленного в графике производства работ (Приложение № 9 к настоящему Договору) и/или техническим заданием (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору), срока выполнения работ по гарантийным обязательствам, установленного разделом 7 настоящего договора, а также любого иного срока, установленного настоящим договором, подрядчик на основании письменного требования заказчика, в том числе, но не исключительно, на основании соответствующей отметки в акте выполненных работ (КС-2), уплачивает заказчику неустойку в размере 1 (один) % от стоимости работ (включая НДС, при его наличии) по данному объекту, указанной в смете, а в случае отсутствия/несогласования сторонами сметы на выполнение работ по данному объекту - от общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1 договора (включая НДС, при его наличии), за каждый день просрочки до момента фактического выполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 5.11 договора заказчик, по своему усмотрению, вправе произвести удержание (провести зачет) любых сумм неустойки и/или штрафных санкций, начисленных подрядчику по любым основаниям за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договора, а также суммы причиненного заказчику ущерба (убытков), в том числе, вызванных повреждением имущества при исполнении настоящего договора, из средств, причитающихся подрядчику по настоящему договору в оплату выполненных работ.

Обосуществлении удержания (зачете) любых сумм, указанных в настоящем пункте, заказчик уведомляет подрядчика в письменном виде, с указанием основания удержания (зачета) и удерживаемой (зачитываемой) суммы, в том числе, путем отражения суммы удержания в акте выполненных работ (форма КС-2). отсутствие в Акте(-ах) информации о сумме начисленной неустойки, а также оплата заказчиком стоимости выполненных работ без удержания суммы неустойки, не лишает заказчика права на предъявление требований о ее взыскании как в судебном, так и в досудебном (претензионном) порядке.

Согласия подрядчика для данного удержания (зачета) не требуется, однако, подрядчик вправе реализовать права, предусмотренные настоящим пунктом договора, что, в свою очередь, не ставит в зависимость и не влияет на право заказчика удержать (зачесть) спорные суммы.

Согласно пункту 5.12 договора о факте начисления предусмотренной настоящим договором неустойки, иных штрафных санкций, сумм понесенных убытков и т.п., заказчик уведомляет подрядчика, с указанием их размера и оснований начисления. подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления (в любой форме, предусмотренной договором) от заказчика о факте начисления предусмотренной настоящим договором неустойки, иных штрафных санкций, сумм понесенных убытков и т.п., рассмотреть полученное уведомление и, если такое требование было заявлено заказчиком, произвести перечисление указанных в нем сумм на счет Заказчика и/или указанного им лица.

В силу пункту 5.13 договора в случае несогласия с основанием начисления и/или расчетом указанных сумм, подрядчик вправе в этот же срок, установленный п.5.12. договора, направить заказчику мотивированный ответ, с обоснованием своего несогласия с суммами неустойки, иных штрафных санкций, суммами понесенных убытков (ущерба) и/или основаниями их применения (начисления). В случае неполучения заказчиком в указанный срок ответа на направленное подрядчику уведомление, подрядчик считается согласившимся с указанным уведомлением и лишается права на дальнейшее оспаривание сумм неустойки, иных штрафных санкций, сумм понесенных убытков (ущерба) и т.п.

В случае получения заказчиком ответа от подрядчика о несогласии с основанием и/или расчетом начисленных сумм, заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения рассматривает аргументы подрядчика и, в случае принятия решения о возможности снижения начисленных сумм и/или освобождения подрядчика от ответственности, информирует об этом подрядчика в письменном виде (пункт 5.14 договора).

На период рассмотрения подрядчиком уведомлений заказчика в порядке, установленном в п. 5.12 настоящего договора, а также рассмотрения заказчиком ответа подрядчика в порядке, установленном данным пунктом настоящего договора, заказчик вправе не производить перечисление причитающихся подрядчику сумм.

Пунктом 7.10 договора предусмотрено, что подрядчик не позднее 10 календарных дней с даты заключения настоящего договора обязуется заключить и предоставить в письменном виде заказчику в виде заверенной копии:

- Полис/Договор страхования, связанный с обязанностью подрядчика возместить убытки, связанные с гибелью или случайным повреждением объектов заказчика (несущих конструкций, инженерных коммуникаций и др.), материала, оборудования и другого имущества заказчика в результате выполнения работ подрядчиком по настоящему договору. 

Выгодоприобретателем по вышеуказанному Полису/Договору страхования должны выступать лица, у которых возникли убытки в результате гибели или повреждения соответствующего имущества, владеющие таким имуществом на праве собственности или ином законом основании.

Страховая сумма должна составлять не менее 3 (трех)% от общей стоимости Договора (п. 3.1 Договора), равной 582 459 (Пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 18 копеек.

При этом страховому возмещению подлежат:

вред, причиненный уничтожением или повреждением имущества Заказчика;

расходы Заказчика по уменьшению (ликвидации) ущерба в результате выполнения Подрядчиком Работ ненадлежащего качества;

судебные издержки и расходы, расходы на привлечение независимых экспертов, прочие расходы по предварительному выяснению степени виновности Сторон.

Полис/Договор страхования гражданской ответственности Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором.

Страховая сумма должна составлять не менее 3 (трех)% от общей стоимости Договора (п. 3.1 Договора), равной 582 459 (Пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 18 копеек.

При этом страховому возмещению подлежат:

расходы в связи с причинением вреда жизни или здоровью;

расходы в случае причинения имущественного вреда;

судебные издержки и расходы, расходы на привлечение независимых экспертов, прочие расходы по предварительному выяснению степени виновности Сторон.

- Документы (например, квитанция, чек, вкладной (подкладной) документ), подтверждающие оплату страховой премии (взноса) по Полисам/Договорам страхования.

Письмом от 30.03.2022 № 8640-исх/73 заказчик уведомил подрядчика о применении в соответствии с пунктами 5.3, 7.10 договора штрафных санкций в виде штрафа в размере 194 153 руб. 06 коп. в связи непредставлением в установленный срок до 25.03.2022 полисов страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии.

Письмом от 31.03.2022 исх. № 03/31/2022 подрядчиком заявлены возражения в отношении начисления и удержания неустойки.

Письмом от 04.04.2022 № 8640-исх/88 заказчик уведомил подрядчика о невозможности снятия выставленных штрафных санкций.

Письмом от 04.04.2022 исх. № 04/04/2022 подрядчиком повторно заявлены возражения в отношении начисления и удержания неустойки.

Письмом от 06.04.2022 № 8640-исх/90 заказчик повторно уведомил подрядчика о невозможности снятия выставленных штрафных санкций, указав на возможность удержания неустойки в порядке, установленном договором.

Письмом от 13.04.2022 № 8640-19-исх/10 заказчик в ответ на направленный для согласования акт приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3) по объекту текущего ремонта ДО№8640/093 

<

...>, указал на внесение в них правок, а также на удержание начисленной неустойки в сумме 49 894 руб. 16 коп.

Письмом от 15.04.2022 № 8640-исх/108 заказчик повторно уведомил подрядчика о невозможности снятия выставленных штрафных санкций, а также указал на повторную необходимость предоставления графиков производства работ, составленных с учетом сроков проведения работ, обозначенных в технических заданиях, направленных письмом № 8640-19-исх/9 от 11.04.2022, а также проектов смет по объектам в соответствии с указанными техническими заданиями в установленные договором сроки.

В ответ на письмо от 15.04.2022 № 8640-исх/108 подрядчик указал на невозможность приступить к работам в установленные в графиках производства работ сроки без полного закрытия дополнительных филиалов (письмо исх. 15/04/2022-1 от 15.04.2022).

Письмом от 18.04.2022 № 8640-исх/112 заказчик уведомил подрядчика о применении в соответствии с пунктами 5.3, 4.7 договора штрафных санкций, указав, что с учетом направления по трем объектам технических заданий (письмо № 8640-19-исх/9 от 11.04.2022) срок предоставления сметной документации истек 14.04.2022, по состоянию на 18.04.2022 не представлены.

25.04.2022 истец направил ответчику претензию о возврате в 10-дневный срок необоснованно удержанной неустойки в размере 49 893 руб. 16 коп.

Неисполнение претензионных требований послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Возражая против удовлетворения заявленных требований ответчик указал, что неустойка в размере 49 893 руб. 16 коп. им фактически удержана не была. По акту № 1 от 13.04.2022 в соответствии с письмом от 29.04.2022 № 8640-исх/130 была удержана неустойка в размере 2 889 руб.48 коп.

Оценив представленные в дело доказательства на основании статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

Условиями возникновения неосновательного обогащения являются обстоятельства, когда:

1) имело место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя;

2) приобретение или сбережение произведено за счет другого лица, что, как правило, означает уменьшение стоимости имущества потерпевшего вследствие выбытия из его состава некоторой его части или неполучения доходов, на которые потерпевшее лицо правомерно могло рассчитывать;

3) отсутствуют правовые основания, то есть приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке.

В предмет доказывания по данным спорам входят следующие обстоятельства: факт получения ответчиком имущества (работ, услуг), принадлежащего истцу; факт пользования ответчиком этим имуществом (работами, услугами); размер переданного имущества; период пользования спорным имуществом в целях определения размера неосновательного обогащения (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении").

Статьей 1105 ГК РФ установлена обязанность лица, неосновательно временно пользовавшегося чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, возвратить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

При этом правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).

Бремя доказывания наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества лежит на нем (пункт 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержденного его Президиумом 17.07.2019).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Истец обосновывает требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 49 893 руб. 16 коп., представляющего собой удержанную сумму неустойки, начисленной в соответствии с пунктами 5.3, 7.10 договора подряда 50004041094 от 15.03.2022, направленными в его адрес письмами ответчика, в том числе от 13.04.2022 № 8640-19-исх/10, а также приложенной к нему справкой о стоимости выполненных работ № 1 от 13.04.2022.

Вместе с тем, ответчиком в материалы дела представлено письмо от 29.04.2022 № 8640-исх/130, которым заказчик указал на начисление в соответствии с пунктом 5.3 договора подряда 50004041094 от 15.03.2022 истцу неустойки за несвоевременное предоставление сметной документации, в том числе по объекту ВСП 8640/098, Костромская обл.г. Нея, ул. Любимова, д. 7 в размере 2 889 руб.  48 коп., а также на возможность удержания указанной суммы в порядке, установленном пунктами 5.11 и 4.23 договора.

Также ответчиком представлены акт выполненных работ № 1 от 13.04.2022 по объекту текущего ремонта ДО№8640/093 

<

...> на сумму 49 895 руб. 16 коп., справка о стоимости выполненных работ № 1 от 13.04.2022, в которой указано на удержание неустойки в размере 2 889 руб.  48 коп. и платежное поручение № 761594 от 17.05.2020, свидетельствующее о произведенной оплате по названному акту в размере 47 005 руб. 68 коп.

Определением суда от 07.11.2022 сторонам предлагалось произвести сверку взаимных расчетов по договору № 50004041094 от 15.03.2022.

Представителем ответчика в материалы дела представлен соответствующий акт за период с 15.03.2022 по 07.11.2022, из которого не следует об удержании им неустойки по договору в заявленном размере.

Истец, получив 17.11.2022 указанный акт, возражений по нему ни в адрес ответчика, ни в адрес суда не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При указанных обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку в материалах доказательства удержания ответчиком денежных средств в сумме 49 893 руб. 16 коп. отсутствуют.

Правомерность удержания ответчиком денежных средств в виде неустойки за несвоевременное предоставление сметной документации по объектам в соответствии письмом от 29.04.2022 № 8640-исх/130, истцом не оспорена. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

На основании вышеизложенного, руководствуясь со статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Судья  Н. Г. Хомяк