Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-6793/2023

07 ноября 2023 года

город Якутск

  Резолютивная часть решения объявлена 30.10.2023  

Мотивированное решение изготовлено 07.11.2023 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёновой У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Теплоэнергия"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 28.07.2023 № б/н к обществу с ограниченной  ответственностью "НордСервисСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании 4 143 307,74 рублей неустойки, начисленной в соответствии с пунктом 6.2  договора № 142/ТС о подключении (технологическом присоединении) к системе  теплоснабжения объекта от 13.07.2022 за просрочку внесения авансовых платежей за  период с 28.07.2022 по 30.10.2023, и далее с 31.10.2023 по день фактического исполнения  обязательств по внесению авансовых платежей, рассчитанную исходя из 1/130 ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату  фактической оплаты долга, а также 30 993 рублей расходов на оплату государственно  пошлины, 126 рублей расходов на отправку почтовых отправлений,  

на судебное заседание явились: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 09.12.2022 № 001, паспорт, диплом;  от ответчика: ФИО3 по доверенности от 15.01.2021, паспорт, диплом.  

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество "Теплоэнергия" обратилось в арбитражный суд с иском от  28.07.2023 № б/н к обществу с ограниченной ответственностью "НордСервисСтрой" о  взыскании 1 799 288,84 рублей неустойки, начисленной в соответствии с пунктом 6.2  договора № 142/ТС о подключении (технологическом присоединении) к системе  теплоснабжения объекта от 13.07.2022 за просрочку внесения авансовых платежей за  период с 28.07.2022 по 28.07.2023, и далее с 29.07.2023 по день фактического исполнения  обязательств по внесению авансовых платежей, а также 30 993 рублей расходов на оплату  государственно пошлины, 126 рублей расходов на отправку почтовых отправлений.  

В суд поступили от истца: 20.10.2023 от истца уточнение требований, 23.10.2023  ходатайство об отложении судебного разбирательства учитывая большой объем работы,  требуется время для дополнительного расчета.  

Представитель истца поддержал исковые требования. Представитель ответчика исковые требования не признал. 

Суд, руководствуясь статьями 158, 159, 163, 184, 185 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, отказал в удовлетворении ходатайства  

ответчика об отложении судебного разбирательства, так как дополнительное соглашение  не относится к спорному договору, оплата долга возможна и на стадии исполнения  судебного акта, объявил перерыв в судебном заседании с 11 час. 03 мин. 23.10.2023 до 09  час. 45 мин. 30.10.2023.  

После перерыва судебное заседание продолжено 30.10.2023 09 час. 45 мин., в том же  составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания.  

На судебное заседание явились: от истца: ФИО2 по доверенности от 09.12.2022 № 001, паспорт, доверенность; от ответчика: не явились, извещены. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, провел судебное заседание в отсутствие представителей  ответчика.  

30.10.2023 от истца в суд поступило уточнение. 

Представитель истца поддержал исковые требования, просит принять уточнение  требований.  

Суд руководствуясь статьями 66, 49, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, приобщает к материалам дела поступившие документы,  принимает уточнение истцом исковых требований, так как оно не противоречит закону, не  нарушает прав других лиц, подписано полномочным лицом.  

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.  

Между АО "Теплоэнергия" (исполнитель, истец) и ООО "НордСервисСтрой"  (заявитель, ответчик) заключен договор о подключении (технологическом  присоединении) к системе теплоснабжении объекта № 142/ТС от 13.07.2022, в  соответствии с которым Исполнитель обязуется осуществить подключение к системе  теплоснабжения объекта капитального строительства Заявителя, а 'Заявитель обязуется  выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по  подключению (п. 1.1. Договора).  

Согласно п. 1.2. Договора, под объектом капитального строительства, указанном в  пункте 1.1 настоящего договора, понимается «Многоквартирный жилой дом в мкр. Марха  г. Якутска РС(Я)» (далее - подключаемый объект).  

Срок подключения объекта- в лечение 18 месяцев с даты заключения договора (п.  1.5. Договора).  

В соответствии с п. 3.1. Договора, плата за подключение (технологическое  присоединение) объекта к системе теплоснабжения приведена в приложении N 3 и  составляет 13 731 804,00 (тринадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча восемьсот  четыре рубля ноль копеек) рублей, в т.ч. НДС 20%.  

Согласно п. 3.2. Договора, внесение Заявителем платы за подключение  осуществляется в следующем порядке (согласно п.52 Постановления Правительства №  2115 от 30.11.2021 «О подключении (технологическом присоединении) к системам  теплоснабжения»):  

2 059 770,60 руб. (15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со  дня заключения договора о подключении);  

6 865 902,00 руб. (50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со  дня заключения договора о подключении, но не позднее подписания акта о подключении);  

2 746 360,80 руб. (20 процентов платы за подключение вносится в течение 5 дней с  даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения  пусконаладочных работ и комплексною опробования, но не позднее дня подписания  сторонами акта о подключении);  

2 059 770, 60 руб. (оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15  дней со дня подписания сторонами акта о подключении).  

Договор вступает в силу с даты получения исполнителем экземпляра Договора,  подписанного Заявителем, и действует до даты исполнения Сторонами своих обязательств  

в полном объеме. Истечение срока подключения не влечет прекращения неисполненных  по Договору обязательств Сторон. Прекращение действия Договора не освобождает  Стороны от ответственности за его нарушение (п. 5.2. Договора).  

В п. 6.2. Договора стороны установили, что в случае несвоевременной и (или)  неполной оплаты Заявителем обязательств по оплате каждого из платежей (в том числе  авансовых), указанных в гг. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от  Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки  Центральною банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты,  не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня  после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты;  

Истцом свои обязанности выполнены в полном объеме, что подтверждается актом от  23.10.2023 об окончании строительно-монтажных работ по договору № 2023.2208 от  22.08.2023, актами о приемке выполненных работ № 1 от 23.10.2023, № 2 от 23.10.2023, №  3 от 23.10.2023, № 4 от 23.10.2023, № 5 от 23.10.2023, справками о стоимости  выполненных работ № 1 от 23.10.2023.  

Истец в адрес ответчика направил претензионное письмо от 26.06.2023 № 2445/ТЭ, с  требование в течение 3 календарных дней с момента получения настоящей претензии  оплатить пени за просрочку внесения авансовых платежей.  

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате за  оказанные услуги истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.  

Ответчик в нарушение статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации отзыв в материалы дела не представил.  

Суд пришел к следующим выводам. 

Согласно пункту 2 статьи 421 ГК РФ, стороны могут заключить договор, как  предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.  

Договор о технологическом присоединении, заключенный между сторонами, по  всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг;  к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения могут быть  применены помимо положений главы 39 ГК РФ, положения главы 37 ГК РФ о подряде,  общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Статья 782 ГК РФ устанавливает один из таких случаев, когда обязанности заказчика  и исполнителя прекращаются вследствие одностороннего отказа от исполнения договора  возмездного оказания услуг.  

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг  исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные  действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.  

Согласно ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения  о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания  услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также  особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.  

Следовательно, на стороны распространяются положения гражданского  законодательства о возмездном оказании услуг, а также общие положения о подряде.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Кодекса заказчик обязан оплатить оказанные  ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. Данные нормы закона,  устанавливая обязанность заказчика оплатить исполнителю оказанные им услуги, не  регулируют вопроса об оплате исполнителю понесенных им расходов в связи с  оказанными услугами.  

Как установлено частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование  своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

В нарушение условий договора ответчик оплату оказанных услуг произвел  несвоевременно.  

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения.  

В силу п. 1 ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,  определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли  обязанность ее уплаты соглашением сторон.  

В соответствии с п. 9.1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О  теплоснабжении" потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) не полностью  оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по договору  теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации  (теплоснабжающей организации) пени в размере одной стотридцатой ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день  фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная  со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день  фактической оплаты.  

В п. 6.2. Договора стороны установили, что в случае несвоевременной и (или)  неполной оплаты Заявителем обязательств по оплате каждого из платежей (в том числе  авансовых), указанных в гг. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от  Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки  Центральною банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты,  не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня  после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.  

Судом расчет истца проверен, признан неверным в части периода начисления пени. 

Начальной датой исчисления пени следует считать 29.07.2022 и 12.10.2022 с учетом  положений статьи 191 и 193 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока,  определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной  даты или наступления события, которыми определено его начало. Если последний день  срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший  следующий за ним рабочий день.  

С учетом п. 3.2. Договора, внесение Заявителем платы за подключение  осуществляется в следующем порядке (согласно п.52 Постановления Правительства №  2115 от 30.11.2021 «О подключении (технологическом присоединении) к системам  теплоснабжения»):  

2 059 770,60 руб. (15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со  дня заключения договора о подключении);  

6 865 902,00 руб. (50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со  дня заключения договора о подключении, но не позднее подписания акта о подключении);  

2 746 360,80 руб. (20 процентов платы за подключение вносится в течение 5 дней с  даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения  пусконаладочных работ и комплексною опробования, но не позднее дня подписания  сторонами акта о подключении);  

2 059 770, 60 руб. (оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15  дней со дня подписания сторонами акта о подключении).  

В связи с чем, судом произведен собственный расчет неустойки в размере 

4 133 008,93 рублей за период с 29.07.2022 по 30.10.2023, и далее с 31.10.2023 по день  фактической оплаты 8 925 672,60 рублей долга рассчитанную исходя из 1/130 ставки  

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату  фактической оплаты долга.  

Задолженность:  

2 059 770,60 руб. 

с 29.07.2022 по 30.10.2023 

Период 

просрочки:

Доля от ставки  ЦБ:  

1/130 

на конец периода 

Расчёт 

ставки: 

Задолженность  

Период просрочки 

с 

по 

дней  

Ставка  

Формула 

Неустойка 

2 059 770,60  

29.07.2022 

Новая задолженность на 2 059 770,60 руб. 

2 059 770,60  

29.07.2022  

11.10.2022  

75 

15 

2 059 770,60 × 75 × 1/130 × 15%  

178 249,38 р.  

8 925 672,60 

12.10.2022 

Новая задолженность на 6 865 902,00 руб. 

8 925 672,60  

12.10.2022  

30.10.2023  

384 

15 

8 925 672,60 × 384 × 1/130 × 15%  

3 954 759,55 р.  

Сумма основного долга: 8 925 672,60 руб. 

Сумма неустойки: 4 133 008,93 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы  относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных  требований.  

Пропорциональный размер удовлетворенных требований составляет 99,75 %  (4 133 008, 93 (размер обоснованных требований) /4 143 307, 74 (размер заявленных  требований)*100)  

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных  с рассмотрением дела арбитражным судом.  

Истцом понесены почтовые расходы в размере 126 рублей за направление  претензии, искового заявления, что подтверждается кассовыми чеками, списками  внутренних почтовых отправлений, в связи с чем, указанные почтовые расходы следует  отнести на ответчика в размере 125,69 рублей (126 * 99, 75%).  

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при  сумме исковых требований 4 133 008, 93 рублей размер государственной пошлины  составляет 43 717 рублей.  

Определением суда от 03.08.2023 удовлетворено ходатайство истца, произведен  зачет государственной пошлины в размере 36 313 рублей.  

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с  учетом удовлетворения исковых требований расходы истца подлежат взысканию с  ответчика в размере 36 313 рублей.  

С истца в доход федерального бюджета следует взыскать государственную пошлину  в размере 109 рублей (43 717 рублей – (43 717 рублей * 99, 75 %)).  

С ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать государственную  пошлину в размере 7 295 рублей (43 717 рублей – 36 313 рублей – 109).  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в  сети «Интернет».  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в  общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу:  www.kad.arbitr.ru.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НордСервисСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Теплоэнергия"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 4 133 008,93 рублей неустойки, начисленной в  соответствии с пунктом 6.2 договора № 142/ТС о подключении (технологическом  присоединении) к системе теплоснабжения объекта от 13.07.2022 за период с 29.07.2022  по 30.10.2023, и далее с 31.10.2023 по день фактической оплаты 8 925 672,60 рублей долга  рассчитанную исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации, действующую на дату фактической оплаты долга, а также 36 313 рублей  расходов на оплату государственно пошлины, 125,69 рублей расходов на отправку  почтовых отправлений.  

Взыскать с акционерного общества "Теплоэнергия" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 109 рублей государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НордСервисСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 7 295 рублей  государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н.