Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

19. 06. 2020 года.                                               Дело № А40-43484/20-43-316

Резолютивная часть решения объявлена 15. 06. 2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме 19. 06. 2020 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО " Хайтед-Энергетика " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " ПАВЛОВСКИЙ ПАССАЖ " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 3 787 707 руб. 77 коп. – долга, пени,

с участием представителей: от истца – не явился, от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 3 787 707 руб. 77 коп. – долга, пени, на основании статей  307, 309, 310, 711  ГК РФ.

Истец не направил представителя в судебное заседание, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; представителя в судебное заседание не направил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва ответчика и представителей истца и ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что 10.10.2017г. между компанией ООО «Хайтед-Энергетика» (Истец) и компанией ООО «ПАВЛОВСКИЙ ПАССАЖ» (Ответчик) был заключен Договор строительного подряда № HEN-P-A110-112-17 (Договор).

Согласно Договору Истец обязуется выполнить строительно-монтажные работы, работы по инженерному и технологическому оснащению здания Автономного энергетического блока для инженерно-технического обеспечения здания торгово-развлекательного комплекса «Павловский Пассаж», расположенного по адресу: 

<

...> а также монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные с ними работы, а Ответчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2019г. Стороны подписали к Договору Дополнительное соглашение №4, которым приостановили выполнение работ по Договору на неопределенный срок.

Истец выполнил строительно-монтажные работы в объеме, зафиксированном сторонами в Дополнительном соглашении №4 от 01.02.2019г., т.е. на момент приостановления выполнения работ по Договору, что подтверждается подписанными Сторонами Актами: Акт о приемке выполненных работ за июль 2018г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2018г. на сумму 5 177 468 руб. 84 коп. (с НДС); Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.10.2018г. на сумму 3 152 454 руб. 32 коп. (с НДС); Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.01.2019г. на сумму 3 435 360 руб. 10 коп. (с НДС).

Общая стоимость Договора с учетом Дополнительного соглашения №2 от 20.07.2018г. и Дополнительного соглашения №3 от 11.01.2019г. составляет сумму в рублях РФ, эквивалентную 107 034,22 Евро (с НДС) и 188 884 709 руб. 54 коп. (с НДС).

Общая стоимость выполненных работ с учетом Дополнительного соглашения №4 от 01.02.2019г. составляет 11 765 283 руб. 26 коп. (с НДС).

На основании п. 2.7.1.8. Договора оплата за выполненный объем работ в расчетном месяце производится не позднее 10 дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат за расчетный месяц.

В соответствии с п. 2.7.1.9. Договора для обеспечения надлежащего исполнения генподрядчиком своих обязательств заказчик удерживает в качестве гарантийного резерва 3 процента от стоимости выполненных работ по предоставленным генподрядчиком формам КС-2 и КС-3. Таким образом, Ответчиком было удержано 352 958 руб. 50 коп. (с НДС).

В соответствии с п. 2.7.2. Договора и п. 5 Дополнительного соглашения №4 от 01.02.2019г. Ответчик обязуется обеспечить возврат Истцу гарантийного удержания, произведенного согласно п. 2.7.1.9. Договора, в размере 352 958 руб. 50 коп. (с НДС), в срок не позднее 365 дней после подписания Дополнительного соглашения №4 от 01.02.2019г., т.е. в срок до 01.02.2020г.

Ответчиком выполнены обязательства по оплате на сумму 8 234 000 руб. 00 коп. (с НДС).

Задолженность Ответчика по оплате выполненных работ на 02.03.2020г. составляет 3 178 324 руб. 76 коп. (с НДС) и 352 958 руб. 50 коп. (с НДС).

Истцом свои обязательства по Договору выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством, претензий со стороны Ответчика не имеется. В свою очередь, возникшая задолженность Ответчиком не погашена, обязательства по Договору Ответчиком в полном объеме не выполнены, окончательный расчет не произведен.

Задолженность Ответчика перед Истцом составляет 3 531 283 руб. 26 коп, (с НДС), что подтверждается актами выполненных работ, подписанными обеими сторонами.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 3 531 283 руб. 26 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 8.3. Договора за нарушение сроков оплаты за выполненные работы Истец вправе потребовать от Ответчика уплаты пени в размере 0,01% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки до момента оплаты.

Сумма пени на 02.03.2020г. составляет 256 424 руб. 51 коп.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 256 424 руб. 51 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " ПАВЛОВСКИЙ ПАССАЖ " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Хайтед-Энергетика " (ОГРН 

<

***>) 3 787 707 руб. 77 коп., в том числе: 3 531 283 руб. 26 коп. – долга,  256 424 руб. 51 коп. – пени и расходы по уплате госпошлины в сумме 41 939 руб. 00 коп.;

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов