АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(р е з о л ю т и в н а я  ч а с т ь)

Дело №А13-14073/2021

город  Вологда

07 февраля 2022 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :

внести в муниципальный контракт № 3352602325321000016 от 23.07.2021 «Выполнение работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в 

<

...>», заключенный  между муниципальным казённым учреждением «Горстройзаказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «Интелстрой», следующие изменения:

пункт 3.1 Контракта изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: после заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ: 15.06.2022 года».

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

 

Судья                                                                                                      Л.А. Соколова