АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432970 

Тел. (8422) 33-46-08 Факс (8422) 32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru  

 Именем Российской Федерации  РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А72-1098/2021

г. Ульяновск

09 февраля 2022 года

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Котельникова А.Г., 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд    

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Симбирскэлектромонтаж» в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу  решения суда устранить недостатки работ в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, выполненные по договору субподряда № 2018- НМ.НО.СВТ от 01.12.2018 и договору субподряда № 2019-НМ.ДОП2 от 01.08.2019, а  именно:  

- произвести демонтаж светодиодной ленты Неон мини в объеме 671 погонных метров;  - произвести демонтаж распределительной коробки IР55 в количестве 4 шт.;  

- произвести монтаж, установку распределительной коробки IР55 в количестве 4 шт.;  

- произвести соединение, подключение внутри распределительной коробки 9кабель  ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 с кабелем сетевого шнура адаптера АС при помощи опрессовки,  сварки, пайки или сжимов с последующей герметизацией, в количестве 17 шт.);  

- произвести подключение, соединение разъема колодки адаптера С с корпусом  светодиодной ленты с помощью штыревого коннектора, с герметизацией соединений  герметиком, в количестве 17 шт.;  

- произвести зачистку профиля на фасаде здания (ниша под неон) от старого герметика в  объеме 671 х 0,008 кв. метров;  

- произвести монтаж светодиодной ленты в существующий профиль на фасаде здания с  применением герметика и герметизацией заглушек и соединений неона.  

 Указанные работы произвести с использованием следующих материалов:  

- светодиодная лента Неон мини (Led Neon Flex) SMD 2835/120 LED 8x16 220V Max  7W/m (белый холодны) в количестве 671 погонный метр, или аналог, согласованный с  ООО «СМУ КПД-2»»;  

- монтажный комплект для одноцветной светодиодной ленты (2 игольчатых коннектора,  соединитель, заглушка) в количестве 17 шт.;  

- драйвер АС/DС 220V (сетевой шнур для неона 8 х 16) в количестве 17 шт.;  - коробка кабельная соединительная или разветвительная в количестве 4 шт.;  - силиконовый нейтральный герметик Penosil Silicone в количестве 10 шт.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Симбирскэлектромонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное управление КПД-2» расходы по оплате государственной  

пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. и расходы по оплате судебной экспертизы в  размере 123 000 (сто двадцать три тысячи) руб.  

 Перечислить с депозита Арбитражного суда Ульяновской области на счет  экспертного учреждения общество с ограниченной ответственностью «ЭКЦ Самара»  123 000 (сто двадцать три тысячи) руб. за производство судебной экспертизы.  

 Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  управление КПД-2» с депозита Арбитражного суда Ульяновской области излишне  перечисленные денежные средства за производство судебной экспертизы в размере  30 000 (тридцать тысяч) руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  порядке и сроки, установленные статьями 257-260 АПК РФ.  

 Судья А.Г. Котельников