Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-599/2022

03 ноября 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "БАЛТКАМЕНЬ" (ИНН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: ФИО2 

- от ответчика: ФИО3 

установил:

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (далее - Фонд) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "БАЛТКАМЕНЬ" (далее - Общество) о взыскании 749306,74 руб. излишне уплаченных по договору от 11.10.2018 № 2018-74-1 (далее – Договор).

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Представитель ответчика поддержал возражения против заявленных требований. 

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Фондом (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) заключен Договор, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) дом(-ах) (далее – работы), расположенных на территории Ленинградской области по адресам, указанным в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

По п. 2.1. Договора цена Договора составляет 75566960,88 руб. 

Согласно пункту 2.4. Договора расчёт за фактически выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выдачи Комитетом по культуре Ленинградской области акта(-ов) приемки выполненных работ по сохранению объекта(-ов) культурного наследия, выявленного(-ых) объекта(-ов)  культурного наследия по многоквартирному(-ым) дому(-ам), подписания Акта выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору, и предоставления акта(-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 на каждый вид работ по каждому многоквартирному дому, согласованного(-ых) всеми членами Рабочей комиссии, указанной в п. 6.2 настоящего Договора, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры, согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору) с учетом понижающего коэффициента.

В силу п. 2.4.1. Договора Заказчик вправе осуществлять расчеты за фактически выполненные виды работ по многоквартирному(-ым) дому(-ам) (далее - МКД) до выдачи Комитетом по культуре Ленинградской области акта(-ов) приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия по многоквартирному(-ым) дому(-ам) и подписания Акта выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору, но не более 80 % от цены договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2.4.1.1. Договора оплата выполненных видов работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта(-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 на каждый вид работ по каждому многоквартирному дому, согласованного(-ых) всеми членами Рабочей комиссии, указанной в п. 6.2 настоящего Договора, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры, согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору) с учетом понижающего коэффициента.

Стороны по Договору подписали акты о приемке выполненных работ от 14.07.2020 № 1 на сумму 6337654,85 руб., от 14.07.2020 № 2 на сумму 8648479,97 руб. 

Фонд оплатил работы по указанным актам на сумму 11988907,85 руб. платежными поручениями от 23.07.2020 № 11509 на сумму 4744707,28 руб., от 23.07.2020 № 11508 на сумму 2748360,13 руб., от 16.10.2018 № 9723 на сумму 2321763,75 руб., от 16.10.2018 № 9724 на сумму 2174076,69 руб. 

Как указывает Фонд, в указанные акты о приемке выполненных работ и исполнительные сметы от 23.07.2020 №№ 02-01-01, 02-01-02 на данные виды работ на основании акта фиксации увеличения/уменьшения объемов работ от 23.07.2020 включена стоимость дополнительных фактически выполненных работ, в связи с чем включение в исполнительные сметы и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 суммы в размере 5% на непредвиденные работы и затраты, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте произведено ошибочно. Общий размер суммы излишне уплаченных денежных средств составляет 749306,74 руб. согласно расчету 14986134,82 руб. (стоимость принятых работ) * 5%. 

Фонд направил Обществу претензию от 03.11.2020 с требованием возврата излишне уплаченных денежных средств.

Отказ Общества удовлетворить требование послужил основанием для обращения Фонда в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Верховный Суд Российской Федерации определил, что право подрядчика на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим несением (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2018 N 301-ЭС18-21555).

Непредвидимые расходы - это резерв средств на непредвидимые работы и затраты, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность которых возникает в ходе выполнения работ в результате уточнения фактической ситуации на объекте.

Согласно акту фиксации увеличения/уменьшения объемов работ от 23.07.2020 включена стоимость дополнительных фактически выполненных работ, т.е. сторонами произведен фактический расчет объемов работ.

Затраты на непредвидимые расходы не подлежат возмещению заказчиком без их расшифровки в актах приемки выполненных работ, поскольку любые расходы по договору подлежат оформлению с предоставлением оправдательных первичных документов в силу правил бухгалтерского учета.

При этом Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004..."), который не конкретизировал виды работ, относимых к непредвиденным работам, и не устанавливал признаки, которыми должны обладать данные работы, в связи с чем дополнительно расшифровывать их в актах выполненных работ не требовалось, и оплачивались заказчиком по норме, согласованной при формировании договорной цены, утратил силу в связи с изданием Приказа Минстроя России от 06.10.2020 N 592/пр.

С учетом изложенного Фонд правомерно исходит из того, что возникновение у подрядчика права на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с выполнением соответствующих работ (несением непредвиденных затрат), которые должны быть обоснованы документами.

На вопрос суда ответчик пояснил, что документальное подтверждение несения непредвидимых расходов отсутствует.

Отзыв на исковое заявление не представлен.

На основании изложенного, суд удовлетворяет исковые требования о возврате 749306,74 руб. излишне оплаченных по спорному договору. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БАЛТКАМЕНЬ" (ИНН: 

<

***>) в пользу НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН: 

<

***>) 749306,74 руб. неосновательного обогащения, 14030 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БАЛТКАМЕНЬ" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 3956 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья Косенко Т.А.