69025_3370510  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск «15» февраля 2019 года Дело № А19-3687/2017 

 Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОН-Т»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН:3849009023; адрес: 664035, 

<

...>) в месячный срок со дня вступления в  законную силу решения суда безвозмездно устранить недостатки работ, выявленных в  период гарантийного срока эксплуатации объектов капитального строительства - жилых  зданий, находящихся по адресу: 

<

...>, 42, 44, построенных в соответствии с муниципальным контрактом   № 2014.277441 от 28.09.2014, путем выполнения следующих работ по всем  вышеуказанным объектам:  

1. Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 (23,88 куб.м.); 2. Устройство основания из ПГС (3,57 куб.м.); 

3. Усиление ленточных бетонных фундаментов железобетонными обоймами (14,28  куб.м.);  

4. Демонтаж отмостки существующей (107,1 кв.м. (10,71 куб.м.);  5. Устройство основания из ПГС под отмостку (107,1 кв.м. (10,71 куб.м.);  

6. Устройство отмостки (107,1 кв.м. (10,71 куб.м.); 

7. Демонтаж оконных блоков с сохранением материалов (25,245 кв.м.);  

8. Монтаж оконных заполнений (стоимость оконных блоков не учитывается,  применяются существующие) (25,245 кв.м.);  

9. Устройство гидроизоляции фундаментов обмазочной (59,5 кв.м.); 10. Демонтаж профилированного листа (демонтаж фасадной обшивки) (301,2 кв.м.); 

11. Демонтаж слоя ветровлагозащиты (301,2 кв.м.);  

12. Заполнение швов кладки из газобетонных блоков. Применительно применить  

расценку: Ремонт штукатурки отдельных мест до 10% (301,2 кв.м.); 

13. Утепление наружных стен минераловатными плитами, толщиной 100 мм (301,2  

кв.м.); 

14. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой профилированным листом  

высотой гофры 10 мм без утепления (301,2 кв.м.); 15. Демонтаж слоя из фанеры на отм 0,00 (172,3 кв.м.); 16. Демонтаж существующих перекрытий на отм. 0,00 (172,3 кв.м.); 

17. Устройство деревянных балочных перекрытий, утепленных слоем 150 мм  

утеплителем «Эковата» с устройством слоя пароизоляции, черновым полом из доски на  

отм. 0,00 (172,3 кв.м.); 18. Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ (172,3 кв.м.); 

19. Демонтаж минераловатного утеплителя чердачного помещения (172,3 кв.м. (25,8  

куб.м.); 

20. Демонтаж подсистемы для подвесных потолков из брусков (172,3 кв.м. (287 п.м.);  21. Устройство перекрытий чердачных с устройством пароизоляции, слоем  

минераловатного утеплителя, толщиной 200 мм, накатом из доски, толщиной 30 мм.  

(172,3 кв.м.); 22. Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой (172,3 кв.м.); 

23. Обработка антисептиками, антигрибковая обработка пиломатериала (11,25  

куб.м.); 

24.  Строительный мусор, излишки грунта и материалов должны быть вывезены с  

территории строительства в специально отведенные места. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОН- 

Т» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:3849009023; адрес: 664035, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,  

<

...>) в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  

через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия. 

Судья Е.Ю. Колосова