АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-297748/23-126-2290

г. Москва

27 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 07.06.2024 года  

Решение в полном объеме изготовлено 27.06.2024 года  Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

председательствующего судьи Новикова М.С. протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Торосян М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

дело по исковому заявлению ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>)  к ООО "АЛЬТА" (ИНН 

<

***>)  

о взыскании 537 432,59 руб. при участии: от истца: ФИО2 по дов. от 10.11.2023 

от ответчика: ФИО3 по дов. от 14.06.2022  

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности в размере 516 200 руб., процентов за  

период с 26.08.2023 по 15.12.2023 в размере 21 232 руб. 59 коп., с последующим  

начислением процентов по день фактической оплаты задолженности исходя из ставки  

рефинансирования Банка России действующей в соответствующие периоды. 

Определением от 27.06.2024 встречное исковое заявление возвращено  

заявителю. 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.  Истец требования поддержал в полном объеме.  

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, заслушав мнение  истца, суд пришел к следующим выводам.  

Из материалов дела и представленных доказательств следует, что между ООО  «АЛЬТА» (далее-Заказчик/Ответчик) и ИП ФИО1 (далее -  исполнитель/Истец) заключен договор субподряда № 0205/23 от 02.05.2023 года на  выполнение работ (далее-Договор) (Приложение Мб).  

В соответствии с п. 1.1. Договора, Исполнитель принял обязательства перед  Заказчиком по выполнению механизированной стяжки и штукатурки «ЖК Режиссер»,  по адресу: ул. Вильгема Пика, вл. 3., стр. 1-8, в соответствии утверждённой Проектной  и Рабочей документацией, действующими на момент выполнения и сдачи-приемки  результата Работ строительными нормами и правилам, а также условиями Договора.  

Согласно п. 2.1. Стоимость работ определена на основании Расчета сметной  стоимости (Приложение № 1) и составляет 4 131 862,00 рублей.  

В связи с изменением объема работ, 22.06.2023 года было подписано  Дополнительное соглашение № 1 (Приложение № 7), которым цена договора увеличена  и составляет 6 133 810 рублей.  

Согласно п.3.2 договора Заказчик производит оплату в течение 10 рабочих дней  с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат и КС-3).  

Сдача-приемка работ подтверждается подписанными КС-2 и КС-3 без  замечаний.  

В случае наличия замечаний к работам, Заказчик в течение 7 дней должен  направить их Исполнителю (п. 7.2.1., 7.2,2. Договора). Сторонами было подписано без  замечаний: КС-2 № 1 от 10,05.2023 года на сумму 427 500,00 рублей КС-2 № 2 от  25.05.2023 года на сумму 429 723,00 рублей. КС-3 № 3 от 29.05.2023 года на сумму 285  000,00 рублей. КС-2 № 3 от 29.05.2023 года на сумму 285 000,00 рублей. КС-3 № 4 от  05.06.2023 года на сумму 131 600,00 рублей. КС-2 № 4 от 05.06.2023 года на сумму 131  600,00 рублей. КС-3 № 5 от 09.06.2023 года на сумму 399 000,00 рублей. КС-2 № 5 от  09.06.2023 года на сумму 399 000,00 рублей КС-2 № 6 от 16.06.2023 года на сумму 199  500,00 рублей КС-3 № 7 от 21.07.2023 года на сумму 228 000,00 рублей КС-2 № 7 от  21.07.2023 года на сумму 228 000,00 рублей КС-2 № 8 от 31.07.2023 года на сумму 228  000,00 рублей КС-3 № 9 от 11.08.2023 года на сумму 332 200,00 рублей КС-2 № 9 от  11.08.2023 года на сумму 332 200,00 рублей КС-2 № 10 от 17.08.2023 года на сумму 184  000,00 рублей. КС-3 № 10 от 17.08.2023 года на сумму 184 000,00 рублей. Общая сумма  

выполненных и принятых Заказчиком работ по договору составляет 2 844 523,00  рублей.  

Оплата по КС-3 № 9, КС-2 от 11.08.2023 года, КС-2 № 10, КС-3 № 10 от  17.08.2023 года в общем размере 516 200 руб. не произведена.  

КС-3 № 9 и КС-2 № 9 были подписаны сторонами 11.08.2023 года. Срок оплаты  составляет 10 рабочих дней с даты подписания, т.е. не позднее 25.08.2023 года.  

КС-3 № 10 и КС-2 № 10 были подписаны сторонами 17.08.2023 года. Срок  оплаты составляет 10 рабочих дней с даты подписания, то есть не позднее 31.08.2023  года.  

Таким образом, по состоянию на 15.12.2023 года задолженность Заказчика  составляет 516 200 руб.  

По состоянию на 15.12.2023 года сумма процентов за пользование чужими  денежными средствами составляет 21 232,59 рубля согласно предоставленному  расчету.  

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд руководствуется положениями ст.  8, 10, 12, 307-310, 395, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а  также отмечает следующее.  

По результатам исследования совокупности представленных в материалы дела  доказательств, судом установлено, что сдача-приемка выполненных работ  производится ежемесячно в следующем порядке: Приемка выполненных работ  осуществляется каждые 500 м2. Исполнитель передает Заказчику. Справку о стоимости  выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном  месяце. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).  

Заказчик в течение 7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает  Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма Ш КС-3), Акт о приемке  выполненных работ (форма КС-2). При несогласии Заказчика с содержанием указанных  документов, а также в случае выявления работ, выполненных с нарушением  требований к качеству, а также выявления критических недостатков представителем  строительного контроля, и не устраненных Исполнителем, Заказчик возвращает  Исполнителю Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Акт о  приемке выполненных работ (форма КС-2) с мотивированным отказом и указанием  конкретных замечаний. Мотивированный отказ направляется в адрес Исполнителя  посредством электронной почты.  

В случае отказа Заказчика от приемки некачественно выполненных работ либо  при выявлении критических недостатков, Исполнитель устраняет недостатки в  выполненных работах в установленный Заказчиком срок и после устранения  представляет на подпись Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат  (форма № КС-3), Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).  

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о  приемке выполненных работ (форма № КС-2). утверждённые подписью  уполномоченного представителя Заказчика, подтверждают лишь выполнение  промежуточных работ для проведения расчетов. Они не являются актами  предварительной приемки результата отдельного этана работ, с которым  законодательство РФ связывает переход всех рисков на Заказчика.  

В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе ссылаться на  ю. что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.  

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на  недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.  

После подписания Исполнителем и Заказчиком Справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Акта приемки выполненных работ по  форме № КС-2 Исполнитель в пятидневный срок выставляет счет-фактуру па  стоимость выполненных СМР.  

Итоговая приемка выполненных работ оформляется итоговым актом сдачи-приемки результата работ.  

Исполнитель письменно информирует Заказчика за 12 (двенадцать) часов до  начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их  готовности. Заказчик обязан обеспечить участие представителя Генерального  Заказчика, строительного контроля и авторского надзора в приемке.  

Указанное соответствует п. 7.1.1 и 7.2.1 – 7.2.8 договора (ст. 421, 431 ГК РФ). 

Истец указывает, что предъявил к приемке результат работ на сумму 516 200  руб., отраженный в актах КС-2 и КС-3 № 9 и № 10.  

Вместе с тем, суд отклоняет указанный довод как несостоятельный, поскольку  надлежащих, относимых и допустимых доказательств (ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ)  предъявления к приемке выполненных работ ответчику, применительно к п. 7 договора  и согласованным сторонами адресам организаций (п. 8) договора истцом не  представлено. Более того, договором не предусмотрен обмен юридически значимыми  сообщениями, в том числе приемка выполненных работ по WhatssApp. В связи с чем,  

нотариально заверенная переписка не является относимым и допустимым  доказательством сдачи работ, учитывая отсутствие согласованного условия в договоре.  

Учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к  выводу об отсутствии факта сдачи выполненных работ ответчику, в связи с чем,  правовых оснований для взыскания задолженности по оплате выполненных работ  судом не установлено.  

Поскольку в удовлетворении основного требования судом отказано, в  удовлетворении акцессорного требования о взыскании процентов суд также  отказывает.  

Учитывая результат рассмотрения дела, расходы по оплате услуг представителя  взысканию с ответчика не подлежат.  

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что заявленные  исковые требования не подлежат удовлетворению с отнесением на истца  государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 307-310, 395, 421,  431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 4, 8, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: М.С. Новиков