44/2017-75496(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-11310/2017

г. Курган

16 ноября 2017 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Задориной А.Ф., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Лебяжьевского  района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному  предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 315743000005401, ИНН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ 

при участии: данные в протоколе 

Руководствуясь статьями 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315743000005401) в течение 3 месяцев с момента  вступления в законную силу настоящего решения, безвозмездно устранить  недостатки работ по муниципальному контракту № 01 от 14.07.2016 на выполнение  работ по ремонту кровли здания Администрации Лебяжьевского района,  расположенного по адресу: 

<

...>, путем выполнения ремонта мягкой кровли, с частичной  заменой кровельного покрытия площадью 232,2 кв.м., выполнения замены  кровельного покрытия площадью 20 кв.м.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315743000005401) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня  принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Курганской области.  

Судья А.Ф. Задорина