209/2020-17370(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-3010/2019

18 марта 2020 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Корона»  (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) к Некоммерческой организации  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской  области» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) об обязании в течение трех  месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить недостатки  выполненных работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по  адресу: 

<

...>, объединенное в одно производство с  делом, возбужденным по исковому заявлению НО «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» к ООО  «САГА+» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки выполненных работ по капитальному ремонту кровли  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, о взыскании  судебной неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ,  

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «Управляющая компания «Корона»  удовлетворить частично.  

Обязать НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» в течение трех месяцев со дня вступления в законную  силу решения суда устранить недостатки, допущенные при проведении  капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, а именно:  

1) Устранить нарушение, выразившееся в том, что ограждение кровли  выполнено с использованием кровельных саморезов путем исполнения п. 3.10,7.13  МСД 12-33; п. 4.4., 6.4.1.4 СП 17.13330.2017;  

2) Устранить нарушение, выразившееся в том, что карнизная кладка  выполнена с использованием монтажной пены путем соблюдения п.4.3, 5.1 СП  15.13330.212;  

3) Устранить недостаток, выразившийся в том, что не был заменен мауэрлат,  выполненный из коротких бревен, на целиковый;  

4) Устранить нарушение, выразившееся в том, что при применении  пароизоляционных мембран под обрешетку выполнена контробрешетка, путем  выполнения работ с соблюдением п 3.1.13, 3.1.23,7.4,7.5 СП 17.13330.2017;  

5) Устранить нарушение, выразившееся в том, что карнизная часть  выполнена из оцинкованного железа и замки разошлись, путем выполнения работ с  соблюдением п. 7.12,7.13, 7.14 СП 17.13330.2017;  

6) Устранить нарушение, выразившееся в том, что примыкание к стенам  (служащие парапетом) не имеют к ним крепления, путем выполнения работ с  соблюдением п. 5.1.18, 5.1.2, 5.1.22, 5.1.23, 6.4.1.3, 7.2 СП 17.13330.2017;  

7) Устранить нарушение, выразившееся в том, что примыкания к вытяжкам и  телерадиостойкам выполнены с помощью битумной мастики, путем выполнения  работ с соблюдением п. 5.1.19 СП 17.13330.2017, п. 7.11, 7.12 МДС 12-33.2007;  

8) Устранить нарушение, выразившееся в наличии многочисленных  сквозных отверстий в профлисте, путем выполнения работ с соблюдением п. 3.9,  3.10, 10.1, 10.6 МДС 12-33.2007.  

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.  

Взыскать с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» в пользу ООО «Управляющая компания «Корона»  расходы по оплаты государственной пошлины в размере 3 000 руб. и расходы на  оплату услуг эксперта в размере 42 000 руб.  

2. Исковое заявление НО «Региональный фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов Ивановской области» удовлетворить. 

Обязать ООО «Сага+» устранить недостатки, допущенные при проведении  капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, а именно:  

1) обеспечить выполнение монтажа ограждения кровли с 

использованием крепежа в соответствии с п. 3.10, 7.13 МДС 12-33.2007; п.  4.4,6.4.1.4 СП 17.13330.2017;  

2) обеспечить соединение кровельного материала карнизной части в «замок»  в соответствии п 7.12, 7.13, 7.14 СП 17.13330.2017;  

3) выполнить крепление примыканий к стенам (служащие парапетом) в  соответствии с п. 5.1.18, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.23, 6.4.1.3,7.2 СП 17.13330.2017;  

4) восстановить целостность кровельного покрытия (профлиста) п. 3.9, 3.10,  10.1, 10.6 МДС 12-33.2007.  

Установить для ООО «Сага+» судебную неустойку в пользу  

Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов Ивановской области» в случае неисполнения в  

установленный срок настоящего решения в следующем размере: за первую  

неделю неисполнения решения – 1 500 руб., за вторую неделю – 2 000 руб., за  

третью – 2 500 руб., за четвертую – 3 000 руб., начиная с пятой недели – по 4 000  

руб. за каждую неделю просрочки исполнения решения. 

Взыскать с ООО «Сага+» в пользу НО «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Ивановской области» расходы по оплаты  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

3. Взыскать с НО «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» в доход федерального бюджета  3 000 руб. государственной пошлины по делу.  

4. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд (610007, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия в  соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса  РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного  

сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья Скобелева Е.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 13:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна