7/2018-65397(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

08 июня 2018 года Дело № А28-2826/2018  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Вычугжанина Р.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

истца – кировское областное государственное казенное учреждение  "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН 

<

***>)  

к ответчику – общество с ограниченной ответственностью ТРЕСТ  "ГРАЖДАНСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>)  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств, 

при участии в судебном заседании: 

истец (представитель) – ФИО2 (доверенность от 18.01.2018)  

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью ТРЕСТ  "ГРАЖДАНСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента  вступления настоящего решения в законную силу безвозмездно устранить  недостатки работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Крытый  тренировочный каток с искусственным льдом в г. Кирове" (

<

...>), а именно:  

 - выполнить огнезащитное покрытие металлического каркаса здания на  ледовой арене в соответствии с проектно-сметной документацией и принятыми  решениями;  

 - восстановить просевший участок тротуара с левой стороны здания у  пандуса для маломобильных групп населения площадью 15 кв.м;  

 - установить привод на пожарный клапан системы ПВ-2;  - установить задвижку в приямке для таяния снега; 

 - ликвидировать провисание реечного потолка в раздевалке № 10 площадью  60 кв.м (закрепить несущие конструкции);  

 - зачеканить гильзу прохода труб в приямке с электрозадвижкой для  исключения попадания воды;  

 - восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре с правой стороны  здания площадью 20 кв.м, обетонировать бордюр;  

 - восстановить газонную бетонную решетку на автомобильной парковке  площадью 450 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ТРЕСТ  "ГРАЖДАНСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000  (шесть тысяч) рублей 00 копеек государственной пошлины по делу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный  апелляционный суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба (в том числе в  электронном виде) подается через Арбитражный суд Кировской области.  

Судья Р.А. Вычугжанин