Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-108314/22-51-816

14 октября 2022 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 октября 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИБРОБЕТОН» (ОГРН 5147746343949)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГАРАНТИЯ» (ОГРН 5167746245651)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 748 916 руб. 87 коп., по договору № ДП2047Ф/1710-К/Дмт от 14 сентября 2020 года штрафа в размере 3 677 113 руб.,

при участии:

от истца – Гулюкин А. Н., по дов. № 79ф/22 от 18 марта 2022 года; 

от ответчика – не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИБРОБЕТОН» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГАРАНТИЯ» (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 748 916 руб. 87 коп., по договору № ДП2047Ф/1710-К/Дмт от 14 сентября 2020 года штрафа в размере 3 677 113 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва на исковое заявление не представил, учитывая надлежащее уведомление о дате, месте и времени проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства определением суда о принятии дела к производству, отсутствие возражений ответчика на переход к рассмотрению дела по существу, в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), дело рассмотрено в отсутствие ответчика в судебном заседании суда первой инстанции.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителя истца, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 14 сентября 2021 года между истцом (подрядчиком) и ответчиком (субподрядчиком) был заключен договор подряда № ДП2047Ф/1710-К/Дмт.

В соответствии с пунктом 2.1. договора субподрядчик обязался по заданию подрядчика выполнить капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по программе капитального ремонта по адресу:

Адрес

Работа

 

Код

Вид

Объём

Ед. изм.

Сумма

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 8

3.4.1

Замена системы канализации (стояки)

3171,6

кв. м общей жилой площади помещений

948 554,20

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 8

3.4.2

Замена системы канализации (подвал)

1331

кв. м подвала

585 543,50

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.1.1

Замена стояков центрального отопления с радиаторами

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

2 838 969,98

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.1.3

Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой

1734,4

кв. м подвала (чердака)

2 838 891,94

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.2.1

Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

793 527,02

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.2.2

Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

1734,4

кв. м подвала (чердака)

624 839,28

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.2.3

Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

710 366,88

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.3.1

Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

909 129,12

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.3.2

Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

1734,4

кв. м подвала (чердака)

1 244 176,18

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.4.1

Замена системы канализации (стояки)

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

636 923,72

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.4.2

Замена системы канализации (подвал)

580

кв. м подвала

289 783,95

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.1

Замена вводно-

распределительного устройства

1

1 устройство

213 023,78

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.2

Замена магистралей (стояки)

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

565 366,70

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.3

Замена общедомовой системы освещения

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

385 973,38

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.4

Замена этажного распределительного щита

1

1 щит

29 221,97

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.5

Замена вводно-

распределительного устройства для многоквартирного дома

1

1 устройство

182 155,86

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.6

Замена магистралей (стояки) для многоквартирного дома

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

483 442,32

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.7

Замена общедомовой системы освещения для многоквартирного дома

1734,4

кв. м общей жилой площади помещений

330 038,98

г. Дмитров, г. Яхрома, ул. Ленина, д.40

3.6.8

Замена этажного распределительного щита для многоквартирного дома

1

1 щит

24 987,60

г. Дмитров, п. Рыбное, д. 13

3.2.1

Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой

1506,7

кв. м общей жилой площади помещений

376 840,74

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 11

3.2.2

Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

555,06

кв. м подвала (чердака)

210 166,53

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 11

3.4.2

Замена системы канализации (подвал)

555,06

кв. м подвала

291 464,78

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 11

3.6.1

Замена вводно-

распределительного устройства

1

1 устройство

223 888,00

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 11

3.6.2

Замена магистралей (стояки)

865,7

кв. м общей жилой площади помещений

296 588,82

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 11

3.6.3

Замена общедомовой системы освещения

865,7

кв. м общей жилой площади помещений

202 476,41

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 11

3.6.4

Замена этажного распределительного щита

6

1 щит

184 273,74

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.2.1

Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой

802,1

кв. м общей жилой площади помещений

385 693,79

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.2.2

Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

554,14

кв. м подвала (чердака)

209 818,19

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.3.1

Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой

802,1

кв. м общей жилой площади помещений

441 880,90

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.3.2

Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

554,14

кв. м подвала (чердака)

417 786,93

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.4.1

Замена системы канализации (стояки)

802,1

кв. м общей жилой площади помещений

309 576,51

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.4.2

Замена системы канализации (подвал)

554,14

кв. м подвала

290 981,69

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.6.1

Замена вводно-

распределительного устройства

1 устройство

223 888,00

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.6.2

Замена магистралей (стояки)

802,1

кв. м общей жилой площади помещений

274 799,46

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.6.3

Замена общедомовой системы освещения

802,1

кв. м общей жилой площади помещений

187 601,17

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 12

3.6.4

Замена этажного распределительного щита

6

1 щит

184 273,74

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 13

3.2.2

Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

554,06

кв. м подвала (чердака)

265 670,39

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 13

3.4.2

Замена системы канализации (подвал)

554

кв. м подвала

243 719,84

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 13

3.6.1

Замена вводно-

распределительного устройства

1

1 устройство

239 035,89

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 13

3.6.2

Замена магистралей (стояки)

801,5

кв. м общей жилой площади помещений

267 302,26

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 13

3.6.3

Замена общедомовой системы освещения

801,5

кв. м общей жилой площади помещений

139 364,82

г. Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. Транспортная, д. 13

3.6.4

Замена этажного распределительного щита

6

1 щит

184 273,74

г. Дмитров, рп. Деденево, ул. Комсомольская, д.26

3.1.7

Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения

511

кв. м площади дома по

внешним стенам

2 053 717,94

г. Дмитров, рп. Деденево, ул. Комсомольская, д.26

3.2.2

Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

370,4

кв. м подвала (чердака)

177 605,87

г. Дмитров, рп. Деденево, ул. Комсомольская, д.26

3.3.2

Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой

370,4

кв. м подвала (чердака)

202 341,19

г. Дмитров, рп. Деденево, ш. Московское, д.9

3.1.1

Замена стояков центрального отопления с радиаторами

3140

кв. м общей жилой площади помещений

4 808 698,05

г. Дмитров, рп. Деденево, ш. Московское, д.9

3.1.3

Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой

828

кв. м подвала (чердака)

1 374 925,05

г. Дмитров, рп. Икша, ул. Рабочая, д.21

3.1.1

Замена стояков центрального отопления с радиаторами

3442,97

кв. м общей жилой площади помещений

5 923 087,62

г. Дмитров, рп. Икша, ул. Рабочая, д.21

3.1.3

Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой

897,8

кв. м подвала (чердака)

1 544 476,37

в соответствии с техническим заданием, в сроки установленные графиком работ и в объеме, установленном в сметной документации, а подрядчик обязался принять результат работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 3.1. договора предельная стоимость работ составила 36 771 134 руб. 76 коп.

В соответствии с пунктом 5.1. договора субподрядчик обязался выполнить работы по договору в соответствии с графиком производства работ в пределах срока договора. Срок начала работ – с даты подписания договора. Срок выполнения – 30 ноября 2022 года.

Платежным поручением № 61 от 02 февраля 2021 года истец перечислил ответчику аванс по договору в размере 4 252 806 руб. 44 коп.

Ответчик выполнил и сдал работы на общую стоимость 1 503 889 руб. 57 коп., что подтверждается формами КС-2, КС-3 № 1 от 17.06.2021 на сумму 897 064 руб. 66 коп., № 2 от 17.06.2021 на сумму 291 713 руб. 40 коп., № 3 от 17.06.2021 на сумму 130 070 руб. 51 коп., № 4 от 17.06.2021 на сумму 185 041 руб.

Согласно пункту 13.1. договора, подрядчик вправе отстранить субподрядчика от работ или расторгнуть договор в случае если субподрядчик не приступит к выполнению работ в течение 10 дней или приостановит ход работ на срок более 5 дней или допустит просрочку выполнения работ установленных графике производства работ на срок свыше 15 календарных дней по причинам, зависящим субподрядчика.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ, истец принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 12 апреля 2022 года направил в адрес ответчика уведомление исх. № 533/ф от 08 апреля 2022 года о расторжении договора (прибыло в место вручения 14 апреля 2022 года, РПО № 11509370016384).

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ определено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу статей 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Со дня расторжения договора у ответчика нет правовых оснований для удержания денежных средств, перечисленных ему истцом в качестве предварительной оплаты работ. Доказательств выполнения работ на оставшуюся сумму перечисленного аванса в размере 2 748 916 руб. 87 коп. ответчик не представил.

В данном случае сумма неотработанного аванса в размере 2 748 916 руб. 87 коп. образует на стороне ответчика неосновательное обогащение. 

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах суд признает заявленное истцом требование о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 748 916 руб. 87 коп. подлежащим удовлетворению.

Истец просит суд взыскать с ответчика штраф в размере 3 677 113 руб.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 14.15. договора в случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 13. договора, субподрядчик уплачивает подрядчику штраф в размере 10 % от цены договора. 

Расчет истца судом проверен и признан математически и методологически верным.

Контррасчета штрафа ответчик не представил, о снижении не заявил.

Учитывая изложенное, поскольку ответчиком были нарушены сроки выполнения работ по договору, что повлекло одностороннее расторжение договора, штраф подлежит взысканию с ответчика в заявленном размере в соответствии с пунктом 14.15. договора, ст. 330 ГК РФ.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167 - 170 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГАРАНТИЯ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИБРОБЕТОН» неосновательное обогащение в размере 2 748 916 руб. 87 коп., по договору № ДП2047Ф/1710-К/Дмт от 14 сентября 2020 года штраф в размере 3 677 113 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 55 130 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова