АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

(в соответствии со ст. 176 АПК РФ) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

17 марта 2021 года по результатам рассмотрения дела № А31-13695/2020  

по иску Администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский  район Костромской области (ИНН 4405004378, ОГРН 1034443160014) к обществу с  ограниченной ответственностью "Яравтодор" (ИНН 7602110885, ОГРН  1147602008520) об обязании устранить недостатки работ по муниципальному  контракту в рамках гарантийных обязательств, взыскании 2 317 793 рублей 85  копеек штрафа,  

суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Хомяка  Николая Георгиевича в соответствии со ст. ст. 110, 167-170, 174, 176 АПК РФ  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (ИНН  7602110885 , ОГРН 1147602008520) в течение 30 рабочих дней после вступления  решения суда в законную силу исполнить гарантийное обязательство в рамках  муниципального контракта № 01413000266190000210001 от 08 мая 2019 года, а  именно:  

1.1. Безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного  срока по муниципальному контракту № 01413000266190000210001 от 08 мая 2019  года:  

- произвести доуплотнение покрытия из щебня с расклинцовкой на всем  протяжении участка автомобильной дороги;  

- продольный профиль кюветов довести до проектных отметок, ликвидировав  места застоя воды на всем протяжении участка автомобильной дороги;  

- произвести подсыпку, уплотнение, планировку обочины у водопропускной  трубы на ПК 10-40;  

- произвести подсыпку и уплотнение берм дорожных знаков: 

- произвести оштукатуривание в местах шелушений бетонного укрепления  оголовка водопропускных труб на всем протяжение участка автомобильной  дороги:  

- устранить расхождение швов входного оголовка водопропускных труб па  ПК 21+45, ПК 1+20;  

- произвести очистку от намывного грунта укрепления русла водопропускных  труб на всем протяжении участка автомобильной дороги;  

- произвести обратную засыпку бетонного быстротока;  

- произвести оштукатуривание в местах шелушения монолитного бетона  быстротоков и водобойных колодцев;  

- произвести оштукатуривание бетонных стенок быстротоков: 

- довести до проектных геометрических параметров укрепления кюветов  щебнем на всем протяжении участка автомобильной дороги.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (ИНН  7602110885 , ОГРН 1147602008520) в пользу администрации муниципального  района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН  4405004378, ОГРН 1034443160014) 2 317 793 руб. 85 коп. штрафа.  

Исполнительные листы выдаются по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (ИНН  7602110885, ОГРН 1147602008520) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 40 589 рублей.  

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального  бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в  законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового  кодекса Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в  арбитражный суд.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае  непредставления ответчиком сведений о ее добровольной уплате.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через  Арбитражный суд Костромской области.  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Судья Н. Г. Хомяк Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.06.2020 8:32:21

Кому выдана Хомяк Николай Георгиевич