Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва 

25.12.2017 года                                                               Дело № А40-51311/17-110-490

Резолютивная часть решения объявлена 15.12.2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 25.12.2017 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "110 ССУ" (ОГРН 

<

***>, 143900, 

<

...> покровский,4 А) к обществу с ограниченной ответственностью "МД СТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, 117342,

<

...>) о взыскании 23 878 784,15 рублей, а также встречный иск , при участии:

от истца - ФИО2 по дов. от 28.11.2016; 

от ответчика - ФИО3 по дов. от 27.12.2016;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "110 ССУ" (деле также – ООО «110 ССУ») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МД СТРОЙ"  (далее также – ООО «МД Строй») о взыскании 14 186 886 руб. 69 коп. задолженности по договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК от 22.10.2012, 4 911 660 руб. 73 коп.  задолженности по договору подряда  от 30.01.2013 № 1-30/01-2013, 4 780 236 руб. 73 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. 

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск о взыскании 54 660 407 руб. 70 коп. пени.  

В обоснование первоначального иска ООО «110 ССУ»  ссылается на ненадлежащее исполнение обязательств по договору по оплате выполненных работ.

В обоснование встречного иска ООО «МД Строй» указывает на нарушение ООО «110 ССУ»  сроков выполнения работ, предусмотренных договором.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 22 октября 2012 года между ООО «110 ССУ» и ООО «МД Строй» был заключен Договор подряда № МДС/22-10/12-1 ПК. 

В соответствии с п. 1.1. указанного Договора ООО «110 ССУ» обязалось выполнить собственными или привлеченными силами и средствами на основании Технической документации, полученной от ООО «МД Строй», в установленный в Договоре срок работы по устройству систем канализации, отопления, водоснабжения и вентиляции по корпусам № 1, 2, 3 жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее деревни Рассказова, первая очередь строительства, 1 квартал, 1-ый пусковой комплекс; подготовить (совместно с ООО «МД Строй») документы, необходимые для получения заключения о соответствии объекта проектной документации и требованиям нормативных документов, осуществить подготовку документов, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; передать смонтированные инженерные системы эксплуатирующей организации. ООО «МД Строй» обязалось создать условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить ООО «110 ССУ» стоимость выполненных работ в размере и на условиях, предусмотренных, заключенным Договором.

Согласно п. 3.1. заключенного Договора общая стоимость работ по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК 173 000 000,00 рублей. Согласно п. 3.2. Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК стоимость выполнения работ является твердой, действует в течение всего срока действия договора и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных Договором. Сторонами были согласованы и подписаны Приложения № № 1, 2 и 3 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающие конкретные виды работ, их объем и стоимость.

Согласно п. 3.3. заключенного Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 43 250 рублей. В соответствии с п. 3.4. Договора оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ производится ООО «МД Строй» ежемесячно, с зачетом ранее выплаченного аванса, удержания сумм, указанных в п. 3.5. и 3.6. Договора, в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами следующих документов:

- Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Сторонами;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Сторонами;

при наличии у ООО «МД Строй»:

- Счета-фактуры ООО «110 ССУ»;

- Оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на скрытые работы (и пр. акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Согласно п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК ежемесячная оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ осуществляется ООО «МД Строй» за вычетом 5% от стоимости работ указанной в соответствующем акте, предъявленном к оплате. Удержанная сумма подлежала перечислению ООО «110 ССУ» в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания ОАО «МИСК» (Генподрядчик проекта) и ЗАО «НДК» (Заказчик проекта) Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

В соответствии с п. 6.1. Договора отчетным признается период с 1-го числа по последнее число месяца выполнения работ. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2-х экземплярах предоставляется ООО «МД Строй» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. ООО «МД Строй» в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает указанные Акт и Справку, либо направляет ООО «110 ССУ» мотивированный отказ с указанием недостатков и сроками их исправления.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ. При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов. В частности, в подтверждение изложенного  в материалы дела представлены следующие документы:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.11.2012 - 445 211,76 руб.; 

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2012 - 445 211,76 руб.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.01.2013 - 2 252 168,79 руб.

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.01.2013 - 3 140 535,15 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 3 от 31.01.2013 - 76 848,84 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.02.2013 - 4 064 991,84 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 4 от 28.02.2013 -  2 070 895,05 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 5 от 28.02.2013 - 774 796,06 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 6 от 28.02.2013 - 563 329,01 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 7 от 28.02.2013 - 2 398 111,08 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 31.03.2013 - 3 888 526,33 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 8 от 31.03.2013 - 140 452,37 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 9 от 31.03.2013 - 1 448 887,92 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 10 от 31.03.2013 - 150 339,77 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 11 от 31.03.2013 - 381 180,60 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 12 от 31.03.2013 -  3 434 176,96 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.03.2013 - 617 905,00 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.03.2013 - 606 479,42 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.03.2013 - 527 330,92 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 30.04.2013 - 7 509 155,46 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 13 от 30.04.2013 - 476 021,06 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 14 от 30.04.2013 - 5 004 670,31 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 15 от 30.04.2013 - 1 933 916,04 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 16 от 30.04.2013 - 1 922 950,18 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 17 от 30.04.2013 - 1 389 807,36 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 31.05.2013 - 4 078 543,61 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 18 от 31.05.2013 - 529 301,34 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 19 от 31.05.2013 - 1 756 027,23 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 20 от 31.05.2013 - 1 597 614,04 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 21 от 31.05.2013 - 1 301 730,29 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 22 от 31.05.2013 - 578 817,98 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 30.06.2013 - 2 751 745,43 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 23 от 30.06.2013 - 577 950,21 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 24 от 30.06.2013 - 382 969,37 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 25 от 30.06.2013 - 422 836,89 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 26 от 30.06.2013 - 1 062 352,28 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 27 от 30.06.2013 - 886 121,22 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 28 от 30.06.2013 - 598 834,93 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 31.07.2013 - 4 658 760,97 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 29 от 31.07.2013 - 1 046 557,02 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 30 от 31.07.2013 - 1 009 034,85 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 31 от 31.07.2013 - 511 829,58 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 32 от 31.07.2013 - 656 485,58 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 33 от 31.07.2013 - 3 431 465,78 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 01.10.2013 - 8 780 495,94 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 37 от 01.10.2013 - 2 455 539,72 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 38 от 01.10.2013 - 4 263 977,68 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 39 от 01.10.2013 - 1 824 943,98 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 40 от 01.10.2013 -3 504 898,48 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 41 от 01.10.2013 - 494 205,77 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 30.11.2013 - 10 814 859,43 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 42 от 30.11.2013 - 31 418,82 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 43 от 30.11.2013 - 73 712,15 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 44 от 30.11.2013 - 73 662,15 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 45 от 30.11.2013 - 2 857 276,30 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 46 от 30.11.2013 - 1 595 494,15 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 47 от 30.11.2013 - 946 541,86 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 48 от 30.11.2013 - 500 139,34 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 49 от 30.11.2013 - 12 557,01 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 50 от 30.11.2013 - 382 086,41 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 51 от 30.11.2013 - 713 024,61 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 52 от 30.11.2013 - 8 263 895,39 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 15.01.2014 - 12 860 576,24 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 54 от 15.01.2014 - 5 618 857,85 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 55 от 15.01.2014 - 3 895 205,04 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 56 от 15.01.2014 - 8 858 188,87 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 31.01.2014 - 12 793 334,98 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 57 от 31.01.2014 - 6 214 190,44 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 58 от 31.01.2014 - 6 147 049,47 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 59 от 31.01.2014 - 5 914 952,93 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 12 от 25.02.2014 - 19 264 899,42 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 60 от 25.02.2014 - 14 299 733,07 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 61 от 25.02.2014 - 12 972 675,43 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 62 от 28.02.2014 - 248 876,40 руб.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 13 от 25.02.2014 - 14 206 083,16 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 63 от 25.02.2014 - 12 587 346,78 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 64 от 25.02.2014 - 7 090 351,33 руб.;

- Акт о приемке выполненных работ № 65 от 25.02.2014 - 5 452 875,62 руб.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 1 от 15.05.2013 по условиям которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, по переносу стояков водопровода по корпусам №№ 1, 3 и изготовлению кронштейнов по корпусам №№ 1, 2, 3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 1 общая стоимость работ составляет 225 805,93 рублей. К Дополнительному соглашению № 1 Сторонами были согласованы и подписаны Приложения № № 1,2 и 3 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающие конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 1 - Акт о приемке выполненных работ № 46 от 30.11.2013 обязался выплатить  аванс в размере 67 741,78 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Дополнительному соглашению № 1 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ. При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КC-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов. В частности, в подтверждение указанных обстоятельств в материалы дела представлены: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.10.2013 на сумму 214 515,63 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2013 на сумму 112 304,28 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 01.10.2013 на сумму 48 814,62 руб., Акт о приемке выполненных работ № 3 от 01.10.2013 на сумму 64 687, 03 руб.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2013, по условиям которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, по монтажу систем вентиляции мусорокамер по корпусам №№ 1, 2, 3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 2 общая стоимость работ составляет 1 340 102,85 рублей. К Дополнительному соглашению № 2 Сторонами были согласованы и подписаны Приложения № № 1, 2 и 3 - Расчет стоимости работ, предусматривающие конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 2 ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 402 030,86 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Дополнительному соглашению № 2 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014 на сумму 871 066,85 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 446 700,95 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 446 700,95 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 446 700,95 руб.

При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 3 от 15.04.2013, по условиям которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, по переносу стояков водопровода по корпусам №№ 1, 2, 3 и изготовлению кронштейнов по корпусам №№ 1, 2, 3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 3 общая стоимость работ составляет 3 876 929,77 рублей. К Дополнительному соглашению № 3 Сторонами было согласовано и подписано Приложение № 1 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающий конкретных видов работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 3 Ответчик обязался выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 1 163 078,94 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложением № 1 по Дополнительному соглашению № 3 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014 на сумму 2 520 004,34 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 1 292 498,96 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 1 292 498,96 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 1 291 931,85 руб.

 При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 4 от 19.06.2013, по условиям которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, по монтажу системы ДУ по корпусам №№ 1, 2, 3 и изготовлению кронштейнов по корпусам №№ 1,2,3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 4 общая стоимость работ составляет 2 605 384,14 рублей. К Дополнительному соглашению № 4 Сторонами были согласованы и подписаны Приложения №№ 1, 2, 3 - Расчет стоимости работ, предусматривающий конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 4 ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 781 615,24 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Дополнительному соглашению № 4 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014  на сумму 1 693 499,70 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 868 461,38 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 868 461,38 руб., Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 868 461,38 руб.

 При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК у держаний и зачета ранее выплаченного аванса. А в Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 5 от 12.11.2013,   по   условиям   которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить   дополнительные   работы,  не предусмотренные договором, по переносу стояков водопровода по корпусам №№   1, 2, 3 и изготовлению кронштейнов по корпусам №№ 1, 2, 3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 5 общая стоимость работ составляет 3 528 425,49 рублей. К Дополнительному соглашению № 5 Сторонами было согласовано и подписано Приложение № 1 - Укрупненный расчет стоимости работ, предусматривающий конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 5 ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 1 058 527,65 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложением № 1 по Дополнительному соглашению № 5 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2014 на сумму 2 293 476, 56 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.02.2014 на сумму 1 176 141, 83 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 1 176 141,83 руб., Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.02.2014 на сумму 1 176 141, 83 руб.

При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Также между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 6 от 20.11.2013, по условиям которого ООО «110 ССУ» обязалось выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, по монтажу трубопроводов Rehau и изоляции Энергофлекс по корпусам №№ 1, 2, 3 и изготовлению кронштейнов по корпусам №№ 1, 2, 3 объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее д. Рассказовка, Первая очередь строительства, 1-й квартал, 1-ый пусковой комплекс».

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения № 6 общая стоимость работ составляет 5 251 612,65 рублей. К Дополнительному соглашению № 6 Сторонами было согласовано и подписано Приложение № 1 - Расчет стоимости, предусматривающий конкретные виды работ, их объем и стоимость.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 6 ООО «МД Строй» обязалось выплатить аванс в размере 1 575 483,80 рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения.

Условия о передаче выполненных работ и их оплате  при этом регулируются соответствующими статьями и пунктами Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложением № 1 по Дополнительному соглашению № 6 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, а ООО «МД Строй» приняло указанные работы замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.01.2014 на сумму 2 092 185,15 руб., Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.01.2014 на сумму 2 202 300,15 руб., Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.02.2014 на сумму 2 896 846,87 руб., Акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.02.2014 на сумму 3 049 312,50 руб.

 При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № МДС/22-10/12-1 ПК удержаний и зачета ее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Дополнительным соглашением № 7 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК от 01.02.2014  Стороны достигли соглашения о признании утратившими силу Приложений №№ 1, 2, 3 к Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК, утверждении их в новой редакции и определили общую стоимость работ по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК и Дополнительным соглашениям к нему №№ 1-6. Согласно п. 4 Дополнительного соглашения № 7 Общая стоимость работ с учетом согласованных изменений составляет 176 286 987,02 рублей

Согласно данным бухгалтерского учета, подписанным Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также Актам о приемке выполненных работ, ООО «110 ССУ» выполнило работы по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК и Дополнительным соглашениям к нему на общую сумму 176 356 876,18 рублей. В свою очередь, ООО «МД Строй» была оплачена только часть работ, а именно работы на сумму 162 169 989,49 рублей. Задолженность ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» по Договору подряда № МДС/22-10/12-1 ПК и Дополнительным соглашениям к нему по состоянию на настоящий момент составляет 14 186 886,69 рублей.

Кроме того, 30 января 2013 года между ООО «110 ССУ» и ООО «МД Строй»  был заключен Договор подряда № 1-30/01-2013. В соответствии с п. 1.1. указанного Договора ООО «110 ССУ» обязалось выполнить собственными или привлеченными силами и средствами на основании Технической документации, полученной от  ООО «МД Строй», в установленный в Договоре срок работы по устройству систем электрооборудования и электроосвещения по корпусам № 1, 2, 3 жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, севернее деревни Рассказова, первая очередь строительства, 1 квартал, 1 -ый пусковой комплекс; подготовить (совместно с  ООО «МД Строй») документы, необходимые для получения заключения о соответствии объекта проектной документации и требованиям нормативных документов, осуществить подготовку документов, необходимых для получения решения на ввод Объекта в эксплуатацию; передать смонтированные инженерные системы эксплуатирующей организации. ООО «МД Строй» обязалось создать условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить ООО «110 ССУ» стоимость выполненных работ в размере и на условиях, смотренных, заключенным Договором.

Согласно п. 3.1. заключенного Договора общая стоимость работ по Договору подряда № 1-2013 - 63 985 133,97 рублей. Согласно п. 3.2. Договора подряда № 1-30/01-2013 стоимость работ является твердой, действует в течение всего срока действия договора и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных Договором. Сторонами были согласованы и подписаны Приложения № № 1, 2 и 3 - Расчет стоимости работ, предусматривающие конкретные работ, их объем и стоимость.

Дополнительным соглашением № 1 к Договору подряда № 1-30/01-2013 от 01.02.2014 Стороны достигли соглашения о признании утратившими силу Приложений №№ 1,2, 3 к Договору подряда № 1-30/01-2013, утверждении их в новой редакции и определили общую стоимость работ по Договору подряда № 1-30/01-2013. Согласно п. 4 Дополнительного соглашения № 1 Общая стоимость работ с учетом согласованных изменений составляет 53 550 376,09 рублей.

Согласно п. 3.3. заключенного Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора  ООО «МД Строй» обязалось выплатить ООО «110 ССУ» аванс в размере 16 322 380 рублей. В соответствии с п. 3.4. Договора оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ производится  ООО «МД Строй» ежемесячно, с зачетом ранее выплаченного аванса, удержания сумм, указанных в п. 3.5. и 3.6. Договора, в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами следующих документов:

- Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Сторонами;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Сторонами;

при наличии у  ООО «МД Строй»:

- Счета-фактуры ООО «110 ССУ»;

- Оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на скрытые работы (и пр. акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Согласно п. 3.6. Договора подряда № 1-30/01-2013 ежемесячная оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ осуществляется  ООО «МД Строй» за вычетом 5% от стоимости работ указанной в соответствующем акте, предъявленном к оплате. Удержанная сумма подлежала перечислению ООО «110 ССУ» в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания ОАО «МИСК» (Генподрядчик проекта) и ЗАО «НДК» (Заказчик проекта) Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

В соответствии с п. 6.1. Договора отчетным признается период с 1-го числа по последнее число месяца выполнения работ. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2-х экземплярах предоставляется  ООО «МД Строй» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. ООО «МД Строй» в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает указанные Акт и Справку, либо направляет ООО «110 ССУ» мотивированный отказ с указанием недостатков и сроками их исправления. 

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1, 2, 3 по Договору подряда № 1-30/01-2013, а  ООО «МД Строй» приняло указанные работы без замечаний, что подтверждается Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.03.2013 на сумму 1 862 938,24 руб. (к оплате 1 294 742,08), Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.04.2013 на сумму 1 027421,73 руб. (к оплате 714 058,11), Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.02.2014 на сумму 50 660 016,12 руб. (к оплате 35 541 677,10). При этом, стоимость работ, подлежащих оплате ООО «110 ССУ» указывалась в Справках стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом произведенных в соответствии с п. 3.6. Договора подряда № 1-30/01-2013 удержаний и зачета ранее выплаченного аванса. В Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 стоимость выполненных работ указывалась без производимых удержаний и зачетов.

Согласно данным бухгалтерского учета, подписанным Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также Актам о приемке выполненных работ, ООО «110 ССУ» выполнил работы Договору подряда № 1-30/01-2013 на общую сумму 53 550 376,09 рублей. В свою очередь, ООО «МД Строй» была оплачена только часть работ, а именно работы на сумму 48 638 715,36 рублей. Задолженность ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» по Договору подряда № 1-30/01-2013 и Дополнительным соглашениям к нему по состоянию на настоящий момент составляет 4 911 660,73 рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности ООО «МД Строй» составила 19 098 547 руб. 42 коп., которая до настоящего времени не оплачена последним.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения ООО «110 ССУ» в Арбитражный суд города Москвы суд с настоящим иском.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Порядок оплаты установлен в ст. 711 ГК РФ, согласно которой в случае, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Пунктом 1 ст.746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком, в размере, предусмотренном сметой, в срок и порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний  акт сдачи  или  приемки  результата работ может быть  признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им

ООО «110 ССУ» в материалы дела представлены надлежащие доказательства в обоснование требований о взыскании с ООО «МД Строй» задолженности по оплате работ на общую сумму 19 098 547 руб. 42 коп., которые ООО «МД Строй» не опровергнуты. ООО «МД Строй» не представлено документов, свидетельствующих об оплате денежных средств. 

Учитывая изложенное, суд считает факт наличия задолженности ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» подтвержденным, в связи с чем, сумма задолженности подлежит взысканию с ООО «МД Строй» в полном объеме.

Работы по договору были выполнены Подрядчиком, акты о приемке выполненных работ подписаны сторонами без замечаний.

Учитывая изложенное, ООО «МД Строй» требования статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации не выполнены, поскольку после приемки полностью выполненных по договору работ, их результат в полном объеме не оплачен.

Заказчик надлежащим образом свои обязательства по договору не исполнил, выполненные работы на момент подачи иска в полном объеме не оплатил.

Согласно гл. 12 ГК Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в 3 года, течение указанного срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, при этом по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности по окончании срока исполнения; исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решение; с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям. Основания для приостановления и перерыва течения срока исковой давности перечисляются в законе (ст. 202 и 203 Кодекса). Согласно п. 2 ст. 199 ГК Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В соответствии с п. 3 ст. 202 ГК Российской Федерации, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры.

При этом в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» указано, что течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором. Таким образом, с 01.06.2016 АПК Российской Федерации для сторон установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Согласно данным бухгалтерского учета, подписанным Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также Актам о приемке выполненных работ, ООО «110 ССУ» выполнило работы по Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК и Дополнительным соглашениям к нему на общую сумму 176 356 876,18 рублей. В свою очередь, ООО «МД Строй» была оплачена только часть работ, а именно работы на сумму 162 169 989,49 рублей. Задолженность ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» по Договору подряда № МДС/22-10/12-1ПК и Дополнительным соглашениям к нему по состоянию на 20.06.2017 г. составляет 14 186 886,69 рублей.

Согласно п. 3.4. заключенного Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ производится ООО «МД Строй» ежемесячно, с зачетом ранее выплаченного аванса, удержания сумм, указанных в п. 3.5. и 3.6. Договора, в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами следующих документов:

-Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Сторонами;

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Сторонами;

при наличии у ООО «МД Строй»:

-Счета-фактуры ООО «110 ССУ»;

-Оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на скрытые работы (и пр. акты), паспортов и сертификатов на материалы.

ООО «110 ССУ» выполнило работы, предусмотренные Приложениями №№ 1,2,3 по Договору подряда № 1-30/01-2013, а ООО «МД Строй» принял указанные работы без замечаний. Указанное обстоятельство удостоверяется Справками о стоимости работ и затрат и Актами о приемке выполненных работ последняя из которых на сумму 50 660 016,12 рублей (к оплате 35 541 677,10 рублей) была также подписана 25.02.2014.

Согласно данным бухгалтерского учета, подписанным Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также Актам о приемке выполненных работ, ООО «110 ССУ» выполнило работы по Договору подряда № 1-30/01-2013 на общую сумму 53 550 376,09 рублей. В свою очередь, ООО «МД Строй» была оплачена только часть работ, а именно работы на сумму 48 638 715,36 рублей. Задолженность ООО «МД Строй» перед ООО «110 ССУ» по Договору подряда № 1-30/01-2013 и Дополнительным соглашениям к нему по состоянию на настоящий момент составляет 4 911 660,73 рублей.

В соответствии с п. 3.4. Договора № 1-30/01-2013 оплата фактически выполненных ООО «110 ССУ» работ производится ООО «МД Строй» ежемесячно, с зачетом ранее выплаченного аванса, удержания сумм, указанных в п. 3.5. и 3.6. Договора, в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами следующих документов:

-Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Сторонами;

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Сторонами;

при наличии у ООО «МД Строй»:

-Счета-фактуры ООО «110 ССУ»;

-Оформленной в установленном порядке исполнительной документации, актов на скрытые работы (и пр. акты), паспортов и сертификатов на материалы.

Как следует из материалов дела, последние Акты выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ по которым имеется задолженность были подписаны сторонами 25.02.2014. Следовательно, ООО «МД Строй» должно было произвести оплату по ним не позднее 12.03.2017 (10 банковских дней). Таким образом, по общему правилу срок исковой давности по требованиям об оплате работ, принятых по актам от 25.02.2014 истекал 13.03.2017.

Соблюдая обязательный претензионный порядок урегулирования спора, Истец 20.01.2017 направил ООО «МД Строй» претензию б/н б/д, что подтверждается описью вложения в ценное письмо от 20.01.2017, кассовым чеком № 06459, описью вложения в ценное письмо от 20.01.2017 и кассовым чеком № 142036.

Таким образом, учитывая правовую позицию Пленума Верховного суда, отраженную в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43, а также с учетом необходимости соблюдения обязательного порядка досудебного урегулирования спора, установленной ч. 5 ст. 4 АПК РФ, течение срока исковой давности для ООО «110 ССУ» приостанавливалось на 30 календарных дней с 20.01.2017  по 20.02.2017 в связи направлением ООО «МД Строй» претензии.

Поскольку течение срока исковой давности для ООО «110 ССУ» было приостановлено, срок на обращение в суд с первоначальным исковым заявлением истекал не 13.03.2017, как утверждает  ООО «МД Строй», а 13.04.2017.

ООО «110 ССУ» обратилось в Арбитражный суд с первоначальным исковым заявлением к ООО «МД Строй» 22.03.2017, что подтверждается отметкой Арбитражного суда города Москвы на первоначальном иске. Таким образом, Истец обратился в Суд в пределах срока исковой давности.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск в этой части подлежит удовлетворению.

Кроме того, с ООО «МД Строй»  на основании ст. 395  ГК РФ подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, что по расчету истца, проверенному судом, по состоянию на 20.03.2017, составляет 4 780 236 руб. 73 коп.  

Учитывая вышеизложенное, суд считает требования ООО «110 ССУ», заявленные по первоначальному иску, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

ООО «МД Строй», предъявляя встречный иск, сослалось на то обстоятельство что,  Подрядчиком работы были выполнены с нарушением срока,  в связи с чем он должен уплатить неустойку на основании п. 13.2 Договора, что согласно расчету  истца по встречному иску составляет  54 660 407 руб. 70 коп.

Положениями статей 307-310 ГК РФ предусмотрено надлежащее исполнение договорных обязательств, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

При этом, согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

ООО «110 ССУ» заявлено о пропуске ООО «МД Строй» трехлетнего срока исковой давности.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого прав.

Согласно п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 (ред. от 07.02.2017) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске ... Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Номер справки о стоимости выполненных работ

Дата подписания Справки о стоимости выполненных работ

Дата истечения сроков исковой давности

Договора подряда № МДС/22-10/12-1ПК

1

30.11.2012 г.

01.12.2015 г.

2

31.01.2013 г.

01.02.2016 г.

3

28.02.2013 г.

29.02.2016 г.

4

31.03.2013 г.

01.04.2016 г.

5

30.04.2013 г.

03.05.2016 г.

6

31.05.2013 г.

01.06.2016 г.

7

30.06.2013 г.

01.07.2016 г.

8

31.07.2013 г.

01.08.2016 г.

9

01.10.2013 г.

03.10.2016 г.

9

30.11.2013 г.

01.12.2016 г.

10

15.01.2014 г.

16.01.2017 г.

11

31.01.2014 г.

01.02.2017 г.

12

25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

13

25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 15.05.2013 г.

1

01.10.2013 г.

03.10.2013 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2013 г.

1

25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

Дополнительное соглашение № 3 от 15.04.2013 г.

1

25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

Дополнительное соглашение № 4 от 15.04.2013 г.

1

25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

Дополнительное соглашение № 5 от 11.11.2013 г.

1                         25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

Дополнительное соглашение № 6 от 20.11.2013 г.

1

15.01.2014 г.

16.01.2017 г.

2

25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

Номер справки о стоимости выполненных работ

Дата подписания Справки о стоимости выполненных работ

Дата истечения сроков исковой давности

Договора подряда № 1-30/1

11-2013

1

31.03.2013 г.

01.04.2016 г.

2

30.04.2013 г.

03.05.2016 г.

3

25.02.2014 г.

27.02.2017 г.

Претензия ООО «МД Строй» с исх. № МДСП/17 датирована 03.03.2017 и направлена в адрес ООО «110 ССУ» только 05.06.2017, то есть за истечением установленных ст. 196 ГК РФ срока исковой давности. 

ООО «МД Строй» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «110 ССУ» только 09.08.2017,  то есть за пределами установленного ст. 196 ГК РФ 3-х летнего срока подачи иска.

При указанных обстоятельствах встречный иск удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате госпошлины распределяются судом в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171  АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МД СТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "110 ССУ" 19 098 547 руб. 42 коп. задолженности. 4 780 236 руб. 73 коп. процентов, 118 493 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МД СТРОЙ" в федеральный бюджет госпошлину в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко