АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-9296/2024

г. Салехард

11 февраля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 28 января 2025 года.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Воробьёвой В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шуляковской Д.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу «Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 47 189 884 рублей 33 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО1 директор, ФИО2 представитель по доверенности;

от ответчика - ФИО3, представитель по доверенности,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Сибирская нефтегазовая компания» (далее - ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда №7200022/0853Д от 27.01.2023 в размере 50 909 884 рублей 33 копеек.

В ходе производства по делу от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому исковые требования истца считает необоснованными.

Определением от 17.12.2024 судебное заседание отложено на 28.01.2025 на 10 час. 45 мин. В судебном заседании объявлялся перерыв в течении текущего дня в связи с наличием технических неполадок со стороны ответчика по участию в веб-конференции.

Стороны о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Истец обеспечил явку своих представителей в судебное заседание. Участие представителя ответчика организовано путем использования систем веб-конференции.

Таким образом, суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, проводит судебное онлайн-заседание при указанной явке.

От сторон в материалы дела поступили дополнительные документы. Судом исковые требования уточнены. В связи с частичной оплатой, поступившей от ответчика после принятия иска к производству суда, задолженность ответчика перед истцом составила 47 189 884 рубля 33 копейки.

В порядке ст. 49 АПК РФ уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению.

Заслушав доводы сторон, суд счел возможным рассмотреть спор по существу.

Как указывает истец в исковом заявлении, между АО «Сибнефтегаз» (далее-Заказчик) и ООО «Белоруснефть-Сибирь» (далее-Подрядчик) заключен договор генерального подряда от 27.01.2023 № 7200022/0853Д на выполнение работ по строительству и освоению скважин на условиях генерального подряда (по метровой ставке).

В соответствии с п.п.2.1, п.2 раздела 1 Договора по заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству и освоению эксплуатационных скважин на условиях Генерального подряда (по метровой ставке) в соответствии с условиями настоящего Договора, в объеме и в сроки, определенные в Наряд-заказах и соответствующих Заявках, представленных в виде Графика глубина-день, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

Согласно п.п. 6.2 п.6 раздела 4 приемка работ осуществляется по этапам. 

В  тексте искового заявления истец ссылается на III этап - Бурение и крепление скважины.

Приемка выполненного объема работ производится отдельно по каждой скважине ежемесячно за факт выполненного объема проходки и крепления в разрезе секций скважины.

Возмещаемые расходы принимаются по фактическим расходам, образованным только в ходе выполнения работ III этапа за производительное время.

В силу п.п. 7.1 п.7 раздела 4 - Условия приемки и оплаты стоимость работ по строительству скважин складывается из стоимости этапов, указанных в п.6.2 раздела 4 настоящего Договора, которые в свою очередь оплачиваются согласно ставок указанных в Приложении № 4.1 к настоящему Договору.

Согласно п.п. 8.3, п.8 раздела 4 в Бурение и крепление скважины входят (в том числе операции по подготовке и углублению ствола скважины):

- 8.3.5 Ставка бурения пилотного ствола с отбором керна - применяется при выполнении работ по бурению пилотного ствола необходимых для углубления скважины заданным диаметром до необходимой глубины, с использованием Материалов, оборудования и персонала Подрядчика и Субподрядчиков, однако в Приложение № 4.1- эта ставка отсутствует, как отсутствует и ставка бурения технической колонны с отбором керна.

Стоимость ставок указана в Приложение № 4.1 к настоящему Договору - основные ставки и содержит пять таблиц: 

таблица 1 - фиксированные ставки;

таблица 2 - переменные ставки

таблица 3 - сервисные ставки метра бурения

таблица 4 - дополнительные работы и услуги

таблица 5 (8) - иные расходы.

Согласно примечаний к таблице указано, что Дополнительные ставки не применяются для расчетов за выполнение работ, указанных в приложении 1.4 к Договору (техническое задание).

В  техническом  задании Пункт 5. Описание  работ (Приложение   1.4)

Строительство скважин указаны следующие наименования работ / услуг:

1    Мобилизация, переезд, демобилизация буровой установки;

2    Монтаж, передвижка, стаскивание, демонтаж буровой установки;

3    Бурение и ликвидация водозаборной (артезианской) скважины

4    Обустройство и содержание водовода;

5    Бурение скважины согласно проектной документации, в том числе сервисные услуги;

6    Отбор керна;

7    Проведение геофизических исследований в скважине в процессе бурения;

9    Подготовка скважины и проведение интенсификации пластов;

10  Освоение скважины;

11   Электроснабжение от ДЭС;

12  Зачистка, техническая рекультивация территории рабочей площадки, передача устья (с оборудованием) скважины и территории Заказчику;

13  Обращение с буровыми отходами.

При этом в Таблице 3 Приложения № 4.1 Ставка бурения пилотного ствола с отбором керна и Ставка бурения технического ствола с отбором керна отсутствуют, но имеются данные виды работ в таблице 4 Дополнительные работы и услуги, с разделением на ставки:

-  сервисная ставка работы бригады (включая все сервиса);

-  отбор изолированного керна (24 м) в секции технической колонны с учётом распила, маркировки, описания, упаковки, хранения в термокейсах и доставки до кернохранилища в г. Тюмень отобранных образцов в соответствии с ЛНД ПАО «НК «Роснефть».

В адрес ООО «Белоруснефть-Сибирь» поступила заявка, в виде Графика глубина-день (ГГД) на строительство скважины №54 куст №5 Берегового месторождения, в которой было указано, что при бурении под техническую колонну (Приложение 52), также запланирован отбор керна в количестве 134м в интервалах 1080-1110м по 2 рейса (в количестве по 12м и 18м), 1134-1170м по 2 рейса (в количестве по 18м и 18м), 1207-1243м 2 рейса (в количестве по 18м и 18м), 1275-1307м 2 рейса (в количестве по 18м и 14м), а также бурение без отбора керна в трех интервалах 1110-1134м, 1170-1207м, 1243-1275м.

Истец указывает, что секция технической колонны без отбора керна буриться одним рейсом, который включает в себя:

- сборку компоновки низа бурильной колонны (КНБК);

- спуск КНБК;

- бурение с механической скоростью 45-60м/час;

- промывка на забое;

- подъем КНБК;

- разборка КНБК.

При бурении секции с отбором керна, как указано в ГГД количество рейсов увеличивается до 11 (одиннадцати), а время, связанное с операциями по отбору керна (КНБК, СПО, промывки) на строительство секции под техническую колонну, увеличивается по отношению ко времени строительства данной секции без отбора керна до 268 часов 11,17суток.

ООО «Белоруснефть-Сибирь» проанализировав данную заявку, в адрес АО «Сибнефтегаз» направило письмо от 07.06.2023 №01-06/2013, в котором просило учесть, что время на строительство секции под техническую колонну, увеличивается в связи с операциями на отбор керна до 268 часов 11,17 суток и оплата данных работ будет производиться по дополнительным ставкам  Приложения  4.1.   с  учетом  стоимости  работы  буровой  бригады  с сервисами и отбора изолированного керна.

В переговорах с Заказчиком была достигнута договоренность о полной оплате выполняемых работ по дополнительным ставкам и поэтому с 10.06.2023г. ООО «Белоруснефть-Сибирь» приступило к работам по бурению секции технической колонны с отбором керна.

Работы производились в период: с 9 час.45 мин. 10.06.2023 до 24 час.00 мин. 21.06.2023.

Работы были выполнены, а ответ от АО «Сибнефтегаз» о принятии услуг по завершению всех работ по секции технической колонны с отбором керна, поступил в адрес ООО «Белоруснефть-Сибирь» только 04.10.2023 №ИСХ-АК-05136-23.

В своем письме Заказчик не отрицает, что данные работы смешанные (чередуются) и при отборе керна на разных отрезках секции технической колонны и оплачиваются по опциональным ставкам, Кроме того, Заказчик также обозначил, что на основании ст. 421 ГК РФ Подрядчик должен был быть учесть все затраты и расходы для выполнения обязательств по Договору при определении размера ставок в коммерческом предложении, включая опциональные ставки.

При этом Заказчик не проанализировал Матрицу Распределения Ответственности (Приложение 15), в которой у ООО «Белоруснефть-Сибирь» нет обязательств по выполнению работ по отбору керна.

Данные работы по отбору керна оплачиваются по дополнительным ставкам, согласно Приложения 4.1. к Договору

Однако ООО «Белоруснефть-Сибирь» не могло предвидеть выполнение данных работ по Договору, так как в соответствии с п. 5.7. № Ш-01.03 Р-0136 Положения компании ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» «Исследование керна», Генеральным заказчиком составляется проект геолого-технического задания (ГТЗ) (Приложение 55) на отбор керна в котором прописываются как геологические характеристики объектов отбора керна, так и технические характеристики отбора: тип керноотборочного снаряда (КОС), скорость бурения при отборе керна, использование стеклопластиковых, алюминиевых труб, гелей и основ для сохранения целостности горных пород, скорость подъёма бурового инструмента с отобранным керном, перечень и условия работы с керном на поверхности.

Согласно п.2.1. Таблицы 1 раздела 4 № П1-01.03 Р-0136, Порядок взаимодействия участников процесса по планированию организации отбора, транспортировки, комплексного исследования, хранения и ликвидации керна: Заказчик заключает Договор на строительство скважины «под ключ» при комплексном выполнении услуг с буровым подрядчиком / заключает договор на отбор керна с подрядчиком по отбору керна, включающий ГТЗ на отбор керна (подписанный Заказчиком и буровым подрядчиком/подрядчиком по отбору керна).

АО «Сибнефтегаз» не разработало и не передало ГТЗ на отбор керна для формирования коммерческого предложения ООО «Белоруснефть-Сибирь», вследствие чего нарушил свои же ЛНД.

ООО «Белоруснефть-Сибирь» является буровым подрядчиком у многих Генеральных заказчиков, таких как АО «НК «Янгпур», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на объектах которых выполняются аналогичные работы, которые оплачиваются по ставкам буровой бригады и ставкам отбора керна, как и указано в дополнительных ставках в Приложении 4.1 к Договору № 7200022/0853 Д от 27.01.2023

В связи с тем, что Заказчик отказался оплачивать выполненные работы по отбору керна, Подрядчик направил в его адрес Претензию от 13.11.2023 № 01-06/4058, в которой просил оплатить выполненные работы в соответствии с п. 1.1. Раздела 4 Договора №7200022/0853Д от 27.01.2023 на выполнение работ по строительству и освоению скважин на условиях генерального подряда по метровым ставкам согласно Актов выполненных работ в размере 78 562 200,12 (семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей 12 копеек без НДС, в том числе акт сдачи-приемки выполненных работ по отбору керна на сумму 50 909 884,33 рублей 33 копейки без НДС.

АО «Сибнефтегаз» приняло к оплате не оспариваемые объемы услуг по бурению 589,65 метров по ставке бурения и крепления технической колонны 38 459,41 рублей / метр, за вычетом 129,35 метров бурения с отбором керна.

Однако бурение с отбором керна 129,35 метров (вынос керна 124м) на сумму 50 909 884,33 рублей 33 копейки без НДС Заказчиком не оплачено, при том, что данные работы производились с привлечением дополнительного сервисного подрядчика по отбору керна ООО НПФ «Буринтех».

По мнению истца, данные работы подлежат оплате, согласно п. 17 Таблицы 4 Приложения 4.1. к Договору по ставке 30 000 рублей за метр и согласно п. 10, таблицы №4 Приложения 4.1. к Договору (11,35суток) по сервисной ставке работы бригады (включая все сервиса) 4 157 699,06 рублей / сутки, так как данное время, непосредственно связанно с работой буровой бригады и оборудования, сервисных подрядчиков, работой техники, расходом дизельного топлива (подъем КНБК с телесистемой для сборки керноотборочного снаряда, спуско-подъемные операции для бурения с отбором керна, спуско-подъемные операции для роторного и направленного бурения между интервалами с бурением под керн, спуск КНБК с телесистемой для бурения секции технической колонны до проектной глубины).

Данные виды работ никак не могут формулироваться, как смешанные (то есть чередоваться), и поэтому не оплачиваться АО «Сибнефтегаз», как это отражается в письме АО «Сибнефтегаз» №ИСХ-АК-05136-23 от 04.10.2023.

Как указывает истец, в своих письмах №ИСХ-АК-05136-23 от 04.10.23 и ИСХ-АК-053 96-23-16.10.2023, Заказчик считает, что может дать заявку в виде ГГД с отбором керна по всему интервалу секции технической колонны, либо пилотного ствола с оплатой отбора керна по опциональной ставке 30 000 рублей. На стадии оценки качества отбора керна признать керн не кондиционным по всему интервалу, и не оплачивать производство работ по секции технической колонны. Помимо этого, применить к Подрядчику по бурению штрафные санкции.

ООО «Белоруснефть-Сибирь» считает, что данный подход к принятию объемов выполненных работ можно расценивать, как преднамеренное снижение Заказчиком стоимости фактически выполненных работ.

Выполненные Подрядчиком в полном объеме работы по отбору керна, имеют для Заказчика потребительскую ценность, факт выполнения Подрядчиком данного вида работ Заказчик, не отрицает, однако оплачивать отказывается, ссылаясь, на то что у него отсутствует правовое основание при этом сам же в своём ответе от 20.05.2024 № ЕР-02383-24 на претензию Подрядчика утверждает, что отбор керна - совокупность производственных процессов, осуществляемых во время бурения скважин с целью подъема горной породы на поверхность специальным оборудованием.

Истец отмечает, что согласно ст. 424 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, хотя в данном случае ставки указаны в дополнительных ставках, это ставка работы бригады (включая все сервиса) - 4 157 699,06 рублей / сутки и ставка - отбор изолированного керна (24 м) в секции технической колонны с учётом распила, маркировки, описания, упаковки, хранения в термокейсах и доставки до кернохранилища в г. Тюмень отобранных образцов в соответствии с ЛНД ПАО «НК «Роснефть» - 30 000 рублей за метр.

Акт сдачи - приемки выполненных работ №1 от 13.11.2023, и справка о стоимости выполненных работ № 9 от 13.11.2023 на сумму 50 909 884,33 руб. были направлены в АО «Сибнефтегаз» 13.11.2023 через систему электронного документооборота Диадок.

После подачи иска, ответчиком произведена частичная оплата в неоспариваемой части.

Отклоняя доводы отзыва на иск, дополнений и разрешая спор, суд исходит из следующего.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Согласно статье 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В соответствии с частью 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работы выполнена надлежащим образом и в согласованны срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (часть 1 статьи 720 ГК РФ).

Как следует из части 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно разъяснениям, данным Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 Информационного письма от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - Информационное письмо N 51), основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В статьях 309, 310 ГК РФ закреплено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Сторонами не оспаривается факт выполнения работ истцом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что материалы дела содержат допустимые и достаточные доказательства выполнения истом и принятия ответчиком работ по договору.

Между сторонами имеются разногласия относительно стоимости выполненных работ и порядка ее определения.

Условия договора проанализированы судом в соответствии с положениями статей 421, 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовым подходом, закрепленным в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", с учетом поведения сторон в ходе исполнения договорных обязательств, направленности воли сторон.

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 раздела 1 Договора от 27.01.2023 № 7200022/0853Д на выполнение работ по строительству и освоению скважин на условиях генерального подряда (по метровой ставке) (далее-Договор) настоящий Договор представляет собой полную договоренность Сторон в отношении Работ и заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности в отношении предмета договора. Любые изменения и дополнения к договору, не совершенные в письменной форме и не подписанные сторонами, ничтожны.

Тем не менее согласно подпункта 1.2. пункта 1 раздела 2 договора, если по какой-либо причине считается необходимым для Заказчика дать Подрядчику в первую очередь распоряжения телефонограммой/в устной форме/по электронной почте, Подрядчик должен выполнять такие распоряжения. Любое такое распоряжение должно быть подтверждено письменно в течение 24 (двадцати четырех) часов в сложившихся обстоятельствах.

Любые такие распоряжения не должны и не могут изменять условия Договора.

В соответствии с решением протокола ЦЗК№547-22-3-з от 12.09.2022 ООО «Белоруснефть-Сибирь» признано победителем закупочной процедуры на выполнение работ по бурению и освоению 7 эксплуатационных скважин.

21.10.2022 между организациями состоялось совещание, на котором было предложено ООО «Белоруснефть-Сибирь» провести дополнительные работы, которые указаны в дополнительных ставках.

При этом необходимо отметить, что Коммерческое предложение формировалось на основе предоставленного формата коммерческого предложения и Технического задания, в настоящее время это (Приложение №1.4 к Договору 7200022/0853Д).

В техническом задании п. 5. описание работ обозначено:

1    Мобилизация, переезд, демобилизация буровой установки;

2    Монтаж, передвижка, стаскивание, демонтаж буровой установки;

3    Бурение и ликвидация водозаборной (артезианской) скважины

4    Обустройство и содержание водовода;

5    Бурение скважины согласно проектной документации, в том числе сервисные услуги;

6    Отбор керна;

7    Проведение геофизических исследований в скважине в процессе бурения;

9    Подготовка скважины и проведение интенсификации пластов;

10  Освоение скважины;

11   Электроснабжение от ДЭС;

12  Зачистка, техническая рекультивация территории рабочей площадки, передача устья (с оборудованием) скважины и территории Заказчику;

13  Обращение с буровыми отходами.

Указанный перечень работ и услуг, выполняемых подрядчиком, не является исчерпывающим и может быть дополнен Заказчиком в соответствии с условиями договора.

Распределение ответственности между заказчиком и подрядчиком, в том числе за предоставление материалов и услуг указано в приложении к договору (Матрица распределения ответственности).

В матрице распределения ответственности отсутствует отбор керна (Приложение 3.1. к договору).

После проведения переговоров 21.10.2022 ООО «Белоруснефть-Сибирь» направило письмо № 01-06/3905 от 24.10.2022 «О предоставлении информации» по количеству скважин и ориентировочном метраже отбираемого керна по комплексу по отбору изолированного керна (диаметром 80 мм и 100 мм).

АО «Сибнефтегаз» письмом №ИСХ-АК-05736-22 от 01.11.2022 «О плановом объеме дополнительных сервисных услуг» дал ответ с приложением планового объема оказания услуг по отбору керна, для проведения закупочных процедур на дополнительный сервис услуг, в соответствии с условиями закупочной процедуры АО «Сибнефтегаз».

В письме обозначено, что Заключение Договоров по опциональным ставкам выполнения работ не является гарантией обязательного выполнения такого объема работ, что он может меняться, как в большую сторону, так и в меньшую.

В результате проведения ООО «Белоруснефть-Сибирь» закупочной процедуры по Сервисам и заключения Договора с ООО НПФ «Буринтех», выяснилось, что стоимость услуг по отбору керна на месторождениях АО «Сибнефтегаз», превышают расценки по другим регионам и соответственно выше стоимости услуг, обозначенных в приложении №8 к Приложению 1 к Приложению №4.1 в нашем коммерческом предложении, а соответственно и в заключённом договоре. И тем не менее нами был заключен договор с сервисной организацией по отбору керна ООО НПФ «Буринтех» на невыгодных для нас условиях, в целях выполнения своих обязательств перед Генеральным Заказчиком. АО «Сибнефтегаз».

После поступления в адрес ООО «Белоруснефть-Сибирь» заявки, в виде Графика глубина-день (ГГД) на строительство скважины №54 куст №5 Берегового месторождения, в которой было указано, что при бурении под техническую колонну (Приложение 52). также запланирован отбор керна в количестве 134м в интервалах 1080-1110м по 2 рейса (в количестве по 12м и 18м),1134-1170м по 2 рейса (в количестве по 18м и 18м), 1207-1243м 2 рейса (в количестве по 18м и 18м), 1275-1307м 2 рейса (в количестве по 18м и 14м), атакже бурение без отбора керна в трех интервалах 1110-1134м, 1170-1207м, 1243-1275м, ООО «Белоруснефть-Сибирь» направило письмо от 07.06.2023 №01-06/2013 (Приложение 40), в котором просило учесть, что время на строительство секции под техническую колонну, увеличивается в связи с операциями на отбор керна до 268 часов 11,17суток и оплата данных работ будет производиться по дополнительным ставкам Приложения 4.1. с учетом стоимости работы буровой бригады с сервисами и отбора изолированного керна.

В переговорах с Заказчиком АО «Сибнефтегаз» была достигнута договоренность о полной оплате выполняемых работ по дополнительным ставкам, именно:

-  сервисная ставка работы бригады (включая все сервиса);

-  отбор изолированного керна (24 м) в секции технической колонны с учётом распила, маркировки, описания, упаковки, хранения в термокейсах и доставки до кернохранилища в г. Тюмень отобранных образцов в соответствии с ЛНД ПАО «НК «Роснефть» и поэтому с 10.06.2023 ООО «Белоруснефть-Сибирь» приступило к работам, после выполнения работ Заказчик бурение с отбором керна 129,35 метров (вынос керна 124м) на сумму 50 909 884,33 рублей 33 копейки без НДС АО «Сибнефтегаз отказался оплачивать данные работы, при том, что данные работы производились с привлечением дополнительного сервисного подрядчика по отбору керна ООО НПФ «Буринтех» и по письму о дополнительных работах самого Заказчика.

Заказчик (ответчик) указывает, что сервисная ставка работы бригады (включая все сервиса) уже включена в ставку «Отбор керна», так он указывает в ответе Исх-ЕГ-02383-23 от 20.05.2024 на претензию от 13.11.2024 №01-06/4058, при том что в самой ставке расписано, что в нее входит.

При этом, без работы буровой бригады (включая все сервиса) невозможно поднять на поверхность и произвести отбор керна.

Однако ООО «Белоруснефть-Сибирь» не могло предвидеть выполнение данных работ по Договору, так как в соответствии с п. 5.7. № Ш-01.03 Р-0136 Положения компании ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» «Исследование керна», Генеральным заказчиком составляется проект геолого-технического задания (ГТЗ) (Приложение 55) на отбор керна в котором прописываются как геологические характеристики объектов отбора керна, так и технические характеристики отбора: тип керноотборочного снаряда (КОС), скорость бурения при отборе керна, использование стеклопластиковых, алюминиевых труб, гелей и основ для сохранения целостности горных пород, скорость подъёма бурового инструмента с отобранным керном, перечень и условия работы с керном на поверхности.

Согласно п.2.1. Таблицы 1 раздела 4 № П1-01.03 Р-0136, Порядок взаимодействия участников процесса по планированию организации отбора, транспортировки, комплексного исследования, хранения и ликвидации керна: Заказчик заключает Договор на строительство скважины «под ключ» при комплексном выполнении услуг с буровым подрядчиком / заключает договор на отбор керна с подрядчиком по отбору керна, включающий ГТЗ на отбор керна (подписанный Заказчиком и буровым подрядчиком/подрядчиком по отбору керна).

АО «Сибнефтегаз» не разработал и не передал ГТЗ на отбор керна для формирования коммерческого предложения ООО «Белоруснефть-Сибирь».

Выполненные Подрядчиком в полном объеме работы по отбору керна, имеют для Заказчика потребительскую ценность, факт выполнения Подрядчиком данного вида работ Заказчик, не отрицает.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об обоснованности уточненных исковых требований. Иск подлежит удовлетворению.

В порядке ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на отевтчика.

Руководствуясь статьями 9, 16, 49, 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>, дата регистрации – 09.07.1996) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, тер. Панель 8, влд. 52, стр. 2, дата регистрации – 28.07.2008) задолженность за выполненные работы в размере 47 189 884 рублей 33 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей. Всего взыскать 47 389 884 рубля 33 копейки.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://yamal.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восьмого арбитражного апелляционного суда http://8aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Западно-Сибирского округа http://faszso.arbitr.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья

В.С. Воробьёва