10458_6029109  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-12882/19

17 сентября 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М. А. при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Администрации Большесальского сельского поселения ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройсервис" ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>  

об обязании выполнить работы, взыскании денежных средств 

 Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить следующие недостатки работ  по муниципальному контракту от 21.06.2017 № 0158300025517000012-0228074-04 по  объекту: «Капитальный ремонт здания МКУК Дома культуры «Большесальского  сельского поселения», расположенного по адресу: 

<

...>» в течение трех месяцев со дня вступления  решения суда в законную силу, а именно:  

1. Заменить неисправные самовсасывающие насосы НС2 50/175.175-7.5/2-  600(1)Q =20мЗ/час; Н=24 м с электр.N=7,5 квт; п=2650 об/мин (1 раб, 1 рез) в количестве  двух штук (локальная смета Водоснабжение 02-01-04, п. 35,37, акт форы КС-2 № 5, п.  35,37);  

2. Наладить систему автоматизированной подачи воды по пожарным кранам  (локальная смета на автоматизацию № 02-01-08, п. 1-52; акт формы КС-2 № 12, п. 1-52);  

3. Заменить потрескавшиеся плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм,  (серые) при входе в здание Дома культуры в количестве 47 штук (локальная смета № 0201-01 на общестроительные работы. Раздел 10. Крыльца, входы, п. 548, 551, 576, 579, акт  формы КС-2 № 1 л.443, 446, 471,474);  

4. Заменить 93,4 кв.м плит подвесного потолка типа Армстронг по каркасу из  оцинкованного профиля, в зале здания Дома культуры (помещение 102) в местах протечки  (локальная, смета № 02-01-01 на общестроительные работы. Раздел 7. Внутренняя  

отделить и, 280, акт формы КС-2 № 1, п. 204);  

5. Заменить потрескавшиеся плитки керамогранитные размером 40x40 мм в  количестве 15 штук в помещениях 111, 112, 113, 114, 115,116, 211,213, 214, 215 (тамбуры  туалетов, туалеты) здания Дома культуры (локальная смета № 02-01-01 па  общестроительные работы, Раздел 5. Полы, п. 214, акт формы КС-2 № 1, п.154);  

6. Отштукатурить фасад здания Дома культуры в осыпавшихся местах  (локальная смета № 02-01- 01 на общестроительные работы, Раздел 8. Наружная отделка  существующее здание п. 477- 482, 485,490, акт формы КС-2 № 1 п. 374, 378, 381,386);  

7. Провести ремонтные работы проездов (тип 1) с целью устранения  застаивания у стен и проникновения осадков (дождевая вода, снег) в подвальные  помещения 001, 004, 005, 006 здания Дома культуры (локально сметный расчет № 05-01- 02, п. 1-16, акт формы KC-2 № 18, п. 1-16);  

8. Устранить выявленные нарушения в подвальных помещениях 001,004, 005, 006  здания Дома культуры, а именно, устранить грибок и провести ремонтные работы стен  покрывшихся влагой, плесенью и грибком. Общая площадь стен подвальных помещений  001, 004, 005, 006 здания Дома культуры, подлежащих гарантийному ремонту 111 кв. м  (локальная смета № 02-01-01 на общестроительные работы, Раздел 7. Внутренняя отделка,  подраздел стены подвала, п. 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, акт формы КС- 2 № 1 п.253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,262).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации Большесальского сельского  поселения (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 948 014,88 руб. штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 27960 руб.  государственной пошлины  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Новожилова М. А.