АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-17802/2023

г. Ярославль

28 мая 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена  27 мая 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Светловой Е.О. 

рассмотрев в судебном заседании заявление  Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о   взыскании,

 

при участии

от истца – не явились

от ответчика – не явились 

 

установил:

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой" о взыскании 139 500 руб.

В судебное заседание стороны представителей не направили.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

27.04.2020 между Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой" /Подрядчик/ заключен Договор № 09смр/2020 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, согласно п. 1.1. которого Заказчик поручает, а  Подрядчик  принимает на себя  обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего  имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам, в соответствии с адресным перечнем, указанном в Приложении № 1 к Договору.

В соответствии с п. 2.1. Договора цена договора составляет 84532949,00 руб. и включает в себя все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 3.3. Договора максимальный срок окончания выполнения всего комплекса (объема) работ, установленного разделом 1 Договора – до 15.09.2020.

В соответствии с п. 13.7. Договора срок действия банковской гарантии №ЭБГ-54793/2020 от 08.05.2020 со сроком действия до 15.12.2020.

В соответствии с п. 14.6. Договора в случае продления срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан до истечения срока действия договора страхования продлевать его на новый срок, либо заключить новый договор страхования на тех же условиях.

В течение 3 рабочих дней с даты истечения срока действия договора страхования строительных рисков, Подрядчик обязуется представить Заказчику документы, подтверждающие продление срока его действия (копию нового договора страхования/дополнительного соглашения, заверенную страховой организацией), а также платежное поручение, подтверждающее оплату страховой премии, с отметкой банка об исполнении.

В соответствии с п. 14.11. Договора за нарушение сроков, установленных пунктом 14.1. настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10000 руб. за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 5.1.1. Договора  страхования № ЕН03-2000028368 строительно-монтажных работ от всех рисков ООО «Ремстрой» от 27.04.2020 срок действия договора по разделу 2 настоящего договора (за исключением страхования послепусковых гарантийных обязательств) и по разделу 3 настоящего договора с 00 часов 00 минут 07 мая 2020 года, но не ранее 00 часов 00 минут даты следующей за датой уплаты страховой премии в полном объеме, по 23 часа 59 минут 14.11.2020 года, обе даты включительно.

Работы по капитальному ремонту в отношении некоторых объектов не были завершены в срок, предусмотренный договором.

          Согласно актам  приемки выполненных работ в срок не выполнены  работы  по капитальному ремонту в отношении следующих объектов: Гаврилов-Ямский MP, Шопша, ул. Старосельская, д.1 - 30.12.2020, 

<

...> - 23.04.2021,

<

...> - 30.12.2020,Ярославль, ул. Ранняя, д.4 -29.04.2021,ФИО1, 

<

...> - 27.11.2020, 

<

...> - 23.03.2021.

29.01.2021 письмом № 10-03/588 Подрядчик был  уведомлен  о необходимости  продления банковской гарантии  и продления сроков  договора страхования.

26.08.2021 в адрес Подрядчика направлена Претензия об оплате суммы  в размере 13 950 000 руб. за нарушение обязательств по предоставлению документов, подтверждающих  продление срока договора страхования № 04-02/6975. 

Письмом от 10.03.2022 № 10-03/1785  на основании обращения  Подрядчика размер  штрафа был  уменьшен до 139 500 руб.

Полагая, что подрядчиком нарушены обязательства по Договору, что является основания для начисления неустойки, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

На основании ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

Согласно п.1 ст.330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Факт нарушения ответчиком условий договора подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

При неисполненном обязательстве требование о взыскании неустойки соответствует ст.330 Гражданского кодекса РФ и условиям Договора.

По расчету истца сумма неустойки составляет 139500 руб. 

Расчет неустойки ответчиком не оспорен.

Судом расчет истца проверен.

Основания для применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда отсутствуют.

Учитывая изложенное, требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в размере 139 500 руб.

Расходы по уплате государственной пошлины судом распределены в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 139 500 руб. неустойки, 5 185 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 815 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.05.2023 № 3046, от 19.05.2023 № 3042, от 19.05.2023 № 3046. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Л.А. Шадринова