АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-297980/19-96-2375

31 января 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 31 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО «ЩЛЗ» к ответчику ООО «ДСК-5» о взыскании 13 197 522,67 руб.,  госпошлины.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 24.12.2019 г., диплом;

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ОАО «ЩЛЗ»  обратилось в суд с требованиями о взыскании с ООО «ДСК-5» задолженности по договору строительного субподряда № 1/16 Д (ЩЛЗ) от 01.10.2016 года в размере 1 428 160 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 285 719,50 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 1 428 160 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженности по договору строительного субподряда № 3/16 Д (ЩЛЗ) от 01.10.2016 года в размере 4 003 860 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 752 396,44 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 4 003 860 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженности по договору строительного субподряда № 9/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 года в размере 1 025 273,70 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 196 337,05 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 1 025 273,70 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженности по договору строительного субподряда № 10/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 года в размере 4 428 160 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 547 963,66 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 4 428 160 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженности по договору строительного субподряда № 11/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 года в размере 471 264 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 58 388,32 руб.

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

В судебное заседание не явился ответчик, считается извещенным надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела в порядке ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец не возражает против рассмотрения дела в отсутствие ответчика.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 01.10.2016г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 1/16.  

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-строительно-отделочные работы машинного помещения

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг – 17 остановок – 5 лифтов

г/п 630 кг - 17 остановок - 5 лифтов

на объекте, расположенном по строительному адресу: М.О., 

<

...> позиция проекта планировки 3-27 (далее - объект), а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора. 

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 6 919 000 руб., в т.ч. НДС 18 % - 1 055 440,68 руб., определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 1428160 руб., что подтверждается КС-2 от 31.12.2016г. и КС-3 от 31.12.2016г. (сумма 137 850 руб.); КС-2 от 28.02.2017г. и КС-3 от 28.02.2017г. (сумма 1 290 310 руб.).

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 1 428 160 руб.

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 01.10.2016г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 3/16.  

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-строительно-отделочные работы машинного помещения

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 17 остановок - 5 лифтов

г/п 630 кг - 17 остановок - 5 лифтов 

на объекте, расположенном по строительному адресу: г. Обнинск, мкр. Заовражье, кв.5 корп.10, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора. 

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 6 919 000 руб. (Шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч рублей), в т.ч. НДС 18 % - 1 055 440,68 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 4 003 860  руб., что подтверждается КС-2 от 28.02.2017г., КС-3 от 28.02.2017г. (сумма 529 303,50 руб.); КС-2 от 31.03.2017г., КС-3 от 31.03.2017г. (сумма 1 888 887,00 руб.); КС-2 от 30.04.2017г., КС-3 от 30.04.2017г. (сумма 1 585 669,50 руб.).

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 4 003 860 руб. 

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 04.08.2017г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 9/17.  

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 27 остановок - 1 лифт

г/п 1000 кг - 27 остановок - 2 лифта (лифты без машинного помещения) 

на объекте, расположенном по строительному адресу: МО, г. Одинцово, мкр.8 корп.4, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора. 

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 3 296 700 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 1 025 273, 70 руб.., что подтверждается КС-2 от 28.02.2018г., КС-3 от 28.02.2018г. (201 098,70 руб.); КС-2 от 31.03.2018г., КС-3 от 31.03.2018г. (сумма 824 175,00 руб.)

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 1 025 273, 70 руб. 

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 04.08.2017г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 10/17.  

В соответствии с пунктом №1. 1 раздела № 1 договора «Предмет договора» субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-строительно-отделочные работы машинного помещения,

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 17 остановок - 5 лифтов

г/п 630 кг - 17 остановок - 5 лифтов 

на объекте, расположенном по строительному адресу: 

<

...>, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора. 

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 6 919 000,00 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 4 428 160 руб., что подтверждается КС-2 от 31.10.2017г., КС-3 от 31.10.2017г. (сумма 145 299,00 руб.); КС-2 от 30.11.2017г., КС-3 от 30.11.2017г. (сумма 1 162 392,00 руб.); КС-2 от 29.12.2017г., КС-3 от 29.12.2017г. (сумма 1 113 959,00 руб.); КС-2 от 31.01.2018г., КС-3 от 31.01.2018г. (сумма 1 314 610,00 руб.); КС-2 № 28.02.2018г., КС-3 от 28.02.2018г. (сумма 691 900,00 руб.)

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 4 428 160 руб. 

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 04.08.2017г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 11/17.  

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-строительно –отделочные работы машинных помещений,

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 17 остановок - 2 лифта

г/п 630 кг - 17 остановок - 2 лифта 

на объекте, расположенном по строительному адресу: 

<

...>, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе Объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора. 

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 2 767 600 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 471 264 руб., что подтверждается КС-2 от 29.12.2017г., КС-3 от 29.12.2017г. (471 264 руб.)

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить задолженность, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Оплата выполненных работ ответчиком в полном объеме до настоящего времени не произведена. Доказательств обратного ответчиком не представлено. Сумма задолженности составляет: по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) № 1/16 от 01.10.2016г. - 1 428 160 руб.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) № 3/16 от 01.10.2016г. - 4 003 860 руб.;   по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) - № 9/17 от 04.08.2017г- 1 025 273, 70 руб.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) -№ 10/17 от 04.08.2017г. - 547 963, 66 руб.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) -№ 11/17 от 04.08.2017г. - в размере 471 264,00 руб.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что работы  истцом выполнены, замечания в отношении объема и качества выполненных работ не представлены, оплата работ ответчиком добровольно не произведена, поэтому требования  истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере: по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) № 1/16 от 01.10.2016г. - 285 719, 50 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019г.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) № 3/16 от 01.10.2016г. - 752 396, 44 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г.;  по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) - № 9/17 от 04.08.2017г. - 196 337, 05 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) -№ 10/17 от 04.08.2017г. - 547 963, 66 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) -№ 11/17 от 04.08.2017г. - 58 388, 32 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г., исходя из ставки банковского процента по вкладам физических лиц, существующей в месте нахождения истца, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды согласно представленного расчета.

Расчет истца ответчиком по существу не оспорен, судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно. Учитывая изложенные положения законодательства, условия сделки, заключенной сторонами, а также установленные судом фактические обстоятельства дела, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судом также признаются правомерными требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства по спорным договорам.

Уплаченная истцом при обращении в суд госпошлина в размере 88 988 руб. взыскивается с ответчика на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании статей 307-309, 395, 702, 711, 740, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ДСК-5» в пользу ОАО «ЩЛЗ» задолженность по договору строительного субподряда № 1/16 Д (ЩЛЗ) от 01.10.2016 года в размере 1 428 160 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 285 719,50 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 1 428 160 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 3/16 Д (ЩЛЗ) от 01.10.2016 года в размере 4 003 860 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 752 396,44 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 4 003 860 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 9/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 года в размере 1 025 273,70 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 196 337,05 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 1 025 273,70 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 10/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 года в размере 4 428 160 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 547 963,66 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 4 428 160 руб., за период с 22.10.2019 года по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 11/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 года в размере 471 264 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 58 388,32 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 88 988 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                П.С.  Гутник