АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041 Россия, Тульская область, город Тула, Красноармейский проспект, д. 5

телефон (факс): 8(4872)250-800; http://www.tula.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А68-7789/2020

город Тула

16 декабря 2020 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Воронцова И.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации муниципального образования Воловский район (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО «Белагро-корм» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании ответчика устранить недостатки (дефекты) работ по муниципальному контракту,  

при участии в заседании:

от сторон: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

АМО Воловский район обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к ООО «Белагро-корм» об обязании ответчика устранить недостатки (дефекты) работ по муниципальному контракту № 0366200035618003822-0109672-02 от 16.08.2018, возникшие в гарантийный период и выразившиеся в наличии трещин в оконных блоках на объекте МКОУ «Борятинская СОШ», расположенном по адресу: 

<

...>, Воловского района, Тульской области, а именно: заменить пять оконных блоков в учебных кабинетах (кабинет №3, кабинет начальных классов, кабинет русского языка, кабинет технологии) и коридоре.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим  образом о времени и месте судебного заседания, ответчик отзыв на иск не представил.

Дело рассмотрено в соответствии с нормами статей 121 - 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации в «Картотеке арбитражных дел» на официальном сайте  www.kad.arbitr.ru

Из материалов дела суд установил следующее.

16.08.2018 между администрацией муниципального образования Воловский район (Заказчик) и ООО «Белагро-корм» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт №0366200035618003822-0109672-02 на выполнение работ по замене оконных блоков по Объекту МКОУ «Борятинская СОШ» с. Борятино Воловского района Тульской области (далее - контракт).

В соответствии с пунктом 6.1 контракта на основании акта сдачи-приемки выполненных работ от 21.05.2019 Заказчик перечислил Подрядчику 1 118 979,66 руб., что подтверждается платежные поручения от 21.05.2019 № 647, от 21.05.2019 № 648.

Согласно подпункту 7.2. пункта 7 контракта гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на участке ремонта, с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, составляет не менее 5 лет.

В соответствии с пунктом 7.3 контракта, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Комиссия по обследованию оконных блоков в МКОУ «Борятинская СОШ» 

<

...> Воловского района Тульской области, находящихся на гарантийном обслуживании, 27.02.2020 выявила следующие недостатки (дефекты): треснули 5 оконных блоков в четырех учебных кабинетах (кабинет №3, кабинет начальных классов, кабинет русского языка, кабинет технологии) и один оконный блок в коридоре находящиеся на объекте МКОУ «Борятинская СОШ».

На заявленную администрацией муниципального образования Воловский район претензию подрядчик не ответил.

Полагая, что работы выполнены ответчиком с существенными недостатками, выявленными в период гарантийного срока, и данные недостатки обществом не устранены, истец обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Изучив и проанализировав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Согласно пункту 1 статьи 724 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (пункт 5 статьи 724 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Судом установлено, что 16.08.2018 между администрацией муниципального образования Воловский район (Заказчик) и ООО «Белагро-корм» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0366200035618003822-0109672-02 на выполнение работ по замене оконных блоков по Объекту МКОУ «Борятинская СОШ» с. Борятино Воловского района Тульской области.

Заказчик перечислил подрядчику денежные средства в сумме 1 118 979,66 руб. на основании платежных поручений от 21.05.2019 № 647, от 21.05.2019 № 648.

Согласно подпункту 7.2. пункта 7 контракта гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на участке ремонта, с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, составляет не менее 5 лет.

В соответствии с пунктом 7.3 контракта, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Комиссия по обследованию оконных блоков в МКОУ «Борятинская СОШ» 

<

...> Воловского района Тульской области, находящихся на гарантийном обслуживании, 27.02.2020 выявила следующие недостатки: треснули 5 оконных блоков в четырех учебных кабинетах (кабинет №3, кабинет начальных классов, кабинет русского языка, кабинет технологии) и один оконный блок в коридоре находящиеся на объекте МКОУ «Борятинская СОШ».

Между тем ответчиком не представлены в суд документальные доказательства того, что указанные истцом в акте обследования от 27.02.2020 недостатки (дефекты) произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

Ответчик ходатайство о проведении судебной экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ в целях установления причин возникновения дефектов в результате работ не заявлял.

При таких обстоятельствах исковые требования об обязании ответчика в течение пятнадцати дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки (дефекты) работ, возникшие в гарантийный период и выразившиеся в наличии трещин в оконных блоках на объекте МКОУ «Борятинская СОШ», расположенном по адресу: 

<

...>, Воловского района, Тульской области, а именно: заменить пять оконных блоков в учебных кабинетах (кабинет №3, кабинет начальных классов, кабинет русского языка, кабинет технологии) и коридоре, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ госпошлина по иску в размере 6 000 руб. относится на ответчика и подлежит взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истец освобожден от уплаты госпошлины при подаче искового заявления в суд в силу закона. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 156, 167 - 170, 176, 180, 181, 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Белагро-корм» в течение пятнадцати дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки (дефекты) работ, возникшие в гарантийный период и выразившиеся в наличии трещин в оконных блоках на объекте МКОУ «Борятинская СОШ», расположенном по адресу: 

<

...>, Воловского района, Тульской области, а именно:

заменить пять оконных блоков в учебных кабинетах (кабинет №3, кабинет начальных классов, кабинет русского языка, кабинет технологии) и коридоре.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белагро-корм» в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления его в полном объеме в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Тульской области.

Судья                                          И.Ю. Воронцов