Арбитражный суд Московской области

       107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

«03» июля 2019 года                                                                          Дело № А41-101303/18

Резолютивная часть решения объявлена «04» июня 2019 года. Решение изготовлено в полном объеме «03» июля 2019 года.

Арбитражный суд Московской области 

в составе: судьи Быковских И. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО  "КОРПОРАЦИЯ Р-ИНДУСТРИЯ"; ОАО "РЖД" к ООО "ПРОМСТРОЙ" об обязании передать документацию, третье лицо - ОАО "РЖД" (филиал Дирекции по строительству сетей связи),

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по дов. № 90 от 03.05.2018 г.,

от ответчика – ФИО3 по дов. № 2 от 09.01.2019 г., ФИО4, генеральный директор, решение №160 от 27.06.2018 г.,

от третьего лица

установил:

ООО  "КОРПОРАЦИЯ Р-ИНДУСТРИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ПРОМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании ООО "ПРОМСТРОЙ" передать исполнительную документацию по договору субподряда № 119/01/2014 от 30.04.2014 в составе:

Наименование работ

Состав исполнительной  документации

Общестроительные работы

 

Здание вокзала. Общестроительные работы

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Исполнительные схемы

Устройство Кровли

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Деревянные башни (2 шт.)

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Здание вокзала. Ремонтно-реставрационные работы.

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Исполнительные схемы

Электроосвещение здания вокзала

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ

Акт проверки осветительной сети на 

правильность зажигания внутреннего освещения

Акт проверки осветительной сети на 

функционирование и правильность установочных аппаратов

Акты на выполненные (скрытые) работы                

Исполнительные схемы

Силовое оборудование здания вокзала

Акт технической готовности электромонтажных работ 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Исполнительные схемы

Молниезащита и заземление

Акт технической готовности электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Автоматика ОВ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Протокол измерения сопротивления изоляции

Исполнительные схемы

Автоматика ТС

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Протокол измерения сопротивления изоляции

Исполнительные схемы

Автоматика ВК

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Протокол измерения сопротивления изоляции

Исполнительные схемы

Автоматика ДУ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Протокол измерения сопротивления изоляции

Исполнительные схемы

Порошковое пожаротушение

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части помещений

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации,

предъявляемой при сдаче-приемке

электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных

работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Охранная сигнализация

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, предъявляемой 

при сдаче-приемке электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Система оповещения пожарная

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Пожаротушение

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части помещений

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, предъявляемой при 

сдаче-приемке электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

 

Система видеонаблюдения

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части помещений

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, 

предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Сети связи

Протокол измерения сопротивления изоляции

Ведомость отступлений от проекта

Ведомость недоделок

Справка о ликвидации недоделок

Акт о готовности строительной части помещений

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Кабельный журнал

Исполнительные схемы

Здание вокзала. Отопление, вентиляция

Акт визуального осмотра сварных швов

Акт гидростатического или манометрического

испытания на герметичность

Акт освидетельствования внутренней системы теплоснабжения

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Технический паспорт системы вентиляции Исполнительные схемы

Здание вокзала. Водопровод и канализация

Акт визуального осмотра сварных швов

Акт гидростатического или манометрического

испытания на герметичность

Акт освидетельствования внутренней системы водоснабжения

Акт освидетельствования внутренней системы канализации

Акт испытаний внутренней канализации

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

ФИО5 дренаж

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

ИТП

Акт визуального осмотра сварных швов

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Устройство монолитно-балочного перекрытия в осях

1-2, А-А/2

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Навес

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Объекты подсобного и обслуживающего назначения

 

Тепловой пункт для жилых домов по ул. Островского, 15 и 15А. Тепломеханические решения тепловых сетей. Демонтаж

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Тепловой пункт для жилых домов по ул. Островского, 15 и 15А. Тепломеханические решения тепловых сетей.

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Тепловой пункт Общестроительные работы по ул. Островского, 15 и 15 А. Тепломеханические решения тепловых сетей.

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Освещение и силовое электроснабжение теплового пункта для жилых домов по ул. Островского, 15 и 15А.

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания освещения

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Автоматика ТС. Тепловой пункт для жилых домов по ул. Островского, 15 и 15 А.

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Протокол измерения сопротивления изоляции

Исполнительные схемы

Объекты энергетического хозяйства

 

Электроосвещение. Внутриплощадочные сети

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания освещения

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт технической готовности электромонтажных работ

Протокол измерения сопротивления изоляции

Исполнительные схемы

Наружное электроосвещение

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания освещения

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Электроосвещение. Внешнеплощадочные сети

Протокол измерения сопротивления изоляции

Акт технической готовности электромонтажных работ

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания освещения 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность установочных аппаратов 

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Фундаменты ТП

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

 

Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

 

Наружные сети водопровода

Акт освидетельствования наружных сетей водопровода

Акт о проведении приемочного гидравлического

испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

Акт о проведении промывки и дезинфекции

трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Наружные сети канализации

Акт освидетельствования наружных сетей

канализации

Акт о проведении приемочного гидравлического

испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Внутриплощадочные сети. Кольцевой дренаж

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Внешнеплощадочная теплосеть

Акты на выполненные (скрытые) работы

Акт освидетельствования наружных тепловых сетей

Акт о провидении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

Акт о проведении промывки трубопровода

Исполнительные схемы

Внешнеплощадочная сеть. Общестроительные работы. Архитектурно-строительные решения

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Благоустройство и озеленение территории

 

Генеральный план

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Временные здания и сооружения

 

Временные здания и сооружения

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Башни (ССН84)

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Воссоздание окон и дверей

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Фасад

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Восстановление трассы ливневой канализации

Акт освидетельствования наружных сетей канализации

Акт о проведении приемочного гидравлического

испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Устройство шпунтового ограждения. Общестроительные работы

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Устройство шпунтового ограждения со стороны 1-го

ж/д пути

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Двухсторонняя парковая связь. Напольные устройства

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Переустройство кабельной канализации ОАО "РЖД"

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Переустройство кабельной канализации ОАО "Ростелеком"

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

ПРС-УКВ Радиосвязь

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Локомотивные возимые радиостанции

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Заземление АМС

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Внешнеплощадочные сети. Дополнительные работы на фундамент под КНС

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Реставрационные работы

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Кровля

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Внутренняя отделка помещений и лепного декора

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Демонтажные работы

Акты на демонтажные работы Исполнительные схемы

Люстры

Акты на монтаж люстр Исполнительные схемы

Полы

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Леса

Акты на демонтаж/монтаж лесов

Навесы, крыльцо, цоколь, приямки

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы

Исполнительные схемы

Печка

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Внутренняя отделка помещений

Исполнительные схемы

Деревянная башня

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Оконные проемы

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Проемы деревянные наружные

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Проемы деревянные внутренние

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Перегородки сантехнические

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Перегородки ДП-1, ДПО-1

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Бронеперегородки

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Перегородки INTERLUX

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Фасад

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

Противодымная защита

Протокол измерения сопротивления изоляции Ведомость отступлений от проекта 

Ведомость недоделок 

Ведомость смонтированного оборудования

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

Акты на выполненные (скрытые) работы 

Акт технической готовности электромонтажных работ

Кабельный журнал 

Исполнительные схемы

 

Внутриплощадочные сети. Доп. работы на фундамент под КНС

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Акты на выполненные (скрытые) работы Исполнительные схемы

 

Журнал входного контроля;

 

Журнал авторского надзора;

 

Общий журнал работ КС-6;

 

Приказы на ответственных лиц;

 

Паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование;

 

Свидетельства СРО организаций, привлеченных к работам на Объекте

 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ОАО "РЖД" (филиал Дирекции по строительству сетей связи).

Иск предъявлен на основании ст. ст. 309,310, 398, 721, 723, 726 ГК РФ, ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

В обосновании заявленных требований истцом указано, что ответчик передал истцу результат работ по вышеназванному договору, однако исполнительная документация о выполненных строительных, монтажных, пуско-наладочных работах, а также схемы расположения и каталоги координат, высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, согласованные в установленном порядке в инспектирующих организациях, ответчиком истцу переданы не были.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что истец принял выполненные работы, а также комплект документов, указанный в п. 2.4.1, п. 2.4.2 и п. 5.3 договора, без возражений и замечаний, при этом, истцом выполненные ответчиком по договору работы были оплачены, что также свидетельствует о надлежащем исполнении ответчиком, в том числе обязанности по передаче полного комплекта технической документации.

В письменных пояснениях на отзыв ответчика истец сослался на наличие у ответчика, как субподрядчика, обязанности по ведению и нахождению у последнего исполнительной документации.

В судебное заседание представитель третьего лица, извещённый надлежащим образом о месте и времени его проведения, не явился. Дело рассмотрено в порядке ч. 5 ст. 156 АПК РФ в его отсутствие.

Представитель истца в заседании суда настаивал на доводах и требованиях искового заявления.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него, письменных возражениях на отзыв и выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 30.04.2014 между истцом (генподрядчиком) и ответчиком (субподрядчиком) в редакции дополнительных соглашений был заключен договор субподряда № 119/01/2014, согласно которому субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных работ на объекте – здание вокзала Пермь-1 на Свердловской железной дороге в составе титула: «Ремонтно-реставрационные работы здания вокзала Пермь-1, объекта культурного наследия».

Цена работ, подлежащих выполнению субподрядчиком по договору, является твердой и в соответствии с ведомостью договорной цены составляет 67452776 руб. 40 коп. (п. 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 2 от 30.04.2015).

В соответствии с п. 2.4.1 договора работы, фактически выполненные, сданные субподрядчиком и принятые генподрядчиком до 20-го числа (включительно) каждого текущего месяца, оплачиваются генподрядчиком в размере 95% от их стоимости в течение 75 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления субподрядчиком исполнительной документации на выполненный объем работ, счета и счета-фактуры, при условии поступления финансирования генподрядчику от заказчика. Оплата оставшихся 5 % от стоимости выполненных работ производится генподрядчиком в соответствии с п. 2.4.2 договора.

Согласно п. 5.3 договора субподрядчик до 20 числа каждого (текущего) месяца составляет и передает генподрядчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не менее 3-х экземпляров, накладные по форме № ТОРГ-12, акты о приемке (поступлении) оборудования (по форме № ОС-14), акты приема-передачи оборудования в монтаж (по форме № ОС-15), акт смонтированного оборудования по форме ФСУ-3, накопительную ведомость, промежуточную исполнительную документацию на выполненные объемы работ, счет с указанием суммы, подлежащей оплачете, счет-фактуру. 

С момента начала работ и до их завершения субподрядчик обязан вести всю необходимую и требуемую документацию по учету работ в капитальном строительстве в соответствии с требованиями СНиП, в том числе журнал производства работ, в котором отражается ход фактического производства работ, факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях генподрядчика и субподрядчика. Каждая запись в журнале подписывается субподрядчиком (п. 4.1.14 договора).

Пунктом 4.1.21 договора предусмотрено, что субподрядчик обязался передать генподрядчику по окончанию выполнения работ, при подписании актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости работ и затрат по форме № КС-3, исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных, пуско-наладочных работах, а также схемы расположения и каталоги координат, высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания (при необходимости), согласованные в установленном порядке в инспектирующих организациях.

31.12.2015 субподрядчик передал генподрядчику результат работ, что подтверждается представленными в материалы дела подписанными в двустороннем порядке актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справками о стоимости работ и затрат по форме № КС-3, и не оспаривается ответчиком. 

Вместе с тем, как указывает истец, субподрядчик нарушил свои договорные обязательства в части предоставления генподрядчику исполнительной документации по выполненным работам.

Оставление ответчиком без удовлетворения претензии истца о предоставлении указанной документации послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Отношения сторон по настоящему спору регулируются положениями главы 37 ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 8 ГК РФ).

В силу положений ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктами 1, 4 ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения. 

При этом, свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных кодексом и другими законами. 

Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило. Указанные положения разъяснены в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

В соответствии с абз. 7 ст. 12 ГКРФ защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства, кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав заключается в понуждении должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства (договора). 

При этом, требование о понуждении к исполнению обязанности в натуре может быть удовлетворено при условии, что данная обязанность предусмотрена законом либо договором. 

Таким образом, суд удовлетворяет требования кредитора о возложении на должника обязанности по исполнению обязательства в натуре при установлении следующих обстоятельств – наличие согласованных сторонами соответствующих условий договора, представление истцом достаточной совокупности доказательств, подтверждающих нарушение его прав действиями ответчика, установление факта наличия неисполненной обязанности ответчика.

В силу ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Согласно ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать, в том числе ведение исполнительной документации. 

Состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 9 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

В силу пункта вышеназванных Требований исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в главе II Порядок ведения исполнительной документации. 

Императивных норм устанавливающих обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации подлежащей передаче подрядчику, нормы действующего законодательства не содержат. 

В этой связи, в случае закрепления в договоре подряда обязанности подрядчика по передаче исполнительной документации сторонами должны быть согласованы условия о составе исполнительной документации подлежащей передаче подрядчиком, позволяющие определить перечень такой документации.

Вместе с тем, заключенный между сторонами договор субподряда № 119/01/2014 от 30.04.2014 не регулирует отношения по ведению исполнительной документации субподрядчиком.

Сам перечень исполнительной документации, подлежащий передаче субподрядчиком генподрядчику, ни договором № 119/01/2014 от 30.04.2014, ни иными соглашениями сторон, не определен. 

Условиями договора не предусмотрена обязанность субподрядчика передать именно тот перечень исполнительной документации, который запрашивает истец.

Как было установлено судом выше, в силу пункта 4.1.21 договора субподрядчик обязался передать генподрядчику по окончанию выполнения работ, при подписании актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости работ и затрат по форме № КС-3, исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных, пуско-наладочных работах, а также схемы расположения и каталоги координат, высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания (при необходимости), согласованные в установленном порядке в инспектирующих организациях.

В силу ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 65 АПК РФ  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий и последствий несоблюдения установленных судом процессуальных сроков (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Истец посредством подписания актов о приемке выполненных работ, составленных по унифицированной форме № КС-2, без замечаний и возражений принял выполненные ответчиком работы, что, исходя из буквального значения содержащихся в пунктах 4.1.21, 5.3, 5.5 договора слов и выражений и принципа добросовестности участников гражданских правоотношений, свидетельствует о том, что исполнительная документация была передана генподрядчику при передаче результата работ по договору.

Доказательств того, что без истребуемой исполнительной документации, невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре, истец не представил, а также истец не обосновал необходимость истребования документации спустя более 3-х лет с момента приемки работ у ответчика (ст. 65 АПК РФ).

При этом, на вопрос суда представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что объект строительства эксплуатируется.

Данный факт также подтверждается актом приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта от 27.12.2017.

Таким образом, арбитражный суд приходит к выводу, что истец в нарушение положений ст. 65 АПК РФ не представил суду бесспорных доказательств наличия у ответчика обязанности по предоставлению истцу истребуемых им документов, основанной на нормах права и/или возникшей из договора субподряда № 119/01/2014 от 30.04.2014, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области 

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                     И. В. Быковских