Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А12- 29586/2018

г. Волгоград

14 ноября 2018 г.

Резолютивная часть решения оглашена 08 ноября 2018 г.

Решение изготовлено в полном объеме 14 ноября 2018 г.

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН 

<

***>, 400120 

<

...>) к муниципальному унитарному предприятию дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400011 

<

...>) об обязании выполнить работы по устранению дефектов, выявленных в период гарантийного срока объекта,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность № 414/03 от 26.02.2018 г.;

от ответчика – не явился, извещен.

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями (уточненными в порядке ст.49 АПК РФ) к  ответчику в котором просит обязать  безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по  муниципальному контракту № 1874 от 08.07.2016 г., по объекту: улица 40 лет ВЛКСМ (ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайного пути) в Красноармейском районе Волгограда (выборочно): разрушение асфальтобетонного покрытия вдоль трамвайных рельс -127,5 пог.м. от пр-кта г.Сталинграда до ул Мачтозаводской.

Истец просил удовлетворить исковые требования.

   Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

В силу ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Исследовав материалы дела,   оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,  суд  находит исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела,  между МУ «Комдорстрой» (муниципальный заказчик) и МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №1874 от 08.07.2016 (далее по тексту Контракт) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту улицы 40 лет ВЛКСМ (ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайного пути) в Красноармейском районе Волгограда (выборочно).

Согласно п. 2.1 в целях реализации мероприятий по ремонту автомобильных торг;,общего пользования населенных пунктов Подрядчик принимает на себя обязательства поремонту улицы 40 лет ВЛКСМ (ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайного пути) вКрасноармейском районе Волгограда (выборочно) (далее - Объект), в соответствии спроектной документацией, (далее - Проект), а Муниципальный заказчик берет на себяобязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящегоКонтракта.

Согласно п. 2.2. Контракта, Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонтуОбъекта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.

В соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 Контракта, для выполнения работ по указанномуКонтракту Подрядчик принял на себя следующие обязательства:

- выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Муниципальному заказчику с качеством соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему:

- обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии е Проектомдействующими документами, определенными Перечнем нормативно-техническихдокументов (Приложение № 6 к Контракту) и другими действующими нормативнымидокументами (ГОСТ. СНиП. ВСН, ТУ и др.), а также условиями настоящего контракта и Приложений к нему.

 Согласно гарантийному паспорту указанные объекты приняты в эксплуатацию с условиями по гарантийным срокам по устранению дефектов.

С 19 по30 марта 2018 г. комиссией в составе представителей МУ «Комдорстрой» и МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда произведено обследование объектов ремонта улично-дорожной сети г. Волгограда, отремонтированных в 2017 году и составлен акт комиссионною обследования объектов улично-дорожной сети г. Волгограда, отремонтированных в 2014-201 гг.

Согласно вышеуказанному акту было установлено наличие следующих дефектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту улицы 40 лет ВЛКСМ (ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайного пути) в Красноармейском районе Волгограда (выборочно):

- разрушение асфальтбетонного вдоль трамвайных рельс - 127,5 пог.м от пр-кта 1 Сталинграда до ул. Мачтозаводская;

- выкрашивание проезжей части - ориентировочно 50 м2;

- разрушение асфальтобетонного покрытия - ориентировочно 25 м2;

- поперечные трещины - ориентировочно 300 пог. м (от разворотного кольца троллейбуса до поворота на М-6).

Указанный акт комиссионного обследования подписан со стороны МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда без претензий и разногласий.

Вместе с тем, со стороны МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда не были выполнены работы по устранению дефектов до настоящего времени.

Согласно п. 11.1 Контракта, гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

В соответствии с п. 11.2 Контракта, гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ, на автомобильной дороге и входящих в них инженерных сооружениях составляет: 4 года с даты подписания акта приемки законченных работ на объекте (по форме А-1 «Правила приемки работ при строительстве и ремонта автомобильных дорог» ВСН 19-89).

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (Приложение .N 5) в соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003'№ ИС-414-р, в состава исполнительной документации.

На основании п. 11.3 Контракта, если в период гарантийной эксплуатации ФИО2 обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты согласования порядка и сроков их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.

Согласно п.11.4 Контракта, при отказе Подрядчика от составления или подписания аки обнаруженных дефектов и недостатков Муниципальный заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

Между сторонами заключен договор строительного подряда. Отношения сторон по договору подряда и строительного подряда регулируются главой 37 ГК РФ (параграфы 1 и 3).

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик ) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его,

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполни п. иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 724 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы додж ж соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумною срок, быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно статье 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительной подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможности эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

В соответствии с пунктом 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

В соответствии с ч.1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 724 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные данной статьей.

 В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора в адрес МУП ДСЭР Советского района г. Волгограда муниципальным учреждением «Комдорстрой» была направлена претензия   от 06.07.2018 г. требованием в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств выполнить работы по устранению вышеуказанных дефектов

 Однако  вышеуказанные требования об устранении недостатков, выявленных в период гарантийного срока не выполнены.

 Таким образом, исходя из установленных  обстоятельств и в силу указанных норм закона, суд находит требования истца правомерными и  подлежащими удовлетворению.

   Расходы по госпошлине в силу ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

   На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400011 

<

...>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу за счет собственных денежных средств выполнить работы по устранению дефектов по муниципальному контракту № 1874 от 08.07.2016 г., по объекту: улица 40 лет ВЛКСМ (ремонт асфальтобетонного покрытия трамвайного пути) в Красноармейском районе Волгограда (выборочно): разрушение асфальтобетонного покрытия вдоль трамвайных рельс -127,5 пог.м. от пр-кта г.Сталинграда до ул Мачтозаводской.

 Взыскать с муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400011 

<

...>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6000 руб.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия  через арбитражный суд Волгоградской области.   

 

Судья                                                                                                   Л.А. Кремс