Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-23720/2017

10 октября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  10 октября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Организатор перевозок" (адрес:  Россия 191002, 

<

...>/лит.А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Корона Чистоты" (адрес:  Россия 198095, 

<

...>/ГЗ, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 233 097 руб. 28 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2017

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 31.08.2017

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Организатор перевозок" обратилось с иском к ООО "Корона Чистоты" о взыскании 233 097 руб. 28 коп. штрафа по п.8.5 государственного контракта № 0372200004516000027-0225657-01 от 13.04.2016.

Ответчик иск отклонил, ссылаясь на отсутствие вины. 

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен государственный контракт № 0372200004516000027-0225657-01 от 13.04.2016.

Согласно п.1.1 контракта исполнитель-ответчик обязуется выполнить работы по комплексной уборке территорий 33 земельных участков, закрепленных за истцом. 

Цена контракта составляет 4 661 945 руб. 60 коп. 

Конечный срок выполнения работ: по 15 октября 2016 года. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что работы выполнены не в полном объеме и просит взыскать в доход Санкт-Петербурга штраф в размере 233 097 руб. 28 коп. на основании п.8.5 государственного контракта. 

Изучив представленные сторонами документы, суд считает, что исполнить контракт в полном объеме не представилось возможным по причинам, не зависящим от ответчика. 

За время исполнения обязательств по контракту истец неоднократно просил ответчика приостановить проведение работ по адресам, указанным в письмах от 26.08.2016 исх. № 2054-У, а также направленным по электронной почте. 

Согласно п.8 пп.16 технического задания (приложение № 1 к контракту) выполнение работ по адресам: Придорожная аллея, участок 20 (северо-западнее пересечения с проспектом Культуры) проводятся только по письменной заявке заказчика. За время исполнения контракта заявок не поступало. 

Пункт 9 пп.4 технического задания (приложение № 1 к контракту) предусматривает, что определенные виды работ должны выполняться в зависимости от погодных условий: 

- Поливка дорожных покрытий производится для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25 градусов (по Цельсию), а также для снижения запыленности в сухую погоду по мере необходимости. 

- Уборка грунтовых наносов, образующихся после ливневых дождей.

При несоблюдении указанных условий работы не выполнялись. 

По окончании выполнения работ по контракту между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение № 1, в котором стороны на основании п.9.2 контракта пришли к соглашению уменьшить объем оказанных услуг по контракту не более чем на десять процентов, тем самым уменьшить цену контракта на 329 751 руб. 95 коп. 

За период действия контракта актов о невыполнении работ истцом не составлялось, претензий по объему и качеству работ в адрес ответчика не направлялось.

Учитывая изложенное, исковые требования удовлетворению не подлежат.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.