РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-90972/23-126-708

г. Москва

30 июня 2023 года

Резолютивная часть решения изготовлена 15 июня 2023 года (в порядке ст. 229 АПК РФ)

Полный текст решения изготовлен 30 июня 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Новикова М.С., единолично, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело 

по иску ООО "СКС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 62 526 руб. 

без вызова лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

ООО "СКС" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" 62 526 руб. 00 коп. из них: задолженность по Договору строительного субподряда №516-ЮЭС/21-СП от 13.09.2021 г. в размере 59 290 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.09.2022 года по 01.03.2023 года в размере 3 235 руб. 84 коп., расходы на оплату юридических услуг в размере 25 000 руб.

Определением от 04.05.2023 исковое заявление ООО "СКС" принято к производству суда для рассмотрения в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ.

На основании частей 1, 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец и ответчик о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом.  Копии определения о принятии искового заявления согласно информации с официального сайта Почты России http://www.russianpost.ru вручены истцу и ответчику. 

Ходатайство ответчика о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, не подлежит удовлетворению, так как ответчиком не приведены обстоятельства, предусмотренные ч.5 ст. 227 АПК РФ, для такого перехода. Истец представил доказательства в обоснование своих требований, оснований требовать у истца дополнительные документы, не имеется.

Документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, ни в срок, установленный судом, ни на дату принятия решения от истца и ответчика не поступило.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 1,2 ст. 227 и ст. 228 АПК РФ, без вызова сторон, по материалам, представленным истцом и не оспоренным ответчиком.

Резолютивная часть решения в порядке п. 1 ст. 229 АПК РФ по делу № А40-90972/23-126-708 изготовлена 15 июня 2023 и размещена на сайте суда.

В соответствии с п.2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

28 июня 2023 в материалы дела поступила апелляционная жалоба ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, 13.09.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «СтройКонтактСеть» (далее по тексту «Истец») и обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «Ленпромстрой» (далее - «Ответчик») был заключен Договор строительного субподряда №516-ЮЭС/21-СП, в соответствии с условиями которого Истец принял на себя обязательство произвести изыскательские работы, разработать на их основании и согласовать со всеми заинтересованными организациями проектно-сметную документацию, а так же а так же осуществить поставку оборудования и выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу: «Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кв от проект. ВЛИ-0,38 кв (по договору ТП №Ю8-21-302-50853 (442763)) ПС №491 «Прудная», рубильник, в т.ч. ПИР по адресу: Московская обл., г. Домодедово, д. Голубино Ю8-21-302-51864 (454260) для нужд ПАО «Россети Московский регион», а Ответчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

Согласно пункта 2.1. Договора общая стоимость работ Истцом (с учётом договорного коэффициента К=0,95) составила 1 220 064 руб. 42 коп., включая НДС 20%.

В соответствии с пунктом 3.7. Договора датой окончания работ по нему является дата подписания Истцом и Ответчиком Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с пунктом 3.9 договора.

Пунктом 3.9. Договора установлено, что при выполнении Истцом как субподрядчиком всех своих обязательств по Договору, исключая гарантийные, он направляет Ответчику как подрядчику два экземпляра Актов о приёмке всех работ по Договору вместе с актами сверки произведённых расчётов, а Ответчик со своей стороны в течении 5 рабочих дней обязан рассмотреть представленный Истцом акт сдачи-приемки работ, и по результатам рассмотрения либо подписать его, либо направить истцу мотивированный отказ от приемки работ. 

Порядок оплаты выполненных Истцом работ установлен пунктом 2.4. Договора следующим образом:

2.4.1. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 15 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий), при условии, что Сторонами подписан Акт о приёмке выполнения работ по неунифицированной форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-5

Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится в срок не позднее 15 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий), при условии, что Сторонами подписан Акт приёмки выполненных работ.

Согласно «Графику финансирования работ по титулу» (приложение №2 к Договору строительного субподряда №516-ЮЭС/21-СП от 13.09.2021 г.) проектные и изыскательские работы, а также поставка Истцом оборудования с проведением им строительно-монтажных и пусконаладочных работ должны были быть оплачены Ответчиком ещё в январе 2022 года.

Все работы по Договору, а также поставка оборудования были выполнены Истцом надлежащим образом и переданы Ответчику в два этапа в следующем порядке:

31.01.2022 года уполномоченным представителям Ответчика было передано предназначенное к установке оборудование, а также сдан результат выполненных Истцом строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Договору строительного субподряда №516-ЮЭС/21-СП от 13.09.2021 г., что подтверждается подписанными представителем Истца без замечаний:

- Актом о приемке (строительно-монтажных) работ (и оборудования) №1 (унифицированная форма № КС-2) от «31» января 2022 года на сумму 904 502,49 руб.;

- Актом о приемке (пусконаладочных) работ №2 (унифицированная форма № КС-2) от «09» февраля 2022 года на сумму 8 906,48 руб.;

- Актом №1 сдачи - приемки проектных и изыскательских работ от «31» января 2022 года на сумму 64 638 руб., включая НДС 20%

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 (унифицированная форма № КС-3) от «31» января 2022 года на сумму 1 160 728,76 рублей, включая НДС 20%.

25.08.2022 года представителям Ответчика были сдан результат всех выполненных Истцом работ по Договору строительного субподряда №516-ЮЭС/21-СП от 13.09.2021 г., что подтверждается подписанными представителем Должника без замечаний:

- Актом №1 сдачи-приёмки работ (унифицированная форма № КС-2) от «25» августа 2022 года на сумму 38 254,32 рубля;

- Актом №2 сдачи-приёмки работ (унифицированная форма № КС-2) от «25» августа 2022 года на сумму 11 154,70 рубля;

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (унифицированная форма № КС-3) от «25» августа 2022 года на сумму 59 290 рублей, включая НДС 20%;

- Актом от «25» августа 2022 года о выполнении всех работ по Договору строительного субподряда №516-ЮЭС/21-СП от 13.09.2021 г. (по форме Ответчика), из содержания которого следует, что общая стоимость всех выполненных по Договору строительного субподряда работ составила 1 220 019 рублей 59 коп., включая НДС - 20%, из которых по состоянию на 25.08.2022 г. полностью оплачено Ответчиком было 1 160 728 рубля 76 коп.

Ответчиком обязательства по оплате в полном объеме не исполнены, в связи с чем у ответчика перед истцом образовалась задолженность в общей сумме 59 290 руб. 00 коп., которую истец просит взыскать с ответчика в судебном порядке. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи искового заявления в Арбитражный суд г.Москвы.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

Согласно положениям ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Согласно ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии  со  ст.  309 ГК РФ  - обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в   соответствии   с   условиями  обязательства   и требованиями закона,  иных  правовых  актов,  а  при  отсутствии  таких  условий   и  требований  -  в  соответствии  с  обычаями  делового  оборота  или  иными  обычно  предъявляемыми  требованиями. Статья   310 ГК РФ   указывает  на то,  что  односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства   и  одностороннее   изменение   его  условий  не  допускается.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком не представлены суду доказательства своевременной оплаты выполненных по договору работ, в связи с чем, требование истца о взыскании задолженности в размере 59 290 руб. 00 коп., является обоснованным и подлежащим  удовлетворению.

Истец предъявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22.09.2022 года по 01.03.2023 года в размере 3 235 руб. 84 коп. 

Согласно статье 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Ответчик сумму процентов не оспорил, контррасчет суммы процентов не представил, факт перечисления процентов в добровольном порядке не доказал.   

Начисление процентов произведено истцом обоснованно, так как факт нарушения денежного обязательства ответчиком перед истцом подтвержден материалами дела и соответствует требованиями ст. 395 ГК РФ, в связи с чем суд взыскивает с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 235 руб. 84 коп.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб. 

В целях получения квалифицированной юридической помощи по подготовке искового заявления Истец понес судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела договором на оказание юридических услуг №03-А/УПР от 02.03.2023 заключенным с ООО «Агентство ПСБ», Платежным поручением №66 от 06.03.2023 года на сумму 25 000 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ, расходы на оплату услуг представителей, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, в разумных пределах.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О указано, что правило части 2 статьи 110 АПК РФ, предоставляющее арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, призвано создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах, является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" указал, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Как указано в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 15235/07 суд при определении суммы подлежащих возмещению обществу расходов на оплату услуг представителя исходит из продолжительности рассмотрения и сложности дела, объема и сложности выполненной работы, наличия нескольких аналогичных дел по спорам между теми же лицами, по которым интересы заявителя представлял тот же адвокат.

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" разъяснено: суд вправе, оценив размер требуемой суммы и установив, что она явно превышает разумные пределы, удовлетворить данное требование частично.

При этом лицо, требующее возмещение расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.03.2012 № 16067/11).

Таким образом, суд находит обоснованными и подтвержденными надлежащими доказательствами судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб. 00 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине в сумме 2 502 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 307-310, 395, 702, 711 ГК РФ, ст. ст. 4, 27, 67, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 229 АПК РФ, суд                                                                 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО "СКС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 59 290 (пятьдесят девять тысяч двести девяносто) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.09.2022г. по 01.03.2023г. в размере 3 235 (три тысячи двести тридцать пять) руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 5000 (пять тысяч) руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 502 (две тысячи пятьсот два) руб. 

В остальной части судебных расходов отказать.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:

М.С. Новиков