АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-191074/22-110-1444

г. Москва

02 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 02 мая 2023 года Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "СОЮЗ-СК" (390000, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ,  КИЛОМЕТР 196 КИЛОМЕТР (ОКРУЖНАЯ ДОРОГА), ДОМ 12Б, ОГРН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННЫЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЦЕНТР" (115404, 

<

...>, ПОДЪЕЗД 8 ПОМЕЩЕНИЕ 13, ОГРН:  

<

***>) о признании,  

Третье лицо- Федеральное государственное унитарное предприятие "ГЛАВНОЕ  ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ"  (676470, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦИОЛКОВСКИЙ ГОРОД, ДОМ ТЕР ВОЕННЫЙ  ГОРОДОК № 10, ОГРН: 

<

***>),  

при участии: от истца – ФИО2 по дов. от 27.10.2021 от ответчика- ФИО3 по дов. от 16.01.2023, 

от ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО  СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ"-не явился,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ-СК" обратилось с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ - ЦЕНТР" признать исполнение Контракта №  1920187375632554164000000/1907-17-СМР (СУБ)/6799 от 26.08.2019 года,  заключенного между «Объединенные энергетические технологии - Центр» (ООО  «ОЭНТ-Центр) (Генподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью  «Союз-СК» (ООО «Союз-СК») (Субподрядчик) исполненным в части авансирования;  

признать Договор залога от 03.10.2019 года доли в уставном капитале ООО «Союз- СК», заключенного в счет обеспечения Основного Договора ( Контракта №  1920187375632554164000000/1907-17-СМР (СУБ)/6799 от 26.08.2019 года),  заключенного между ООО «Союз-СК» и ООО «ОЭЕНТ-Центр» - исполненным.  

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле было привлечено Федеральное  государственное унитарное предприятие "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ", которое в судебное заседание не  явилось, спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.  

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил  встречный иск о взыскании 134 770 210,93 руб. задолженности по контракту №  1920187375632554164000000/1907-17-СМР (СУБ)/6799 от 26.08.2019, 99 289 995,54  руб. неустойки, 86 823 601,18 руб. процентов за пользование чужими денежными  средствами, процентов на сумму 130 787 981 руб. исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в  соответствующие периоды с 21.01.2023 по дату фактического исполнения  обязательства, обратить взыскание на предмет залога доли в уставном капитале ООО  «Союз-СК» 100%, номинальной стоимостью 10 000 руб.  

Определением от 02 мая 2023 года встречный иск оставлен без движения на срок  до 15.03.2023 на основании ст. 125 АПК РФ.  

Поскольку обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового  заявления без движения, в установленный срок не устранены, руководствуясь пунктом  4 части 1, частью 2 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд пришел к выводу о возвращении  встречного иска.  

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив  представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.  

Как усматривается из материалов дела, 26 августа 2019 года, между Обществом  с ограниченной ответственностью «Объединенные энергетические технологии - Центр»  (ООО «ОЭНТ-Центр) (Генподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью  «Союз-СК» (ООО «Союз-СК») (Субподрядчик) был заключен Контракт №  1920187375632554164000000/1907-17-СМР (СУБ)/6799 на завершение строительства  объекта: «Инженерное обеспечение объектов в/г 120 в/ч 01355 (шифр 156/21), в/г 85/2  в/ч 28337 (шифр 156/690), 5-ти жилых домов (шифр 156/688) по адресу: 

<

...> этапы (шифр объекта 156/692-И).  

В соответствии с п. 2.5 - настоящий Контракт заключается в целях реализации  Государственного Контракта заключенного с Государственным заказчиком от  02.07.2019 № 1920187375632554164000000 на завершение строительства объекта:  «Инженерное обеспечение объектов в/г 120 в/ч 01355 (шифр 156/21), в/г 85/2 в/ч 28337  (шифр 156/690), 5ти жилых домов (шифр 156/688) по адресу: 

<

...> этапы (шифр объекта 156/692-И), в целях выполнения государственного  оборонного заказа (далее «Государственный Контракт»). Идентификационный код  государственного заказа ИГК № 1920187375632554164000000.  

Во исполнении п. 4.27 Контракта, Сторонами заключен нотариальный Договор  залога от 03.10.2019 доли Уставного капитала Субподрядчика (ООО «Союз-СК»), в  связи с чем в ЕГРЮЛ ООО «Союз-СК» внесена запись за № 2196234283991 от  11.10.2019, Номер договора залога: 77/743-Н/77-2019-8-164, Дата договора залога:  03.10.2019, Залогодержатель ООО ««Объединенные энергетические технологии -  Центр».  

Предметом залога (п. 1 Договора залога) является: 

п.п 1.1 передача в залог Залогодержателю, принадлежащей на праве  собственности Залогодателю доли в уставном капитале ООО «Союз-СК» с целью  обеспечения исполнения обязательств Должника по основному договору перед  Залогодержателем в рамках заключенного между ними Контракта №  1920187375632554164000000/1907-17-СМР (СУБ)/6799 на завершение строительства  

объекта: «Инженерное обеспечение объектов в/г 120 в/ч 01355 (шифр 156/21), в/г 85/2  в/ч 28337 (шифр 156/690), 5-ти жилых домов (шифр 156/688) по адресу: 

<

...> этапы (шифр объекта 156/692-И) от 26.08.2019 года  (Основной договор).  

п.п. 1.4. абз. второй, Цена Основного договора составляет 292 428 960 руб.  

п.п. 1.4 абз третий, Залогодатель отвечает перед Залогодержателем  закладываемой долей в полном объеме своих обязательств по Основному Договору, в  части суммы аванса, составляющей 80% от цены Договора.  

Согласно п. 3.2 Договора залога, Размер обеспеченного залогом требования  составляет фактическую сумму, перечисленную в рамках Основного Договора на счет  Субподрядчика, но не более 233 943 168 руб.  

Согласно п. 3.1. Контракта - Цена Контракта составляет 292 428 960 руб., в т.ч.  НДС (20%)-48 738 160 руб.  

Согласно п.п. 5.1. и 5.2. Контракта -Дата начала работ: дата вступления  Контракта в силу  

Дата окончания работ: выполнение строительно-монтажных работ (СРМ)-24.12.2019 

подписание итогового Акта приемки выполненных работ- 25.03.2020 года В  соответствии с п.п. 19.1-19.2 Контракта,  

19.1.- Контракт вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания  Сторонами и действует до 30.11.2020  

19.2. - В случае если Сторонами не исполнены свои обязательства по Контракту  до окончания срока, установленного п. 19.1. Контракта, то Контракт продолжает  действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.  

ПП № 929 от 04.09.2019, ООО «ОЭНТ-Центр» перевело на счет ООО «Союз- СК» аванс в размере 10 000 000 руб., по Контракту   № 1920187375632554164000000/1907-17-СМР(СУБ)/6799 от 26.08.2019 на зав.раб по  стр. инжер.обесп.объект в/г 120 в/ч 01355 (шифр 156/21 )в/г 85/2 в/ч 28337 (шифр  156/690) 5-ти жил.дом(шифр156/68) т.ч НДС.  

ПП № 1096 от 07.10.2019, ООО «ОЭНТ-Центр» перевело на счет ООО «Союз- СК» аванс на выполнение СМР по Контракту № 1920187375632554164000000/1907-17- СМР (СУБ)/6799 от 26.08.2019г счет 301 от 04.10.2019.Сумма 54506690-75, в т.ч.  НДС(20%) 9084448-46 руб.  

ПП № 1449 от 20.12.2019 года, ООО «ОЭНТ-Центр» перевело на счет ООО  «Союз-СК» аванс: на выполнение СМР по Контракту №  1920187375632554164000000/1907-17-СМР (СУБ)/6799 от 26.08.2019г. Сумма  126350000-00 руб., в т.ч. НДС(20%) 21058333-33  

ПП № 181 от 26.14.2021 года, ООО «ОЭНТ-Центр» перевело на р/счет ООО  «Союз-СК» аванс по Контракту № 1920187375632554164000000/1907-17-СМР  (СУБ)/6799 от 26.08.2019г. за строительно-монтаж-ше работы Сумма 11786674-00, в  т.ч. НДС(20%) 1964445-67  

Расчет: 10 000 000+54 506 690.75+126 350 000+11786674 = 202 643 364.75 руб. - всего авансировано Генподрядчиком ООО «ОЭНТ-Центр» по Контракту.  

Субподрядчиком за период с 26.08.2020 по 18.08.2021 года выполнены и  приняты Генподрядчиком работы на сумму 71 906 508.48 руб., что подтверждается:  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3) от 21.10.2020 за период с 26.08.2019 по 22.10.2020 на сумму 25 696  999.66 руб.  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3) от 27.11.2020 за период с 23.10.2020 по 27.11.2020 на сумму 3 651  584.35 руб.  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3)от 01.12.2020 за период с 28.11.2020 по 01.12.2020 на сумму 6 049 015.43  руб.  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3) от 21.12.2020 за период с 02.12.2020 по 21.12.2020 на сумму 4 931  534.86 руб.  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3) от 18.08.2021 года за период с 04.03.2021 по 15.02.2021 на сумму 1 838  581.33 руб.  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3) от 03.03.2021 за период с 22.12.2020 по 03.03.2021 на сумму 4 307  240.48 руб.  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3) от 09.07.2021 года за период с 16.06.2021 по 09.07.2021 на сумму 6 671  537.62 руб.  

Актом приема работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-2,3) от 18.08.2021 года за период с 10.072021 по 18.08.2021 на сумму 18 760  015.08 руб.  

Расчет 25 696 999.66+6 049 015.43 +4 931 534.86 +3 651 584.35+4 307 240.48 + 6  671 537.62 + 1 838 581.33+18 760 015.08 = 71*906 508.48 руб. - принятые заказчиком  работы и затраты в счет отработки субподрядчиком аванса.  

Субподрядчиком, с 19.08.2021 по 04.10.2021 года выполнены работы, что  подтверждается следующими односторонними закрывающими документами на общую  сумму 3 914 556.06 руб.  

Сводным Актом выполненных работ от 04.10.2021 года (КС-2)  Сводным реестром Актов выполненных работ от 04.10.2021 года (КС-2)  

Справкой о стоимости выполненных работ от 04.10.2021 года (КС-3)  Счетом-фактурой № 103 от 04.10.2021 года  

Субподрядчиком, с 05.10.2021 но 20.12.2021 года выполнены работы, что  подтверждается следующими односторонними закрывающими документами на общую  сумму 126 873 425.12 руб.  

Сводным Актом выполненных работ от 20.12.2021 года (КС-2)  Сводным реестром Актов выполненных работ от 20.12.2021 года (КС-2)  

Сводной Справкой о стоимости выполненных работ от 20.12.2021 года (КС-3) 

Расчет: 3 914 556.06+126 873 425.12= 130 787 981 руб.- сумма выполненных, но  не подписанных (принятых) Генподрядчиком работ  

Во исполнении п. 4.5 Контракта, в адрес Генподрядчика, Ценными бандеролями  от 24.12.2021 года с Описями вложений, направлены закрывающие документы + ( 2  DVD диска с документами в электронном виде) по выполненным работам на сумму 3  914 556.06 руб. и 126 873 425.12 руб. на утверждение.  

Согласно Отчетам с сайта Почта России, обе ценные бандероли получены  ответчиком 27.12.2021 года, вторых экземпляров закрывающих документов с  подписями о принятии выполненных работ, как и возражений об их не принятии в  адрес ООО «Союз-СК» не поступило.  

24.12.2021 года, в адрес ответчика направлено Требование о предоставлении  второго экз. закрывающих документов, полученных ответчиком, однако последнее так  же было проигнорировано.  

Общий расчет выполненных работ с учетом подписанных закрывающих  документов 3 914 556.06+126 873 425.12_+ 71 906 508.48= 202 694 489 руб.  

Авансировано Генподрядчиком на общую сумму 202 643 364.75 руб., выполнено  Субподрядчиком работ на общую сумму 202 694 489 руб.  

Расчет: 202 694 489 - 202 643 364 = 51 125 руб. - сумма, превышающая  авансирование ответчиком.  

Согласно ч. 1 ст. 325 ГК РФ - залог прекращается обеспеченного залогом  обязательства.  

С учетом положений п. 3.1 Договора залога от 03.10.2019 года, заключенного в  счет обеспечения исполнения Субподрядчиком Основного договора от 26.08.2019 года  - размер обеспеченного залогом требования составляет фактическую сумму,  перечисленную в рамках Основного Договора на счет Субподрядчика.  

Субподрядчик выполнил работы сверх авансированного платежа (202 643 364.75  руб.) на сумму 51 125 руб.  

Ответчик игнорирует как принятие работ, так и письменные требования. 

С учетом существа предмета Договора Залога от 03.10.2019 года, последний  подлежит прекращению.  

Вместе с тем статья 12 ГК РФ содержит открытый перечень способов защиты  нарушенных гражданских прав.  

Между тем, законодательством РФ не предусмотрен такой способ защиты как  признание договора прекращенным, обязательства прекратившимся.  

С учетом установленных обстоятельств по спору, в условиях сформулированного  предмета исковых требований, при указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу  о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты права, что является  самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований.  

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства о продлении срока отказать. Встречное исковое  

заявление возвратить. В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  

течение месяца с даты его принятия. 

Судья: А.В. Мищенко