АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

      Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-6983/2022 

Дата принятия решения – 04 мая 2022 года 

Дата объявления резолютивной части – 25 апреля 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Закировой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Аквалэнд Плюс", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Мин-Строй", г. Казань; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 834 696 руб. 17 коп. долга, 

с участием:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 15.03.2022г.;

от ответчика – не явился, извещен,   

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "Аквалэнд Плюс", г. Казань (далее - истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Мин-Строй", г. Казань (далее - ответчик) о взыскании  1 834 696 руб. 17 коп. долга.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, представил копии платежных поручений и отчеты об отслеживании, которые приобщены к материалам дела. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещён согласно ст. 123 АПК РФ, возражений не представил, иск не оспорил. 

В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Возражений о рассмотрении дела по существу от   сторон  не поступило.

С согласия истца, при отсутствии возражений ответчика, суд в соответствии с  ч. 4 ст. 137 АПК РФ и п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда №65 от 20.12.2006г., завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела по существу.  

Суд, руководствуясь п.  3 ст. 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело без участия ответчика.

Исследовав материалы дела, суд находит правовые основания для удовлетворения исковых требований, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что от 26.11.2020г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор №1/П02-03, согласно которого подрядчик обязуется по заданию заказчика, собственными силами, с использованием собственных материалов выполнить отделочные работ в осях 1-4/А-Д Объекта: «Реконструкция  нежилых помещений  №1018, №102.1 под строительство административно-производственного здания №5130», расположенном по адресу: РТ, 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 16:50:200106:862 (далее по тексту - Объект). 

Работы производятся   согласно   проектной   документации   стадии   Р   08.20-АР,   08.20-АС, выполненной ООО «Аликорн Проект».

Результатом исполнения Работ по настоящему договору является готовая чистовая отделка Объекта в осях I -4/А-Д (п.1.2 договора).

Стоимость Работ по договору, их объем определены в Калькуляции договорной стоимости работ (Приложение №1). Приложения согласовываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (п.1.3 договора).

Срок выполнения работ по настоящему Договору установлен в Графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и определен следующим образом: со 27.11,2020г. по 31.12.2020г. (п.1.4 договора).

Стоимость Работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору установлена сторонами в Калькуляции договорной стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 6 167 400 (шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч четыреста) рубля копеек; в том числе НДС 20% 1 027 900 рубля 00 копеек (п. 3.1 договора).

Оплата производится в следующем порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере Один миллион (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% (п. 3.2.1 договора).

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора, но не позднее 15.12.2020 г., заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% (п. 3.2.2 договора).

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов КС-2 и КС-3, передачи всей необходимой исполнительной документации, актов лабораторных исследований, актов скрытых работ и журналов производства работ. Заказчик перечисляет на расчетный счет окончательный платеж в размере 5 550 660 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%, за минусом суммы гарантийного удержания, предусмотренной п. 3.9, Договора (п. 3.2.3 договора).

Из суммы окончательного расчета, предусмотренной п. 3.2.3. Договора, причитающейся

подрядчику, заказчик удерживает 10 % (десять процентов), что составляет 616 740 рублей 00 копеек, в том числе ДС-20%, в виде гаранта итого удержания на период 60 (шестьдесят) календарных дней после подписания актов КС-2 и КС-3 (п. 3.9 договора).

Далее, между сторонами были заключены Дополнительные соглашения №1, №2, №3 от 30.12.2020г.

Общая стоимость работ составила 7 409 005 рублей 17 коп.: 

1) 2 175 810 рублей 49 коп. – акт от 31.12.2020 № 1 (выполнение работ, определенных дополнительным соглашением от 30.12.2020 № 1).

2) 2 612 561 рубль 58 коп. – акт от 31.12.2020 № 1 (выполнение работ, определенных дополнительным соглашением от 30.12.2020 № 1).

 3) 2 620 633 рубля 10 коп. – акт от 31.12.2020 № 1 (выполнение работ, определенных дополнительным соглашением от 30.12.2020 № 3).

10.02.2021г. между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) был заключен договор №4/П02-03/М, согласно которого исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать заказчику услуги по генеральной уборке помещений в осях 1-4/А-Д Объекта: «Реконструкция нежилых помещений №1018» №1021 под строительство административно-производственного здания №5130», расположенного по адресу: РТ, 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 16:50:200106:862 (далее по тексту - Объект), а именно:

1. Освободить от упаковки радиаторы отопления. Убрать скотч со стен, дверных проемов, а также убрать с дверей целлофан и прочие защитные средства.

2. Выполнить смет пыли и уборку мусора на площади 2300 кв.м. во входных группах, в коридорах и помещениях на 5ти этажах и в венткамере, в том числе со всех горизонтальных поверхностей (пожарных шкафов, электрических шкафов, трубопроводов, стен, светильников и прочего оборудования)

3. Выполнить помывку стен, радиаторов отопления, поручней, шкафов, подоконников, дверей, секционных ворот, откосов, окон, пожарных трубопроводов, светильников и прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей внутри помещений с применением чистящих и моющих веществ

4. Произвести уборку с/у и КУИ на всех этажах здания с применением чистящих средств для керамических и металлических поверхностей для помывки плитки, раковин, унитазов и поддонов.

5. Выполнить помывку пола и плинтусов в коридорах и помещениях 5ти этажей и в венткамере, в том числе лестничных маршей общей площадью 2300 кв.м, Убрать с поверхности пола масляные следы, следы от разлитой краски и прочих строительных смесей.

Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги согласно условиям Договора. 

Срок оказания услуг по настоящему договору определен следующим образом: дата начала- 10 февраля 2021 г. дата окончания - 18 февраля 2021 г. (п.2.1 договора).

Общая стоимость услуг установлена Сторонами в Калькуляции (Приложение №1) и составляет 172 500 руб., в том числе НДС 20% 28 750 рублей 00 копеек. Стоимость услуг является твердой, включает в себя все затраты исполнителя на исполнение настоящего Договора (п.3.1 договора).

Оплата производится в следующем порядке: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг заказчик на основании счета исполнителя перечисляет на расчетный счет исполнителя платеж в размере 172 500 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% (п.3.2.1 договора).

В соответствии с договором от 10.02.2021 № 4/П02-03/М (приложения 11, 12) истец оказал услуги по генеральной уборке на Объекте. Результат исполнения принят в установленном порядке. Стоимость услуг составила 172 500 рублей.

Какие-либо замечания, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчика и исполнителя, от Ответчика по результатам приемки работ и услуг не поступили. 

Общая стоимость работ и услуг, выполненных (оказанных) по договорам от 26.11.2020 и от 10.02.2021, составила 7 581 505 руб. 17 коп. 

Ответчик оплату произвел частично в размере 5 746 809 руб.

Таким образом, задолженность по оплате за выполненные работы составила 1 834 696 руб. 17 коп.

Претензия от 22.02.2022г., направленная истцом в адрес ответчика с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, оставлена последним без удовлетворения, что в свою очередь послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

В соответствии со ст.307, 309 ГК РФ стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, исходя из требований закона и условий обязательства.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства отсутствия задолженности перед истцом, либо наличия ее в ином размере.

          Согласно ч. 1 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

          В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая, что задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально, в том числе актами о приемке выполненных работ, подписанными сторонами, требование истца о взыскании 1 834 696 рублей. 17 коп. долга, в силу ст. ст. ч.1 ст. 702 ГК РФ  является правомерным и подлежит удовлетворению судом. 

Расходы по уплате госпошлины согласно  ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мин-Строй", г. Казань; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Аквалэнд Плюс", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 834 696 рублей. 17 коп. долга и 31 347 руб. госпошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

Председательствующий судьяЮ.Н. Галеева