Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-8948/24

03 июля 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «ДорСтройСистем» к  ООО «ВаилдФрост» о взыскании неустойки,  

при участии в заседании лиц, согласно протоколу, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО «ВаилдФрост» в пользу ООО «ДорСтройСистем» неустойку за  нарушение срока выполнения работ за период с 01.12.2023 по 11.01.2024 в размере  2 021 734, 04 руб., неустойку в размере 0, 2 % от цены договора за каждый день  просрочки начиная с 12.01.2024 по день подписания сторонами Актов о приемке  выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости вполненных работ и затрат (КС-3),  расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 109 руб.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в  полном объеме).  

Судья Т.Ю. Цыганкова