АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-5142/2024 02 сентября 2025 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1.Исковые требования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Лесимпорт-В.Н.» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично. 2.Обязать общество с ограниченной ответственностью «Лесимпорт-В.Н.» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.11.2025 выполнить работы по договору аренды лесного участка от 20.03.2012 № 341 по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Советского участкового лесничества Новгородского лесничества Новгородской области в объеме:  

 за 2024 год: прочистка минерализованных полос - 3 км, устройство минерализованных полос - 1 км, установка аншлагов - 5 штук; за 2023 год: 

 подготовка почвы под лесные культуры – 50 га в кварталах № 15, 35, 44, 74 Советского участкового лесничества,  

 дополнение лесных культур - 50,1 га в кварталах № 24, 64, 66, 74, 75, 76, 77 Советского участкового лесничества,  

 агротехнический уход за лесными культурами - 56 га в кварталах № 7, 29, 65, 75, 76 Советского участкового лесничества,  

 содействие естественному возобновлению - 80 га в кварталах № 26, 29, 35, 36, 38, 66, 71, 76, 218 Советского участкового лесничества,  

 рубки ухода в молодняках, осветление - 43,8 га в кварталах № 2, 29, 35, 65, 75, 76 Советского участкового лесничества,  

 прочистка - 10.6 га в кварталах № 22, 60 Советского участкового лесничества, 

 лесоводственный уход - 14.3 га в кварталах № 24, 64, 75, 77 Советского участкового лесничества,  

 посадка лесных культур открытой корневой системой - 1 га, посадка лесных культур закрытой корневой системой - 2 га, прочистка минерализованных полос - 3 км,  

 устройство минерализованных полос - 1 км, установка аншлагов - 5 штук; 

 за 2022 год:  

 прочистка минерализованных полос - 3 км, устройство минерализованных полос - 1 км, установка аншлагов - 5 штук, установка квартальных столбов - 28 штук, лесопатологическое обследование - 25 га, изготовление гнездовий - 15 штук; за 2021 год: лесопатологическое обследование - 25 га, изготовление гнездовий - 15 штук. 

3.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лесимпорт-В.Н.»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) неустойку в общей сумме 2 292 556,29 руб. за нарушение условий договора аренды лесного участка от 20.03.2012 № 341.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

4.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лесимпорт-В.Н.»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 125 027 руб.  

5.Исполнительный лист по пункту 2 решения выдать после вступления настоящего решения в законную силу по письменному заявлению взыскателя, по пункту 3 решения выдать после вступления настоящего решения в законную силу, по пункту 4 - по истечении 10 дней со дня вступления настоящего решения в законную силу.  

6.Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Л.А. Максимова