АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

 

15 августа 2018 года                                                            Дело № А65-17284/2018 

 

Дата принятия решения –  15 августа 2018 года.

Дата объявления резолютивной части –  08 августа 2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хисамовой Г.Р., 

при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Карпухиной Ю.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А65-17284/2018 

по иску Акционерного общества "Татэлектромонтаж" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Акционерному обществу "КЗСК-Силикон" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 6 986 654,45 руб. 

с привлечением в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, конкурсного управляющего АО "КЗСК-Силикон" ФИО1, 

 

с участием в заседании:

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 11.05.2018

от ответчика – не явился, извещен

от третьего лица – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Татэлектромонтаж" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Акционерному обществу "КЗСК-Силикон" (далее – ответчик) о взыскании 6 986 654,45 руб. 

Определением от 07.06.2018 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен конкурсный управляющий АО "КЗСК-Силикон" ФИО1.

Ответчик и третье лицо, явку своих представителей в судебное заседание, назначенное на 08.08.2018, не обеспечили.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьего лица в порядке норм частей 1, 4 статьи 123 и части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, арбитражный суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению исходя из следующего. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.01.2018 по делу                № А65-1813/2017 Акционерное общество "КЗСК-Силикон" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Исковые требования мотивированы тем, что в рамках дела № А65-1813/2017 определениями от 10.04.2018 и 10.05.2018 были частично удовлетворены требования                            АО "Татэлектромонтаж" о включении в реестр требований кредиторов должника, в оставшейся части производство по заявлению прекращено, сумма в размере 6 986 654,45 руб. признана текущими платежами.

Как следует из материалов дела, между истцом (генподрядчик) и ответчиком (заказчик) 27.06.2016 был заключен договор № 77 (от заказчика после подписания договор вернулся от 30.12.2016 № 130) согласно условиям которого генподрядчик обязался по заданию заказчика выполнить на свой риск работы по достройке "Операторной производств мономеров и хлористого метила тит.1/7, распределительной трансформаторной РТП-1с тит.7" объекта "Строительство отдельного промышленного производства метилхлорсиланов" ОАО "КЗСК-Силикон" г. Казань, Республика Татарстан", в соответствии с пунктом 2.1. которого генподрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на свой риск работы по достройке "Операторной производств мономеров и хлористого метила тит.1/7, распределительной трансформаторной РТП-1с тит.7" г.Казань Республика Татарстан (далее по тексту – объект) в соответствии с техническим заданием к договору (Приложение № 1 к контракту), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.

Согласно пункту 4.5. договора оплата по настоящему договору осуществляется заказчиком поэтапно ежемесячно по факту выполнения работ, в течение тридцати банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих сторон соответствующего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета, счета-фактуры, выставленных Генподрядчиком, за вычетом 11,5%, от стоимости, указанной в формах КС-3, и в случае, предусмотренном пунктом 4.3. настоящего Контракта, части суммы аванса в соответствии с графиком погашения аванса.

За период выполнения работ с 27.06.2016 по 31.08.2016 генподрядчиком были предъявлены, а заказчиком приняты и подписаны по форме № КС-2 и КС-3 акты на выполненные работы на общую сумму 4 291 284,76 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2018 по делу № А65-1813/2017 указанная сумма включена в реестр требований кредиторов должника.

При этом, указанным определением установлено, что письмом № 227/06 от 21.06.2017 истцом были предъявлены к приемке акты выполненных работ от 31.03.2017 № 10, от 31.03.2017 № 11, от 31.03.2017 № 12 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.03.2017 на общую сумму 681 580,98 руб.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств, задолженность на дату предъявления иска в рамках договора от 27.06.2016 № 77 (от заказчика после подписания договор вернулся от 30.12.2016 № 130),  составила в общей сумме  681 580,98 руб.

30.03.2016 между АО "КЗСК-Силикон" (заказчик, должник) и АО "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (генподрядчик, заявитель) был заключен договор № 54 на выполнение работ по достройке "Энергоблока в составе с холодильной станцией, компрессорной сжатого воздуха, азотной станцией, ТП-2с" объекта "Строительство отдельного промышленного производства метилхлорсиланов", в соответствии с пунктом 2.1. которого генподрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на свой риск работы по достройке "Энергоблока в составе с холодильной станцией, компрессорной сжатого воздуха, азотной станцией, ТП-2с" г.Казань, Республика Татарстан (объект) в соответствии с техническим заданием к договору (приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Согласно пунктами 3.4.2. и 4.5. договора оплата по настоящему договору осуществляется заказчиком (должником) поэтапно ежемесячно по факту выполнения работ, в течение тридцати банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих сторон соответствующего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета, счета-фактуры, выставленных генподрядчиком, за вычетом 5%, от стоимости, указанной в формах КС-2, и в случае, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, части суммы аванса в соответствии с графиком погашения аванса.

За период выполнения работ с 31.03.2016 по 30.04.2016 истцом (генподрядчик) были предъявлены, а ответчиком (заказчик) приняты и подписаны формы № КС-2 и КС-3 на выполненные работы на общую сумму 17 897 828,18 руб.

Оплаты за выполненные работы составила 7 851 882,07 руб. (взаимозачет между сторонами от 01.12.2016).

За период выполнения работ с 01.12.2016 по 30.12.2016 истцом (генподрядчик) были предъявлены, а заказчиком (ответчик) приняты формы № КС-2 и КС-3 за выполненные работы на общую сумму 3 754 529,90 руб. (письмо исх. № 45-СДО от 11.01.2017, зарегистрировано АО "КЗСК-Силикон" за вх. № 013 от 11.01.2017).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.04.2017 по делу № А65-2389/2017 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана сумма задолженности в размере 12 717 858,11 руб., 200 000 руб. неустойки и 75 339 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В рамках рассматриваемого дел, истцом предъявлены требования по односторонним актам по форме КС-2 и КС-3 которые были предъявлены истцом ответчику на общую сумму 1 042 197,95 руб. (письма от 21.06.2017 исх. № 227 (получено ответчиком 21.06.2017                      вх. № 521) и от 23.11.2017 исх. № 98/СДО (получено ответчиком от 24.11.2017 вх. № 867)).

В соответствии с пунктом 4.9. договора заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Ответчиком акты не подписаны, в адрес истца не возвращены. Мотивированные возражения об отказе от подписания не заявлены. Оплата за выполненные работы не произведена.

Кроме того, между АО "КЗСК-Силикон" (заказчик, должник) и АО "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (генподрядчик, заявитель) 26.02.2015 был заключен государственный контракт № 031 на выполнение работ по строительству "Отделения хлористого метила и гидролизата ДМДХС тит. 2/1" объекта "Строительство отдельного промышленного производства метилхлорсиланов" ОАО "КЗСК-Силикон" г.Казань, Республика Татарстан" (далее по тексту – контракт), в соответствии с пунктом 2.1. которого генподрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на свой риск работы по строительству "Отделения хлористого метила и гидролизата ДМДХС тит. 2/1" объекта "Строительство отдельного промышленного производства метилхлорсиланов" ОАО "КЗСК-Силикон" г.Казань, Республика Татарстан (объект) в соответствии с техническим заданием к контракту (Приложение № 1 к контракту), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Согласно   пунктам 3.5.2.   и   4.5.   контракта  оплата   по   настоящему   контракту осуществляется заказчиком (должником) поэтапно ежемесячно по факту выполнения работ, в течение двадцати банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих сторон соответствующего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КОЗ), на основании счета, счета-фактуры, выставленных генподрядчиком (заявителем), за вычетом 11,5%, от стоимости, указанной в формах КС-2, и в случае, предусмотренном пунктом 4.3. настоящего контракта, части суммы аванса в соответствии с графиком погашения аванса. 

В период выполнения работ с 31.03.2015 по 30.09.2016 истцом (генподрядчиком) были предъявлены, а ответчиком (заказчиком) приняты и подписаны формы № КС-2 и КС-3 на выполненные работы на общую сумму 155 650 348,39 руб. Оплата за выполненные работы составила 87 904 572,18 руб. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.06.2017 по делу № А65-2386/2017, исковые требования удовлетворены, с должника в пользу кредитора взыскана сумма задолженности в размере  56 031 043,69 руб., в том числе 49 845 986,12  руб. основного долга, 6 185 057,57 руб. пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ за период просрочки в оплате с 08.02.2016 по 17.04.2017, а также 200 000 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Истцом предъявлены требования по актам по форме КС-2 и КС-3 за выполненные работы, которые были предъявлены заявителем должнику на общую сумму 596 724,82 руб. (письма за исх. № 227 от 21.06.2017 (получено должником от 21.06.2017 вх. № 521) и от 23.11.2017 исх. № 98/СДО (получено должником от 24.11.2017 вх. № 867)).

В соответствии с пунктом 4.9. договора заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Ответчиком акты не подписаны, в адрес истца не возвращены. Мотивированные возражения об отказе от подписания не заявлены. Оплата за выполненные работы не произведена.

В связи с отсутствием оплаты, истец обратился в суд.

Определением  Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2018 по делу № А65-1813/2017 производство по делу о включении в реестр требований кредиторов должника в сумме 1 638 922,77 руб. прекращено, поскольку требования являются текущими.

30.04.2015 между истцом (генеральный подрядчик) и ответчиком (государственный заказчик) заключен государственный контракт № 074 согласно условиям которого ответчик поручил, а истец принял на себя обязательства выполнить работы по строительству "Технологической эстакады" объекта "Строительство отдельного промышленного производства метилхлорсиланов" ОАО "КЗСК-Силикон" г. Казань, Республика Татарстан в соответствии с техническим заданием и выданной государственным заказчиком рабочей документацией. 

Согласно пункту 4.1 контракта общая стоимость подлежащих выполнению работ по контракту составила 326 900 185 руб. 

Оплата должна производиться государственным заказчиком поэтапно ежемесячными платежами по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих сторон соответствующего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании счета, выставленного генеральным подрядчиком, за вычетом 11,5% от стоимости, указанной в формах КС-2 (пункт 4.5.). 

Окончательный расчет по удержанным 11,5% от цены выполненных работ заказчик обязался произвести после приемки законченного строительством объекта. 

В подтверждение выполнения работ по государственному контракту истцом представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 за период с 31.05.2015 по 30.09.2016 на общую сумму 234 999 735,07 руб.

Ответчик частично оплатил выполненные работы в сумме 180 008 068, 02 руб. Сумма непогашенного долга за вычетом 11,5% удержания составила 27 966 697,52 руб. 09.01.2017 в адрес ответчика направлена претензия с требованием выплатить сумму долга. 

Неисполнение ответчиком требований истца в добровольном порядке явилось основанием для обращения в суд с иском.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.06.2017 по делу № А65- 2383/2017 принят отказ акционерного общества "Татэлектромонтаж" от требований в части взыскания неустойки по дату фактической оплаты суммы долга, производство в данной части прекращено. Исковые требования удовлетворены частично. С акционерного общества "КЗСК-Силикон" в пользу Акционерного общества "Татэлектромонтаж" взыскана сумма долга в размере 27 966 697 руб. 52 коп., неустойка в размере 1 000 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 178 581 руб. В остальной части отказано. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 сентября 2017 года, решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.06.2017 по делу № А65- 2383/2017 оставлено без изменений.

В рамках указанного договора от 30.04.2015 № 074, кредитором также предъявлены к оплате работы на сумму 4 666 150,70 руб. за период с 31.03.2017  по 14.06.2017. Письмом от 21.06.2017 № 227 кредитор направил ответчику акты по форме КС-2 и КС-3.

В связи с отсутствием оплаты за выполненные работы, истец в рамках дела № А65 -1813/2017 обратился в суд с требованием. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.05.2018 по делу № А65-1813/2017 производство по делу о включении в реестр требований кредиторов должника в сумме 4 666 150,70 руб. прекращено, поскольку требования являются текущими.

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) в установленный срок определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В порядке, предусмотренном статьями 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и договорами, выполненные истцом работы по договорам были приняты ответчиком, что подтверждается материалами дела. Мотивированных возражений со стороны ответчика не последовало. 

В соответствии с пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На момент рассмотрения настоящего дела на стороне ответчика имела место быть задолженность в общей сумме 6 986 580,98 руб. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что выполнение обязательств истцом подтверждается материалами дела и ответчиком доказательств оплаты задолженности не представлено, требование истца о взыскании долга на сумму 6 986 654,45 руб. правомерно и подлежит удовлетворению.

При этом арбитражный суд учитывает, что за период с момента заключения договора до обращения истца с настоящим иском в суд, от ответчика каких-либо возражений в ходе исполнения договора относительно невозможности осуществления окончательного расчета не заявлялось, в том числе по причине невыполнения всех работ, предусмотренных договором, либо не предоставления какого-либо документа, необходимого для произведения окончательного расчета, доказательств обратного в материалы дела в нарушении положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Акционерного общества "КЗСК-Силикон" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Татэлектромонтаж" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 986 654 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 45 копеек задолженности и 57 933 (пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

 

Судья                                                                                                   Г.Р. Хисамова