АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-68527/2022-52-486

г. Москва

27 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2023 года.  Решение в полном объеме изготовлено 27 апреля 2023 года.  

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

акционерного общества «ПОДОЛЬСКИЕ ОГНЕУПОРЫ» (108851, ГОРОД  МОСКВА, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.12.2008, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: публичному акционерному обществу «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ  РЕГИОН» (115114, 

<

...>, СТР 2,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: 

<

***>)  

об обязании исполнить обязательства по договору № ИА-19-354-29(994096) об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 2  месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; о взыскании неустойки в  размере 1 793 106,97 руб. за период с 13.11.2021 по 16.11.2022, далее с 17.11.2022 до  момента фактического исполнения обязательства,  

при участии: 

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. № 012/23 от 09.01.2023),  от ответчика – ФИО3 (паспорт, диплом, дов. от 10.10.2022 г.), ФИО4  

(паспорт, дов. от 28.12.2022). 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «ПОДОЛЬСКИЕ ОГНЕУПОРЫ» (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к публичному  акционерному обществу «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (далее – ответчик) об  обязании исполнить обязательства по договору № ИА-19-354-29(994096) об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 2  месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; о взыскании неустойки в  размере 1 793 106,97 руб. за период с 13.11.2021 по 16.11.2022, далее с 17.11.2022 до  

момента фактического исполнения обязательства (с учетом принятых судом уточнений  в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Истец заявленные требования поддержал. Ответчик по исковым требованиям возражал. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие  обстоятельства.  

АО «Подольские огнеупоры» действующее промышленное предприятие,  расположенное по адресу 

<

...> и  созданное методом выделения из ОАО «Подольскогнеупор». После выделения в 2009  году АО «Подольские огнеупоры» (на тот момент ЗАО «Подольские огнеупоры»), как  самостоятельное юридическое лицо, заключило Договор на энергоснабжение с АО  «Мосэнергосбыт» № 11006910 от 01.10.2009. В данном договоре были указаны данные  трансформаторов, установленных и действующих на тот момент.  

АО «Подольские огнеупоры» 30.05.2019 обратилось в адрес ПАО «Московская  объединённая электросетевая компания» с письмом Исх. № 02-08/130 о приведении в  соответствие единовременной мощности к имеющейся и указанной в договоре  энергоснабжения трансформаторной мощности. Для этого необходимо было на  действующем технологическом присоединении увеличить единовременную мощность  с показателя 3062,4 кВт до показателя 5845,4 кВт, что соответствует полной  трансформаторной мощности действующих на АО «Подольские огнеупоры»  трансформаторов.  

В результате рассмотрения данного письма совместно со специалистами ПАО  «Московская объединённая электросетевая компания» была подготовлена и направлена  в адрес ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» Заявка № И-19-0094096/103 от 17.07.2019.  

В ответ на полученную Заявку Сетевая организация письмом   № МОЭСК/203/3268 от 07.10.2019 направила в адрес АО «Подольские огнеупоры»  проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям. На комментарий АО «Подольские огнеупоры» о том, что у Общества уже  имеется действующее технологическое присоединение и нам его не нужно  осуществлять, а нужно лишь привести в соответствие единовременную и  трансформаторные мощности, был получен ответ, что, согласно законодательства, в  ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» не предусмотрены иные  типы договоров и, что увеличение мощности оформляется таким образом.  

В результате чего, 12.11.2019 между АО «Подольские огнеупоры» (Заявитель)  и ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (Сетевая организация)  был заключен договор № ИА-19-354-29(994096) об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям, в соответствии с условиями которого Сетевая  организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а именно трансформаторной  подстанции, расположенной по адресу: 108851, г. Москва, 

<

...>, 50:61:0010122:120, 50:61:0010201:252. В том числе Сетевая  организация принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объектов  электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство,  реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств Заявителя,  урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства  (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов энергопринимающих  устройств, с учетом следующих характеристик:  

- максимальная мощность: 2 783 кВт (доведение до 5 845,4 кВт с учетом ранее  выделенной мощности 3 062,4 кВт в соответствии с АРБП и ЭО юб/н от 09.10.2009);  

- категория надежности - II (Вторая); - класс напряжения в точках присоединения: 6 (кВ). 

В рамках вышеуказанного договора предусмотрен ряд мероприятий,  фактически выполненных и являющихся частью действующего Договора  энергоснабжения № 11006990 от 01.10.2009, заключенного между АО «Подольские  огнеупоры» и ОАО «Мосэнергосбыт».  

В частности, в тексте договора № ИА-19-354-29(994096) от 12.11.2019,  оговаривается присоединение энергопринемающих устройств.  

Как поясняет истец, фактически данное оборудование уже имеет  технологическое присоединение к электрическим сетям и работает в АО «Подольские  огнеупоры» на протяжении нескольких лет, а приведение в соответствие  единовременной мощности к установленной трансформаторной позволяет увеличить  выпуск готовой продукции и более рационально использовать имеющиеся  производственные мощности.  

Согласно п. 3.1 Договора, размер платы за технологическое присоединение  рассчитан по тарифным ставкам, утвержденным Приказом Департамента  экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2018 № 306-ТР и  составляет 1 943 747,39 руб., в том числе НДС (20%) 323 957,90 руб. Стоимость  подготовки и выдачи сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)  составляет: 583 127,56 руб. с НДС и включена в состав платы за технологическое  присоединение в соответствии с тарифным решением уполномоченного органа  исполнительной власти в области регулирования тарифов. С возникновением  изменений законодательства РФ, связанных с введением/ исключением или  повышением/понижением сборов, налогов, либо иных платежей, взымаемых в пользу  государственных органов. Стороны осуществляют соответствующее  повышение/понижение размера платы по Договору в порядке, предусмотренном п.п.  2.1.10 и 2.3.19 договора.  

АО «Подольские огнеупоры» 26.11.2019 в соответствии с п.3.1.1. Договора  произвело оплату в размере 1 943 747,39 руб., что подтверждается платежным  поручением № 2565 от 26.11.2019.  

В соответствии с п. 1.2. Договора, перечень мероприятий по технологическому  присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению  определены в Технических условиях.  

Срок действия Технических условий составляет 2 года со дня заключения  настоящего Договора, (п. 1.3. Договора).  

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 к Договору, ПАО «МОЭСК»  необходимо выполнить комплекс работ по реконструкции яч. № 20 (фид.6) в РУ-6 кВ  ПС № 617 110/10/6 кВ Сырово (ПС 110кВ Сырово) с заменой 3 существующих  трансформаторов тока номиналом 300/5 на трансформаторы тока номиналом 400/5.  

В соответствии с пунктом 10.2.2. приложения № 1 к Договору, ПАО «МОЭСК»  необходимо выполнить комплекс работ по пуско-наладке в яч. № 19 (фид.13), яч. № 20  (фид. 6) в РУ-6 кВ ПС № 617 110/10/6 кВ Сырово (ПС 110кВ Сырово).  

В соответствии с пунктом 10.3. приложения № 1 к Договору, ПАО «МОЭСК»  необходимо предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в  реализации управляющих воздействий ПА (АЧР).  

В соответствии с пунктом 10.4. приложения № 1 к Договору, ПАО «МОЭСК»  необходимо до ввода объектов в работу, провести проверку выполнения технических  условий (этапов технических условий), подписываемый ПАО «МОЭСК» и Заявителем.  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по  настоящему Договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет 2 года с  даты заключения Договора, (п. 1.4. Договора).  

По окончании осуществления мероприятий по технологическому  присоединению (этапа при поэтапном вводе) Стороны составляют Акт об  осуществлении технологического присоединения по форме, указанный в приложения 2  

к настоящему Договору, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони  (при необходимости) - п. 1.6. Договора.  

 Договор был заключен 12.11.2019 соответственно мероприятия по  технологическому присоединению по настоящему Договору должны были быть  выполнены в срок до 12.11.2021.  

Согласно разделу 2 Договора, п.2.1. Сетевая организация обязуется:  

- надлежащим образом и своевременно исполнять обязательства по  настоящему ДГТПТГГУ при условии надлежащего исполнения Заявителем своих  обязательств по Договору (п. 2.1.1. Договора);  

- в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении  заявителем ТУ принять участие в проверке выполнения Заявителем ТУ с привлечением  представителей филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (в случае если ТУ подлежали  согласованию с филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РД (п. 2.1.3.Договора).  

По мнению истца, Сетевая организация не выполнила своих обязательств,  предусмотренных Договором, в то время как, истцом были выполнены обязательства  по техническим условиям:  

- Приёмное оборудование, а так же приборы учёта и аппараты защиты,  установленное в ячейках № 9 и № 20 РУ-6 кВ ЦРП АО «Подольские огнеупоры»,  позволяют принять увеличенное количество мощности электрической энергии;  

- Коммерческий учёт электрической энергии и мощности осуществляется по  приборам учёта, установленным в ячейках РУ-6 кВ ПС № 617 «Сырово» ПАО  «МОЭСК Новая Москва», оборудованными системой АИИС КУЭ;  

- 01.07.2013, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ЗАО «РХИ Подольские  огнеупоры» был заключен Договор № 072-13070013-1-52 выполнения работ по  созданию АИИСКУЭ-ЛАИТ. В рамках работ проводимых в соответствии с  вышеуказанным договором системой АИИСКУЭ - ЛАИТ были оборудованы  следующие приборы учёта электрической энергии и мощности, установленные в РУ-6  кВ ЦРП АО «Подольские огнеупоры»: Ячейка № 9 РУ-6 кВ ЦРП, ввод с ПС № 617  «Сырово» - Ф. № 6 РУ-6кВ; Ячейка № 20 РУ-6кВ ЦРП, ввод с ПС № 617 «Сырово» - Ф.   № 13 Ру-6кВ. Также данной системой были оборудованы приборы учёта электрической  энергии и мощности, установленные в ячейках РУ-6 кВ ЦРП АО «Подольские  огнеупоры», от которых получают электроэнергию по линиям 6 кВ организации,  имеющие прямые Договора энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт»: Ячейка № 7 РУ- 6кВ ЦРП, резервное энергоснобжение ООО «Энергоресурс»; Ячейка № 22 РУ-6кВ ЦРП,  основное энергоснабжение ООО «ПК Старт-99»;  

- Электроснабжение электроприёмников 6/0,4 кВ АО «Подольские огнеупоры»  осуществляется по ранее спроектированным действующим электрическим схемам.  Разработку которых проводил «Всесоюзный Институт Огреупоров» г. Ленинград;  

- в соответствии с Договором энергоснабжения № 11006910 от 01.10.2009  приборы коммерческого учёта электрической энергии и мощности установлены на ПС   № 617 «Сырово» Ф. № 6 и Ф. № 13 РУ-6кВ;  

- Значение tg соответствует указанным в Техническим условиям на  технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Московская  объединённая электросетевая компания» энергопринемающих устройств;  

- Нагрузки, искажающей форму кривой электрического тока и вызывающие не  симметрию напряжения на АО «Подольские огнеупоры» отсутствуют;  

- Электроприёмники, относящиеся к первой категории надёжности  электроснабжения на АО «Подольские огнеупоры» - отсутствуют.  

То есть, как поясняет истец, ранее выделенная единовременная мощность  3062,4 кВт 3300 кВА не позволяет им полноценно использовать имеющееся  технологическое оборудование, в то время как, установленное и действующее  трансформаторное оборудование к увеличению мощности пригодно.  

18.02.2021 за исх. № 02-08/029 АО «Подольские огнеупоры» направило письмо  в адрес Сетевой организации с требованием выдать оригинал акта об осуществлении  технологического присоединения по договору № ИЛ-19-354-29(994096) от 12.11.2019.  

Поскольку, как указывает истец, Сетевая организация в нарушение п.2.1.3.  Договора не осуществило проверку выполнения Заявителем технических условий.  

Согласно п. 2.3.7. Договора, Заявитель обязуется в течение 5 рабочих дней со  дня получения, подписать представленный Сетевой организацией Акт о выполнении  ТУ либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую  организацию.  

Сетевая организация Акт о выполнении ТУ в адрес Заявителя не направила.  Акт о выполнении ТУ Сторонами подписан не был.  

Тем самым, Сетевая организация не выполняет условия договора и  препятствует выполнению обязательств Заявителем предусмотренных п.п. 2.3.7.-  2.3.12. Договора.  

18.11.2021 АО «Подольские огнеупоры» по электронным каналам связи и  почтовым отправлением № 10885165017585 АО «Почта России» направило в адрес  Сетевой организации претензию по договору № ИА-19-354-29(994096) об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.11.2019  за исх. № 08/233.  

19.11.2021 в адрес АО «Подольские огнеупоры» поступило письмо за исх.  203/2586 «О выполнении работ со стороны ПАО «Россети Московский регион», по  указанному письму, Заявителю требовалось отправить уведомление о завершении  производства работ, выполнение которых предусмотрено техническими условиями со  стороны АО «Подольские огнеупоры».  

По мнению истца невыполнение Заявителем со своей стороны технических  условий само по себе не освобождает сетевую организацию от выполнения  обязательств, возложенных за нее как техническими условиями, так и Постановления  Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 29.12.2021). Отсутствие уведомления от  истца об исполнении им технических условий не препятствует осуществлению  ответчиком мероприятий, предусмотренных техническими условиями к выполнению  самим ответчиком, для технологического присоединения объектов истца.  

АО «Подольские огнеупоры» повторно направило в адрес Сетевой  организации (по электронным каналам связи) письмо за исх.М02-08/242 от 30.11.2021  об исполнении условий договора и готовности подписания акта об осуществлении  технологического присоединения.  

10.02.2022 в адрес АО «Подольские огнеупоры» поступило от Сетевой  организации соглашение о расторжении договора № ПА-19-354-29(994096) об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.11.2019  и акт сдачи-приемки выполненных работ.  

АО «Подольские огнеупоры» направило в адрес Сетевой организации 

мотивированный отказ от подписания Соглашения о расторжении договора № ИА-19- 354-29(994096) об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям от 12.11.2019 за исх. № 08/032 от 17.02.2022.  

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок  урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с  настоящим иском в суд.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, оценив  представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении  требований в полном объеме.  

Между ПАО « «Россети Московский регион» и АО «Подольские огнеупоры»  заключен договор № ИА-19-354-29(994096) от 12.11.2019 об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям.  

В соответствии с п. 1.1 договора его предметом является увеличение мощности  на 2 783 кВт (доведение до 5 845,4 кВт) для электроснабжения трансформаторной  подстанции Заявителя, расположенной по адресу: Москва, 

<

...>.  

Договор технологического присоединения к электрическим сетям в  соответствии с позицией Верховного суда РФ изложенной в Определении № 305-ЭС17- 11195 от 25.12.2017 по всем своим существенным условиям соответствует договору о  возмездном оказании услуг: к правоотношениям сторон по договору технологического  присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с п. 7 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от  27.12.2004 № 861, установлена следующая процедура технологического присоединения:  

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель),  которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям,  предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;  

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренных договором;  

г) получение разрешения органа федерального государственного  энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в  эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,  объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85;  

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов  заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и  мощности;  

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с п. 18 Правил ТП, мероприятия по технологическому  присоединению, помимо прочих, включают в себя:  

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий,  включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению  энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств  сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и  сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств  релейной защиты и автоматики;  

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических  условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.  

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению  выполняются не только сетевой организацией, но и заявителем, после чего проводится  проверка выполнения заявителем технических условий, осмотр органом  исполнительной власти, и только после этого осуществляется непосредственно  технологическое присоединение.  

Соблюдение срока технологического присоединения зависит не только от  сетевой организации, но и от заявителя.  

Согласно п. 2.1.1 Договора исполнение обязательств сетевой организации  поставлено в зависимость от исполнения обязательств по Договору со стороны  Заявителя.  

Обязательства Заявителя установлены разделом 2.3 Договора и техническими  условиями.  

В соответствии с п. 2.3.1 Заявитель обязуется принять к исполнению  технические условия.  

Как указано в п. 2.3.4 Заявитель обязан своевременно осуществить разработку  проектной документации в рамках исполнения обязательств по техническим условиям  и не позднее чем за 10 рабочих дней до направления уведомления о выполнении  технических условий направить её в сетевую организацию для проверки соответствия  требования проекта техническим условиям.  

Стороны 21.09.2022 заключили дополнительное соглашение № 1 к договору об  осуществлении ТП № ИА-19-354-29(994096) от 13.11.2019, согласно которому  продлили срок действия указанного Договора, а также обязательств по  технологическому присоединению со стороны сетевой организации и Заявителя на 1  месяц с момента подписания сторонами соглашения, аннулировали предыдущие ТУ №  ИА-19-354-29(994096), приняли к исполнению ТУ № И-22-00-419137/125.  

Обязательства Заявителя по техническим условиям определены в п. 11  технических условий.  

Согласно п. 11.2 технических условий, заявитель должен разработать  проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе  Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке  приборов учета электроэнергетики, устройств релейной защиты и автоматики,  телемеханики и коммутационных аппаратов) в случае, если в соответствии с  законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной  документации является обязательной. Согласно п 11.5 технических условий Заявитель  обязан, в случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями,  указанными в п. 11.2 ТУ, принимаемые на стадии проектирования технические  решения, а также сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с  филиалом ПАО «Россети Московский Регион» Новая Москва.  

В ходе проверки выполнения заявителем мероприятий по ТУ № И-22-00419137/125 в качестве замечаний было выявлено невыполнение указанных выше п. 11.2  (в части разработки проектной документации), а также п. 11.5 ТУ (в части согласования  проектной документации с филиалом ПАО «Россети Московский регион» Новая  Москва).  

Таким образом, мероприятия, предусмотренные ТУ № И-22-00-419137/125 от  21.09.2022 со стороны Заявителя выполнены не были. Перечень замечаний по  результатам осмотра был составлен в присутствии представителя Заявителя -  генерального директора ФИО5, и им же подписан, без каких-либо  дополнительных комментариев с его стороны. Указанный перечень был направлен по  почте в адрес Заявителя, был получен им 11.11.2022 согласно сведениям сервиса Почты  России «Отслеживание отправлений».  

Поскольку требования п. 2.3.4 Договора и п. 11.2, 11.5 технических условий  истцом не выполнены, то требование истца об обязании исполнить обязательства по  договору № ИА-19-354-29(994096) об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную  силу удовлетворению не подлежит.  

Относительно требования о взыскании неустойки. 

Срок действия технических условий к спорному договору составляет 2 года и  истек 12.11.2021.  

Стороны 21.09.2022 заключили дополнительное соглашение № 1 к договору об  осуществлении ТП № ИА-19-354-29(994096) от 13.11.2019, согласно которому  продлили срок действия указанного Договора, а также обязательств по  

технологическому присоединению со стороны сетевой организации и Заявителя на 1  месяц с момента подписания сторонами соглашения, то есть до 21.10.2022.  

Таким образом срок исполнения обязательств по договору с обеих сторон  истек 21.10.2022 и до этого момента ни одна из сторон не находилась в просрочке  исполнения обязательств, следовательно начисление неустойки за период до 21.10.2022  неправомерно.  

Истечение срока действия технических условий, как особого специального  разрешения на выполнение определенных действий, выдаваемого профессиональным  субъектом электроэнергетики непрофессиональному, препятствует заявителю  осуществлять мероприятия по технологическому присоединению, но не прекращает  договор технологического присоединения в целом, поскольку заявитель в течение  срока действия договора сохраняет право на инициацию продления срока действия  технических условий или выдачу новых технических условий, что легитимирует  потенциальное выполнение мероприятий по технологическому присоединению.  

В то же время по смыслу Правил № 861 наличие действующих технических  условий является непременным атрибутом технологического присоединения. Поэтому  предполагается, что по истечении срока действия технических условий выполнение  заявителем мероприятий по технологическому присоединению перестает быть  возможным, так как подобные действия будут являться неправомерными.  

Ввиду того, что неустойка обеспечивает возможное исполнение обязательства  должником, представляющее интерес для кредитора (определение Верховного Суда  Российской Федерации от 09.12.2014 № 305-ЭС14-3435), то предусмотренная  подпунктом «в» пункта 16 Правил № 861 и пунктом 17 договора неустойка за  нарушение заявителем сроков выполнения мероприятий по технологическому  присоединению после истечения срока действия технических условий не подлежит  взысканию.  

Продление срока действия ранее выданных технических условий,  предусмотренное пунктом 27 Правил № 861 и пунктами 7, 9 договора, является правом  сторон договора об осуществлении технологического присоединения на изменение его  условий (пункт 1 статьи 450, пункт 1 статьи 452, пункт 1 статьи 453 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

Реализация заявителем права на продление срока действия технических  условий и осуществление такого продления сетевой организацией создают  возможность для правомерного осуществления заявителем мероприятий по  технологическому присоединению.  

С учетом изложенного суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении  исковых требований.  

Поскольку в удовлетворении основных требований судом отказано, то и  акцессорные требования о взыскании процентов и неустойки удовлетворению не  подлежат.  

Судебные расходы по государственной пошлине распределяются по правилам  статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат  отнесению на истца.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 71, 123, 156, 167, 170,  176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.Е. Галиева