АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-13502/2022

07 сентября 2022 года

г. Челябинск

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», ОГРН 

<

***>, г. Москва, к обществу с ограниченной ответственностью «А-Холдинг», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, о взыскании 1 086 781 руб. 54 коп., при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО2, паспорт, доверенность от 09.10.2022.

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ОГРН 

<

***>, г. Москва (далее – истец), 27.04.2022 обратиось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «А-Холдинг», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск (далее – ответчик), о взыскании 1 086 781 руб. 54 коп., в том числе:

- задолженности по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в размере 238 124 руб. 63 коп.;

- процентов по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 776 руб. 35 коп.;

- процентов по банковской гарантии № 24710-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления НЛО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 15.02.2022 по дату полного возмещения задолженности из расчета 17% годовых от суммы задолженности в размере 238 124 руб. 63 коп.;

- неустойки по Банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 11.1. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за 14.02.2022 в размере 357 руб. 19 коп.;

- штрафа по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 11.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» в размере 50 000 руб.;

- задолженности по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в в размере 238 124 руб. 63 коп.;

- процентов по Банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 776 руб. 35 коп.;

- процентов по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 15.02.2022 г. по дату полного возмещения задолженности из расчета 17% годовых от суммы задолженности в размере 238 124 руб. 63 коп.;

- неустойки по Банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 11.1. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за 14.02.2022 в размере 357 руб. 19 коп.;

- штрафа по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в соответствии с пунктом 11.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» в размере 50 000 руб.;

- задолженности по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в размере 203 165 руб. 48 коп.;

- процентов по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 662 руб. 38 коп.;

- процентов по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 г. в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 15.02.2022 по дату полного возмещения задолженности из расчета 17% годовых от суммы задолженности в размере 203 165 руб. 48 коп.;

- неустойки по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в соответствии с пунктом 11.1. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за 14.02.2022 в размере 304 руб. 75 коп.;

- штрафа по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в соответствии с пунктом 11.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» в размере 50 000 руб.;

- задолженности по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в размере 203 165 руб. 48 коп.;

- процентов по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 08.02.2022 г. по 14.02.2022 в размере 662 руб. 38 коп.;

- процентов по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в соответствии с пунктом 10.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за период с 15.02.2022 г. по дату полного возмещения задолженности из расчета 17% годовых от суммы задолженности в размере 203 165 руб. 48 коп.;

- неустойки по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в соответствии с пунктом 11.1. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» за 14.02.2022 в размере 304 руб. 75 коп.;

- штрафа по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в соответствии с пунктом 11.4. Правил предоставления ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» в размере 50 000 руб.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.05.2021 исковое заявление принято к производству, судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 

<

***>, г. Челябинск (т. 1 л.д. 1-2).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явились, полномочных представителей не направили.

Ответчик письменного мотивированного отзыва на исковое заявление в соответствии с требованиями статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в материалы дела не представил.

Третье лицо Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области представило в материалы дела письменное мнение по делу, в котором поддержало позицию истца и просило исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (пункт 3 статьи 156 АПК РФ).

Дело рассматривается по правилам частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав доводы истца, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, 31.05.2021 между Министерством и ООО «А-Холдинг» был заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт (Челябинская область, Южноуральский городской округ, поселок Летягино)» № 53/ЭА ИКЗ 212745120833274510100100250254120414 (далее соответственно - Контракт №53/ЭА, Работы №1, Объект №1).

Согласно пункту 1.1 контракта № 53/ЭА генеральный подрядчик обязуется подготовить проектную документацию, выполнить инженерные изыскания, выполнить работы по строительству объекта №1 (в том числе поставить оборудование, предусмотренное проектной документацией), иные действия генерального подрядчика, необходимые для выполнения работ по контракту №53/ЭА и передать результат работ, определенный в пункте 1.8 контракта № 53/ЭА, государственному заказчику.

В соответствии с пунктом 1.4 контракта № 53/ЭА генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по контракту № 53/ЭА в сроки, предусмотренные контрактом № 53/ЭА в соответствии с графиком выполнения работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта №1, который является приложением № 3 к контракту № 53/ЭА (далее - график выполнения работ №1).

Пунктом 1.8 контракта №53/ЭА предусмотрено, что результатом 2 этапа выполненных работ является объект № 1, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а также государственным заказчиком подписан акт приемки выполненных работ сформированный по 2 этапу выполненных работ (далее - результат 2 этапа выполненных работ №1).

На основании пункта 2.1 контракта № 53/ЭА цена контракта № 53/ЭА составляет 7 980 706 руб. 00 коп.

В пункте 3.1 контракта № 53/ЭА стороны согласовали, что генеральный подрядчик обязуется выполнить работы № 1 по контракту № 53/ЭА в сроки предусмотренные контрактом № 53/ЭА в соответствии с графиком выполненных работ № 1.

Окончание выполнение работ - до 15.10.2021 (пункт 3.3 контракта № 53/ЭА).

Согласно графику выполнения работ № 1 срок исполнения строительных работ, в том числе поставка оборудования июнь - октябрь 2021 года.

Согласно пункту 2.1.2 контракта № 53/ЭА стоимость строительно-монтажных работ составляет 6 557 146 руб. 17 коп.

В соответствии с пунктом 2.1.3 контракта № 53/ЭА стоимость оборудования составляет 1 153 311 руб. 45 коп.

Таким образом, стоимость выполненных работ за 2 этап по контракту №53/ЭА составляет 7 710 457 руб. 62 коп.

ООО «А-Холдинг» приняло на себя обязательство по контракту № 53/ЭА выполнить работы по 2 этапу в период июнь - октябрь (с июня 2021 года до 15.10.2021).

24.08.2021 Министерство направило ООО «А-Холдинг» претензию № 9655, согласно которой указало на то, что несмотря на строго оговоренные контрактом № 53/ЭА сроки, на 05.08.2021 строительные работы генеральным подрядчиком не начаты, площадка для строительства не подготовлена, что подтверждается актом комиссионного осмотра объекта №1. 

Согласно пункту 10.9 контракта № 53/ЭА генеральный подрядчик предоставляет документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных обязательств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, либо включенная в реестр банковских гарантий безотзывная банковская гарантия в размере, который предусмотрен в пункте 10.8 Контракта №53/ЭА), до приемки результата выполненных работ по контракту №53/ЭА, в соответствии с условиями контракта №53/ЭА.

Согласно пункту 10.14 контракта № 53/ЭА, если генеральный подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом № 53/ЭА (в том числе гарантийных), государственный заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а генеральный подрядчик обязан в течение десяти дней восстановить обеспечение исполнения контракта № 53/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств).

Согласно пункту 10.15 контракта № 53/ЭА в случае если обеспечение исполнения контракта № 53/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) осуществляется в форме банковской гарантии, то при наступлении случая, на который распространяется обеспечение настоящего контракта № 53/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) государственный заказчик вправе потребовать выплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Исполнение генеральным подрядчиком обязательств по контракту № 53/ЭА обеспечено банковской гарантией № 24724-21-10 от 26.05.2021 (далее - банковская гарантия № 24724-21-10), выданной ПАО «Промсвязьбанк», которой предусмотрено что обстоятельствами, при наступлении которых должна быть выплачена сумма банковской гарантии № 24724-21-10, являются ненадлежащее выполнение или невыполнение принципалом основного обязательства.

При этом основное обязательство включает в себя все обязательства принципала перед бенефициаром по контракту № 53/ЭА, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии, в том числе обязательства по возврату аванса, гарантийные обязательства, возникающие в гарантийный период, обязательства по уплате штрафов, пеней, неустоек, убытков при условии, что соответствующие обязательства принципала предусмотрены контрактом №53/ЭА.

Банковской гарантией № 24724-21-10 предусмотрено право бенефициара в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом основного обязательства представить гаранту в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии № 24724-21-10, в размере цены контракта № 53/ЭА, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом № 53/ЭА и оплаченных бенефициаром, но не превышающих сумму банковской гарантией № 24724-21-10.

Банковская гарантия № 24724-21-10 вступает в силу с даты ее выдачи (26.05.2021) и действует по 31.01.2022 включительно.

Требование бенефициара по банковской гарантии № 24724-21-10 должно быть получено гарантом до истечения срока действия банковской гарантии № 24724-21-10.

В связи неисполнением (ненадлежащем исполнением) ООО «А-Холдинг» своих обязательств перед Министерством по контракту № 53/ЭА, Министерство обратилось в ПАО «Промсвязьбанк» с требованием от 31.01.2021 об осуществление уплаты денежной суммы по банковской гарантии № 24724-21-10.

Согласно требованию по банковской гарантии № 24724-21-10 ввиду неисполнения принципалом в срок своих обязательств по передаче государственному заказчику результата 2 этапа выполненных работ № 1, Министерство требовало в соответствии с условиями банковской гарантии № 24724-21-10 в течении пяти рабочих дней после поступления настоящего требования перечислить сумму 238 124 руб. 63 коп. на счет бенефициара, по банковским реквизитам указанным в требовании.

Во исполнение требования по банковской гарантии № 24724-21-10 ПАО «Промсвязьбанк» перечислило Министерству денежные средства в сумме 238 124 руб. 63 коп., что подтверждаетя платежным поручением № 6670 от 07.02.2022.

10.06.2021 между Министерством и ООО «А-Холдинг» заключен государственный контракт № 57/ЭА на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт (Челябинская область, Увельский муниципальный район, поселок Зеленый Лог)» ИКЗ 212745120833274510100100320324120414, на основании результатов проведения аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 0169200001121000032 от28.05.2021), (далее соответственно - контракт № 57/ЭА, объект № 2), в соответствии с которым ООО «А-Холдинг» обязуется подготовить проектную документацию, выполнить инженерные изыскания, выполнить работы по строительству объекта и сдать государственному заказчику результат выполненных работ по контракту № 57/ЭА, которым по условиям последнего абзаца пункта 1.8 контракта № 57/ЭА является объект №2, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию (далее - результат работ № 2).

10.06.2021 к контракту № 57/ЭА заключено дополнительное соглашение № 1 (далее - дополнительное соглашение № 1 к контракту № 57/ЭА), внесены изменения в раздел 2 контракта № 57/ЭА «Цена контракта, порядок финансирования и расчетов», которым перераспределены объемы финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

Согласно пунктам 1.4, 1.5 контракта № 57/ЭА генеральный подрядчик обязуется обеспечить: выполнение проектных работ по контракту № 57/ЭА в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту № 57/ЭА), выполнение строительных работ по контракту № 57/ЭА в соответствии с разработанной им в рамках контракта № 57/ЭА проектной документацией по объекту №2 (далее - проектная документация № 2); выполнение работ по контракту ведется в два этапа в сроки, предусмотренные контрактом № 57/ЭА в соответствии с графиком выполнения работ по подготовке проектной документации № 2, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт (Челябинская область, Увельский муниципальный район, поселок Зеленый Лог)», который является приложением № 3 к контракту № 57/ЭА и его неотъемлемой частью (далее - график выполнения работ № 2) и сдать государственному заказчику результат работ № 2.

В соответствии с пунктом 3.3 контракта № 57/ЭА срок окончания выполнения работ, до истечения которого государственным заказчиком должен быть получен результат работ № 2 - до 30.10.2021.

Пунктом 6.15 контракта № 57/ЭА предусмотрено, что приемка результата работ № 2 оформляется подписанием акта приемки выполненных работ при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который до 31.01.2021 не оформлен; акт приемки выполненных работ сторонами не подписан.

Согласно пункту 13.1 контракта № 57/ЭА, контракт № 57/ЭА вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту № 57/ЭА, но не позднее 31.12.2021, что не освобождает генерального подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.

Таким образом, срок окончания выполнения работ и получения Министерством результата работ № 2 до 30.10.2021.

На 31.01.2021 генеральным подрядчиком не выполнены работы, входящие во 2 этап выполнения работ по контракту № 57/ЭА, а именно строительные работы, в том числе и поставка оборудования, стоимостью 7 710 264 руб. 79 коп., срок выполнения которых графиком выполнения работ № 2 по объекту установлен с августа по октябрь 2021 года.

В нарушение срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 3.3 контракта № 57/ЭА, результат работ № 2 Министерством до 31.01.2021 не получен, тем самым генеральный подрядчик допустил просрочку исполнения обязательства по 2 этапу выполнения работ по контракту № 57/ЭА на 93 дня (с 31.10.2021 по 31.01.2022).

Согласно пункту 10.9 контракта № 57/ЭА генеральный подрядчик предоставляет документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных обязательств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, либо включенная в реестр банковских гарантий безотзывная банковская гарантия в размере, который предусмотрен в пункте 10.8 контракта № 57/ЭА), до приемки результата работ №2 по контракту № 57/ЭА, в соответствии с условиями контракта № 57/ЭА.

Согласно пункту 10.14 контракта № 57/ЭА если генеральный подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом № 57/ЭА (в том числе гарантийных), государственный заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а генеральный подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней восстановить обеспечение исполнения контракта № 57/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств).

Согласно пункту 10.15 контракта № 57/ЭА в случае если обеспечение исполнения контракта № 57/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) осуществляется в форме банковской гарантии, то при наступлении случая, на который распространяется обеспечение настоящего контракта № 57/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) государственный заказчик вправе потребовать выплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Исполнение генеральным подрядчиком обязательств по контракту №57/ЭА обеспечено Банковской гарантией № 26584-21-10 от 04.06.2021 (далее - банковская гарантия № 26584-21-10), выданной ПАО «Промсвязьбанк», которой предусмотрено что обстоятельствами, при наступлении которых должна быть выплачена сумма банковской гарантии № 26584-21-10, являются ненадлежащее выполнение или невыполнение принципалом основного обязательства.

При этом основное обязательство включает в себя все обязательства принципала перед бенефициаром по контракту № 57/ЭА, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии, в том числе обязательства по возврату аванса, гарантийные обязательства, возникающие в гарантийный период, обязательства по уплате штрафов, пеней, неустоек, убытков при условии, что соответствующие обязательства принципала предусмотрены контрактом № 57/ЭА.

Банковской гарантией № 26584-21-10 предусмотрено право бенефициара в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом основного обязательства представить гаранту в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии №26584-21-10, в размере цены контракта № 57/ЭА, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом № 57/ЭА и оплаченных Бенефициаром, но не превышающих сумму банковской гарантией №26584-21-10.

Банковская гарантия № 26584-21-10 вступает в силу с даты ее выдачи (04.06.2021) и действует по 31.01.2022 включительно.

Требование бенефициара по банковской гарантии № 26584-21-10 должно быть получено Гарантом до истечения срока действия банковской гарантии № 26584-21-10.

В связи неисполнением (ненадлежащем исполнением) ООО «А-Холдинг» своих обязательств перед Министерством по контракту № 57/ЭА, Министерство обратилось в ПАО «Промсвязьбанк» с требованием от 31.01.2021 об осуществление уплаты денежной суммы по банковской гарантии № 26584-21-10 (далее - требование по банковской гарантии № 26584-21-10).

Согласно требованию по банковской гарантии №26584-21-10 ввиду не исполнения принципалом в срок своих обязательств по передаче государственному заказчику результата работ № 2, Министерство требовало в соответствии с условиями банковской гарантии № 26584-21-10 в течении пяти рабочих дней после поступления настоящего требования перечислить сумму 203 165 руб. 48 коп. на счет бенефициара, по банковским реквизитам, указанным в требовании.

Во исполнение требования по банковской гарантии № 26584-21-10 ПАО «Промсвязьбанк» перечислил Министерству денежные средства в сумме 203 165 руб. 48 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 6829 от 07.02.2022.

31.05.2021 между Министерством и ООО «А-Холдинг» заключен государственный контракт № 56/ЭА на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт (Челябинская область, Увельский муниципальный район, поселок Мирный)» ИКЗ 212745120833274510100100260264120414 (далее соответственно - контракт № 56/ЭА, объект №3), в соответствии с которым ООО «А-Холдинг» обязалось выполнить, работы по строительству объекта №3 (в том числе поставить оборудование, предусмотренное проектной документацией) и передать результат работ, определенный в п. 1.8 контракта №56/ЭА, государственному заказчику.

Согласно пункту 1.4 контракта № 56/ЭА генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по контракту №56/ЭА, в сроки, предусмотренные контрактом № 56/ЭА в соответствии с графиком выполнения работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта №3, который является приложением № 3 к контракту № 56/ЭА и его неотъемлемой частью (далее - график выполнения работ №3).

Согласно пункту 1.8 контракта № 56/ЭА результатом 2 этапа выполненных работ является объект №3, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации градостроительной деятельности получено разрешение на ввод его в эксплуатацию, а также государственным заказчиком подписан акт приемки выполненных работ, сформированный по 2 этапу выполненных работ (далее - результат работ № 3).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта № 56/ЭА цена контракта № 56/ЭА является твердой, определена на весь срок исполнения контракта № 56/ЭА (за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 контракта № 56/ЭА) и включает в себя прибыль генерального подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов генерального подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту № 56/ЭА, при котором цена контракта №56/ЭА составляет: 7 980 706 руб., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) 1 137 899 руб.

Стоимость проектно-изыскательских работ составляет: 270 248 руб. 38 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 процентов 45 041 руб. 40 коп.; за счет средств федерального бюджета 256 155 руб. 84 коп.; за счет средств областного бюджета 14 092 руб. 54 коп. (пункт 2.1.1 контракта №56/ЭА).

Согласно пункту 2.1.2 контракта стоимость строительно-монтажных работ составляет: 6 557 146 руб. 17 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 процентов 1 092 857 руб. 69 коп.; из которой: за счет средств федерального бюджета 6 215 213 руб. 23 коп.; за счет средств областного бюджета 341 932 руб. 94 коп.

В соответствии с пунктом 2.1.3 контракта № 56/ЭА стоимость оборудования составляет: 1 153 311 руб. 45 коп., НДС не облагается на основании ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»; из которой: за счет средств федерального бюджета 1 093 170 руб. 17 коп.; за счет средств областного бюджета 60 141 руб. 28 коп.

Согласно пункту 3.1 контракта № 56/ЭА генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по контракту №56/ЭА в сроки, предусмотренные контрактом №56/ЭА в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся приложением № 3 к контракту № 56/ЭА.

В соответствии с пунктом 3.3 контракта № 56/ЭА и графиком выполнения работ № 3, срок окончания выполнения работ - до 15.10.2021 года.

Пунктом 6.2 контракта № 56/ЭА предусмотрено, что при завершении выполнения каждого этапа выполненных работ, определенного сметой контракта № 56/ЭА, графиком выполнения работ № 3, генеральный подрядчик обязан уведомить государственного заказчика, об их завершении с предоставлением первичных документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ в отношении этапа выполненных работ, в том числе:

- акта приемки выполненных работ, сформированного в отношении этапа выполненных работ в соответствии с приложением № 5 к контракту № 56/ЭА (оригинал 2 экз.), подписанный со стороны генерального подрядчика, с приложением необходимой исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ; - счета на оплату выполненных работ (и/или счета-фактуры); -разрешения на ввод объекта №3 в эксплуатацию (при завершении 2 этапа выполненных работ);

- документа, подтверждающего обеспечение гарантийных обязательств (при завершении 2 этапа выполненных работ).

На 31.01.2022 ООО «А-Холдинг» не выполнило 2 этап выполнения работ по контракту № 56/ЭА, в частности, строительные работы (в том числе и поставку оборудования) и не передало государственному заказчику результат работ № 3 по контракту № 56/ЭА, предусмотренный пунктом 1.8 контракта № 56/ЭА, тем самым нарушило срок окончания выполнения работ, предусмотренный пунктом 3.3 контракта № 56/ЭА, графиком выполнения работ № 3 на 109 дней (с 15.10.2021 по 31.01.2022).

Согласно пункту 10.9 контракта № 56/ЭА генеральный подрядчик предоставляет документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных обязательств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, либо включенная в реестр банковских гарантий безотзывная банковская гарантия в размере, который предусмотрен в пункте 10.8 контракта № 56/ЭА), до приемки результата работ № 3 по контракту № 56/ЭА, в соответствии с условиями контракта № 56/ЭА.

Согласно пункту 10.14 контракта № 56/ЭА если генеральный подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом № 56/ЭА (в том числе гарантийных), государственный заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а генеральный подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней восстановить обеспечение исполнения контракта № 56/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств).

Согласно пункту 10.15 контракта № 56/ЭА в случае если обеспечение исполнения контракта № 56/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) осуществляется в форме банковской гарантии, то при наступлении случая, на который распространяется обеспечение настоящего контракта № 56/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) государственный заказчик вправе потребовать выплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Исполнение генеральным подрядчиком обязательств по контракту №56/ЭА обеспечено Банковской гарантией № 24719-21-10 от 26.05.2021 (далее - банковская гарантия № 24719-21-10), выданной ПАО «Промсвязьбанк», которой предусмотрено что обстоятельствами, при наступлении которых должна быть выплачена сумма банковской гарантии № 24719-21-10, являются ненадлежащее выполнение или невыполнение принципалом основного обязательства.

При этом основное обязательство включает в себя все обязательства принципала перед бенефициаром по контракту № 56/ЭА, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии, в том числе обязательства по возврату аванса, гарантийные обязательства, возникающие в гарантийный период, обязательства по уплате штрафов, пеней, неустоек, убытков при условии, что соответствующие обязательства принципала предусмотрены контрактом № 56/ЭА.

Банковской гарантией № 24719-21-10 предусмотрено право бенефициара в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом основного обязательства представить гаранту в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии № 24719-21-10, в размере цены контракта № 56/ЭА, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом № 56/ЭА и оплаченных бенефициаром, но не превышающих сумму банковской гарантией № 24719-21-10.

Банковская гарантия № 24719-21-10 вступает в силу с даты ее выдачи (26.05.2021) и действует по 31.01.2022 включительно.

Требование бенефициара по банковской гарантии № 24719-21-10 должно быть получено гарантом до истечения срока действия банковской гарантии № 24719-21-10.

В связи неисполнением (ненадлежащем исполнением) ООО «А-Холдинг» своих обязательств перед Министерством по контракту № 56/ЭА, Министерство обратилось в ПАО «Промсвязьбанк» с требованием от 31.01.2021 об осуществление уплаты денежной суммы по банковской гарантии № 24719-21-10 (далее - требование по банковской гарантии № 24719-21-10).

Согласно требованию по банковской гарантии № 24719-21-10 ввиду не исполнения принципалом в срок своих обязательств по передаче государственному заказчику результата работ №3, Министерство требовало в соответствии с условиями банковской гарантии № 24719-21-10 в течении пяти рабочих дней после поступления настоящего требования перечислить сумму 238 124 руб. 63 коп. на счет бенефициара, по банковским реквизитам указанным в настоящем требовании.

Во исполнение требования по банковской гарантии № 24719-21-10 ПАО «Промсвязьбанк» перечислило Министерству денежные средства в сумме 238 124 руб. 63 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением №6689 от 07.02.2022.

10.06.2021 между Министерством и ООО «А-Холдинг» заключен государственный контракт № 59/ЭА, в соответствии с которым ООО «А-Холдинг» обязалось выполнить работы по подготовке проектной документации, выполнить инженерные изыскания, выполнить работы по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт (Челябинская область, Увельский муниципальный район, поселок Формачево, железнодорожная станция)» (в том числе поставить оборудование, предусмотренное проектной документацией) (далее соответственно - контракт № 59/ЭА, объект № 4), иные действия генерального подрядчика, необходимые для выполнения работ по контракту № 59/ЭА (далее - работы № 4), и передать результат работ, определенный в пункте 1.8 контракта № 59/ЭА, государственному заказчику.

10.06.2021 к контракту № 59/ЭА заключено дополнительное соглашение № 1 (далее - дополнительное соглашение № 1 к контракту № 59/ЭА), которым внесены следующие изменения:

1) В пункте 2.1.1 контракта № 59/ЭА установлено, что стоимость проектно-изыскательских работ составляет: 270 248 руб. 38 коп., НДС не предусмотрен, из которой за счет средств федерального бюджета 256 155 руб. 84 коп.; за счет средств областного бюджета 14 092 руб. 54 коп.

2) В пункте 2.1.2 контракта № 59/ЭА установлено, что стоимость строительно-монтажных работ составляет 6 557 040 руб. 27 коп., НДС не предусмотрен, из которой: за счет средств федерального бюджета 6 215 112 руб. 85 коп.; за счет средств областного бюджета 341 927 руб. 42 коп.

3) В пункте 2.1.3 контракта № 59/ЭА установлено, что стоимость оборудования составляет 1 153 224 руб. 52 коп., НДС не облагается на основании статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»; из которой: за счет средств федерального бюджета 1 093 087 руб. 77 коп.; за счет средств областного бюджета 60 136 руб. 75 коп.

Согласно пункту 1.4 контракта № 59/ЭА генеральный подрядчик обязуется выполнить работы № 4 по контракту № 59/ЭА в сроки, предусмотренные контрактом № 59/ЭА в соответствии с графиком выполнения работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта №4, который является приложением № 3 к контракту № 59/ЭА и является его неотъемлемой частью (далее - график выполнения работ № 4).

Пунктом 1.5 контракта № 59/ЭА предусмотрено, что генеральный подрядчик обязуется обеспечить: выполнение проектных работ по контракту № 59/ЭА в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту № 59/ЭА), выполнение строительных работ по контракту в соответствии с разработанной им в рамках контракта № 59/ЭА проектной документацией по объекту №4.

Выполнение работ по контракту № 59/ЭА ведется в два этапа.

Пунктом 1.8 контракта № 59/ЭА предусмотрено, что результатом 1 этапа выполненных работ является проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий (отчет о выполнении инженерных изысканий), в отношении которых государственным заказчиком подписан акт приемки выполненных работ, сформированный в отношении 1 этапа выполненных работ (далее - результат 1 этапа выполненных работ № 4).

С даты приемки Результата 1 этапа выполненных работ №4 исключительные права на Результат 1 этапа выполненных работ №4 принадлежат Челябинской области.

Результатом 2 этапа выполненных работ является объект №4, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию, а также государственным заказчиком подписан акт приемки выполненных работ, сформированный по 2 этапу выполненных работ (далее - результат 2 этапа выполненных работ).

Результатом выполненных работ по контракту является объект, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (далее - результат работ №4).

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по контракту № 59/ЭА в сроки, предусмотренные контрактом № 59/ЭА в соответствии с графиком выполнения работ № 4 (пункт 3.1 контракта № 59/ЭА).

Согласно графику выполнения работ № 4 срок выполнения 2 этапа выполнения работ по контракту № 59/ЭА строительных работ, в том числе и поставка оборудования, указан август - октябрь 2021 года, который нарушен генеральным подрядчиком.

В соответствии с пунктом 3.3 контракта № 59/ЭА срок окончания выполнения работ до 30.10.2021.

Пунктом 6.1 контракта № 59/ЭА предусмотрено, что приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов (определенных в п. 6.2 контракта № 59/ЭА), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения каждого этапа выполненных работ на основании сметы контракта № 59/ЭА (приложение № 2 к контракту № 59/ЭА), графика выполнения работ №4 и графика оплаты выполненных работ (приложение № 4 к контракту № 59/ЭА), условиями контракта № 59/ЭА, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При завершении выполнения каждого этапа выполненных работ, определенного сметой контракта № 59/ЭА, графиком выполнения работ №4, генеральный подрядчик обязан уведомить государственного заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с предоставлением первичных документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ в отношении этапа выполненных работ, в частности:

- акта приемки выполненных работ, сформированного в отношении этапа выполненных работ в соответствии с приложением № 5 к контракту № 59/ЭА, подписанный со стороны генерального подрядчика (далее - акт приемки выполненных работ), с приложением необходимой исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ;

- счета на оплату выполненных работ (и/или счета-фактуры); - разрешения на ввод объекта № 4 в эксплуатацию (при завершении 2 этапа выполненных работ);

- документа, подтверждающего обеспечение гарантийных обязательств (при завершении 2 этапа выполненных работ).

Согласно пункту 13.1 контракта № 59/ЭА, контракт № 59/ЭА вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту № 59/ЭА, но не позднее 31.12.2021, что не освобождает генерального подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.

Однако, в нарушение срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 3.3 контракта № 59/ЭА, результат работ № 4 Министерством на 31.01.2021 не получен, генеральным подрядчиком не выполнены строительные работы и не поставлено оборудование, в частности, не выполнен 2 этап выполненных работ, тем самым генеральный допустил просрочку исполнения обязательства на 93 дня (с 31.10.2021 по 31.01.2022).

Согласно пункту 10.9 контракта № 59/ЭА генеральный подрядчик предоставляет документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных обязательств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, либо включенная в реестр банковских гарантий безотзывная банковская гарантия в размере, который предусмотрен в пункте 10.8 контракта № 59/ЭА), до приемки результата работ № 4 по контракту № 59/ЭА, в соответствии с условиями контракта № 56/ЭА.

Согласно пункту 10.14 контракта № 59/ЭА если генеральный подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом № 59/ЭА (в том числе гарантийных), государственный заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а генеральный подрядчик обязан в течение десяти дней восстановить обеспечение исполнения контракта № 59/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств).

Согласно пункту 10.15 контракта № 59/ЭА в случае если обеспечение исполнения контракта № 59/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) осуществляется в форме банковской гарантии, то при наступлении случая, на который распространяется обеспечение настоящего контракта № 59/ЭА (обеспечение гарантийных обязательств) государственный заказчик вправе потребовать выплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Исполнение генеральным подрядчиком обязательств по контракту №59/ЭА обеспечено Банковской гарантией № 26633-21-10 от 04.06.2021 года (далее - банковская гарантия № 26633-21-10), выданной ПАО «Промсвязьбанк», которой предусмотрено что обстоятельствами, при наступлении которых должна быть выплачена сумма банковской гарантии № 26633-21-10, являются ненадлежащее выполнение или невыполнение принципалом основного обязательства.

При этом основное обязательство включает в себя все обязательства принципала перед бенефициаром по контракту № 59/ЭА, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии, в том числе обязательства по возврату аванса, гарантийные обязательства, возникающие в гарантийный период, обязательства по уплате штрафов, пеней, неустоек, убытков при условии, что соответствующие обязательства принципала предусмотрены контрактом № 59/ЭА.

Банковской гарантией № 26633-21-Ю предусмотрено право бенефициара в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом основного обязательства представить гаранту в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии № 26633-21-10, в размере цены контракта № 59/ЭА, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных принципалом обязательств, предусмотренных контрактом № 59/ЭА и оплаченных бенефициаром, но не превышающих сумму банковской гарантией № 26633-21-10.

Банковская гарантия № 26633-21-10 вступает в силу с даты ее выдачи (04.06.2021) и действует по 31.01.2022 включительно.

Требование бенефициара по банковской гарантии № 26633-21-1 должно быть получено гарантом до истечения срока действия банковской гарантии № 26633-21-10.

В связи неисполнением (ненадлежащем исполнением) ООО «А-Холдинг» своих обязательств перед Министерством по контракту № 59/ЭА, Министерство обратилось в ПАО «Промсвязьбанк» с требованием от 31.01.2021 об осуществление уплаты денежной суммы по банковской гарантии № 26633-21-10 (далее - требование по банковской гарантии № 26633-21-10).

Согласно требованию по банковской гарантии № 26633-21-10 ввиду не исполнения принципалом в срок своих обязательств по передаче государственному заказчику результата работ № 4, Министерство требовало в соответствии с условиями банковской гарантии № 26633-21-10 в течении пяти рабочих дней после поступления настоящего требования перечислить сумму 203 165 руб. 48 коп. на счет бенефициара, по банковским реквизитам указанным в настоящем требовании.

Во исполнение требования по банковской гарантии № 26633-21-10 ПАО «Промсвязьбанк» перечислил Министерству денежные средства в сумме 203 165 руб. 48 коп., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 6640 от 07.02.2022.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром (пункт 2 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 вышеуказанной статьи независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

В независимой гарантии должны быть указаны: дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; срок действия гарантии; обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии (пункт 4 статьи 368 ГК РФ).

Судом установлено соответствие независимой гарантии требованиям статьи 368 ГК РФ и отсутствие предусмотренных нормой пункта 1 статьи 376 ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении его требования.

В силу пункта 1 статьи 378 ГК РФ обязательство гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии прекращается: уплатой бенефициару суммы, на которую выдана независимая гарантия; окончанием определенного в независимой гарантии срока, на который она выдана; вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии; по соглашению гаранта с бенефициаром о прекращении этого обязательства.

Как следует из статьи 379 ГК РФ принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное. Причем гарант не вправе требовать от принципала возмещения денежных сумм, уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями независимой гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром, за исключением случаев, если соглашением гаранта с принципалом предусмотрено иное либо принципал дал согласие на платеж по гарантии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 370 ГК РФ предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них. При этом гарант не вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие из основного обязательства, в обеспечение исполнения которого независимая гарантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из соглашения о выдаче независимой гарантии, и в своих возражениях против требования бенефициара об исполнении независимой гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в гарантии (пункт 2 статьи 370 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (статья 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Расчет взыскиваемой истцом суммы задолженности по банковским гарантиям произведен в соответствии с условиями банковских гарантий.

Суд отмечает, что согласно пункту 1 статьи 370 ГК РФ предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них.

Доказательств выплаты истцу указанной в требовании суммы полностью либо в части в предусмотренный банковской гарантией срок либо в более поздний срок ответчиком в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.

Таким образом, требование ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании задолженности по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в размере 238 124 руб. 63 коп., по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в размере 238 124 руб. 63 коп., по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в размере 203 165 руб. 48 коп., по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в размере 203 165 руб. 48 коп., подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом также предъявлено требование к ответчику о взыскании процентов по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 776 руб. 35 коп. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства, процентов по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 776 руб. 35 коп. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства, процентов по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 662 руб. 38 коп. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства, процентов по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 за период с 08.02.2022 г. по 14.02.2022 в размере 662 руб. 38 коп. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства.

Согласно пункту 10.4. правил в дату полного возмещения гаранту принципалом сумм, уплаченных бенефициару по гарантии и в связи с гарантией принципал обязан уплатить гаранту проценты по ставке 17 процентов годовых на суммы, уплаченные бенефициару по гарантии и в связи с гарантией, за период с даты, следующей за датой уплаты, по дату полного возмещения гаранту принципалом сумм, уплаченных бенефициару по гарантии и в связи с гарантией.

Суд признает расчет процентов верным.

Следовательно, требование истца в указанной части подлежит удовлетворению.

Суд полагает, что требование истца о взыскании с ответчика процентов за период до момента фактического исполнения обязательства на сумму денежных средств, уплаченных бенефициару по гарантии по ставке 17% годовых, также подлежит удовлетворению.

Кроме того, истец просил взыскать с ответчика неустойку по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 за 14.02.2022 в размере 357 руб. 19 коп., штраф по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в размере 50 000 руб., неустойку по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 за 14.02.2022 в размере 357 руб. 19 коп., штраф по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в размере 50 000 руб., неустойку по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 за 14.02.2022 в размере 304 руб. 75 коп., штраф по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в размере 50 000 руб., неустойку по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 за 14.02.2022 в размере 304 руб. 75 коп., штраф по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в размере 50 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

На основании пункта 11.1. Правил в случае просрочки исполнения принципалом обязанности по уплате сумм возмещения и(или) вознаграждения(й) по договору гарант вправе потребовать от принципала уплаты неустойки в размере 0,15% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

Исходя из пункта 11.4. правил в случае неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, предусмотренных п. 8.2.1. договора, гарант вправе взыскать с принципала неустойку (штраф) в размере не менее 50 000 руб. за каждый факт такого неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения.

Поскольку условия согласованные сторонами в банковской гарантии были нарушены ответчиком, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (статья  112 АПК РФ).

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение настоящего дела, составляет 23 868 руб. 00 коп.

При обращении истца с настоящим иском им была уплачена государственная пошлина в указанном размере, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 86381 от 22.04.2022 (т. 1 л. д. 13).

Поскольку исковые требования удовлетворены судом в полном объеме, следовательно, расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 23 868 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А-Холдинг», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в пользу публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», ОГРН 

<

***>, г. Москва, задолженность по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в размере 238 124 руб. 63 коп., проценты по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 776 руб. 35 коп., проценты, за период с 15.02.2022 до момента фактического исполнения обязательства по банковской гарантии № 24710-21-10 от 26.05.2021 на сумму денежных средств, уплаченных бенефициару по гарантии по ставке 17% годовых, неустойку по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 за 14.02.2022 в размере 357 руб. 19 коп., штраф по банковской гарантии № 24719-21-10 от 26.05.2021 в размере 50 000 руб., задолженность по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в размере 238 124 руб. 63 коп., проценты по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 776 руб. 35 коп., проценты, за период с 15.02.2022 до момента фактического исполнения обязательства по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 на сумму денежных средств, уплаченных бенефициару по гарантии по ставке 17% годовых, неустойку по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 за 14.02.2022 в размере 357 руб. 19 коп., штраф по банковской гарантии № 24724-21-10 от 26.05.2021 в размере 50 000 руб., задолженность по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в размере 203 165 руб. 48 коп., проценты по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 за период с 08.02.2022 по 14.02.2022 в размере 662 руб. 38 коп., проценты, за период с 15.02.2022 до момента фактического исполнения обязательства по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 на сумму денежных средств, уплаченных бенефициару по гарантии по ставке 17% годовых, неустойку по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 за 14.02.2022 в размере 304 руб. 75 коп., штраф по банковской гарантии № 26584-21-10 от 04.06.2021 в размере 50 000 руб., задолженность по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в размере 203 165 руб. 48 коп., проценты по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 за период с 08.02.2022 г. по 14.02.2022 в размере 662 руб. 38 коп., проценты, за период с 15.02.2022 до момента фактического исполнения обязательства по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 на сумму денежных средств, уплаченных бенефициару по гарантии по ставке 17% годовых, неустойку по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 за 14.02.2022 в размере 304 руб. 75 коп., штраф по банковской гарантии № 26633-21-10 от 04.06.2021 в размере 50 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 868 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья                                                                              Е.А. Мосягина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru