ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-193463/23-67-1602

г. Москва

25 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 12 декабря 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2023 г.                                                                   

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 54" (630087, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г, НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО УЛ, ЗД. 167, ОФИС 408, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2018, ИНН: 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ПЕТРАСТРОЙ" (125130, 

<

...>, ЭТАЖ 3 ПОМ III КОМ 20/10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.03.2020, ИНН: 

<

***>) 

об обязании Общества с ограниченной ответственностью СК « ПЕТРАСТРОЙ» передать Обществу с ограниченной ответственностью «СМНУ 54» в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу по акту приема-передачи исполнительную документацию по договору № П-0107/22-К от 01.07.2022 г.

при участии:

от истца: ФИО2, дов. от 07.09.2023

от ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 54" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ПЕТРАСТРОЙ"  с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ об обязании ООО СК "ПЕТРАСТРОЙ" передать в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу по акту приема-передачи в рамках договора субподряда № П-0107/22-К от 01.07.2022 г.:

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-З в 2-х экземплярах;

счет-фактура — в 1 -м экземпляре;

а также в 4-х экземплярах следующую исполнительную документацию:

Исполнительная схема стен.

Исполнительная схема перекрытий.

Акт армирования железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

Акт бетонирования монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

Акт на устройство перегородок.

Лабораторное заключение на применяемые смеси.

Акт гидроизоляции ограждающих конструкций.

Акт выполненных работ по шумоглушению.

Акт на монтаж входных групп и лестниц.

Акт монтажа сборных железобетонных конструкций и элементов.

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов).

Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, сварные соединения.

Акт антикоррозионной защиты сварных соединений.

Акт замоноличивания монтажных стыков и узлов.

Температурные листы прогрева бетона.

Акт установки оконных и дверных блоков.

Акт крепления, конопатки и изоляции перегородок оконных и дверных блоков.

Исполнительная схема стен.

Паспорта и сертификаты на материал.

Также Истцом было заявлено ходатайство об уточнении предмета заявленных требований путем включения требования о взыскании судебной неустойки в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечении месячного срока с момента вступления решения суда в законную силу до дня его фактического исполнения.

Согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В силу разъяснений, содержащихся в п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» по смыслу части 1 статьи 49 АПК РФ под увеличением размера исковых требований следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено истцом в исковом заявлении.

Например, увеличением размера исковых требований является изменение истцом в большую сторону сумм взыскиваемых неустоек, процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, вызванное увеличением периода просрочки исполнения основного обязательства.

Не является увеличением размера исковых требований предъявление истцом новых требований, связанных с заявленными в исковом заявлении, но не содержащихся в нем (например, требования о применении мер ответственности за нарушение обязательства дополнительно к заявленному в иске требованию о взыскании основного долга).

Нормами АПК РФ (ч. 1 ст. 49 АПК РФ) не предусмотрена возможность дополнения первоначально предъявленных исковых требований.

Изменение размера исковых требований не может быть связано с предъявлением дополнительных исковых требований, которые не были истцом заявлены в исковом заявлении.

Истцом заявлено новое требование о взыскании судебной неустойки в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечении месячного срока с момента вступления решения суда в законную силу до дня его фактического исполнения, которое не было заявлено при предъявлении иска.

На основании изложенного, суд отклоняет ходатайство истца об уточнении исковых требований в данной части.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 11.05.2010 N 161/10, то обстоятельство, что суд отказал в уточнении искового требования, не повлекло за собой отказ в предоставлении истцу судебной защиты, так как он вправе обратиться в суд с новым иском.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, 01 июля 2022 г. между ООО «СМНУ 54» (ИНН 

<

***>) (далее - Подрядчик) и ООО СК «Петрастрой» (ИНН 

<

***>) (далее - Субподрядчик) был заключен Договор Субподряда № П-0107/22-К (далее - Договор) согласно которому, Субподрядчик по заданию Подрядчика принимает на себя обязательства выполнить в установленные Договором сроки, своими и привлеченными силами и средствами, комплекс строительно-монтажных работ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора (далее Работы), а Подрядчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их 

Субподрядчик обязуется выполнить Работы согласно Калькуляции №1 от 01.07.2022г., являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1) на объекте капитального строительства: «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап», Перечень, состав и стоимость фактически выполненных Работ и использованных основных материалов отражаются Сторонами в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З) (п. 1.2. Договора).

Дата окончания выполнения Работ - не позднее «23» марта 2023 года. (п. 3.1. Договора).

Согласно п. 4.1., 4.2. Договора сдача-приемка Работ, производится Сторонами путем подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Не позднее 25 числа отчетного месяца Субподрядчик нарочно предоставляет уполномоченному представителю Подрядчика:

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

справку о стоимости выполненных работ по форме КС-З;

надлежащим образом оформленную счет-фактуру;

документацию, подтверждающую объем выполненных в отчетном месяце и предъявленных к сдаче Работ.

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-З предоставляются в 2-х экземплярах; счет-фактура — в 1 -м экземпляре; исполнительная документация — в 4-х экземплярах.

Однако, в нарушение вышеназванных условий Договора, Субподрядчик уклонился от исполнения обязательств по передаче Акта по форме КС-2 и справки по форме КС-З - в 2-х экземплярах; счет-фактура — в 1 -м экземпляре; исполнительной документации — в 4-х экземплярах.

02.06.2023 г. ООО «СМНУ 54» направило в адрес Ответчика письмо от 22.05.23 г. № 107 с требованием представить полный комплект исполнительной документации на выполненные по Договору работы. Данное требование Ответчиком ООО СК «ПЕТРАСТРОЙ» не исполнено до настоящего времени.

25.07.2023 г. Истец направил Ответчику претензию от 24.07.2023 г. исх. №134 о предоставлении полного пакета исполнительной документации на выполненные по договору работы.

Однако, Претензия также не исполнена Ответчиком в связи с чем, Истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

В силу статьи 726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Согласно пункту 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Согласно пункту 6.13 СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 781, лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию.

Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения определены Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 (далее - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве №1128)., действовавшим на момент заключения и исполнения договора субподряда № П-0107/22-К от 01 июля 2022 года.

В соответствии с пунктом 3 указанных Требований исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Согласно пунктам 5.1-5.6, пункту 6 Требований РД-11-02-2006 в состав исполнительной документации входят: акты освидетельствования геодезическойразбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; комплект рабочих чертежей; исполнительные геодезические схемы; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;(пп. "в" в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428), результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Пунктом 3.5. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения (действовали в период выполнения работ по Договору) предусмотрен перечень исполнительной документации, которую генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям при приемке объекта.

Кроме этого, СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Определена производственная документация, оформляемая при монтаже оборудования и трубопроводов и подлежащая передаче рабочей комиссии (заказчику) при сдаче работ.

Из вышеизложенного, следует, что исполнительно-техническая документация является результатом действий субподрядчика по договору и указанный результат подлежит передаче подрядчику ООО «СМНУ 54».

Кроме того, 02.06.2023 г. ООО «СМНУ 54» направило в адрес Ответчика письмо от 22.05.23 г. № 107 с требованием представить полный комплект исполнительной документации на выполненные по Договору работы, которое также содержало приложение в виде Регламента по предоставлению исполнительной документации.

Согласно данному Регламенту, работы выполняемы Субподрядчиком в соответствии с Приложением №1 к Договору субподряда №П-0107/22-К от 01.07.2022 г. относятся к разделу «Несущие конструкции, конструктивные элементы», в соответствии с которым исполнительная документация является следующая:

Исполнительная схема стен.

Исполнительная схема перекрытий.

Акт армирования железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

Акт бетонирования монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

Акт на устройство перегородок.

Лабораторное заключение на применяемые смеси.

Акт гидроизоляции ограждающих конструкций.

Акт выполненных работ по шумоглушению.

Акт на монтаж входных групп и лестниц.

Акт монтажа сборных железобетонных конструкций и элементов.

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов).

Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, сварные соединения.

Акт антикоррозионной защиты сварных соединений.

Акт замоноличивания монтажных стыков и узлов.

Температурные листы прогрева бетона.

Акт установки оконных и дверных блоков.

Акт крепления, конопатки и изоляции перегородок оконных и дверных блоков.

Исполнительная схема стен.

Паспорта и сертификаты на материал.

С данным требованием, равно как и с Регламентом Ответчик был ознакомлен, мотивированных отказ в ответ не отправил. Данное требование Ответчиком ООО СК «ПЕТРАСТРОЙ» не исполнено до настоящего времени.

Кроме того, без истребуемой исполнительной документации Истец не может подтвердить выполнение работ в полном объеме перед своим Подрядчиком по Контракту №ОКС.02.-ДОЛ/СМП-01 на выполнение работ по строительству объекта: «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область.1 этап» заключенным 14.12.2021 года.

Подрядчиком по Контракту №ОКС.02.-ДОЛ/СМП-01 предъявлено требование предоставить полный комплект исполнительной документации для подтверждения объемов и стоимости результата работ, что подтверждается уведомлением от 24.03.2023 г. №2403-1/23.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования об обязании Общество с ограниченной ответственностью СК « ПЕТРАСТРОЙ» передать Обществу с ограниченной ответственностью «СМНУ 54» по акту приема-передачи исполнительную документацию по договору № П-0107/22-К от 01.07.2022 г. подлежат удовлетворению.

Определяя срок по передаче документов, суд руководствуется следующим. 

В силу части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

С учетом изложенного, суд признает разумным и обоснованным срок по передаче документов месяц с даты вступления решения в законную силу.

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика.

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ПЕТРАСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 54" (ИНН: 

<

***>)  в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу по акту приема-передачи в рамках договора субподряда № П-0107/22-К от 01.07.2022 г.:

Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-З в 2-х экземплярах;

счет-фактура — в 1 -м экземпляре;

а также в 4-х экземплярах следующую исполнительную документацию:

Исполнительная схема стен.

Исполнительная схема перекрытий.

Акт армирования железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

Акт бетонирования монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.

Акт на устройство перегородок.

Лабораторное заключение на применяемые смеси.

Акт гидроизоляции ограждающих конструкций.

Акт выполненных работ по шумоглушению.

Акт на монтаж входных групп и лестниц.

Акт монтажа сборных железобетонных конструкций и элементов.

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (фундаментов, этажей, пролетов).

Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, сварные соединения.

Акт антикоррозионной защиты сварных соединений.

Акт замоноличивания монтажных стыков и узлов.

Температурные листы прогрева бетона.

Акт установки оконных и дверных блоков.

Акт крепления, конопатки и изоляции перегородок оконных и дверных блоков.

Исполнительная схема стен.

Паспорта и сертификаты на материал..

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ПЕТРАСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 54" (ИНН: 

<

***>)  расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев