Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград

Дело №

А21-3205/2020

«15»

июля

2020 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«13»

июля

2020 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«15»

июля

2020 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Новые строительные технологии» к АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство»  о взыскании 3 864 922,4 рублей, судебных расходов

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности 

от ответчика:  н/я

установил.

 

            Общество с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии» обратилось в суд с иском к акционерному обществу «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство»  о взыскании основного долга  в сумме 2 979 700 рублей, неустойки в сумме 885 222,4 рублей, судебных расходов на оплату юридических услуг в сумме 50 000 рублей.

            В судебном заседании 22.06.2020 года представитель истца уточнила требования. Просила взыскать основной долг в сумме 2 979 700 рублей, неустойку в сумме 1 051 688,1 рублей, судебные расходы в сумме 60 800 рублей. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании 13.07.2020 года представитель ситца уточнила требования в части основного долга. Просила взыскать основной долг в сумме 2 974 700 рублей в связи с допущенной технической ошибкой. Уточнение принято судом.

            Дело рассмотрено в  порядке статьи 156 АПК РФ.

            Между сторонами был заключен договор подряда от 22.02.2019 года № 190219-ХТТ-ТЭС-СДО. По условиям договора ООО  «Новые строительные технологии» (подрядчик) обязалось в соответствии с проектной документацией выполнить комплекс работ по лидерному бурению скважин диаметром 320 мм для погружения составных ж/б свай на объекте «Строительство Приморской ТЭС», а АО  «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

            В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость работ согласована 1 142 800 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3 договора оплата за выполненные работы производится в течение 10 дней после подписания акта формы КС-2.

В соответствии с пунктом 6.2 договора за нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 8.2 договора споры по нему подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде Калининградской области.

26.03.2019 года между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1 к договору подряда, в соответствии с которым стоимость работ согласована 5 779 600 рублей.

Из материалов дела следует, что ответчик подписал акты о принятии работ от 13.03.2019 года на сумму 478 800 рублей, от 15.04.2019 года на сумму 1 166 400 рублей, от 30.05.2019 года на сумму 979 200 рублей.

Истец передал ответчику акты от 16.07.2019 года №№ 8, 9 на сумму 690 300 рублей,  от 26.08.2019 года № 10 на сумму 160 000 рублей (письма от 26.08.2019 года №192, 193, от 30.08.2019 года № 198).

Ответчик подтвердил выполнение работ по договору на общую сумму 3 474 700 рублей и  наличие долга в сумме 2 974 700 рублей в акте сверки расчетов по состоянию на 30.09.2019 года.

При определении размера требований истец учел оплату работ в сумме 500 000 рублей 30.05.2019 года.     

Доказательств оплаты долга ответчиком не представлено.

Требования истца в части основного долга в сумме 2 974 700 рублей подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310 ГК РФ, положений договора подряда.

Согласно расчету истца по состоянию на 22.06.2020 года подлежит уплате неустойка по положениям пункта 6.2 договора подряда в сумме 1 051 688,1 рублей.

Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным.

При вынесении решения суд учитывает, что 19.02.2020 года принято к рассмотрению заявление о признании ответчика несостоятельным (банкротом) в рамках дела № А56-13195/2020, но по состоянию на 13.07.2020 года процедура банкротства наблюдение еще не введена. С учетом даты подачи иска по  настоящему делу требования  могут быть рассмотрены в самостоятельном производстве.  

Материалами дела подтверждены судебные расходы истца в сумме 60 800 рублей, которые суд взыскивает на основании положений статей 110,112 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии» (ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме 2 974 700 рублей, неустойку в сумме 1 051 688,1 рублей, судебные расходы в сумме 60 800 рублей, расходы по госпошлине в сумме 42 325 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 808 рублей.  

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                               О.Н.Шкутко