АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-7406/2023

г. Чита

04 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  26 февраля 2024 года

Решение изготовлено в полном объёме 04 марта 2024 года

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Т.А. Гурулёвой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Министерства природных ресурсов Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ДВЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании в федеральный бюджет 712 662,18 руб. неустойки за нарушение условий договора аренды лесного участка №11-09 от 03.07.2009 в виде невыполнения в 2022 году части противопожарных, лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий,

об обязании выполнить на лесном участке предусмотренные договором аренды лесного участка №11-09 от 03.07.2009 противопожарные, лесовосстановительные и лесохозяйственные мероприятия в виде:

устройства минерализованных полос – 0,9 км,

ухода за минерализованными полосами – 0,5 км,

подновления запрещающих знаков и аншлагов – 4 шт.,

прочистки и обновления просек – 4,7 км,

устройства и содержания мест отдыха и курения – 1 шт.,

ремонта дороги противопожарного назначения – 1 км,

содействия естественному возобновлению леса путем сохранения подроста – 100 га, содействия естественному возобновлению леса путем минерализации почвы – 12 га, разрубки квартальных просек – 12 км,

установки квартальных столбов – 4 шт,

рубки ухода в молодняках – 5,1 га,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, государственного казенного учреждения «Управление лесничествами Забайкальского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, представителя по доверенности №180 от 10.01.2024 (сроком до 31.12.2024);

от третьего лица - ФИО2, представителя по доверенности №179 от 10.01.2024 (сроком до 31.12.2024).

 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края (далее – истец,) обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ДВЛ» (далее – ответчик, ООО «ДВЛ») о взыскании в федеральный бюджет 713 724,10 руб. неустойки за нарушение условий договора аренды лесного участка №11-09 от 03.07.2009 в виде невыполнения в 2022 году части лесовосстановительных мероприятий, обязании выполнить на лесном участке предусмотренные договором аренды лесного участка №11-09 от 03.07.2009 противопожарные, лесовосстановительные и лесохозяйственные мероприятия в виде: устройства минерализованных полос – 0,9 км, ухода за минерализованными полосами – 0,5 км, подновления запрещающих знаков и аншлагов – 4 шт., прочистки и обновления просек – 4,7 км, устройства и содержания мест отдыха и курения – 1 шт., ремонта дороги противопожарного назначения – 1 км, содействия естественному возобновлению леса путем сохранения подроста – 100 га, содействия естественному возобновлению леса путем минерализации почвы – 12 га, разрубки квартальных просек – 12 км, установки квартальных столбов – 4 шт., рубки ухода в молодняках – 5,1 га.

Определением от 29.06.2023 исковое заявление принято судом к производству, назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с частью 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено государственное казенное учреждение «Управление лесничествами Забайкальского края».

Ответчик через канцелярию суда представил ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства (вх. №А78-Д-4/84388 от 21.08.2023), в котором указал, что часть противопожарных, лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий ответчиком выполнены, акты выполненных работ на подписании в участковом лесничестве; в связи с необходимостью представления доказательств выполненных мероприятий, а также для согласования проекта мирового соглашения заявил ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Определением от 22.08.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением суда от 29.11.2023 к рассмотрению приняты уточненные исковые требований о взыскании в федеральный бюджет 712 662,18 руб. неустойки за нарушение условий договора аренды лесного участка №11-09 от 03.07.2009 в виде невыполнения в 2022 году части мероприятий, об обязании выполнить на лесном участке предусмотренные договором аренды лесного участка №11-09 от 03.07.2009 противопожарные, лесовосстановительные и лесохозяйственные мероприятия в виде: устройства минерализованных полос – 0,9 км, ухода за минерализованными полосами – 0,5 км, подновления запрещающих знаков и аншлагов – 4 шт., прочистки и обновления просек – 4,7 км, устройства и содержания мест отдыха и курения – 1 шт., ремонта дороги противопожарного назначения – 1 км, содействия естественному возобновлению леса путем сохранения подроста – 100 га, содействия естественному возобновлению леса путем минерализации почвы – 12 га, разрубки квартальных просек – 12 км, установки квартальных столбов – 4 шт, рубки ухода в молодняках – 5,1 га.

Определением от 11 января 2024 года по настоящему делу на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Алфёрова Д.Е. на судью Гурулёву Т.А. в связи назначением Алфёрова Д.Е. судьей Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку представителя не обеспечил.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие ответчика.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд установил.

Министерство природных ресурсов Забайкальского края зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 01.10.2008 с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 672007, 

<

...> (л.д. 14-15).

ООО «ДВЛ» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.03.2007 с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес до 25.02.2024: 672042, 

<

...> (л.д. 16-17).

Между Государственной лесной службой Забайкальского края (арендодатель) и ООО «Синта-Кедр» (арендатор) подписан договор аренды лесного участка для заготовки древесины №11-09 от 03.07.2009 (л.д. 19-28).

Срок действия договора устанавливается с даты государственной регистрации и составляет 25 лет (п. 8.1 договора).

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.4 договора арендатору во временное пользование был предоставлен лесной участок, находящийся в государственной собственности, площадью 16536 га для заготовки древесины в объеме 9780 м3.

Лесной участок имеет следующее местоположение: Забайкальский край, Улётовский район, Ингодинское лесничество, Верх-Ингодиское участковое лесничество, кварталы №№ 81-84, 98-103, 121-126, 135, 136, 156,157.

Согласно п. 3.5 договора арендодатель имеет право осуществлять контроль за соблюдением лесного законодательства, проекта освоения лесов и обязательств по договору. Ежегодно проводить освидетельствование мест рубок с составлением акта.

Арендатор обязан вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены настоящим договором (п. 4.13 договора).

Арендатор обязан осуществлять санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и плане санитарно-оздоровительных мероприятий (п. 4.19. договора).

Арендатор обязан ежегодно сдавать арендодателю объемы выполненных лесовосстановительных и лесохозяйственных работ по акту (п. 4.25. договора).

Арендатор обязан проводить рубки ухода за лесами в местах и объемах установленных проектом освоения лесов (п. 4.26. договора).

Арендатор обязан ежегодно сдавать арендодателю объекты выполненных противопожарных работ по акту (п. 4.28. договора).

Арендатор обязан вести дорожное строительство в соответствии с проектом освоения лесов своими силами и за свой счет (п. 4.34 договора).

Арендатор обязан осуществлять на лесном участке разрубку (расчистку) квартальных просек, замену квартальных столбов в объемах согласно приложению №5 (п. 4.36 договора).

Согласно подп. «в» п. 5.2 договора за нарушение условий договора арендатор уплачивает арендодателю неустойку за невыполнение указанных в приложении №5 мероприятий – размере 3-кратной стоимости выполнения аналогичных мероприятий.

28.03.2017 истец и ООО «Синта-Кедр» заключили соглашение №1 о внесении изменений в договор, в том числе внесены изменения в приложение №5 договора.

11.10.2019 между ООО «Синта-Кедр» и ООО «ДВЛ» заключен договор перенайма  лесного участка №25/2019-П (л.д.37-38).

По договору перенайма № 25/2019-П от 11.10.2019 г., с согласия Государственной лесной службы Забайкальского края, общество с ограниченной ответственностью «ДВЛ» является правопреемником всех правомочий по договору № 11-09 аренды лесного участка от 03.07.2009.

22.06.2021 истец и ООО «ДВЛ», руководствуясь решением Арбитражного суда Забайкальского края от 20.05.2021 по делу №А78-11296/2020, Приказом Государственной лесной службы Забайкальского края №1464 от 30.12.2016, заключили соглашение №4 о внесении изменений в договор, в том числе внесены изменения в приложение №5 договора.

Сотрудником Верх-Ингодинского участкового лесничества Ингодинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» 29.03.2023 проведен осмотр и обследование арендованного лесного участка ООО «ДВЛ» на предмет выполнения предусмотренных договором аренды противопожарных, лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий за 2022 год. По итогам проверки была составлен акт, в котором зафиксировано невыполнение ответчиком предусмотренных договором мероприятий за 2022 год:

Противопожарные мероприятия:

устройства минерализованных полос – 0,9 км,

ухода за минерализованными полосами – 0,5 км,

ремонта дороги противопожарного назначения – 1 км,

устройство запрещающих знаков и аншлагов – 4 шт.,

прочистки и обновления просек – 4,7 км,

устройства и содержания мест отдыха и курения – 1 шт.,

Лесовосстановительные мероприятия:

содействия естественному возобновлению леса – 112 га,

Лесохозяйственные мероприятия:

разрубки квартальных просек – 12 км,

установки квартальных столбов – 4 шт.,

рубки ухода в молодняках – 5,1 га.

Ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению мероприятий послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, заслушав сторон, оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Согласно   статье   8   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации (далее – Гражданский кодекс) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. При этом в силу части 1 статьи 8 ЛК РФ лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

В силу статьи 71 ЛК РФ лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам - в аренду, безвозмездное пользование.

При этом в силу пункта 11 статьи 1 ЛК РФ одним из основных принципов лесного законодательства является платность использования лесов.

Из части 1 статьи 83 ЛК РФ усматривается, что Российская Федерация делегировала субъектам Российской Федерации полномочия, в том числе по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе по организации и проведению соответствующих аукционов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) главный администратор доходов бюджета осуществляет, среди прочего, формирование перечня подведомственных ему администраторов доходов бюджета.

Пунктом 2 статьи 160.1. БК РФ установлено, что администратор доходов бюджета осуществляет, среди прочего, начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, взыскивает задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.

Федеральный закон от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Приложение № 7) закрепил за Федеральным агентством лесного хозяйства (далее - Рослесхоз) функции главного администратора доходов федерального бюджета в виде денежных взысканий (штрафы) за нарушения лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности.

В своем приказе от 10.04.2015 года № 108 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета» (в редакции с прилагаемого к настоящему заявлению приказа от 25.01.2017 года № 10) в настоящее время Рослесхоз закрепил за Министерством полномочие по администрированию доходов федерального бюджета в виде неустоек и пеней за нарушения условий договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений.

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 06.10.2016 г. № 395 «О некоторых мерах по реализации постановления Губернатора Забайкальского края от 30.09.2016 г. № 80» (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 14.12.2016 г. № 459) Государственная лесная служба Забайкальского края упразднена, при этом ее полномочия и функции переданы Министерству природных ресурсов Забайкальского края (далее - Министерство).

Согласно части 4 статьи 71 ЛК РФ к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом, то есть правоотношения, возникшие между сторонами, регулируются нормами главы 34 Гражданского кодекса.

Согласно статье 606 Гражданского кодекса по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Согласно пункту 1 статьи 615 Гражданского кодекса арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.

В соответствии со статьей 51, частями 2, 3 статьи 53.1 ЛК РФ леса подлежат охране от пожаров, охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах, меры противопожарного обустройства лесов включают в себя, в частности, устройство противопожарных минерализованных полос, меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами лесного участка.

Пунктом 4.19 договора аренды стороны предусмотрели, что арендатор обязан осуществлять санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и плане санитарно-оздоровительных мероприятий.

В приложении №5 к договору аренды (с учетом соглашения №4 от 22.06.2021) предусмотрен следующий объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке (л.д.33-36):

 

№ п/п

Целевое

назначение лесов

Виды мероприятий

Ед. изм.

Объем меропри-ятий

Срок исполнения

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

1

Защитные и эксплуатационные леса

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде:

- плакатов

- объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей

шт.

 

 

1

3

В первый год

ревизионного периода

(установка) с содержанием

в течение всего

ревизионного

периода

2

Защитные и эксплуатационные леса

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса Российской Федерации

шт.

1

В первый год

ревизионного периода

(установка) с содержанием

в течение всего

ревизионного

периода

3

Защитные и эксплуатационные леса

Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:

- реконструкция

км

1

Ежегодно

до 1 ноября

4

Защитные и эксплуатационные леса

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

0,9

Ежегодно

до 1 ноября

5

Защитные и эксплуатационные леса

Прочистка и обновление просек

км

4,7

Ежегодно

до 1 ноября

6

Защитные и эксплуатационные леса

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

км

0,5

В первый год ревизионного периода

7

Защитные и эксплуатационные леса

Строительство, реконструкция и эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

шт.

1

В первый год

ревизионного периода

(строительство, реконструкция, эксплуатация) с содержанием

в течение всего

ревизионного

периода

8

Защитные и эксплуатационные леса

Создание добровольных противопожарных дружин

Кол.

шт./

чел.

1/5

Ежегодно до начала пожароопасного периода

Лесовосстановительные мероприятия

9

Защитные и эксплуатационные леса

Содействие естественному возобновлению в виде:

- сохранения подроста

- минерализации почвы

га

 

100

12

Ежегодно

до 1 октября

Лесохозяйственные мероприятия

10

Защитные и эксплуатационные леса

Разрубка (расчистка) квартальных просек шириной до 0,5 м

км

12

Ежегодно

11

Защитные и эксплуатационные леса

Установка квартальных столбов

шт.

4

Ежегодно

Проектом освоения лесов предусмотрены рубки ухода площадью 5,1 га (оборот л.д. 40).

По итогам проведенной проверки было установлено, что ООО «ДВЛ», в нарушение условий Договора № 11-09 от 03.07.2009 года и проекта освоения лесов от 2021 года, противопожарные, лесовосстановительные и лесохозяйственные мероприятия на арендованном лесном участке были выполнены за 2022 год не в полном объеме.

Согласно промежуточному акту ответчиком частично выполнены мероприятия в 2023 году.

В ответе государственного казенного учреждения «Управление лесничествами Забайкальского края» №13 от 15.01.2024 (л.д. 115-116) указано, что ответчиком не выполнены мероприятия:

- устройство минерализованных полос - 0,9 км,

- уход за минерализованными полосами - 0,5 км,

- подновление запрещающих знаков и аншлагов - 4 шт,

- прочистка и обновление просек - 4,7 км,

- устройство и содержание мест отдыха и курения - 1 шт,

- ремонт дороги противопожарного назначения - 1 км,

- разрубка квартальных просек - 12 км,

- установка квартальных столбов - 4 шт,

- рубки ухода 5,1 га.

Остальные указанные мероприятия выполнены ответчиком в 2023 году, что подтверждается промежуточным актом от 17.10.2023, подписанным представителями истца и ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», а именно содействие естественному возобновлению в виде сохранения подроста в объеме 230,70 га.

Согласно пояснению представителя ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» за счет выполненного объема 230,70 га по содействию естественному возобновлению в виде сохранения подроста, управление посчитало выполненными мероприятия по содействию естественному возобновлению в виде минерализации почвы, хотя как таковые мероприятия ответчиком не производились.

Доказательств своевременного выполнения в 2022 году мероприятий в предусмотренных объемах ответчик в материалы дела не представил.

С учетом выполнения ответчиком в 2023 году части мероприятий, иск в части обязания ответчика выполнить мероприятия подлежит удовлетворению частично, а именно удовлетворению полежит требование об обязании выполнить:

-  устройство минерализованных полос - 0,9 км,

- уход за минерализованными полосами - 0,5 км,

- подновление запрещающих знаков и аншлагов - 4 шт.,

- прочистки и обновление просек - 4,7 км,

- устройство и содержание мест отдыха и курения - 1 шт.,

- ремонт дороги противопожарного назначения - 1 км,

- разрубки квартальных просек - 12 км,

- установки квартальных столбов - 4 шт.,

- рубки ухода в молодняках – 5,1 га.

В части обязания выполнить лесовосстановительные мероприятия следует отказать, в связи с выполнением ответчиком объема 230,70 га по содействию естественному возобновлению в виде сохранения подроста, что вдвое превышает договорной объем и  ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» посчитало, что лесовосстановительные мероприятия выполнены.

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Суд, с учетом значимости противопожарных и лесохозяйственных мероприятий для обеспечения пожарной безопасности лесов, климатических особенностей Забайкальского края, пожароопасного периода в регионе, считает возможным установить срок выполнения противопожарных и лесохозяйственных мероприятий - в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 Гражданского кодекса).

Согласно статье 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Подп. «в» п. 5.2  договора аренды стороны предусмотрели, что за нарушение условий договора арендатор уплачивает арендодателю неустойку за невыполнение указанных в приложении №5 мероприятий – размере 3-кратной стоимости выполнения аналогичных мероприятий.

Истец произвел расчет неустойки за невыполненные в 2022 году мероприятия в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 №174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов», приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края №492 от 08.04.2022 «Об утверждении расчета норматива затрат для определения расходов по мероприятиям», приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края № 2186 от 27.12.2021 «Об утверждении расчётов нормативов затрат для определения расходов по мероприятиям».

Размер неустойки за невыполнение в 2022 году противопожарных и лесохозяйственных мероприятий по расчету истца составил 712 662,18 рублей.

Нарушений в расчете истца судом не установлено, при этом частичное выполнение ответчиком лесовосстановительных мероприятий в 2023 году не устраняет допущенного ответчиком нарушения в виде невыполнения соответствующих мероприятий до 1 октября 2022 года, учитывая, что мероприятия по содействию естественному возобновлению в виде минерализации почвы фактически не выполнены ответчиком, объем данных мероприятий был засчитан за счет перевыполненного объема по содействию естественному возобновлению в виде сохранения подроста.

Таким образом, заявленные требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в полном размере.

Требования об обязании ответчика выполнить мероприятия на арендуемом лесном участке по договору подлежит удовлетворению в части, а именно удовлетворению полежит требование об обязании выполнить:

-  устройство минерализованных полос - 0,9 км,

- уход за минерализованными полосами - 0,5 км,

- подновление запрещающих знаков и аншлагов - 4 шт.,

- прочистки и обновление просек - 4,7 км,

- устройство и содержание мест отдыха и курения - 1 шт.,

- ремонт дороги противопожарного назначения - 1 км,

- разрубки квартальных просек - 12 км,

- установки квартальных столбов - 4 шт.,

- рубки ухода в молодняках – 5,1 га.

В остальной части заявленных требований следует отказать.

Согласно абзацу второму пункта 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» правило о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не подлежит применению при разрешении исков неимущественного характера.

Поскольку заявленные в рамках настоящего дела требования об обязании выполнить противопожарные и лесовосстановительные мероприятия носят неимущественный характер, то правило распределения расходов пропорционально размеру удовлетворенных требований, предусмотренное абзацем вторым части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в данном случае не подлежит применению.

Истец при подаче иска госпошлину не оплачивал на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате госпошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДВЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Министерства природных ресурсов Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 712 662,18 руб.

Обязать общество с ограниченной ответственностью ДВЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить противопожарные, лесовосстановительные и лесохозяйственные мероприятия за 2022 год на арендуемом лесном участке по договору аренды лесного участка №11-09 от 03.07.2009, а именно:

-  устройство минерализованных полос - 0,9 км,

- уход за минерализованными полосами - 0,5 км,

- подновление запрещающих знаков и аншлагов - 4 шт.,

- прочистки и обновление просек - 4,7 км,

- устройство и содержание мест отдыха и курения - 1 шт.,

- ремонт дороги противопожарного назначения - 1 км,

- разрубки квартальных просек - 12 км,

- установки квартальных столбов - 4 шт.,

- рубки ухода в молодняках – 5,1 га.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДВЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 23 253 руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                           Т.А. Гурулёва