АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

(в соответствии со ст. 176 АПК РФ) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

24 мая 2017 года по результатам рассмотрения дела № А31-139/2017 суд  первой инстанции в составе председательствующего судьи Мофа Виталия  Дмитриевича в соответствии со ст. ст. 167-170, 176 АПК РФ  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью строительная компания  «НеоСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1 месяца с  момента вступления решения в законную силу устранить недостатки, допущенные  при строительстве 24-х квартирного дома по адресу: Костромская область, с.  Пыщуг, мкр. Юго-Западный, д. № 13, а именно:  

1. выполнить устройство вентиляционных отверстий в монолитном  поясе или в железобетонных блоках тела фундамента для проветривания  деревянных конструкций цокольного перекрытия 1-го этажа диаметром не менее  90 мм;  

2. выполнить в соответствии с проектом устройство обделок  примыканий кровли к вентиляционным шахтам;  

3. выполнить в соответствии с проектом конек крыши; 4. выполнить в соответствии с проектом монтаж ограждений крыши; 

5. слуховые окна крыши выполнить таким образом, чтобы устранить  попадание дождя и снега в чердачное помещение;  

6. выполнить огнезащитную и антисептическую обработку деревянных  элементов конструкции крыши;  

7. установить крышки и люки на смотровых колодцах канализационной  сети;  

8. установить крышку на накопителе сточных вод;  

9. уплотнить в соответствии с проектом пазухи колодцев  канализационной сети;  

10. установить прибор учета тепловой энергии в тепловом узле и  обеспечить пуско-наладочные работы данного прибора учета;  

11. выполнить в соответствии с проектом работы по благоустройству  прилегающей территории;  

12. выполнить в соответствии с проектом ограждения подающих  трубопроводов на лестничной клетке 3-го этажа.  

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  компания «НеоСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии  у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с  требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской  Федерации.  

Решение

 может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и, если  решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной  инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, в  кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в  двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу. Апелляционная и  кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Судья В.Д. Мофа