Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-48635/2017

13 декабря 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  07 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  13 декабря 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коршуновой А.В.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество "Гипрорыбфлот" (адрес:  Россия 197022, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 8/В, ОГРН:  1079847064362);

ответчик: акционерное общество "Морской порт Санкт-Петербург" (адрес:  Россия 198035, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, канал МЕЖЕВОЙ 5, ОГРН:  1027802712585);

о взыскании 1 418 812 руб. 50 коп. 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 29.11.2017

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 25.06.2015

установил:

АО «Гипрорыбфлот» предъявило иск о взыскании с АО "Морской порт Санкт-Петербург" 1 418 812 руб. 50 коп., составляющих 1 312 500 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 106 312 руб. 50 коп. неустойки за несвоевременную оплату на основании договора № 14П/15 от 23.12.2015. 

Ответчик иск отклонил и предъявил встречный иск о взыскании 700 000 руб. 00 коп. штрафа по п.6.5 договора и 194 250 руб. 00 коп. пеней по п.6.4 договора. 

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст.132 АПК РФ. 

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор подряда № 14П/15 от 23.12.2015.

Согласно п.1.1 договора подрядчик – АО «Гипрорыбфлот» обязуется выполнить работы по обследованию покрытия и инженерных сетей, проведению инженерных изысканий территории склада, ограниченной причалами № 32, 33, 34, а также разработке документации по усилению основания и ремонту того же объекта по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, а заказчик – ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" – принять результат работ и оплатить его. 

Стоимость работ составляет 3 500 000 руб. 00 коп. 

Сроки выполнения работ установлены графиком – приложение № 3. 

Вступившим в законную силу решением от 21.07.2017 по делу № А56-32325/2017 установлено, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме, в связи с чем с него в пользу заказчика было взыскано 437 500 руб. 00 коп. неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса. 

В соответствии со ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда не доказывается вновь, если при рассмотрении дела участвуют те же лица. 

Учитывая изложенное, первоначальный иск удовлетворению не подлежит. 

Факт просрочки (невыполнения части работ) установлен указанным решением. 

В соответствии с п.6.5 договора в случае, если подрядчик допустил нарушения, указанные в п.7.1.1 договора (просрочка выполнения работ) и заказчик по этому основанию расторгает договор, подрядчик обязан уплатить заказчику штраф в размере 20% стоимости работ, указанной в п.3.1 договора. 

Договор расторгнут уведомлением заказчика от 16.01.2017 исх. № А-30.

Штраф по п.6.5 договора составляет: 3 500 000 руб. 00 коп. * 20% = 700 000 руб. 00 коп. 

Согласно п.6.4 договора за нарушение сроков сдачи этапов работ заказчик вправе взыскать с подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости просрочки к сдаче работ за каждый день просрочки. 

Согласно приложению № 3 к договору сроки начала второго этапа 20.07.2016, сроки окончания второго этапа – через 40 календарных дней с момента начала работ по 2 этапу – 28.08.2016. 

Договор был расторгнут 23.01.2017, таким образом, просрочка подрядчика в выполнении работы составила 148 дней до момента расторжения договора. 

Сумма пени, которую должен оплатить подрядчик, составляет 194 250 руб. 00 коп. (1 312 500 * 0,1% * 148). 

Учитывая изложенное, встречный иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на подрядчика.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 69, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении первоначального иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества "Гипрорыбфлот" в пользу акционерного общества "Морской порт Санкт-Петербург" по встречному иску 894 250 руб. 00 коп., из них: 700 000 руб. 00 коп. штрафа по п.6.5 договора № 14П/15 от 23.12.2015 и 194 250 руб. 00 коп. пеней по п.6.4 договора, а также 23 827 руб. 47 коп. расходов по государственной пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.