24 марта 2020 года

 

Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; 

факс (4912) 275-108; http://ryazan.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело №А54-428/2020

г. Рязань

24 марта 2020 года

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Сельдемировой В.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "ВИРАЖ" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>)

к Управлению благоустройства города администрации города Рязани (ОГРН 

<

***>, 

<

...>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства города" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>)

о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 26.03.2018 №Ф.2018.103599 за период с 03.09.2018 по 31.10.2018 в сумме 91343 руб. 82 коп. 

 

установил:

из расчета истца следует, что размер неустойки определен исходя из ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 04.12.2018 N 302-ЭС18-10991 и от 21.03.2019 N 305-ЭС18-20107, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая на день фактической уплаты долга (его части). В случае наличия задолженности подлежит применению ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату принятия судом решения. 

На дату оплаты работ (30.10.2018 и 31.10.2018) размер ключевой ставки ЦБ РФ составлял 7,5% годовых, в связи с чем при расчете неустойки подлежит применению ставка 7,5% годовых.

Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. 

Согласно статье 193 Гражданского кодекса Российской Федерации если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

С учетом даты передачи актов заказчику - 19.07.2018 и положений п.6.3, 2.4 контракта, срок подписания актов - 03.08.2018, срок оплаты истекает 03.09.2018, следовательно, начало просрочки - 04.09.2018.

Согласно расчету суда, размер пени за период с 04.09.2018 по 31.10.2018 составляет 90497,18 руб.

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

6 349 886,72

04.09.2018

30.10.2018

57

7.5

6 349 886,72 ? 57 ? 1/300 ? 7.5%

90 485,89 р.

45 145,51

30.10.2018

Оплата задолженности на 6 304 741,21 руб.

45 145,51

31.10.2018

31.10.2018

1

7.5

45145,51 ? 1 ? 1/300 ? 7.5%

11,29 р.

31.10.2018

Оплата задолженности на 45 145,51 руб.

Сумма неустойки: 90497,18 руб.

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с  Управления благоустройства города администрации города Рязани (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВИРАЖ" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) неустойку по муниципальному контракту от 26.03.2018 №Ф.2018.103599 за период с 04.09.2018 по 31.10.2018 в сумме 90497 руб. 18 коп., расходы по оплате госпошлины в сумме 3620 руб.

В удовлетворении требования в остальной части отказать.

 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, через Арбитражный суд Рязанской области.

Кассационная жалоба на решение может быть подана в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

 

Судья                                                                                                В.А. Сельдемирова