Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-91640/2019

29 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  06 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  29 декабря 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "КДС ГРУПП" (адрес:  Россия 198152, 

<

...>, лит. А, пом. 1Н, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Энергоальянс" (адрес:  Россия 192012, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 112, к. 2, лит. З, пом. 324, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании, 

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 02.12.2019,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "КДС ГРУПП" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "НПФ "Энергоальянс"                 9 725 400 руб. 00 коп. долга,  1 458 810 руб. 00 коп. неустойки.

В порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, считающегося извещенным о времени и месте судебного разбирательства. 

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

20.12.2017 между сторонами заключен Договор № 17-208Г (Договор-1), в соответствии с которым Подрядчик (истец) обязуется по заданию Заказчика (ответчик) выполнить инженерные изыскания, для разработки проектно-сметной документации по капитальный ремонт объекта : «Строительство и реконструкция объектов ФГБВОУ «Академия гражданской защиты МЧС России», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Химки, микрорайон Новогорск, ул. Усадебная, владение 2», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить.

Согласно п. 2.1. Договора-1, стоимость работ  составляет 5 206 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18 %- 794 135 руб. 59 коп.

В  соответствии с п. 2.2. и подпунктам 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 Договора-1 оплата работ производится в следующем порядке: 

Авансовый платеж по Договору в размере 20% от общей стоимости работ в сумме 1 041 200 руб., в т.ч. НДС 18%- 158 827 руб. 11 коп. Заказчик оплачивает исполнителю в срок не позднее 3 (трех) банковских дней начиная от даты подписания договора, на основании полученного Заказчиком от Исполнителя счета на оплату. 

Второй платеж за выполненные Исполнителем работы по Договору в размере 60% от общей стоимости работ в сумме 3 123 600 руб. 00 коп., в т.ч НДС 18%- 476 481 руб. 35 коп., Заказчик оплачивает Исполнителю в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней на основании полученного Заказчиком от Исполнителя соответствующего счета на оплату, после передачи ответов об инженерных изысканий. 

Окончательный расчёт в размере 20% от общей стоимости работ в сумме 1 041 200 в т.ч. НДС 18% - 158 827 руб. 11 коп., в течение 10 ( десяти) календарных дней после получения Заказчиком положительного заключения ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ», без замечаний на выполненные по данному договору работы.  

26.02.2018 Истец по накладной  № 17-02-18/01 от 17.02.2018 года  передал Ответчику результат работ.

Наряду с указанной в накладной технической документацией, Ответчику также переданы на подписание в двух экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ № 0217/001 от 17.02.2018.

Согласно п. 3.4 Договора-1, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществить приемку выполненных работ, на основании документации, переданной в соответствии с п. 3..3.1 Договора.  Если документация, необходимая для приемки работ передана Исполнителем не в полном объеме- приемка работ начинается Заказчиком с момента передачи Исполнителем последней документации. При наличии претензий к выполненным работам, Заказчик направляет Исполнителю уведомление с перечнем замечаний и сроком их устранения. 

Таким образом, последним днем приема документации являлось 14.03.2018 года.

Согласно п. 3.6 Договора-1 при отсутствии замечаний Заказчика к выполненным работам, Исполнитель с сопроводительным письмом направляет документацию в соответствии с п.п. 3.3.2.- 3.3.4 Договора. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документации осуществляет его проверку по качеству и полноте и при отсутствии претензий к выполненным работам направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ.

Соответственно, срок подписания Ответчиком Акта по Договору должен быть не позднее 21.03.2018. 

Обязательства Истца исполнены в полном объеме, однако, переданные с техническими документациями акты, Ответчиком не подписаны и не переданы Подрядчику, мотивированных отказов в приемке работ и (или) подписания актов, в предусмотренный договором срок, Заказчиком также не представлен, претензии по качеству выполнения работ также не поступало.

Ввиду уклонения Заказчика от подписания актов и отсутствия мотивированного отказа от подписания актов выполненных работ, переданных Заказчику, Подрядчиком указанные акты подписаны в одностороннем порядке по истечению указанных выше сроков. 

Условие договора об осуществлении окончательного расчета в размере 20% от общей стоимости работ  после получения Заказчиком положительного заключений экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России», без замечаний на выполненные по данному договору работы, не может считаться согласованным условием о сроке исполнения обязательства, поскольку не отвечает признакам события, которое должно неизбежно наступить и от воли Подрядчика не зависит. 

Подрядчик не может нести неблагоприятные последствия за действия (бездействия) Заказчика по получению положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» так как указанное событие может и не наступить.

Обязанность по передаче  документации на экспертизу, согласно Договору, возложена на Заказчика. Вместе с тем Договором не предусмотрен срок, в течение которого Заказчик обязуется подать соответствующую документацию на проведение экспертизы. 

Таким образом, выполненные и переданные Заказчику работы, должны быть оплачены в полном объеме, в порядке, предусмотренном п. 2.2.2 Договора, а именно в течение 10 (десяти) банковских дней, после передачи отчетов об инженерных изысканий, т.е. не позднее 14.03.2018.

Вместе с тем до настоящего времени выполненные и переданные работы на сумму 5 206 000 руб. 00 коп., Заказчиком не оплачены.

Согласно п. 5.3. Договора-1 при нарушении условий п. 2.2 настоящего Договора Исполнитель вправе требовать с Заказчика выплаты пеней в размере 0,1% от стоимости Договора, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по оплате, установленных настоящим Договором, но не более 15% процентов от стоимости работ.

В соответствии с п. 2.2.2. Договора-1 окончательная оплата выполненных и переданных работ должна быть произведена не позднее 14.03.2018.

Размер неустойки за период с 15.03.2018 по 06.06.2019  за просрочку оплаты выполненных и переданных работ, согласно приложенному расчету, составляет: 2 337 494 руб. 00 коп, однако в силу того, что п. 5.3 договора предусматривает ограничение неустойки в виде 15 % от стоимости работ, подлежащая уплате неустойка составляет 780 900 руб. 00 коп.

Между сторонами  заключен Договор № 17-209Г от  20.12.2017 (Договор-2), в соответствии с которым Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания, для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта: «Строительство двухсекционного жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями с обособленным пожарно-спасательным постом для нужд МЧС России», расположенного по адресу: 

<

...>», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить.

Согласно п. 2.1. Договора-2 стоимость работ  составляет 2 175 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 331 779 руб. 67 коп. 

В соответствии с п. 2.2. и подпунктам 2.2.1,2.2.2 и 2.2.3 Договора-2 оплата работ производится в следующем порядке: 

Авансовый платеж по Договору в размере 20% от общей стоимости работ в сумме 435 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%- 66 355 руб. 93 коп.,  Заказчик оплачивает исполнителю в срок не позднее 3 (трех) банковских дней начиная от даты подписания договора, на основании полученного Заказчиком от Исполнителя счета на оплату. 

Второй платеж за выполненные Исполнителем работы по Договору в размере 60% от общей стоимости работ в сумме 1 305 000 руб. 00 коп., в т.ч НДС 18%- 199 067 руб. 79 коп., Заказчик оплачивает Исполнителю в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней на основании полученного Заказчиком от Исполнителя соответствующего счета на оплату, после передачи ответов об инженерных изысканий. 

Окончательный расчёт в размере 20% от общей стоимости работ в сумме 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 66 355 руб. 93 коп. в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком положительного заключения ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ», без замечаний на выполненные по данному Договору работы.  

26.02.2018 Истец по накладной  № 20-02-18/02 от 20.02.2018  передал Ответчику результат работ.

Наряду с указанной в накладной технической документацией, Заказчику также переданы на подписание в двух экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ № 0220/002 от 20.02.2018.

Согласно п. 3.4 Договора-2 Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществить приемку выполненных работ, на основании документации, переданной в соответствии с п. 3..3.1 Договора.  Если документация, необходимая для приемки работ передана Исполнителем не в полном объеме- приемка работ начинается Заказчиком с момента передачи Исполнителем последней документации. При наличии претензий к выполненным работам, Заказчик направляет Исполнителю уведомление с перечнем замечаний и сроком их устранения. 

Таким образом, последним днем приема документации являлось 14.03.2018.

Согласно п. 3.6 Договора-2 при отсутствии замечаний Заказчика к выполненным работам, Исполнитель с сопроводительным письмом направляет документацию в соответствии с п.п. 3.3.2.- 3.3.4 Договора. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документации осуществляет его проверку по качеству и полноте и при отсутствии претензий к выполненным работам направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ.

Соответственно, срок подписания Заказчиком Акта по Договору-2 должен быть не позднее 21.03.2018. 

Обязательства Истца исполнены в полном объеме, однако, переданный с технической документацией акты, Ответчиком не подписаны и не переданы Подрядчику, мотивированных отказов в приемке работ и (или) подписания акта, в предусмотренный договором срок, Заказчиком также не представлен, претензии по качеству выполнения работ также не поступало.

Ввиду уклонения Заказчика от подписания актов и отсутствия мотивированного отказа от подписания актов выполненных работ, переданных Заказчику, Подрядчиком указанные акты подписаны в одностороннем порядке по истечению указанных выше сроков. 

Таким образом, выполненные и переданные Заказчику работы, должны быть оплачены в полном объеме, в порядке, предусмотренном п. 2.2.2 Договора-2, а именно в течение 10 (десяти) банковских дней, после передачи отчетов об инженерных изысканий, т.е. не позднее 14.03.2019.

Передача Заказчику результатов работ и отсутствие мотивированного отказа в их приемке, является основанием для окончательного расчета по Договору-2.

Вместе с тем до настоящего времени выполненные и переданные работы на сумму 2 175 000 руб. 00 коп., Заказчиком не оплачены.

Согласно п. 5.3. Договора-2, при нарушении условий п. 2.2 настоящего Договора Исполнитель вправе требовать с Заказчика выплаты пеней в размере 0,1% от стоимости Договора, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком, принятых на себя обязательств по оплате, установленных настоящим Договором, но не более 15% процентов от стоимости работ.

В соответствии с п. 2.2.2. Договора, окончательная оплата выполненных и переданных работ должна быть произведена не позднее 14.03.2019.

Размер неустойки за период с 15.03.2018 по 06.06.2019,  за просрочку оплаты выполненных и переданных работ, согласно расчету, составляет: 976 575 руб. 00 коп., однако в силу того, что п. 5.3 договора предусматривает ограничение неустойки в виде 15 % от стоимости работ, подлежащая уплате неустойка составляет 326 250  руб. 00 коп.

Одновременно с этим, между Истцом и Ответчиком был заключен Договор № 17-211Г от 20.12.2017 (Договор-3), в соответствии с которым Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания (далее по тексту: «Работы»), для разработки проектно-сметной документации по капитальный ремонт объекта: «Строительство специализированного жилого дома с обособленными пожарно-спасательным постом для расквартирования сотрудников внутренней службы МЧС России», расположенного по адресу: г Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, улица Кедрова, вл. 17», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить.

Согласно п. 2.1. Договора-3, стоимость работ  составляет 2 344 400 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 %.

В соответствии с п. 2.2 и подпунктам 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 Договора-3, оплата работ производится в следующем порядке: 

Авансовый платеж по Договору в размере 20% от общей стоимости работ в сумме 468 880 (четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС 18% - 71 524 руб. 06 коп.,  Заказчик оплачивает Исполнителю в срок не позднее 3 (трех) банковских дней начиная от даты подписания договора, на основании полученного Заказчиком от Исполнителя счета на оплату. 

Второй платеж за выполненные Исполнителем работы по Договору в размере 60% от общей стоимости работ в сумме 1 406 640 руб. 00 коп., в т.ч НДС 18%- 214 572 руб. 20 коп., Заказчик оплачивает Исполнителю в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней на основании полученного Заказчиком от Исполнителя соответствующего счета на оплату, после передачи ответов об инженерных изысканий. 

Окончательный расчёт в размере 20% от общей стоимости работ в сумме 468 880 руб., в т.ч. НДС 18%- 71 524 руб. 06 коп. в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заказчиком положительного заключения ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ», без замечаний на выполненные по данному договору работы.  

26.02.2018 по накладной  № 25-02-18/03 от 25.02.2018 (далее по тексту – «Накладная») Подрядчиком был передан Заказчику результат работ.

Наряду с указанной в накладной технической документацией, Ответчику также переданы на подписание в двух экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ № 0225/003 от 25.02.2018.

Согласно п. 3.4 Договора-3 Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществить приемку выполненных работ, на основании документации, переданной в соответствии с п. 3..3.1 Договора.  Если документация, необходимая для приемки работ передана Исполнителем не в полном объеме- приемка работ начинается Заказчиком с момента передачи Исполнителем последней документации. При наличии претензий к выполненным работам, Заказчик направляет Исполнителю уведомление с перечнем замечаний и сроком их устранения. 

Таким образом, последним днем приема документации являлось 14.03.2018.

Согласно п. 3.6 Договора-3 при отсутствии замечаний Заказчика к выполненным работам, Исполнитель с сопроводительным письмом направляет документацию в соответствии с п.п. 3.3.2.- 3.3.4 Договора. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документации осуществляет его проверку по качеству и полноте и при отсутствии претензий к выполненным работам направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ.

Соответственно, срок подписания Заказчиком Акта по Договору должен быть не позднее 21.03.2018. 

Обязательства Подрядчика исполнены в полном объеме, однако, переданные с техническими документациями акты, Заказчиком не подписаны и не переданы Подрядчику, мотивированных отказов в приемке работ и (или) подписания актов, в предусмотренный договором срок, Заказчиком также не представлен, претензии по качеству выполнения работ также не поступало.

Ввиду уклонения Заказчика от подписания актов и отсутствия мотивированного отказа от подписания актов выполненных работ, переданных Заказчику, Подрядчиком указанные акты подписаны в одностороннем порядке по истечению указанных выше сроков. 

Условие договора об осуществлении окончательного расчета в размере 20% от общей стоимости работ  после получения Заказчиком положительного заключений экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России», без замечаний на выполненные по данному договору работы, не может считаться согласованным условием о сроке исполнения обязательства, поскольку не отвечает признакам события, которое должно неизбежно наступить и от воли Подрядчика не зависит. 

Подрядчик не может нести неблагоприятные последствия за действия (бездействия) Заказчика по получению положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» так как указанное событие может и не наступить.

Обязанность по передаче  документации на экспертизу, согласно Договору, возложена на Заказчика. Вместе с тем Договором не предусмотрен срок, в течение которого Заказчик обязуется подать соответствующую документацию на проведение экспертизы. 

Таким образом, выполненные и переданные Заказчику работы, должны быть оплачены в полном объеме, в порядке, предусмотренном п. 2.2.2 Договора, а именно в течение 10 (десяти) банковских дней, после передачи отчетов об инженерных изысканий, т.е. не позднее 14.03.2019.

Передача Заказчику результатов работ и отсутствие мотивированного отказа в их приемке, является основанием для окончательного расчета по Договору.

Вместе с тем до настоящего времени выполненные и переданные работы на сумму  2 344 400 руб. 00 коп., Заказчиком не оплачены.

Согласно п. 5.3. Договора-3, при нарушении условий п. 2.2 настоящего Договора Исполнитель вправе требовать с Заказчика выплаты пеней в размере 0,1% от стоимости Договора, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком, принятых на себя обязательств по оплате, установленных настоящим Договором, но не более 15% процентов от стоимости работ.

В соответствии с п. 2.2.2. Договора-3, окончательная оплата выполненных и переданных работ должна быть произведена не позднее 14.03.2019.

Размер неустойки за период с 15.03.2018 по 06.06.2019,  за просрочку оплаты выполненных и переданных работ, согласно расчету, составляет: 1 052 635 руб. 60 коп., однако в силу того, что п. 5.3 договора предусматривает ограничение неустойки в виде 15 % от стоимости работ, подлежащая уплате неустойка составляет 351 660 руб.

Поскольку Ответчик длительное время не исполнял обязанность по оплате задолженностей по Договору-1, Договору-2, Договору-3, Истцом 11.06.2019 в его адрес Заказчика были направлены Претензии с требованием об оплате выполненных работ по выше казанным Договорам и выплате начисленной неустойки. 

Оставление претензии без удовлетворения явилось поводом для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Договорные правоотношения сторон по своей правовой природе относятся к договору подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работ или способы ее определения (статься 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что истец обязательства по выполнению работ, согласно заключенного договора подряда  исполнил в полном объеме.

Однако встречные обязательства по оплате выполненных и принятых работ ответчиком исполнены ненадлежащим образом, ответчик оплату выполненных и принятых работ в полном объеме не произвел, в связи с чем истцом заявлены требования о взыскании задолженности в размере 9 725 400 руб. 00 коп.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что на момент рассмотрения настоящего спора доказательств оплаты выполненных работ в установленный договором сроки в полном объеме ответчиком не представлено, своими действиями ответчик нарушил взятые на себя обязательства и права истца, которые в силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат защите, а требование истца о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в сумме  9 725 400 руб. 00 коп.

В рамках настоящего спора истцом также заявлено требование о взыскании неустойки на общую сумму  1 458 810 руб.  00 коп.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Представленный истцом расчет суммы пени судом проверен, признан верным.

С учётом изложенного иск подлежит удовлетворению в полном объёме.

Истцом заявлено к возмещению 80 000 руб. 00 коп. расходов оплату услуг представителя.

В подтверждение факта несения судебных расходов по делу истцом представлен Договор № 12/19 года об оказании юридических услуг от 28.06.2019 и расходным кассовым ордером № ДОЮ-12/19 от  28.06.2019.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ судебным издержкам относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), а также другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле.

В части 1 статьи 110 АПК РФ определено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Ответчиком возражений против удовлетворения заявленных требований не заявлено.

С учётом изложенного иск следует удовлетворить. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "НПФ "Энергоальянс" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "КДС ГРУПП" долг на общую сумму 9 725 400 руб. 00 коп., неустойки на общую сумму 1 458 810 руб. 00 коп., 78 921 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины,  80 000 руб.                        00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.